218/2023-118956(2) 

 

Арбитражный суд Рязанской области ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; http://ryazan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А54-5432/2023

г. Рязань

10 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 02 ноября 2023 года. Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Савина Р.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Гелион" (390035, 

<

...>, литера а, пом./офис Н1/17, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Центрстрой" (ОГРН  

<

***>, 

<

...>, пом. Н35, оф. 604)  

о взыскании задолженности в размере 4 016 510 руб., процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 28.10.2022 по 28.02.2023 в размере 239 191  руб. 90 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с  01.03.2023 по день фактического исполнения обязательства (с учетом уточнения),  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 - представитель по доверенности от 14.06.2023; 

от ответчика: ФИО3 - представитель по доверенности от 22.08.2023;  

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гелион" обратилось в  Арбитражный суд Рязанкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью "Центрстрой" о взыскании задолженности в размере 5 121 510 руб.,  процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.10.2022 по  28.02.2023 в размере 239 191 руб. 90 коп., процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 01.03.2023 по день фактического исполнения  обязательства.  

Определением суда от 23.06.2023 исковое заявление было принято к  производству, назначено предварительное судебное заседание.  

14.09.2023 в материалы дела от истца поступили копии справок о стоимости работ  и затрат (КС-3) и актов о приемке выполненных работ (КС-2), копия локального  сметного расчета, копии платежных поручений.  

В судебном заседании 10.10.2023 представитель ответчика представил в  материалы дела копию заявления об одностороннем зачете встречных требований и  

доказательства его направления в адрес истца.  

В судебном заседании 17.10.2023 представитель ответчика представил в  материалы дела копию договора поставки строительных материалов № 5/23 от  19.04.2023, копию спецификации от 19.04.2023, копию счета на оплату № 27 от  19.04.2023, копию платежного поручения № 11 от 21.04.2023, расчет процентов.  

В судебном заседании 17.10.2023 представитель истца, в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, утонил исковые  требования в части взыскания задолженности до суммы 4 016 510 руб. В остальной  части исковые требования оставлены без уточнения.  

Уточнение исковых требований судом было принято. 

В судебном заседании 02.11.2023 представитель истца исковые требования  поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске, с учетом уточнения.  

В судебном заседании 02.11.2023 представитель ответчика возражал относительно  удовлетворения исковых требований, в порядке статьи 333 Гражданского Кодекса  Российской Федерации, просил суд снизить размер процентов.  

Заявление ответчика о снижении размера неустойки судом было принято к  рассмотрению.  

Рассмотрев материалы дела, оценив и исследовав представленные в дело  доказательства, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, арбитражный  суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. При  этом суд исходит из следующего.  

18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью "Гелион"  (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной ответственностью  "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор субподряда № 1/2022 (т. 1  л.д. 10-13), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить  общестроительные работы и работы по отмостке по капитальному ремонту МБОУ  "Школа № 22" под адресу: 

<

...> (далее - работы) в  соответствии с условиями настоящего договора, согласно сметной документации  (Приложение № 2) и технической документации (Приложение № 1), являющихся  неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 18 376 107 руб., НДС не  облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 1/2022 (т. 1 л.д. 19) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 5 397 844 руб. НДС не облагается. Оплата  

авансирования работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем  перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более  чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату  аванса".  

Кроме того, 18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной  ответственностью "Гелион" (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной  ответственностью "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор  субподряда № 2/2022 (т. 1 л.д. 20-23), по условиям которого субподрядчик обязуется  выполнить работы по замене проемов (дверей) по капитальному ремонту МБОУ  "Школа № 22" под адресу: 

<

...> (далее - работы) в  соответствии с условиями настоящего договора, согласно сметной документации  (Приложение № 2) и технической документации (Приложение № 1), являющихся  неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 2 542 926 руб., НДС не  облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 2/2022 (т. 1 л.д. 29) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 773 902 руб. НДС не облагается. Оплата  авансирования работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем  перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более  чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату  аванса".  

Кроме того, 18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной  ответственностью "Гелион" (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной  ответственностью "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор  субподряда № 3/2022 (т. 1 л.д. 30-33), по условиям которого субподрядчик обязуется  выполнить фасадные работы по капитальному ремонту МБОУ "Школа № 22" под  адресу: 

<

...> (далее - работы) в соответствии с условиями  настоящего договора, согласно сметной документации (Приложение № 2) и технической  документации (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего  договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 4 628 812 руб., НДС не  облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 3/2022 (т. 1 л.д. 39) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 1 388 644 руб. НДС не облагается. Оплата  авансирования работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем  перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более  чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату  аванса".  

Также, 18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью  "Гелион" (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной ответственностью  "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор субподряда № 4/2022 (т. 1  л.д. 40-43), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить работы по ХВС,  ГВС, канализации, отоплению по капитальному ремонту МБОУ "Школа № 22" под  адресу: 

<

...> (далее - работы) в соответствии с условиями  настоящего договора, согласно сметной документации (Приложение № 2) и технической  документации (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего  договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 5 028 699 руб., НДС не  облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 4/2022 (т. 1 л.д. 48) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 1 496 633 руб. НДС не облагается. Оплата  авансирования работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем  

перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более  чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату  аванса".  

Также, 18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью  "Гелион" (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной ответственностью  "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор субподряда № 5/2022 (т. 1  л.д. 49-52), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить работы по  вентиляции (подвал), электромонтажные работы, вентиляции (общая), автоматической  пожарной сигнализации по капитальному ремонту МБОУ "Школа № 22" под адресу: 

<

...> (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего  договора, согласно сметной документации (Приложение № 2) и технической  документации (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего  договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 6 300 933 руб., НДС не  облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 5/2022 (т. 1 л.д. 57) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 1 970 128 руб. НДС не облагается. Оплата  авансирования работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем  перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более  чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату  аванса".  

Кроме того, 18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной  ответственностью "Гелион" (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной  ответственностью "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор  субподряда № 6/2022 (т. 1 л.д. 58-61), по условиям которого субподрядчик обязуется  выполнить работы по кровле (профлист) по капитальному ремонту МБОУ "Школа   № 22" под адресу: 

<

...> (далее - работы) в соответствии с  условиями настоящего договора, согласно сметной документации (Приложение № 2) и  технической документации (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью  настоящего договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 5 609 859 руб. 08 коп.,  НДС не облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 6/2022 (т. 1 л.д. 66) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 1 700 162 руб. НДС не облагается. Оплата  авансирования работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем  перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более  чем 10 (десять) рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату  аванса".  

18 апреля 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью "Гелион"  (далее - подрядчик, ответчик) и обществом с ограниченной ответственностью  "Центрстрой" (далее - субподрядчик, истец) заключен договор субподряда № 7/2022 (т. 1  л.д. 67-70), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить работы:  наружные выходы, мягкая кровля, замена проемов (окна), металлическая кровля по  капитальному ремонту МБОУ "Школа № 22" под адресу: 

<

...> (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего договора, согласно сметной  документации (Приложение № 2) и технической документации (Приложение № 1),  являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.1. договора).  

Согласно пункту 1.5. договора передача работ осуществляется субподрядчиком,  приемка и проверка работ подрядчиком, с подписанием акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

В соответствии с пунктом 2.1. цена договора составляет 1 280 699 руб., НДС не  облагается.  

Расчеты за выполненные работы подрядчик осуществляет в пределах цены  договора по безналичному расчету в валюте РФ (рублях) путем перечисления денежных  средств на расчетный счет субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих жней с  момента подписания подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (пункт 2.4. договора).  

Согласно пункту 3.1. договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента  заключения договора, окончание работ - 12.10.2022.  

В соответствии с пунктом 8.1. договора стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Дополнительным соглашением от 24.06.2022 к договору субподряда от 18.04.2022   № 7/2022 (т. 1 л.д. 75) стороны изложили пункт 2.5. договора в следующей редакции:  "2.5. Авансирование работ по договору субподряда - 30 (тридцать) процентов от цены  договора подряда, что составляет 402 854. НДС не облагается. Оплата авансирования  работ по договору субподряда осуществляется подрядчиком путем перечисления  

денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение не более чем 10 (десять)  рабочих дней с момента получения от субподрядчика счета на оплату аванса".  

Во исполнение обязательств по договорам субподряда от 18.04.2022 № 1/2022,   № 2/2022, № 3/2022, № 4/2022, № 5/2022, № 6/2022, № 7/2022, истец выполнил работы на  общую сумму 43 768 035 руб. 08 коп., в подтверждение чего представлены  подписанные сторонами без разногласий и замечаний к качеству и срокам выполнения  работ Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ  и затрат № 1 от 27.07.2022, № 1 от 08.09.2022, № 1 от 07.10.2022, № 1 от 07.09.2022, № 1 от  29.08.2022, № 1 от 29.07.2022, № 1 от 08.09.2022, № 1 от 05.09.2022 (т. л.д. 108-157, т. 2  л.д. 1-120).  

Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично, задолженность  ответчика перед истцом составила 10 121 510 руб.  

20.12.2022 между сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период с  01.01.2022 по 20.12.2022 на сумму 10 121 510 (т. 1 л.д. 76).  

21.12.2022 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием погашения  задолженности в размере 10 121 510 (т. 1 л.д. 77-78).  

Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично, задолженность  ответчика перед истцом составила 5 121 510 руб.  

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав  пояснения представителя истца, суд удовлетворяет заявленные исковые требования, при  этом руководствуется следующим.  

В соответствии с частью 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие  причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных  оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения  обязательств не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Обязательства сторон возникли из договоров субподряда от 18.04.2022 № 1/2022,   № 2/2022, № 3/2022, № 4/2022, № 5/2022, № 6/2022, № 7/2022, который по своей правовой  природе является договором подряда и регулируется нормами главы 37 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской  Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором  подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее  результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат  работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (статьей 753 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  

окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения  обязательств не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Факт выполнения истцом работ по договорам субподряда от 18.04.2022 № 1/2022,   № 2/2022, № 3/2022, № 4/2022, № 5/2022, № 6/2022, № 7/2022 на общую сумму 43 768 035  руб. 08 коп., подтверждается подписанными сторонами без разногласий и замечаний к  качеству и срокам выполнения работ Актами о приемке выполненных работ и  Справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 27.07.2022, № 1 от  08.09.2022, № 1 от 07.10.2022, № 1 от 07.09.2022, № 1 от 29.08.2022, № 1 от 29.07.2022,   № 1 от 08.09.2022, № 1 от 05.09.2022 (т. л.д. 108-157, т. 2 л.д. 1-120).  

Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично, задолженность  ответчика перед истцом составила 10 121 510 руб.  

20.12.2022 между сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период с  01.01.2022 по 20.12.2022 на сумму 10 121 510 (т. 1 л.д. 76).  

21.12.2022 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием погашения  задолженности в размере 10 121 510 (т. 1 л.д. 77-78).  

Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично, задолженность  ответчика перед истцом составила 5 121 510 руб.  

В ходе рассмотрения дела, истец, в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил исковые требования в части  взыскания задолженности по договорам субподряда от 18.04.2022 № 1/2022, № 2/2022,   № 3/2022, № 4/2022, № 5/2022, № 6/2022, № 7/2022 до суммы 4 016 510 руб. В обоснование  уточнения заявления истец сослался на зачет на основании заявлении об одностороннем  зачете встречных требований № 0262 от 01.09.2023, по тексту которого истец зачел  часть долга в счёт погашения задолженности по договору поставки строительных  материалов № 5/23 от 19.04.2023 в размере 1105000 руб.  

Документы, подтверждающие оплату выполненных истцом работ на сумму 4 016  510 руб. ответчик не представил, доказательства, представленные истцом, не опроверг.  

Согласно статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий.  

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею  прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

В силу указанной нормы закона обстоятельства, на которые ссылается истец, а  именно, наличие на стороне ответчика неисполненного обязательства по оплате работ,  выполненных в рамках договоров субподряда от 18.04.2022 № 1/2022, № 2/2022,   № 3/2022, № 4/2022, № 5/2022, № 6/2022, № 7/2022 в сумме 4 016 510 руб., суд считает  признанными ответчиком, так как они им прямо не оспорен, несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из доказательств, представленных в дело.  

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 28.10.2022 по 28.02.2023 в сумме 239 191  

руб. 90 коп. с дальнейшим начислением процентов начиная с 01.03.2023 по день  фактического исполнения обязательства.  

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в  случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной  просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов  определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие  периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен  законом или договором.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы  этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не  установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395  Гражданского кодекса Российской Федерации). Одновременно с установлением суммы  процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной  части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения  обязательства. При этом день фактического исполнения обязательства, в частности  уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.  

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в  процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях,  установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами  казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и  гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70  Закона об исполнительном производстве).  

Расчет процентов судом проверен, признан обоснованным в рамках заявленных  исковых требований.  

Ответчик возражений по расчету истца не представил, однако заявил о снижении  процентов, в порядке статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Заявленное ответчиком ходатайство не подлежит удовлетворению, в связи со  следующим.  

Согласно абзацу четвертому пункта 48 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации N7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств" к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395  Гражданского кодекса Российской Федерации, по общему правилу, положения статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются (пункт 6 статьи 395  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Поскольку при расчете процентов применены минимальные ставки размера  ответственности, предусмотренные указанной статьей за неисполнение денежного  обязательства, основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации и уменьшения суммы начисленных процентов за пользование чужими  денежными средствами отсутствуют.  

Таким образом, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 28.10.2022 по 28.02.2023 в размере 239 191 руб. 90  коп. подлежат удовлетворению.  

Дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами следует производить с 01.03.2023 на сумму задолженности 4 016 510 руб. по  день фактической оплаты, исходя из ключевых ставок банка России, действующих в  соответствующие периоды.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации государственная пошлина относится на ответчика и подлежит  взысканию в пользу истца.  

Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1249 руб. подлежит  возврату истцу из дохода федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Центрстрой" (ОГРН  

<

***>, 

<

...>, пом. Н35, оф. 604) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Гелион" (390035, 

<

...>, литера а, пом./офис Н1/17, ОГРН: 

<

***>)  задолженность в размере 4 016 510 руб., проценты за пользование чужими денежными  средствами за период с 28.10.2022 по 28.02.2023 в размере 239 191 руб. 90 коп., расходы  по оплате государственной пошлины в сумме 44 279 руб.  

Дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными  средствами следует производить с 01.03.2023 на сумму задолженности 4 016 510 руб. по  день фактической оплаты, исходя из ключевых ставок банка России, действующих в  соответствующие периоды.  

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Гелион" (390035,  

<

...>, литера а, пом./офис  Н1/17, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 5 525 руб., перечисленную по платежному поручению № 54 от 20.06.2023.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  области.  

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная  жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской  области.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со  статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение,  выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в  деле, посредством размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской  области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на  сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном  носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд.  

Судья Р.А. Савин