Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть 

город Калининград дело № А21-12544/2021  «29» марта 2023 года.  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специальная научная  реставрационная проектно-производственная мастерская» в течение двух месяцев  со дня вступления настоящего решения суда в законную силу выполнить  следующие работы:  

- установить дверной блок деревянный двухстворчатый Д1, остекление со  шпросами, S=5,8 кв.м в количестве 1 шт., соответствующий характеристикам,  указанным на стр. 5, 30 проектной документации 2-00.17.05-19-СД Раздел 11  «Сметная документация». Место установки дверного блока Д1 - согласно листу 8  Раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной  документации 2-00.17.05-19-КР изм.2 - Главный фасад;  

- установить оконные блоки деревянные со шпросами 01, S=2,74 в количестве  4 шт., соответствующие характеристикам, указанным на стр. 5, 30 проектной  документации 2-00.17.05-19-СД Раздел 11 «Сметная документация». Место  установки оконных блоков 01 - согласно листу 8 Раздела 4 «Конструктивные и  объемно-планировочные решения» проектной документации 2-00.17.05-19-КР  изм.2 - Веранда главного фасада;  

- установить витраж деревянный с распашными дверными полотнами Bl,  S=6,95 кв.м в количестве 1 шт., соответствующий характеристикам, указанным на  стр. 5, 32 проектной документации 2-00.17.05-19-СД Раздел 11 «Сметная  документация». Место установки витража В1 - согласно листу 8 Раздела 4  

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной  документации 2-00.17.05-19-КР изм.2 - Левый фасад;  

- установить резные наличники (лиственница) (входят в конфигурацию  деревянных изделий: дверь, окна и витраж) согласно листу 9 Раздела 4  «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной документации 200.17.05-19-КР.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья М.Н. Надежкина 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 08.02.2022 12:25:35Кому выдана Надежкина Марина Николаевна