АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-8176/2022

г. Чебоксары

11 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения вынесена 28 октября 2022 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи           Владимировой О.Е.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 428000, г. Чебоксары, Чувашская Республика,

к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "САРА-СТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 428034, г. Чебоксары, Чувашская Республика, шоссе Ядринское д. 3 А,

о взыскании 136 666 руб. 52 коп., 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "САРА-СТРОЙ" о взыскании 136 666 руб. 52 коп., в том числе 122977 руб. 12 коп. долга, 13689 руб. 40 коп. пени за период с 29.10.2021 по 18.08.2022 и далее по день фактической оплаты долга. 

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по оплате работ по устройству кирпичной кладки по договору №070-130 от 15.09.2021.

Определением суда от 05.09.2022 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копии определения суда от 05.09.2022 были направлены сторонам. Кроме того, информация о принятии искового заявления к производству была размещена арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ответчик в отзыве от 22.09.2022 исковые требования в части долга в размере 122977 руб. 12 коп. признал. Указал, что акты выполненных работ: №1 от 17.09.2021 на сумму 189392 руб., №2 от 27.09.2021 на сумму 55328 руб.; №3 от 01.10.2021 на сумму 51497,60 руб. были оплачены ответчиком в полном объеме, что подтверждается платежным поручением №1655 от 29.10.2021 на сумму 297217,60 руб. Спорным остался не оплаченный акт выполненных работ №4 от 18.10.2021 на сумму 122977,12 руб. По данным бухгалтерского учета данный акт был подписан со стороны заказчика 02.11.2021, о чем стоит отметка в указанном акте, который приложен к настоящему отзыву. Следовательно, согласно пункту 4.2. договора, срок для оплаты 10 календарных дней, то есть с 03.11.2021 по 12.11.2021. Таким образом, просрочка по оплате начинается не с 29.10.2021, как указано в исковом заявлении, а с 13.11.2021. Также следует указать, что истцом из расчета пени не исключен период моратория, который введен Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 и действует по 01.10.2022. С учетом указанных обстоятельств период просрочки за нарушение ответчиком срока оплаты за выполненные истцом работы будет с 13.11.2021 по 31.03.2022, то есть 139 дней. Сумма пени за период с 13.11.2021 по 31.03.2022 будет составлять 6257 руб. 49 коп., в связи с чем, ответчик просит суд взыскать пени в размере 6257,49 руб. за период с 13.11.2021 по 31.03.2022.

Дело рассмотрено без вызова сторон в порядке, предусмотренном главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

28.10.2022 по делу вынесена резолютивная часть решения согласно части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Мотивированное решение составлено на основании части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению ответчика, поступившему в суд 03.11.2022.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

15.09.2021 общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "САРА-СТРОЙ" (заказчик) и индивидуальный предприниматель ФИО1 (подрядчик) заключили договор подряда №070-130, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по устройству кирпичной кладки на объекте: «Общеобразовательная школа поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики», а заказчик обязуется принять и оплатить данные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Стоимость работ, поручаемых подрядчику по настоящему договору, определяется по фактически выполненному объему из расчета 2128 рублей за 1 куб.м кирпичной кладки, которые выплачиваются по мере выполнения работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (пункт 2.1 договора).

Сторонами определены следующие сроки выполнения работ. Начало выполнения работ: с момента подписания договора. Окончание работ: по 31 (тридцать первое) декабря 2021 г. включительно (пункт 3.1 договора).

Согласно пункту 4.2 договора окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания сторонами акта выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3).

Как указывает истец, работы выполнены им по актам от 17.09.2021 №1 на сумму 189392 руб., от 27.09.2021 №2 на сумму 55328 руб., от 01.10.2021 №3 на сумму 51497 руб. 60 коп., от 18.10.2021 №4 на сумму 122977 руб. 12 коп., однако ответчик оплату выполненных работ в полном объеме не произвел. Сумма долга, по данным истца, составляет 122977 руб. 12 коп. 

Ответчику была направлена претензия от 20.04.2022 о необходимости погашения задолженности за выполненные работы, однако денежные средства истцом не получены.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения работ подтвержден материалами дела и самим ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Ответчик сумму основного долга в размере 122977 руб. 12 коп. признал.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании долга в размере 122977 руб. 12 коп. подлежит удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика 13689 руб. 40 коп. пени за период с 29.10.2021 по 18.08.2022 и далее по день фактической оплаты долга.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Согласно пункту 7.2 договора за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. При этом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

Проверив расчет пени, представленный истцом, суд признает правомерным начисление пени с 29.10.2021 исходя из даты составления акта выполненных работ – 18.10.2021 и отчетного периода – с 01.10.2021 по 18.10.2021. 

Вместе с тем, при расчете пени истцом не учтен мораторий, который введен Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

В связи с чем, суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в сумме 5595 руб. 46 коп. за период с 29.10.2021 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 28.10.2022 (исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 7,5%) и далее по день фактической оплаты долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты.

Расходы по государственной пошлине суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям по правилам статьи 110 АПК РФ. В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 226 – 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "САРА-СТРОЙ" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 122 977 (Сто двадцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 12 коп. долга по договору №070-130 от 15.09.2021 согласно акту выполненных работ №4 от 18.10.2021, 5 595 (Пять тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 46 коп. неустойки за период с 29.10.2021 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 28.10.2022 и далее по день фактической оплаты долга исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты, 1 439 (Одна тысяча четыреста тридцать девять) руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в иске отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 3 359 (Три тысячи триста пятьдесят девять) руб. государственной пошлины, оплаченной по квитанциям от 23.06.2022 и от 22.08.2022.

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова