АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-39794/19

г. Уфа

12 марта 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена     05.03.2020

Полный текст решения изготовлен              12.03.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Шариповой Л.У., рассмотрев дело по иску

ООО "ФИРМА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН: 0278181906, ОГРН: 1110280046513) 

к ООО "БАШНАФТАТРАНС" (ИНН: 0278173574, ОГРН: 1100280039881)

о взыскании  921 239 руб. 40 коп. денежных средств в оплату работ по договору подряда №403-БНТ/Э от 20.10.2017г., 24 621 руб. 07 коп.  процентов  за пользование чужими денежными средствами

при  участии  в  судебном заседании: 

от истца – ФИО2  директор по выписке из ЕГРЮЛ;

ответчик явку своего представителя  в судебное заседание не обеспечил, извещен по правилам ст.ст. 121-123 АПК РФ, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет,

        ООО "ФИРМА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением  к  ООО "БАШНАФТАТРАНС" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  о  взыскании  921 239 руб. 40 коп. денежных средств в оплату работ по договору подряда №403-БНТ/Э от 20.10.2017г., 24 621 руб. 07 коп.  процентов  за пользование чужими денежными средствами.

         Истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 921 239 руб. 40 коп. долга, 20 456 руб. 57 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами. Уточнение иска судом принято в порядке ст.49 АПК РФ.

         Исследовав представленные документы, суд

УСТАНОВИЛ:

Предметом иска истцом  определены требования о взыскании                          (с учетом уточнения)   921 239 руб. 40 коп. долга, 20 456 руб. 57 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами. 

        В обоснование  иска  истцом  приведены  следующие  обстоятельства.

Между ООО фирмой «Электромонтаж» и ООО «Башнафтатранс»заключен 20.10.2017г. договор субподряда №403-БНТ/Э, согласно которому

Субподрядчик обязуется, с использованием своих средств и материалов, выполнить электромонтажные и пусконаладочные работы на Объекте: «Объект здравоохранения – поликлиника и жилой дом с подземно-надземным паркингом с административными помещениями в квартале,ограниченном улицами Р. Нуриева, бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», секция 2, в объеме, определенном Договором и сдать результат Генподрядчику, а Генподрядчик принять и оплатить результат Работы.   Под «Работами» в настоящем Договоре понимается совокупность строительно-монтажных работ, а также включая, но, не ограничивая, все сопутствующие работы и мероприятия в соответствии с условияминастоящего Договора и приложений к нему, а также мобилизация, разгрузка и складирование материалов оборудования, необходимых для выполнения работ, производство всех необходимых замеров.

Субподрядчик обязуется выполнить все Работы предусмотренные настоящим Договором, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Договором иприложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора  (п.1.2. договора).

Генподрядчик вправе вносить изменения в техническую документацию, обязательные для исполнения Субподрядчиком. В случае изменения при этом объемов работ стороны корректируют виды,объемы и стоимость работ по Договору, путем заключения дополнительного соглашения (п.1.3 договора).

Согласно п.2.1. договора  Общая стоимость работ по договору составляет:

- 2 075 280,17 (Два миллиона семьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 17 копеек в ценах 2001 г., что составляет 6 532 779,32 (Шесть миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят девять)рублей 32 копейки, НДС не облагается, в текущих ценах, приложение № 3.

В соответствии с п.2.2 договора итоговая сумма стоимости работ не может превышать стоимость работ согласно п. 2.1. настоящего Договора. Оплата производится в пределах общей стоимости работ (п. 2.1. Договора), которая является фиксированной и не подлежит изменению.

Согласно п.3.4. договора  срок выполнения работ: 

дата начала работ - 20.10.2017г.

дата окончания работ - 30.06.2018г.

Режим работы:

1 смена с 8:00 до 17:00; 2 смена с 17:00 до 24:00; 3 смена с 24:00 до 9:00 при 3х сменной работе  

1 смена с 8:00 до 17:00; 2 смена с17:00 до 23:00 при 2х сменной работе.

Поэтапные сроки выполнения работ отображены в Графике производства работ (Приложение № 2 к договору).

В соответствии с п.4.1. договора расчеты за выполненную Работу производятся непосредственно между Генподрядчиком и Субподрядчиком:

- Генподрядчик вправе перечислить денежные средства в качестве авансового платежа по договору в сроки и размере по своему усмотрению.

- Сдача выполненных работ происходит поэтапно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (унифицированная форма КС-2) в следующем порядке:

Субподрядчик, в срок до 25 числа текущего месяца предоставляет Генподрядчику на подписание подтверждающие документы:

- справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3, с обязательным выделением стоимости материалов поставки Генподрядчика),- три экземпляра;

- акт о приемке выполненных работ (по типовой форме КС-2) - три экземпляра;

- журнал учета выполненных работ (по типовой форме КС- 6а) - три экземпляра;

- счет-фактуру - два экземпляра;

- комплект исполнительной документации за отчетный период оформленной в соответствии с Приложением № 8 к договору.

В случае непредоставления  до 25 числа текущего месяца полного пакета документов либо отсутствие одного из выше перечисленных документов акты выполненных работ рассматриваться и приниматься к учету не будут (п.4.1.1. договора).

Согласно п.4.1.2. договора  после поступления указанных документов Генподрядчик в течение 10 дней производит проверку фактически выполненных работ по объему и качеству. В случае отсутствия каких-либо замечаний, Генподрядчик подписывает формы КС-2 и КС-3, один экземпляр передает Субподрядчику.  Оплата указанных работ за соответствующий период производится Генподрядчиком не ранее 15 (пятнадцати) не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами актов приемки (КС-2, КС-3).

Ответчиком  не оплачена сумма выполненных работ за апрель 2019г. (частично от 1 712 584,85 руб.) - 746 144,62 руб.; за май 2019г. - 175 094,97 руб., итого сумма задолженности составляет 921 239,62 руб., что подтверждается актом сверки от 30.08.2019г.

Всего по договору с ООО «Башнафтатранс» подрядчиком ООО фирма«Электромонтаж» выполнено работ на сумму 7 347 128,01 руб.

 Истцом обязательства по договорам выполнены полностью. Выполнение работ подтверждается актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

В соответствии с п.13.1 - п.13.11 договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик и Генподрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

В случае причинения ущерба имуществу Генподрядчика или имуществу третьих лиц при выполнении работ Субподрядчиком, ответственность за свои действия или бездействия несёт Субподрядчик.

Ответственность за охрану труда, за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техникибезопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет Субподрядчик.

В случае, если в отчетном периоде Субподрядчик допустил отставание в выполнении работ от объемов, предусмотренных Графиком выполнения работ, Генподрядчик вправе удержать из суммы подлежащей выплате Подрядчику неустойку в размере 0,05 % от стоимости невыполненных в срокобъемов работ. При этом недовыполненный в отчетном периоде объем работ соразмерно увеличивает объем работ, подлежащий выполнению в следующем отчетном периоде.

В случае срыва сроков выполнения работ по вине Субподрядчика более двух раз подряд, Генподрядчик вправе произвести замену Субподрядчика, расторгнув настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с Договором, либо удержать 10% от стоимости всего месячного задания в качестве штрафной санкции.

В случае выявления фактов завышения Субподрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости материалов, оборудования, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штрафы в следующих размерах:

100% от объемов завышения за каждый факт завышения объемов выполненных Работ;

100% от объемов завышения за каждый факт завышения стоимости материалов, оборудования;

100% от стоимости Работ за каждый факт ненадлежащего качества Работ.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Субподрядчика могут бытьпредъявлены как до подписания акта сдачи-приемки работ, так и после подписания акта сдачи-приемки работ в гарантийный период.

В случае задержки Субподрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки отсобственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Субподрядчика. Субподрядчик обязан уплатитьГенподрядчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

В случае невыполнения Субподрядчиком требований и предписаний Генподрядчика по устранению замечаний в части:

- отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Генподрядчиком срока) Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены;

- отсутствия исполнительной документации подтверждающей объем и качество выполненных работ более 3 (трех) календарных дней (после установленного Договором срока) Субподрядчик  уплачивает  Генподрядчику штраф в размере 20 000  руб. за каждый случай;

- не предоставления полного комплекта исполнительной документации, подтверждающей объем и качество выполненных работ, в количестве экземпляров согласно договору, в 25 дневный срок с момента окончания работ по договору (за исключением работ по устранению выявленных дефектов) Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20% от Договорной цены.

- невыполнения требований Генподрядчика по соблюдению правил ибезопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Генподрядчиком срока Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в соответствии с Приложением №5 к договору;

- невыполнения Субподрядчиком требований Генподрядчика о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Субподрядчиком  в  правилах производства работ отступлениями от требований проектной документации, а также по фактам на период выполнения Субподрядчиком технологического этапа без разрешения Генподрядчика в течение (Одного) календарного дня, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,5 % (нольцелых пять десятых процента) от Договорной цены.

Невыполнение Субподрядчиком требований Генподрядчика по устранению замечаний касательно качества выполняемых работ в установленный срок, в соответствии с полученным предписанием, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,5% от Договорной цены за каждый день просрочки.

В случае выполнения Субподрядчиком технологического этапа без разрешения Организации по независимому технологическому надзору, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Договорной цены.

В случае нарушения условия, предусмотренного п. 17.9 Договора, виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф в размере 100% от стоимости переданного права.

В случае выполнения Субподрядчиком технологического этапа без разрешения Организации по независимому технологическому надзору, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Договорной цены.

В случае нарушения условия, предусмотренного п. 17.9 Договора, виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф в размере 100% от стоимости переданного права.

Поскольку обязательства по оплате ответчиком не исполнены, истец обратился в арбитражный суд настоящим иском.

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает иск обоснованным, правомерным и подлежащим удовлетворению на основании следующего. 

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. 

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом. 

По правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, в силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Проанализировав условия договора суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые Главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.   

Статьей 702 Гражданского кодекса  Российской Федерации  установлено: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. В ч. 2 данной статьи установлено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Гражданского кодекса  Российской Федерации  по этим видам договоров.

В силу положений ст.ст. 702, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 921 239 руб. 40 коп. долга, 20 456 руб. 57 коп. процентов  за пользование чужими денежными средствами.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Право заказчика отказаться от приемки результата работ, предусмотренное п. 6 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, связано исключительно с обнаружением недостатков, которые исключают возможность использования результата работ для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Акты  приемки результата работ ответчиком подписаны.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

 Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Сумма задолженности ответчика перед истцом по договору составляет 921 239 руб. 40 коп. Факт выполнения истцом работ по договору  подтвержден материалами дела. Наличие задолженности и его размер кроме прочего подтвержден актом сверки взаимных расчетов. 

Согласно п.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Как  определено в статье 9  Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами.

Таким образом, факт исполнения обязательства ответчика перед истцом, в данном случае - факт оплаты должен подтверждаться соответствующими платежными документами бухгалтерского учета, содержащими идентифицирующие признаки хозяйственной операции.

Ответчик не представил суду документов, подтверждающих факт исполнения обязательств перед истцом по оплате выполненных работ.

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, на что указано в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств".

При изложенных обстоятельствах, исковые требования о взыскании      921 239 руб. 40 коп. долга  подлежат удовлетворению в полном объеме.

 Истцом также истребовано ко взысканию с ответчика  20 456 руб. 57 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с п. 13.1 договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору, субподрядчик и генподрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

В нарушение требований п. 4.1.2 ответчик оплату принятых работ не произвел.

 Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей после 01.06.2015) за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона N 42-ФЗ положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

В силу части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти  правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Процентнаяставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

  дни  

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]×[4]×[5]/[6]

921 239,62

09.07.2019

28.07.2019

20

7,50%

365

3 785,92

921 239,62

29.07.2019

08.09.2019

42

7,25%

365

7 685,41

921 239,62

09.09.2019

27.10.2019

49

7%

365

8 657,13

921 239,62

28.10.2019

29.10.2019

2

6,50%

365

328,11

Итого:

113

7,17%

20 456,57

Поскольку ответчик своевременно, в оговоренные договором сроки оплату не произвел, за период неправомерного удержания денежных средств - с 09.07.2019 по 29.10.2019  подлежат начисление проценты за пользование чужими денежными средствами. Сумма процентов  составила  20 456 руб. 57 коп. 

Таким образом, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца        20 456 руб. 57 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами. 

 В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "ФИРМА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "БАШНАФТАТРАНС" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО "ФИРМА "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 921 239 руб. 40 коп. сумму долга, 20 456 руб. 57 коп. проценты  за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с ООО "БАШНАФТАТРАНС" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 21 834 руб. сумму государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

  Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.asuo.arbitr.ru.

Судья З.Г. Фазлыева