СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Томск Дело № А27-12502/2022  

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2023 года.  Постановление изготовлено в полном объеме 27 марта 2023 года.  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: Председательствующего: Подцепиловой М.Ю., Судей: Молокшонова Д.В.  ФИО1 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2  без использования средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную  жалобу общества с ограниченной ответственностью «Хоум сервис» ( № 07АП-1746/2023)  на решение от 19 января 2023 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу №  А27-12502/2022 (судья К.В. Козина)  

по иску некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Кузбасса», г. Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***> к обществу с ограниченной ответственностью «Хоум сервис», г. Кемерово,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> о взыскании 504 082,55 руб. неустойки (с  учетом принятого судом ходатайства об увеличении требований в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),  

стороны не явились, извещены; 

УСТАНОВИЛ:

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Кузбасса» (далее-фонд) обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью «Хоум сервис» (далее-общество) о взыскании 504 082,55  руб. неустойки.  

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком сроков выполнения  работ в рамках договора № 04-21/65.КР.21 от 15.03.2021 в части многоквартирного дома,  расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>  (стоимость работ – 4 962 569,64 руб.)  

Решением от 19 января 2023 года Арбитражного суда Кемеровской области  исковые требования удовлетворены частично.  

Не согласившись вынесенным судебным актом, общество обратилось  с апелляционной жалобой, в которой просило решение изменить в части взыскания  неустойки в сторону ее уменьшения на основании статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени  и месте судебного разбирательства (суд апелляционной инстанции располагает  сведениями о получении адресатами направленной копии судебного акта  (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)),  в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела  на интернет-сайте суда, в судебное заседание апелляционной инстанции не явились.  

В порядке части 1 статьи 266, статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу  в отсутствие лиц, участвующих в деле.  

Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только  часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность  и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие  в деле, не заявят возражений.  

При рассмотрении жалобы суд апелляционной инстанции руководствуется  разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,  изложенными в пункте 25 Постановления от 28.05.2009 № 36 "О применении  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел  в арбитражном суде апелляционной инстанции", согласно которому, если заявителем  подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку  судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить  за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм  процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Возражения против проверки законности и обоснованности определения только  в обжалуемой части в апелляционный суд не поступили.  

В порядке предусмотренном частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, с учетом вышеуказанных разъяснений, решение  арбитражного суда проверено в обжалуемой части в пределах доводов апелляционной  жалобы.  

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив законность  и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статьи 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной  инстанции полагает, что апелляционная жалоба подлежит оставлению  без удовлетворения.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 5.03.2021  года между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор № 0421/65.КР.21, по условиям пункта 1.1. которого заказчик поручает, а подрядчик принимает  на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы по капитальному  ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область  – Кузбасс, 

<

...> (стоимость работ – 3 524 783,84 руб.) и работы  по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> (стоимость работ – 4 962  569,64 руб.).  

В соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. договора, срок начала работ определен датой  подписания сторонами акта приема-передачи Объекта к производству работ, а срок  окончания работ до 30.09.2021.  

По акту передачи производства работ от 05.04.2021 жилой дом по адресу:  Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> передан подрядчику в  работу.  

В соответствии с пунктом 8.14 договора работы считаются принятыми после  подписания акта приемочной комиссии оказанных услуг и (или) выполненных работ по  капитальному ремонту общего имущества в МКД.  

Согласно пункту 11.3. Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков  выполнения работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере  одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка РФ от стоимости этапа услуг и (или) работ за каждый день  просрочки.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия (исх. № 9094 от 12.11.2021) в  десятидневный срок в добровольном порядке оплатить неустойку за нарушение срока  окончания выполнения работ по договору, с представлением расчета неустойки исходя из  цены договора за МКД – 4 962 569,64 рублей.  

Согласно акту передачи объекта в эксплуатацию от 12.10.2022 работы ответчиком  выполнены и приняты со стороны истца в указанную дату.  

Предметом настоящих требований является взыскание истцом с ответчика  неустойки в размере 504 082,55 руб. за нарушение сроков выполнения работ за период с  13.11.2021 по 31.03.2022 и далее до момента фактического исполнения обязательств, что  послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции со ссылкой на  статьи 329,330,708,716,740 Гражданского кодекса Российской Федерации, условиями  заключенного между сторонами договора, пришел к выводу,  об обоснованности начисления истцом неустойки за просрочку исполнения обязательств  по договору и отсутствия оснований для ее снижения на основании  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Не согласиться с данными выводами у суда апелляционной инстанции оснований  не имеется.  

Рассматривая доводы подателя жалобы, коллегия суда отмечает следующее. 

В силу части 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренным законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения  (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Пунктом Согласно пункту 11.3. Договора стороны согласовали, в случае  нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору, Подрядчик уплачивает  Заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости этапа услуг и  (или) работ за каждый день просрочки.  

Поскольку, срок исполнения обязательств, установленный сторонами в договоре,  ответчиком нарушен, истец в соответствии с пунктом 11.3 договора начислил ответчику  неустойку за период с 13.11.2021 по 31.03.2022 в размере 504 082 руб. 55 коп.  

Суд первой инстанции, проверив расчет истца, пришел к выводу об его изменении,  поскольку истцом неправомерна была применена ставка рефинансирования ЦБ РФ в  размере 9,5% годовых.  

Поскольку в силу пункта 11.3 договора, следуя его буквальному толкованию,  неустойка подлежит начислению с применением ставки, действующей на день уплаты  неустойки, в настоящем случае таким, является день исполнения обязательства –  12.10.2022, что следует из правовых позиций, сформулированных в Обзоре судебной  практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденном  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 4 (вопрос 3), а также в  определениях Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 N 302-ЭС18-10991,  от 18.09.2019 N 308-ЭС19-8291.  

Как следует из представленных доказательств, работы выполнены 12.10.2022, что  подтверждается актом передачи объекта в эксплуатацию.  

Таким образом, суд первой инстанции применил свой расчет, ввиду чего, размер  неустойки за период с 13.11.2021 по 12.10.2022 на сумму 4 962 569,64 руб. с применением  ставки 7,5 % (на день исполнения обязательства) за исключением периода моратория  (1.04.2022 по 1.10.2022) составил 429 453,14 руб.  

Суд апелляционной инстанции, проверив расчет суда первой инстанции  взыскиваемой неустойки по договору в силу пункта 11.3 признает его арифметически  верными. Расчет ответчиком не опровергнут.  

Контррасчет от общества в материалы дела представлен не был. 

Довод апелляционной жалобы о необходимости применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации, отклоняется судом апелляционной  инстанции по следующим основаниям.  

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии  заявления должника о таком уменьшении.  

Степень соразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, поэтому только суд, рассматривающий  дело, вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения  и обстоятельств конкретного спора в соответствии со ст. 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Как следует из Определения Конституционного Суда РФ № 683-О-О от 26.05.2011,  пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет право суда  уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна  последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать  баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером  действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения,  что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации,  в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц.  

Из пункта 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016  "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление № 7)  следует, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором,  в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть  уменьшена в судебном порядке (часть 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Разъяснения относительно применения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации содержатся в пунктам 71, 73 Постановления Пленума Верховного  Суда РФ № 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"), согласно  которых, если должником является коммерческая организация, индивидуальный  предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по  обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме  (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды  кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут  выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли  возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной  неустойки (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации).  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы  неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства;  

длительность неисполнения обязательств и другие обстоятельства (п. п. 2, 4  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 17  от 14.07.1997 "Обзор практики применения арбитражными судами  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", п. 42 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 от 01.07.1996  "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса  Российской Федерации").  

В силу пункта 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016  "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств" при оценке соразмерности  неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто  не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то,  что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более  выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4  статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доказательствами  обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере  платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым  кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам,  в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях  инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера  неустойки, суд снижает сумму неустойки.  

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой  организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой  организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна  последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором  необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации) (п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016).  

Таким образом, решение вопроса о явной несоразмерности неустойки  последствиям нарушения обязательства производится на основании имеющихся в деле  материалов и конкретных обстоятельств дела.  

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что при  подписании договора № 04-21/65.КР.21 от 15.03.2021, ответчик не возражал против  данного условия об ответственности.  

Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации  субъекты гражданского права приобретают и осуществляют свои гражданские права  своей волей и в своем интересе.  

В соответствии с частью 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской  Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,  изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические  лица свободны в заключении договора (часть 1 статьи 421 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда  содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми  актами.  

Стороны в договоре подряда установили ответственность за нарушение сроков  выполнения работ в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости  этапа услуг и (или) работ за каждый день просрочки.  

Ответчик не был лишён возможности заявить разногласия при заключении  договора, либо требовать изменения условий договора в процессе его исполнения.  

Таким образом, заключая договор на указанных условиях, ответчик должен был  предполагать возможность возникновения для него в случае нарушения им условий  договоров неблагоприятных правовых последствий в виде уплаты неустойки.  

В рассматриваемом случае, договор подписан сторонами, его условия не  противоречат нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе с  предусмотренным договором размером неустойки.  

Согласно условиям заключенного с истцом договора ответчик обязался, в том  числе, нести ответственность в виде уплаты неустойки в случае просрочки исполнения  обязательства. Риск наступления данной ответственности напрямую зависит от действий  самого ответчика. При этом, ответчик, действуя как профессиональный участник  гражданского оборота, мог и должен был предпринять необходимые действия  во избежание применения к нему штрафных санкций. Виновная в неисполнении  обязательства сторона - ответчик должна претерпеть неблагоприятные последствия  взыскания с нее неустойки.  

Из анализа указанных обстоятельств по делу следует, что ответчиком не доказано,  что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести  к получению истцом необоснованной выгоды.  

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения  или несовершения ими процессуальных действий, в том числе по доказыванию своих  доводов и возражений.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной  инстанции, приходит к выводу о том, что неустойка в размере 1/130 действующей на день  уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от  стоимости этапа услуг и (или) работ за каждый день просрочки, исходя из фактических  обстоятельств дела, периода неисполнения обязательств, значительной суммы основной  задолженности, на которую начислена неустойка, не является явно несоразмерной  последствиям нарушения обязательства, а признаков считать ее необоснованно  (чрезмерно) завышенной, или необоснованной оснований не имеется, доказательств  обратного обществом в материалы дела представлено не было в нарушении статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

При этом апелляционный суд отмечает, что снижение размера неустойки является  правом суда и возможно только при установлении явной ее несоразмерности  последствиям нарушения обязательства. Уменьшение неустойки, определенной  договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, допускается в исключительных случаях, однако доказательств наличия  такого исключительного случая в материалы дела не представлено, как не обосновано  и не представлено доказательств для применения статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу  о том, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск в данной части.  

Принимая во внимание требования вышеназванных норм материального  и процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по настоящему  делу, суд апелляционной инстанции считает, что ответчик не доказал обоснованность  доводов апелляционной жалобы, приведенные апеллянтом доводы не содержат фактов,  которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении  дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность  принятого им решения.  

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу  о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, суд полно  и всесторонне исследовал имеющиеся в материалах дела доказательства и дал  им правильную оценку.  

Нарушения норм материального или процессуального права судом допущено  не было, поэтому оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции,  установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, у суда апелляционной инстанции не имеется.  

Государственная пошлина по апелляционной жалобе по правилам  статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на  ее подателя.  

Руководствуясь статьей 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный  суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 19 января 2023 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2712502/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Хоум сервис» - без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства  в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

Председательствующий: М.Ю. Подцепилова  

Судьи: Д.В. Молокшонов  

ФИО1