АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край 

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-1665/2023

г.Чита

03 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2023 года Решение изготовлено в полном объёме 03 августа 2023 года 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи И.В. Леонтьева  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Проммонолит" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Милктрейд" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 685 768 руб.,  неустойки с 02.11.2021 г. по 14.10.2022 г. в размере 1 010 774,42 руб., платы за  генподрядные услуги в размере 80 808,08 руб., при участии в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора -  Комитета экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений  администрации городского округа "Город Петровск-Забайкальский" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>).  

От истца: не было; От ответчика: не было. От третьего лица: не было В судебном заседании объявлялся перерыв до 16 час. 00 мин. этого же дня. 

Общество с ограниченной ответственностью "Проммонолит" обратилось в  арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  "Милктрейд" о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 685 768 руб.,  неустойки с 02.11.2021 г. по 14.10.2022 г. в размере 1 010 774,42 руб., платы за  генподрядные услуги в размере 80 808,08 руб.  

От истца поступило уточнение требований просит взыскать неосновательное  обогащение в размере 2 685 768 руб., штраф за неисполнение обязательств по договору в  сумме 404040,40 руб., плату за генподрядные услуги в размере 80 808,08 руб.  

Суд принял уточнение исковых требований. 

Стороны и третье лицо, извещенные о времени и месте предварительного  судебного заседания, в предварительное судебное заседание не явились.  

Суд на основании ст. 137 АПК РФ перешел из предварительного судебного  заседания в судебное.  

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица,  участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном  судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или  совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения  относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное  судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением  случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное  рассмотрение данного дела.  

Сторонами не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их  отсутствие.  

Дело рассмотрено в порядке частей 1, 3 статьи 156, части 4 статьи 137  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие  представителей сторон и с переходом из предварительного судебного заседания в  судебное заседание.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил. 

Истец является генподрядчиком по муниципальному контракту № 2 на ремонт  автомобильной дороги местного значения, заключенного между Комитетом экономики,  управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации  городского округа "Город Петровск-Забайкальский" (заказчиком) и Обществом с  ограниченной ответственностью "Проммонолит".  

21.09.2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью  «Проммонолит», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, (далее - Истец, Генподрядчик)  и Обществом с ограниченной ответственностью «Милктрейд», ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>, (далее -Ответчик, Субподрядчик) заключен договор субподряда №  2021/09/21-1 (далее - Договор).  

Согласно п. 1.1 договора Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется  произвести работы по ремонту автомобильной дороги местного назначения  протяженностью 3,23 км по ул. Спортивная г. Петровск-Забайкальский по адресу:  Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский от 

<

...> до путепровода  и от путепровода до ул. 50 лет ВЛКСМ и проезд от ул. Спортивная д. 30 до микрорайона  1, д. № 27 (далее - Объект).  

Техническое задание указано в Приложении № 1, которое является неотъемлемой  частью данного Договора. Требования к материалам указаны в Приложении № 2, которое  является неотъемлемой частью данного Договора.  

Объем работ установлен в ведомости объемов и стоимости работ (Приложение №  3), которая является неотъемлемой частью данного Договора.  

Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работу, указанную в п.  1.1 настоящего Договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих  материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с  условиями настоящего Договора, приложениями к нему, нормативной документацией (п.  1.2 договора).  

Сроки выполнения работ по настоящему Договору: срок начала работ по Договору  21.09.2021 г. Работы по Договору должны быть завершены и результат работ должен быть  передан Генподрядчику до 31.10.2021 г. (п. 1.3 договора).  

В соответствии с п. 1.7 Договора право на заключение Генподрядчиком настоящего  договора предусмотрено условиями Муниципального контракта № 2 от 15.03.2021 года  (ИКЗ:213753100387775310100100090014211244), заключенного между Генподрядчиком и  Комитетом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений  администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», (далее - Заказчик,  Государственный заказчик), условиями конкурсной документации закупки  (ИКЗ:213753100387775310100100090014211244), с которыми Субподрядчик ознакомлен  

(Муниципальный контракт, конкурсная документация размещены на официальном сайте  

http://zakupki.gov.ru). Субподрядчик настоящим подтверждает и дает свое согласие на то,  

что приемка и оплата выполненных работ Генподрядчиком, напрямую зависит от приемки  

и оплаты работ Государственным заказчиком. 

В соответствии с п. 2.1 договора цена Договора является твердой, определена на  

весь срок исполнения Договора, и включает в себя прибыль Субподрядчика, уплату  

налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Субподрядчика, включая,  

но не ограничиваясь этим, расходы на приобретение материалов, оборудования, оплату  

труда персонала, транспортные расходы, накладные расходы, и все иные затраты и  

расходы Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору. 

Цена договора (цена работ) составляет: 8 080 808 (восемь миллионов восемьдесят  

тысяч восемьсот восемь) рублей 08 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость  

(далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать-) процентов. 

Цена договора определена согласно ведомости объемов и стоимости работ  

(Приложение № 3). 

В целях исполнения договора Генподрядчиком произведена оплата аванса в общей  

сумме 6 619 893,00 рублей: ПП № 942 от 21.09.2021 года - 500 000,00 рублей, ПП № 4 от 01.10.2021 года - 500 000,00 рублей, ПП № 1004 от 05.10.2021 года-400 000,00 рублей, ПП № 1080 от 18.10.2021 года-400 000,00 рублей, ПП № 1108 от 25.10.2021 года - 400 000,00 рублей, ПП № 1127 от 08.11.2021 года-1 000 000,00 рублей, ПП № 1201 от 26.11.2021 года-300 000,00 рублей, ПП № 1214 от 29.11.2021 года-500 000,00 рублей, ПП № 1259 от 08.12.2021 года - 250 000,00 рублей, ПП № 1281 от 09.12.2021 года-250 000,00 рублей, ПП № 1301 от 16.12.2021 года- 100 000,00 рублей, ПП № 1345 от 29.12.2021 года-2 019 893,00 руб. В подтверждение оплаты прилагаются платежные поручения. 

Работы по договору Субподрядчиком в полном объеме не выполнены, в  

установленном порядке Генподрядчику не сданы, часть работ выполнены некачественно,  

материалы для выполнения работ частично поставлялись Генподрядчиком. 

Уведомление об окончании работ, документы, предусмотренные п. 4.6 договора, в  

т.ч. акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),  

исполнительная документация, документы, подтверждающие стоимость и объемы  

выполненных работ, стоимость материалов Генподрядчику не направлены и не переданы.  Ввиду длительной просрочки выполнения работ часть работ была выполнена  

Генподрядчиком самостоятельно. 

Между Генподрядчиком и Муниципальным заказчиком (Комитет экономики,  

управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации  

городского округа «Город Петровск-Забайкальский») подписаны акты кс-2, справки кс-3  

на всю стоимость муниципального контракта в размере 35 549 914,80 рублей: 07.09.2021 года на сумму 7 965 140 рублей, 10.11.2021 года на сумму 8 218 187 рублей; 29.11.2021 года на сумму 7 909 396,00 рублей; 24.12.2021 года на сумму 11 457 191,80 рублей. 

В подтверждение прилагаются акты кс-2, справки кс-3, муниципальный контракт,  

приложения к нему, локально-сметные расчеты (муниципальный контракт, приложения к  

нему, локально-сметные расчеты, акты кс-2, справки кс-3 по муниципальному контракту  

также размещены на официальном сайте https://zakupki.gov.ru/). 

Однако работы приняты Муниципальным заказчиком под гарантийное письмо №  840 от 24.12.2021 года, в соответствии с которым Генподрядчик обязался в срок до  01.07.2022 года устранить недостатки работ, выявленные в соответствии с актом осмотра  объекта от 22.12.2021 года (копии акта осмотра и гарантийного письма прилагаются),  

20.01.2022 года в адрес Субподрядчика была направлена претензия исх. 14 от  20.01.2022 года. В соответствии с претензией Генподрядчик указывал на то, что работы по  договору выполнены Субподрядчиком с недостатками, не в полном объеме, просил  подписать гарантийное письмо об устранении недостатков выполненных работ, а также  сдать выполненные работы в установленном договором порядке, в течение 3 календарных  дней с момента получения претензии предоставить Генподрядчику оформленные в  надлежащем порядке счета-фактуры на выполненные работы, счет, документы о приемки  (акты кс-2, справки кс-3), гарантийное письмо (т. 1 л.д.60).  

Ответ на претензию не получен, документы о приемке выполненных работ  Генподрядчику не направлены.  

На основании полученного письма и акта Заказчика от 19.04.2022 года  Генподрядчик направил Субподрядчику уведомление о выявленных недостатках работ  исх. 88 от 26.04.2022 года, в соответствии с которым уведомил Субподрядчика о  необходимости явиться для составления и подписания дефектного акта (акта обнаружения  дефектов и недоделок) 04.05.2022 года в 11.00 час. по адресу: 672038, 

<

...>, потребовал в срок до 30.05.2022 года устранить выявленные недостатки  выполненных работ (копия уведомления, электронное письмо об отправке, доказательства  направления по почте прилагаются) т. 1 л.д.103).  

В назначенный день Субподрядчик не явился, от составления дефектного акта  уклонился, ответ на уведомление получен не был.  

Согласно п. 4.9.1. договора субподряда, если в процессе выполнения работ,  предусмотренных настоящим договором, будут выявлены некачественно выполненные  работы, то Субподрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Генподрядчиком,  переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.  

Генподрядчик в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим  Договором, может давать Субподрядчику распоряжения в письменной форме в  отношении качества выполняемых им работ, а также замены некачественных материалов  и конструкций, не соответствующих условиям настоящего Договора, описанию,  изложенному в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Субподрядчик обязан  за свой счет в разумный срок, установленный Генподрядчиком, надлежащим образом  выполнить любое из этих распоряжений Генподрядчика (пункт 4.9.2 договора  субподряда).  

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания  окончательного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и составляет 6 лет (п.  5.1 договора субподряда).  

Согласно 5.2. договора субподряда Субподрядчик несет ответственность за  недостатки, обнаруженные в работе в период гарантийного срока. Устранение всех  обнаруженных в ходе эксплуатации объекта недостатков в выполненных работах  производится Субподрядчиком своими силами и за свой счет в срок, установленный  Генподрядчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения  недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное  устранение Субподрядчиком недостатков в срок, установленный Генподрядчиком,  возмещение понесенных Генподрядчиком расходов по исправлению недостатков своими  силами или силами третьих лиц.  

Согласно п. 5.6. договора субподряда при отказе Субподрядчика от составления  или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок Генподрядчик составляет  односторонний акт. При этом односторонний акт является надлежащим и допустимым  

доказательством, подтверждающим наличие, объем и стоимость обнаруженных дефектов  и недоделок (недостатков).  

Ввиду уклонения Субподрядчика от составления акта обнаружения дефектов и  недоделок Генподрядчиком был составлен односторонний акт от 04.05.2022 года, в  соответствии с которым требуется устранение недостатков. (т. 1 л.д.129).  

Ввиду того, что Субподрядчик к устранению недостатков выполненных работ не  приступил, недостатки работ, указанные в акте недостатков выполненных работ от  04.05.2022 года, частично были устранены силами и за счет Генподрядчика, что  подтверждается перепиской между Генподрядчиком и Муниципальным заказчиком,  актами осмотра объекта (копии переписки, актов прилагаются к настоящему исковому  заявлению).  

Заказным письмом с описью вложения по юридическому адресу Ответчика была  направлена претензия исх. 207 от 25.10.2022 года совместно с актом сдачи-приемки  выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в 2-х экземплярах, справкой о  стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в 2-х экземплярах  для подписания Ответчиком.  

Ввиду уклонения Субподрядчика от сдачи-приемки выполненных работ  Генподрядчиком в одностороннем порядке составлен акт о приемке выполненных работ  на сумму 3 934 125 рублей, с учетом НДС 20 %.  

Работы по договору Субподрядчиком в полном объеме не выполнены, в  установленном порядке Генподрядчику не сданы, часть работ выполнены некачественно,  материалы для выполнения работ частично поставлялись Генподрядчиком. Ввиду  длительной просрочки выполнения работ часть работ была выполнена Генподрядчиком  самостоятельно. Уведомление об окончании работ, документы, предусмотренные п. 4.6  договора, в т.ч. акт сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),  исполнительная документация, документы, подтверждающие стоимость и объемы  выполненных работ, стоимость материалов Генподрядчику не направлены и не переданы.  

Таким образом, стоимость выполненных работ по договору составила 3 934 125  рублей, с учетом НДС 20 %. В целях исполнения договора Генподрядчиком произведена  оплата аванса в общей сумме 6 619 893,00 рублей, что подтверждается платежными  поручениями, прилагаемыми к настоящему исковому заявлению.  

В соответствии с претензией исх. 207 от 25.10.2022 года на основании п. 2 ст. 715  ГК РФ, Истец уведомил Ответчика об одностороннем отказе от исполнения договора  субподряда № 2021/09/21-1 от 21.09.2021 года по ремонту автомобильной дороги  местного назначения протяженностью 3,23 км по ул. Спортивная г. Петровск- Забайкальский по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский от 

<

...> до путепровода и от путепровода до ул. 50 лет ВЛКСМ и проезд от ул.  Спортивная д. 30 до микрорайона 1, д. № 27.  

На основании изложенного, сумма излишне оплаченного аванса в размере 2 685  768,00 рублей подлежит возврату Истцу согласно нормам гражданского законодательства  о неосновательном обогащении.  

Согласно п. 2.4 договора плата за генподрядные услуги в виде процента от  стоимости выполненных Субподрядчиком работ (генподрядный процент) составляет 1%  (один процент) от цены Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, включая  налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать)  процентов.  

Генподрядный процент оплачивается Субподрядчиком не позднее 30 календарных  дней после подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.8. настоящего Договора.  

Генподрядный процент является платой Генподрядчику за посреднические услуги  Генподрядчика, а именно за то, что он принимает на себя перед Государственным  заказчиком риски надлежащего исполнения договора Субподрядчиком, и подлежит  

оплате независимо от наличия и объема оказанных услуг Генподрядчиком в рамках  исполнения настоящего Договора.  

Оплата генподрядного процента по настоящему Договору осуществляется путем  перечисления Субподрядчиком денежных средств на банковский счет Генподрядчика,  указанный в Договоре.  

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя  и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона.  

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускает  одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

Подрядчик не оплатил услуги генподряда, в связи с чем истец просит взыскать с  ответчика задолженность за генподрядные услуги в размере 80 808,08 руб.  

Ответчик не выполнил обязательства по договору в связи с чем истец просит  взыскать с ответчика штраф за неисполнение обязательств на основании п. 6.3 договора в  сумме 404040,40 руб.  

Ответчик извещен надлежащим образом явку представителя в суд не обеспечил,  возражения на иск не представил.  

Пунктом 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,  что правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по  капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить  по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В целях исполнения договора Генподрядчиком произведена оплата аванса в общей  сумме 6 619 893,00 рублей  

Ввиду уклонения Субподрядчика от сдачи-приемки выполненных работ  Генподрядчиком в одностороннем порядке составлен акт о приемке выполненных работ  на сумму 3 934 125 рублей, с учетом НДС 20 %.заказчик указывает, что он в  одностороннем порядке отказался от дальнейшего исполнения договора субподряда.  

В силу пунктов 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом,  другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний  отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного  уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами,  иными правовыми актами или договором.  

Право заказчика отказаться от исполнения договора предусмотрено п. 2 ст. 715 ГК  РФ в котором указано, что Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению  договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку  становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и  потребовать возмещения убытков.  

Суд считает, что в связи с расторжением договора подряда, сумма излишне  оплаченного аванса в размере 2 685 768,00 рублей подлежит возврату Истцу согласно  нормам гражданского законодательства о неосновательном обогащении.  

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое  без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело  или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано  возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение).  

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской  Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение  результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц, или  произошло помимо их воли.  

Следовательно, для того, чтобы констатировать неосновательное обогащение,  необходимо отсутствие у лица оснований (юридических фактов), дающих ему право на  получение имущества (денежных средств).  

Такими основаниями могут быть договоры, сделки и иные предусмотренные  статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации основания возникновения  гражданских прав и обязанностей.  

С учетом этого в предмет доказывания входят следующие обстоятельства: факт  приобретения или сбережения имущества (денежных средств) ответчиком за счет истца,  отсутствие к этому оснований, установленных сделкой, законом или иными правовыми  актами, размер неосновательного обогащения.  

Из материалов дела следует, что лицом, неосновательно обогатившимся за счет  истца, является ответчик , так как в результате производства оплаченных истцом работ,  доказательств выполнения работ в полном объеме не представил, в связи с чем,  неосновательно сберег за счет истца 2 685 768,00 руб.  

Таким образом, исковые требования о взыскании с ответчика 2 685 768,00 руб.  неосновательного обогащения обоснованы, подтверждаются материалами дела и  подлежат удовлетворению на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

Согласно п. 2.4 договора плата за генподрядные услуги в виде процента от  стоимости выполненных Субподрядчиком работ (генподрядный процент) составляет 1%  (один процент) от цены Договора, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, включая  налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20% (двадцать)  процентов.  

Генподрядный процент оплачивается Субподрядчиком не позднее 30 календарных  дней после подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.8. настоящего Договора.  

Генподрядный процент является платой Генподрядчику за посреднические услуги  Генподрядчика, а именно за то, что он принимает на себя перед Государственным  заказчиком риски надлежащего исполнения договора Субподрядчиком, и подлежит  оплате независимо от наличия и объема оказанных услуг Генподрядчиком в рамках  исполнения настоящего Договора.  

Суду не представлено доказательств оплаты данных денежных средств. Суд  считает требования подлежащими удовлетворению.  

Ответчик не выполнил обязательства по договору, в связи с чем, истец просит  взыскать с ответчика штраф за неисполнение обязательств на основании п. 6.3 договора в  сумме 404040,40 руб.  

Из п. 6.3 договора следует, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего  исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением  просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа  устанавливается 5% от цены договора.  

Статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами.  

Порядок сдачи и приемки работ стороны согласовали в разделе 4 Договора. 

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о  неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного  обязательства.  

Ответчик не оспорил факт частичного выполнения работ, доказательств сдачи  работ не представил.  

Судом установлено, что субподрядчик приступив к работам полностью их не  выполнил, работы к приемке не предъявил. При таких обстоятельствах суд считает  требования истца обоснованными и подлежащим удовлетворению.  

Ответчик надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте судебного  заседания, отзыв на исковое заявление с возражениями не представил.  

В соответствии с ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными  другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные  возражения относительно существа заявленных требований.  

В соответствии с ч. 3. ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на  которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает  другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.  

Расходы по оплате государственной пошлины по правилам ст. 110 АПК РФ  относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 171, 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Милктрейд" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Проммонолит" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2685768 руб. неосновательного  обогащения, 404040,40 руб. штрафа, 80808,08 руб. основного долга за услуги генподряда,  38853 руб. расходов по оплате госпошлины, всего 3209469,48 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Проммонолит" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 3034 руб. государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Четвертый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья И.В. Леонтьев