АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-19514/2017

г. Владивосток

25 сентября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2017 года . 

Полный текст решения изготовлен 25 сентября 2017 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Савон А.Ф.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточная инженерная компания" (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

к КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 910 054,55 руб.

при участии

от истца: ФИО1 (паспорт, доверенность)

от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная инженерная компания" обратилось с заявлением к КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО"  о взыскании 1 910 054,55 руб.

Представитель истца поддержал требования.

Представитель истца возражал против удовлетворения иска, пояснил, что задолженность перед истцом числится по бухгалтерскому учету.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Как установлено судом из материалов дела между ООО «ДВИНКОМ» и КГУП «Примтеплоэнерго» заключен договор подряда №88/0024-17/ЗП от 27.04.2017.

Невыполнение договора со стороны ответчика послужили основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением о взыскании неотработанного аванса.

Как следует из материалов дела и установлено судом, что между ООО «ДВИНКОМ» и КГУП «Примтеплоэнерго» заключен договор подряда №88/0024-17/ЗП от 27.04.2017 г. по которому согласно п. 1.1 Договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по объекту «Капитальный ремонт песколовок КОС в г.Фокино», а Заказчик обязуется принять их и оплатить. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по объекту в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика, сметными расчетами. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение трех дней с момента получения задания, и полностью завершить работы и сдать готовый объект в течение 50 дней.

Согласно п. 2.1 Договора Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется сметным расчетом и составляет 2 387 568 рублей 19 копеек (Два миллиона триста восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 19 копеек), в том числе НДС 18% 364205 рублей 32 копейки (Триста шестьдесят четыре тысячи двести пять рублей 32 копейки).

Согласно п.3.1. Договора Заказчик производит авансовый платёж Подрядчику в размере 20% от сметной стоимости.

КГУП «Примтеплоэнерго» был оплачен аванс в размере 20% - 447513,64 рублей.

ООО «ДВИНКОМ» работы были выполнены в полном объеме, что подтверждается актом выполненных работ (КС-2) №1 от 13.06.2017 г. и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) №1 от 13.06.2017 г. на общую сумму 2 387 568,19 руб.

Согласно п.3.3 Договора окончательный расчёт по настоящему договору Заказчик производит в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта приемки законченного ремонтом объекта, при наличии недостатков - по предъявлению Подрядчиком акта устранения недостатков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что акт выполненных работ подписан без замечаний.

С учетом произведенного аванса в размере 447 513,64 руб., задолженность составляет 1 910 054,55 руб., которая подлежит взысканию в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с  КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ", 1942155,55 рублей составляющих 1910054,55 рублей основного долга и 32101,00 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

            Судья                                                                                                Буров А.В.