АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-13674/2023

г.Чита

17 мая 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Геометр»  удовлетворить.  

 Внести изменения в государственный контракт № 301 от 14.12.2022 на  выполнение работ по строительству объекта «Детский сад по адресу: 

<

...>», заключенный между ГКУ «Служба единого заказчика»  Забайкальского края и ООО «Геометр», изложив:  

 1) Пункт 4.2 государственного контракта № 301 от 14.12.2022 в следующей  редакции: «4.2. Работы по контракту должны быть завершены и результат работ  должен быть передан заказчику не позднее 01.07.2024»;  

 2) столбец 3 Графика выполнения работ Приложения № 3 к государственному  контракту № 301 от 14.12.2022 «Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или)  комплекса работ и (или) части работ отдельного вида работ» в следующей редакции: «с  даты подписания контракта до 01.07.2024»;  

3) строку 2 Графика выполнения строительно-монтажных работ Приложения   № 6 к государственному контракту № 301 от 14.12.2022 «Срок окончания работ» в  следующей редакции: «Срок окончания работ – 01.07.2024»;  

 Взыскать с государственного казенного учреждения «Служба единого  заказчика» Забайкальского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Геометр» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб.  

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия через  Арбитражный суд Забайкальского края.  

Судья М.И. Обухова