АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «РЕМКОР», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, 

к Акционерному обществу «АЗОВО-ДОНСКОЙ ФЛОТ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Ростов-на-Дону,

о взыскании, 

при участии в судебном заседании представителя от истца – Общества с ограниченной ответственностью «РЕМКОР» – ФИО2 (доверенность от 01.10.2019), в отсутствие представителей ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМКОР» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Акционерному обществу «АЗОВО-ДОНСКОЙ ФЛОТ» о взыскании 34 693 505,30 рублей задолженности по договору по оказанию услуг от 27.05.2019 № 9МКР/18 и 568 375,35 рублей пени.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик отзыв на иск не представил, явку представителей не обеспечил, ходатайств не заявлял. 

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле,  и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.   

Как видно из материалов дела,  АО «АЗОВО-ДОНСКОЙ ФЛОТ» (заказчик) и ООО «РЕМКОР» (подрядчик) заключили контракт от 27.05.2019 № 9МКР/19 на ремонт т/х «Капитан Корчин», согласно которому ООО «РЕМКОР» приняло обязательство выполнить ремонтные работы на т/х «Капитан Корчин», предусмотренные Предварительной ремонтной ведомостью (Приложение № 1 к контракту) и сдать результат работ в установленные сроки заказчику, а последний – принять результат работ и оплатить установленную цену.

В соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 контракта срок ремонта судна – 40 календарных дней, исключая государственные праздники РФ, при выполнении объемов, предусмотренных Предварительной ремонтной ведомостью (Приложение № 1 к контракту). Сдача судна в ремонт и приемка судна из ремонта оформляется сторонами актом сдачи судна в ремонт и Актом приема судна из ремонта соответственно. При этом датой начала (окончания) ремонта является дата, зафиксированная сторонами в акте сдачи судна в ремонт (Акте приема судна из ремонта).

Цена работ по контракту определяется сторонами в приложении № 1 к контракту, которое является его неотъемлемой частью (пункт 3.1 контракта). Изменение цены, производится по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных контрактом. Согласно Предварительной ремонтной ведомости на ремонт т/х «Капитан Корчин» (Приложение № 1 к Контракту), стоимость работ составляет 38 503 106,40 руб., в т.ч. НДС.

Стоимость Работ в соответствии с ИРВ составила 57 094 747,86 руб., в т.ч. НДС.

Согласно пункту 3.4 контракта оплата работ производится в следующем порядке:

1-й платеж в размере 40% от цены работ, предусмотренной пунктом 3.1 контракта, в течение 5-и банковских дней с даты его подписания,

2-й платёж в размере 70% от цены работ по согласованной сторонами Исполнительной ремонтной ведомости (ИРВ), за вычетом ранее оплаченной суммы – до выхода судна из акватории судоремонтного предприятия;

Окончательный расчет – оставшаяся сумма от цены работ согласно ИРВ, за вычетом ранее оплаченной суммы – в течение 30 календарных дней с даты выхода судна из акватории судоремонтного предприятия.

15.10.2019 сторонами подписан Акт приемки судна из ремонта и судно вышло из акватории 15.10.2019, что подтверждается письмом Филиала ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ» в городе Севастополь от 10.12.2019 исх. № 1874/0261.

 Каких-либо претензий к качеству работ исполнителя предъявлено не было. Соответственно, срок окончательного расчета наступил 14.11.2019.

По состоянию на 23.12.2019 АО «АЗОВО-ДОНСКОЙ ФЛОТ оплатило 15 401 242,56 руб.: 

03.06.2019 – 40% от стоимости ПРВ; 5 000 000 руб. 11.10.2019 и 2 000 000 руб. 22.10.2019 – в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 25.09.2019г. к контракту, которым размер платежа снижен до 70% от ИРВ – до суммы 8 000 000 руб.

Таким образом, полная оплата услуг в качестве второго платежа в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 25.09.2019 № 1 к контракту не произведена, неоплаченная задолженность составляет 1 000 000 руб.

Окончательный расчет – перечисление оставшейся суммы задолженности в размере 33 693 505,30 – также не произведен.

Пунктом 10.1 контракта установлено, что в случае нарушения сроков оплаты, заказчик уплачивает пеню в размере 15% годовых от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Общая сумма контракта за выполненный объем работ составила 57 094 747,86 рублей.

На день подписания Акта приемки судна из ремонта Ответчиком произведена оплата в размере 22 401 242,56 руб., а сумма общей задолженности составила 34 693 505,30 рублей.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 14.11.2019 исх. № 178 с требованием погасить образовавшуюся задолженность, а также уплатить пени, начисленные в соответствии пунктом 10.1 контракта.

В пункте 14.2 контракта установлена договорная подсудность, если ответчиком является заказчик – в Арбитражном суде города Севастополя.

Неисполнение ответчиком договорных обязательств послужило основанием для обращения истца с иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В статье 310 Кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ и пени за просрочку такой оплаты является основанием для принудительного взыскания предъявленных сумм.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств отсутствия или погашения задолженности, не оспорил факт образования и размер задолженности. 

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

взыскать с Акционерного общества «АЗОВО-ДОНСКОЙ ФЛОТ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Ростов-на-Дону, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РЕМКОР», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, 34 693 505,30 рублей задолженности по договору по оказанию услуг от 27.05.2019 № 9МКР/18, 568 375,35 рублей пени и 199 309 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.      

Судья 

А.Ю. Смоляков