Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-193/2021

21 апреля 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

   Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и  ремонта» (628508, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 17.05.2012, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Атлант» (628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, город  Советский, Южная промышленная зона, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 20.12.2002, ИНН: 

<

***>) об обязании исполнить гарантийные обязательства по  контракту,  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности № 42 от 30.12.2020 (после перерыва), от ответчика – не явились, 

 руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Атлант» в течении 30  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить  строительные дефекты в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту   № 0187300008413000375-0466580-01 от 10.09.2013, заключенного между муниципальным  казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Управление капитального  строительства и ремонта» и обществом с ограниченной ответственностью «Атлант», а  именно:  

 - устранить промерзание в узлах примыкания стен к потолку в кабинетах химии и  математики;  

 - подключить 5 видеокамер; 

 - восстановить бетонное основание и резиновое покрытие пришкольного стадиона;  

 - выполнить ремонт входных групп и крылец из керамической плитки;  

 - произвести герметизацию тепловых камер и колодцев в местах прохождения труб;   - произвести облицовку стены кафельной плиткой (в помещении уборочного  инвентаря произошло отслоение настенной кафельной плитки общей площадью 8,34 м2).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлант» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.03.2021 3:37:20Кому выдана Агеев Артур Хамитович