АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-19994/2024 Резолютивная часть 

г. Нижний Новгород 10 декабря 2024 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Миронова Сергея Вадимовича (шифр дела 60-379), при ведении протокола секретарем Гориной Е.Д., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Н.Новгорода"  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ответчику: ООО "Авангард Спецстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки, 

при участии представителей сторон: от истца: ФИО1 по доверенности от 26.02.2024; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом; 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать ООО "Авангард Спецстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) за  

свой счет в месячный срок со дня вступления решения в законную силу устранить  

недостатки выполненных работ по контракту № 11-23 от 13.06.2023, выполнив при этом  

следующие работы: 

- По периметру фасада здания вдоль отмостки восстановить декоративную  

штукатурку. Входная группа: - исправить или заменить не работающий видеодомофон; 

- исправить или заменить не работающий светильник с датчиком движения над  

входной дверью. 1-й этаж: 

- в кладовой устранить расхождение замкового соединения напольного покрытия из  

ламината; - в электрощитовой: - окрасить жгуты кабелей; 

- заделать и окрасить отверстие в стене над щитом распределительным (ЩР); - окрасить угол стены у потолочной плитки;  

- в распределительном щите 1 и 2 этажей разместить адресную и однолинейную  

схемы электропитания помещений; 2-й этаж: 

- в кабинете № 1 руководителя устранить отхождение от основания пола напольного  

покрытия из ламината, 

- в приемной кабинета № 1 устранить расхождение замкового соединения  

напольного покрытия из ламината; 

- в кабинете отдыха руководителя в районе оконного проема устранить  

расхождение стыков обоев; - в кабинете № 2 заместителя руководителя: 

- на выходе в приемную устранить расхождение замкового соединения  

напольного покрытия из ламината, 

- устранить скол на напольном покрытии из ламината; 

- в кабинете № 8: 

- устранить расхождение обоев на стыках в углах; 

- заменить треснувшую потолочную плитку «армстронг»; - в кабинете № 7:  

- задекорировать полосу на входной двери с внутренней стороны, - устранить расхождение обоев на стыках в углах; 

- в кабинете № 3: - установить локальную сеть; 

- устранить расхождение замкового соединения напольного покрытия из  

ламината; 

- на стене между оконными проемами заделать отверстие; - на коробе вдоль оконного проема убрать подтеки от краски;  

- над датчиком движения у потолка заменить обои; 

- в санузле на половой плитке убрать подтеки от плиточного клея; - в кабинете № 4:  

- задекорировать полосу около входной двери; - убрать в углу короба под окном торчащие провода; 

- в холле 2-го этажа провод от локальной сети в месте перехода по потолочной балке  

убрать в кабель канал. 

Взыскать с ООО "Авангард Спецстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  

пользу МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого  

имущества города Н.Новгорода" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6 000 рублей  

государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную силу по  

заявлению взыскателя. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  

принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано  

в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской  

области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья С.В. Миронов