354/2020-189526(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-15995/2020

25 июня 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2020 года. Полный текст решения изготовлен 25 июня 2020 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Пивцаева Е.И.,  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСТРОЙ" (адрес:  Россия 192239, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/А/6-Н, ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОПТИМА" (адрес: Россия 188643,  г ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, ул ПУШКИНСКАЯ 107;  Россия 197374, Санкт-Петербург, ул Стародеревенская 11/2/407/1, ОГРН: 

<

***>;  

<

***>);  

о взыскании 1 098 247,50 руб. при участии от истца (заявителя) ФИО2, доверенность от 19.05.2020; от ответчика ФИО3, доверенность от 01.06.2020; 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Камстрой» (далее – Истец) обратилось в  арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Инвестиционная строительная компания «Оптима» (далее – Ответчик) о взыскании 963 375  руб. задолженности, 134 872,50 руб. неустойки.  

 Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  03.03.2020 суд назначил предварительное судебное заседание и судебное разбирательство на  20.05.2020.  

 Истец, ссылаясь на то, что после принятия иска к производству судом ответчик  частично погасил задолженность, заявил ходатайство об уточнении исковых требований и  просит взыскать 263 375 руб. задолженности, 221 708,37 руб. неустойки.  

 Частичный отказ от иска принят судом на основании пункта 2 статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права  других лиц, производство по делу в этой части подлежит прекращению, согласно пункту 4  статьи 150 АПК РФ.  

В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные требования с учетом  уточнений.  

Ответчик против удовлетворения иска возражал, заявил ходатайство о заключении  мирового соглашения.  

Ходатайство Ответчика о заключении мирового соглашения отклоняется судом,  поскольку Истец не согласен на заключение мирового соглашения.  

Ответчик заявил ходатайство о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации и просит снизить размер неустойки.  

 В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному  разбирательству», частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к  судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл  судебное разбирательство.  

Изучив и оценив материалы дела, суд установил следующее. 

01.06.2019 между ООО «Камстрой» (Поставщиком) и ООО «Оптима» (Покупателем)  заключен договор поставки № 3007/19/02 (далее – Договор), по условиям которого поставщик  обязался поставлять покупателю товар, а покупатель обязался принять и оплатить  поставленный товар.  

Во исполнение принятых на себя обязательств истец поставил ответчику товар на  общую сумму 963 375 руб., что подтверждается представленными в материалы дела  товарными накладными с отметками ответчика о получении товара.  

Ответчик не оплатил поставленный товар, в связи с чем, у него образовалась  задолженность в размере 963 375 руб.  

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате поставленного товара в  установленные договором сроки, истец направил в адрес ответчика претензию от 19.11.2019   № 71 с требованием о погашении задолженности.  

Оставление требования о выплате задолженности осталось без удовлетворения, что  послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым  заявлением.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает  заявленные требования истца подлежащими удовлетворению в связи со следующим.  

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не  допускается.  

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный  срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в  предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,  домашним и иным подобным использованием.  

В силу пункта 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с  соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если  соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются  платежными поручениями.  

Факт поставки товара ответчику подтверждается материалами дела. 

Поскольку доказательств оплаты истцу оставшейся суммы задолженности в размере 263  375 руб. ответчиком не представлено, иск в данной части подлежит удовлетворению.  

Учитывая, что ответчик частично оплатил задолженность, суд в части взыскания суммы  700 000 руб. производство по делу прекращает на основании пункта 4 статьи 150  Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными  законом или договором.  

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Согласно п. 8.1 Договора за просрочку оплаты товара, Покупатель обязан уплатить  Поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день  просрочки.  

В связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательства по оплате, истец в  соответствии с пунктом 8.1 Договора начислил ответчику неустойку в сумме 221 708,37 руб.  

Расчет суммы неустойки проверен судом и признан правильным. 

Поскольку, факт нарушения ответчиком обязательства по оплате поставленного товара  подтверждается материалами дела, требование истца о взыскании неустойки является  законным и обоснованным по праву.  

В отзыве на исковое заявление ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки  по правилам ст.333 ГК РФ. Суд отклоняет данное ходатайство в связи со следующим.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 69 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» (далее - Постановление № 7), подлежащая уплате неустойка, установленная  законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения  обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

Уменьшение размера взыскиваемой неустойки возможно на основании статьи 333 ГК  РФ лишь при условии, что указанный размер неустойки явно несоразмерен последствиям  нарушения обязательства.  

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 22.01.2004 № 13-О  указал, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа  обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки  предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения  обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.  

Возложение на суд решения вопроса об уменьшении размера неустойки при ее явной  несоразмерности последствиям нарушения обязательств вытекает из конституционных  прерогатив правосудия, которое по самой своей сути может признаваться таковым лишь при  условии, что оно отвечает требованиям справедливости (статья 14 Международного пакта о  гражданских и политических правах 1966 года).  

К выводу о наличии или отсутствии оснований для снижения суммы неустойки суд  приходит в каждом конкретном случае при оценке имеющихся в деле доказательств по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном их исследовании.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки  над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность  неисполнения обязательств и др.  

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности  по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых  

способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом,  то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц.  

Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет о необходимости  установления судом баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  оценкой реального размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Данная позиция изложена Конституционным Судом Российской Федерации в  определении от 21.12.2000 № 277-О.  

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, суд учитывает  добросовестность поведения истца как участника гражданского оборота. Ответчиком не  представлено доказательств чрезмерности заявляемой истцом неустойки, в связи с чем  заявленное ходатайство о снижении неустойки не представляется обоснованным и подлежит  отклонению.  

В нарушение статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил  допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в  обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной,  если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из  иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

Ввиду изложенного, исковые требования истца законны, обоснованны и подлежат  удовлетворению с учетом уточнений.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Принять отказ истца от иска в части взыскания 700 000 руб. задолженности. В  указанной части производство по делу прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная  компания «Оптима» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КАМСТРОЙ» 263  375 руб. задолженности, 221 708,37 руб. неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная  компания «Оптима» в доход федерального бюджета 24 851 руб. госпошлины  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Пивцаев Е.И. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.12.2019 10:52:39

 Кому выдана Пивцаев Евгений Игоревич