Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

14.05.2018.                                                     Дело № А40-234182/17-91-1970

г. Москва                                                                              

Резолютивная часть решения объявлена 11.04.2018 г.

Полный текст решения изготовлен 14.05.2018.

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.

при ведении протокола помощником судьи Байкуловым О.Р.

протокол ведется с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗВЕСТИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (125040, 

<

...>, ОГРН1027700497835, ИНН 

<

***>, д/р 05.12.2002)

к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЛЕГАСИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (119261, 

<

...>, ПОДЪЕЗД 12А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 14.01.2005)

третье лицо: Управление делами Президента

о взыскании неустойки в размере 55 750 000 руб.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 по дов. № 68 от 27.06.2017;

от ответчика – не явился, извещен.

от третьего лица – ФИО2 доверенность № УДИ-955 от 20.03.2018 г.

.

                                                                    УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ФГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗВЕСТИЯ" (далее - Истец) к ЗАО "ЛЕГАСИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (далее - Ответчик)  о взыскании неустойки в размере 55 750 000 руб.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав представителей истца и третьего лица, суд считает требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Ответчик в судебное заседание не явился, суд располагает доказательствами его уведомления о времени и месте проведения судебного заседания в соответствии со ст.123 АПК РФ, отзыв не представил.

Как усматривается из материалов дела между Истцом и Ответчиком заключен инвестиционный контракт № УД-271д  от 25.09.2006 на реализацию инвестиционного проекта комплексной реконструкции (включая демонтаж и новое строительство) с элементами реставрации существующих зданий и помещений нежилого назначения, принадлежащих Российской Федерации.

В соответствии со ст. 4 Контракта реализация инвестиционного проекта осуществляется в три этапа.

Первый этап предусматривает выполнение работ по реконструкции сохраняемых объектов, в том числе реставрация объектов культурного наследия по следующим адресам: ул. Пушкинская, 

<

...>

В соответствии с п. 4.1.8 Контракта в редакции дополнительного соглашения от 09.04.2015 № 6/УД-412д (далее - ДС № 6) и в результате подписания акта от 15.04.2015, свидетельствующего об обеспечении Истцом возможности Ответчику по освобождению части земельного участка, указанного в п. 1.7.1 Контракта (кадастровый номер: 77:01:0001098:1000), прилегающей непосредственно к зданию по адресу: 

<

...>, срок реализации первого этапа Контракта - 15.10.2015.

Работы по первому этапу Ответчиком не завершены

В соответствии с п. 10.1 Контракта в редакции ДС № 6 в случае нарушения Ответчиком срока окончания первого этапа работ Ответчик выплачивает Истцу неустойку в размере 150 000,00 руб. за каждый календарный день. При этом общая сумма выплаченной неустойки не может превышать 800 000 000,00 руб.

Ранее Ответчик  выплачивал Истцу неустойку за просрочку исполнения обязательств по первому этапу в добровольном порядке, в результате чего общая сумма выплат составила 78 350 000,00 руб. (оплата в полном объеме за период с 16.10.2015 по 22.03.2017 и частичная оплата за 23.03.2017 в размере 50 000,00 руб.).

Начиная с 23.03.2017 Ответчик перестал выплачивать Истцу неустойку в установленном Контрактом размере.

Письмом от 16.10.2017 № ГДИ-2360 (отправлено ценным письмом 18.10.2017) Истец направил Ответчику претензию с требованием перечислить неустойку за просрочку исполнения первого этапа Контракта по дату фактического перечисления денежных средств.

Претензия от 16.10.2017 № ГДИ-2360 Ответчиком оставлена без удовлетворения.

Таким образом, с 23.03.2017 по состоянию на 30.11.2017 сумма неустойки составляет 37 750 000,00 руб., из которых 100 000,00 руб. - за 23.03.2017, за которое Инвестором произведена частичная оплата в размере 50 000,00 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Расчет суммы штрафных санкций проверен судом и признан законным и обоснованным.

Ответчик иск не оспорил.

В силу положений ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иные доказательства, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины подлежат распределению в порядке статей 110, 112 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307,309,310 ГК РФ, ст.ст. 101-103,110,167-171, 226-229   АПК РФ, суд                  

  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕГАСИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (119261, 

<

...>, ПОДЪЕЗД 12А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, д/р 14.01.2005) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗВЕСТИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (125040, 

<

...>, ОГРН1027700497835, ИНН 

<

***>, д/р 05.12.2002) неустойку в размере 55.750.000 (Пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.; расходы на оплату госпошлины в размере 200.000 (Двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

С У Д Ь Я                                                                    Шудашова Я. Е.