Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-3988/2022

г. Петрозаводск

18 октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 октября 2022 года.   

Полный текст решения изготовлен   18 октября 2022 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Дементьева А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трофимовой М.Ю., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску  казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» (далее – истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «АГАТ» (далее – ответчик, ООО «РСК «Агат», Общество) о взыскании 4 000 871 руб. 37 коп., 

при участии представителя истца – ФИО1, по доверенности от  26.11.2021,

установил:

казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «АГАТ»  (далее – ответчик) о взыскании 4 000 871 руб. 37 коп. 

В обоснование требований истец ссылается на статьи 309, 310, 330, 395, 702, 715, 717, на положения главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на условия государственного контракта от 29.12.2020 № 9С-20 на выполнение работ по объекту «Реконструкция терапевтического корпуса республиканской больницы им. В.А. Баранова 1 отделения по ул. Пирогова, д. 3».

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

Судебное заседание проведено в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без участия представителя ответчика. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске и в дополнительных письменных пояснениях. 

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что по результатам открытого аукциона в электронной форме между КУ РК «УКС РК» (заказчик) и ООО «РСК «Агат» (подрядчик) заключен государственный контракт от 29.12.2020 № 9С-20 на выполнение работ по объекту «Реконструкция терапевтического корпуса республиканской больницы им. В.А. Баранова 1 отделения по ул. Пирогова, д. 3» (далее – контракт № 9С-20). 

По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы надлежащим образом не позднее 31.12.2021 согласно графику производства работ.

Стоимость работ составляет 34 239 339 руб. 05 коп., в том числе НДС 20% (пункт 3.1 контракта № 9С-20). 

Заказчик во исполнение условий контракта выплатил подрядчику авансовый платеж в общей сумме 17 119 669 руб. 5 коп. (платежное поручение № 732305 от 30.12.2020).

В ходе исполнения контракта на основании подписанных сторонами документов о приемке работ (акты по форме КС-2, КС-3) производился зачет авансовых сумм пропорционально объему фактически выполненных работ. 

Вместе с тем, Общество в установленные сроки не исполнило обязательства, предусмотренные контрактом № 9С-20, в полном объеме, в связи с чем, уведомлением № 1315/УКСи заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Уведомление содержит требование о возврате неотработанного аванса и об уплате неустойки в виде штрафа.

Поскольку в добровольном порядке денежные средства не возвращены, истец с соблюдением претензионного порядка обратился в суд с настоящим иском о взыскании с ответчика неотработанного аванса, штрафа по пункту 18.3.2 контракта № 9С-20 и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пункты 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 контракта № 9С-20 предусматривают право заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта от 11.04.2022 № 1315/УКСи заказчик разметил в единой информационной системе, а также надлежащим образом вручил подрядчику. 

В силу части 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, контракт между заказчиком и подрядчиком расторгнут с 29.04.2022.

На момент принятия решения об одностороннем расторжении контракта сумма неотработанного аванса составляла 3 777 552 руб. 37 коп.

Правоотношения сторон по спорному контракту являются подрядными и регулируются положениями главы 37 ГК РФ, а также номами Закона № 44-ФЗ. 

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Разделом 17 контракта № 9С-20 предусмотрено право заказчика на одностороннее расторжение контракта в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 14 дней.

В соответствии с пунктом 2 статьи 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых суд руководствуется правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, обязан немедленно приступить к его приемке. 

В материалах дела отсутствуют доказательства выполнения подрядчиком предусмотренных контрактом № 9С-20 работ и передачи их результата заказчику на сумму 3 777 552 руб. 37 коп. Ответчик соответствующие доказательства в суд не представил.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил факт невыполнения ответчиком работ в интересах истца на сумму аванса в размере 3 777 552 руб. 37 коп. Доказательств возврата полученных денежных средств ответчик в материалы дела не представил.

Требование о взыскании неотработанного аванса возможно только при наличии расторгнутого между сторонами договора подряда.

После прекращения договора полученный по нему аванс утрачивает платежную функцию и подлежит возврату на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При установленных обстоятельствах, требование истца о взыскании с ответчика неотработанного аванса в заявленном размере является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Статьей 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что контракт должен содержать обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В разделе 18 контракта № 9С-20 предусмотрены условия привлечения к ответственности сторон контракта; определен порядок начисления неустоек (пеней, штрафов) как для заказчика, так и для подрядчика.

Факты неисполнения промежуточного срока выполнения работ, невыполнения строительно-монтажных работ в срок до 30.09.2021, не предоставление актов выполненных работ установлены судом, подтвержден материалами дела и мотивированно не опровергнут ответчиком. Следовательно, заказчик вправе начислить штрафную санкцию по пункту 18.3.2 контракта №9-20.

Размер начисленного штрафа составляет 181 196 руб. 70 коп. (171 196 руб. 70 коп. неисполнение промежуточного срока выполнения работ, по 5 000 руб. за невыполнение строительно-монтажных работ в срок до 30.09.2021, не предоставление актов выполненных работ). Расчет судом проверен и признан правильным. В указанной части иск подлежит удовлетворению.

Из содержания пункта 2 статьи 1107 ГК РФ следует, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Из разъяснений, данных в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7), следует, что проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Кодекса, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Кодексе).

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами является мерой ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств и связано с фактом неправомерного пользования денежными средствами.

Согласно пункту  1 статьи  395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, поданным кредиторами» приостановлено взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек, пеней за просрочку уплаты налога или сбора, а также иных финансовых санкций на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Согласно сведениям из Единого федерального реестра сведений о банкротстве ответчик не заявлял об отказе от моратория.

Учитывая изложенное требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 42 122 руб. 30 коп. за период с 29.04.2022  по 26.05.2022 суд отказывает.

Таким образом, иск подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Агат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> ) в пользу казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 3 958 749 руб. 07 коп., в том числе: 3 777 552 руб. 37 коп. неосновательного обогащения, 181 196 руб. 70 коп. штрафных санкций. В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Агат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 45 551 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Дементьева А.В.