АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А57-33396/2023

город Саратов

13 января 2025 года

Руководствуясь статьями 27, 29, 110, 167-171, 177, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Проектстройреставрация»  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) исполнить гарантийные обязательства в рамках  

исполнения контракта от 29.03.2021 № 0360300156721000003/1 на здании отдела истории  

МУ ФИО1 краеведческий музей на памятнике архитектуры и градостроительства  

федерального значения «Здание городской управы», XIX в., а именно: 

1. Смонтировать водоотводящие лотки в основании балюстрады на балконе в  

выполненных водоотводящих каналах; 

2. Выполнить работы по устранению протечек влаги на полах балкона в  

соответствии с техническим решением от 17.07.2024г., 

3. Выполнить герметизацию стыка покрытия пола балкона и основания  

балюстрады в соответствии с техническим решением от 17.07.2024г., 

4. Выполнить ремонт лакокрасочного покрытия оконных блоков с соблюдением  

оригинального покрытия, исключив видимые следы нанесения и стыки нового и старого  

покрытия. 

5. Устранить трещины и пазы между оконными блоками, откосами и  

подоконниками на 1 этаже. 

6. Устранить замачивание подвального помещения и восстановить разрушенную  

кирпичную кладку. 7. Выполнить замену поврежденной плитки на крыльце главного входа. 

8. Установить недостающее оборудование для санузла (поручни, кнопки для МГН,  

осушители рук). 9. Выполнить ремонт и окраску в помещении 2.01. 

10. Устранить неоднородность красочного слоя и непокраску отдельных мест  

фасадов. 11. Устранить ржавчину на металлических конструкциях пожарной лестницы. 

12. Установить отвод воды с конструкций площадок пожарной лестницы. 13. Устранить неравномерность окраски подоконников..  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектстройреставрация»  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  

истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции в  

порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом решения.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья А.Т. Сериккалиева