100000157_1550149  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-9304/2021

23 июня 2022 года

г. Барнаул

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания «Петровское» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  место нахождения: 656050, 

<

...>) к  некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края  

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ОГРН 

<

***>, 

ИНН 

<

***>), место нахождения: 656031,

<

...>) об обязании устранить недостатки, с привлечением к участию в деле в качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,  общества с ограниченной ответственностью «Леан» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), место нахождения: 656058, 

<

...>), общества с ограниченной ответственностью «Системастрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), место нахождения: 656031, Алтайский край,  

<

...>, помещ. Н 8), 

при участии в заседании: 

от истца: ФИО2 - представителя по доверенности;  от ответчика: не явился;  

от третьего лица - ООО «Системастрой»: ФИО3 - представителя по  доверенности; ФИО4 - представителя по доверенности,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать некоммерческую организацию «Региональный оператор Алтайского края  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в течение 6 месяцев со дня  вступления настоящего решения в законную силу устранить недостатки, допущенные при  капитальном ремонте плоской крыши многоквартирного дома № 142 по ул. Георгия  Исакова в г. Барнауле, путем выполнения следующих работ:  

- демонтаж водоизоляционного ковра и примыканий к вертикальным элементам  вентиляционных шахт и труб, в том числе и демонтаж старого слежавшегося кровельного  материала;  

- демонтаж новой цементно-песчаной стяжки и остатков не демонтированной  ранее старой стяжки;  

- монтаж цементно-песчаной стяжки с учетом требований строительных норм и  правил;  

- монтаж рулонной кровли с учетом требований строительных норм и правил; - устройство организованного водостока и снегозадерживающих устройств; 

- устройство деформационного шва в конструкции крыши над деформационным  швом здания;  

- полная замена утеплителя на более эффективный с заменой пароизоляционного  слоя.  

Взыскать с некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания «Петровское»  6 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 50 000 руб.  в счет возмещения судебных издержек по экспернтизе.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 04.02.2022 0:59:40

 Кому выдана Сосин Евгений Александрович