﻿

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-64600/2021

28 ноября 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 ноября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  28 ноября 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бурмистровым Е. В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙВЫСОТРЕГИОН" (адрес:  Россия 199397, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ 30/ЛИТ. А/ПОМ. 67Н, ОГРН:  1027806056189);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕХСТРОЙ" (адрес:  Россия 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей 16/2/А/28-Н, ОГРН:  1197847188241);

о взыскании,

при участии

- от истца: представитель Воронова О. Н. (доверенность от 16.11.2021 г.),

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройВысотРегион» (Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ФинТехСтрой» (Ответчик) о взыскании:

1) 29 326 896,14 рублей суммы неотработанного аванса по договорам подряда,

2) 124 586,86 рубле суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам № 27/З-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г., № 28/З-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г. за период с 04.05.2021 г. по 28.06.2021 г., а также проценты, начиная с 29.06.2021 г. по дату вынесения решения по делу,

3) 78 282,72 рублей суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ по договорам № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 за период с 28.05.2021 г. по 06.07.2021 г., а также проценты, начиная с 07.07.2021 г. по дату вынесения решения по делу.

4) 4 431 619,57 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по договорам № 27/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г., № 28/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г. за период с 04.06.2020 г. по 28.06.2021 г., а также проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса, начиная с 29.06.2021 г. по дату вынесения решения по делу,

5) 4 515 636,80 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по Договорам подряда № 01 /3-21 /19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21 /19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, за период с 17.03.2020 г. по 06.07.2021 г., а также проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса, начиная с 07.07.2021 г. по дату вынесения решения по делу,

6) 16 640 920,86 рублей суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договорам № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020,№ 03/3-21/19-43/2020 от25 февраля 2020,№ 04/3-21/19-43/2020 от25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 за период с 01.08.2020 г. по 27.05.2021 г.,

7) 4 329 934,98 рублей суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договорам № 27/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г., № 28/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г. за период с 21.09.2020 г. по 27.04.2021 г.,

8) 35 000 рублей суммы штрафа за несвоевременное возвращение строительной площадки по Договорам подряда,

9) 35 000 рублей суммы штрафа за несвоевременную передачу исполнительной документации по Договорам подряда,

а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей.

Истец в ходе рассмотрения дела поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, своего представителя не направил, отзыв на иск не представил. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие представителя Ответчика, который извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ.

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между Истцом (Подрядчик) и Ответчиком (Субподрядчик) были заключены и исполнялись Договора подряда:

- № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г., на устройство северной части наружных сетей водоснабжения: от точки 1 до точки 5, от точки 5 до точки 14,

- №02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г., на устройство восточной части наружных сетей водоснабжения: вдоль манежа и насосной,

- № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г., на устройство южной части наружных сетей водоснабжения: вдоль Корпуса 22, Школы, Корпуса 3, гаража,

- № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г., на устройство западной части наружных сетей водоснабжения: вдоль корпуса 1,

- № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г., на устройство северной части наружных сетей водоснабжения: от точки 4 до точки 13, от точки 13 до точки 17,

- № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.07.2020 г. на устройство 5-ти мачт освещения,

- №28/3-21/19-43/2020 от01 июня 2020 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 20.07.2020 г. на устройство 4-х мачт освещения на объекте: «Реконструкция с элементами реставрации и новое строительство объектов Военного института физической культуры», по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект., д. 63, в/г № 55 (шифр объекта 3-21/19-43). 

Стоимость подлежащих выполнению Работ согласно п. 3.1. Договоров составляет:

- по договору № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. - 8 525 985,67 рублей,

- по договору № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. - 11 709 292,71 рублей,

- по договору №03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. - 16 039 373,11 рублей,

- по договору № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. - 16 302 914,64 рублей,

- № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. - 4 576 804,66 рублей,

- по Договору № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г. - 10 984 107,00 рублей,

- по Договору № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г., - 8 787 285,60 рублей,

В соответствии с условиями Договора Истец перечислил Ответчику по договорам авансы:

Номер и дата договора подряда

Платежное поручение

Итого сумма аванса

№ 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

№4761 от 17.03.2020 г. на сумму 6 820 788,54 руб.

6 820 788,54 руб.

№ 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

№ 4759 от 17.03.2020 г. на сумму 9 367 434,16 руб.

9 367 434,16 руб.

№03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г

№4757 от 17.03.2020 г. на сумму 9 198 033,84 руб.,

№ 6260 от 26.06.2020 г. на сумму 3 633 464,65 руб.,

№ 7584 от 29.09.2020 г. на сумму 1 600 000,00 руб.

14 431 498,49 руб.

№04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

№ 4758 от 17.03.2020 г. на сумму 6 312 299,71 руб., 

№7116 от 27.08.2020 г. на сумму 6 730 032,00 руб.

13 042 331,71 руб.

№ 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

№ 4760 от 17.03.2020 г. на сумму 3 661 443,72 руб.

3 661443,72 руб.

№27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г.

№ 5995 от 04.06.2020 г. на сумму 3 978 631,04 руб.,

№ 7115 от 27.08.2020 г. на сумму 4 808 654,56 руб.

8 787 285,60 руб.

№28/3-21/19-43/2020 от01 июня 2020 г.

№ 5994 от 04.06.2020 г. на сумму 2 983 973,28 руб., 

№ 7117 от 28.08.2020 г. на сумму 4 045 855,20 руб.

7 029 828,48 руб.

Итого по договорам сумма аванса

29 326 896,14 руб.

В соответствии с п. п. 5.1, 5.2. Договоров № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 «5.1. Дата начала работ: дата вступления Договора. 5.2. Дата окончания работ: выполнение строительно-монтажных работ: 30 июня 2020 г., подписание итогового акта приемки выполненных работ: 30 июля 2020 г.».

В соответствии с п. п. 5.1, 5.2. Договоров № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г., По Договору № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г «5.1. Дата начала работ: дата вступления Договора. 5.2. Дата окончания работ: выполнение строительно-монтажных работ: 20 сентября 2020 г., подписание итогового акта приемки выполненных работ: 30.09.2020 г.».

Согласно п.8.2.20 Договоров Субподрядчик обязан обеспечить «8.2.20.1. Производство Работ в сроки, установленные Договором».

Однако в установленный Договорами № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020, № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 срок работы не выполнены, исполнительная документация не предоставлена. Мачты не поставлены в количестве согласованном в договоре. Мачты не оснащены прожекторами. Просрочка выполнения работ составляет более 6 месяцев, что является существенным нарушением условий Договора.

По Договором № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 в установленный договорами срок работы в полном объеме не выполнены. Подрядчик принял работы частично:

- по Договору подряда № 01/3-21/19-43/2020 от 25.02.2020 г. по акту приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 03.11.2020 на сумму 5 044 150,46 (Пять миллионов сорок четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 46 копеек, в том числе НДС 20%. Стоимость выполненных работ и затрат согласно справке КС-3 № 1 от 03.11.2020 составляет 5 044 150,46 рублей.

- по Договору подряда № 02/3-21/19-43/2020 от 25.02.2020 г. по акту приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 03.11.2020 на сумму 6 927 461,12 (Шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 20%. Стоимость выполненных работ и затрат согласно справке КС-3 № I от 03.11.2020 составляет 6 927 461,12 рублей.

- по Договору подряда № 03/3-21/19-43/2020 от 25.02.2020 г. по акту приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 03.11.2020 на сумму 9 489 226,75 (Девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%. Стоимость выполненных работ и затрат согласно справке КС-3 № 1 от 03.11.2020 составляет 9 489 226,75 рублей.

- по Договору подряда № 04/3-21/19-43/2020 от 25.02.2020 г. по акту приемки выполненных работ КС-2 № 1 от 03.11.2020 насумму9645 143,40(Девять миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто сорок три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20%. Стоимость выполненных работ и затрат согласно справке КС-3 № 1 от 03.11.2020 составляет 9 645 143,40 рублей.

- по Договору подряда № 06/3-21/19-43/2020 от 25.02.2020 г. по акту приемки выполненных работ КС-2 № 1 отОЗ.11.2020 на сумму 2 707 732,83 (Два миллиона семьсот семь тысяч семьсот тридцать два) рубля 83 копеек, в том числе НДС 20%. Стоимость выполненных работ и затрат согласно справке КС-3 № 1 от 03.11.2020 составляет 2 707 732,83 рублей.

Истец указывает, что просрочка выполнения работ составляет более 9 (Девяти) месяцев, что является существенным нарушением условий Договора. Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ в установленном Договорами порядке не осуществлялась.

Согласно п. 13.1.1. Договоров «Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по Журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)».

В соответствии с п.13.1.3. Договоров ((Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения. Субподрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.».

В соответствии с п.13.3. Договоров «Подрядчик приступает к приемке законченного реконструкцией (реставрацией) Объекта не позднее чем через 10 (десять) дней после получения письменного извещения Субподрядчика о готовности к сдаче Результата работ.

Согласно п.13.4. Договоров «Субподрядчик передает Подрядчику за 10 (десять) дней до начала приемки законченного реконструкцией (реставрацией) Объекта документы, согласно Перечню документов указанных в разделе 23 Договора, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.».

Согласно п. 13.1.2. Договоров «Субподрядчик предоставляет Подрядчику первичные учетные документы, а также Исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа текущего (отчетного) месяца.».

В нарушение условий Договоров надлежащим образом оформленные первичные учетные документы и документация Подрядчику не передавались.

Нарушение срока выполнения работ, неисполнение Субподрядчиком своих обязательств предоставило Истцу право на расторжение Договоров в одностороннем порядке по вине Ответчика (п. 19.5.1., п.19.6. Договора).

Договоры подряда № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020, № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г., были расторгнуты Истцом в одностороннем порядке с 27.04.2021 г. и заявлено требование в течение 5 банковских дней вернуть сумму неотработанных авансов, о чем Субподрядчику было направлено соответствующие Уведомления исх. № 318, № 319 от 27.04.2021 г. РПО № 19939754427246.

Договора подряда № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 были расторгнуты Истцом в одностороннем порядке с 21.05.2021 г. и заявлено требование в течение 5 банковских дней вернуть сумму неотработанных авансов, о чем Субподрядчику было направлено соответствующие Уведомления исх. № 386, № 387, №388,№389,№390от21.05.2021 г. РПО№ 19939754015306. Согласно п. 19.6 Договора «В случае одностороннего расторжения Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении Подрядчика».

Ответчик не возвратил Истцу неотработанные авансы в сумме:

Номер и дата договора подряда

Итого сумма аванса

№ 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

6 820 788,54 руб.

Х° 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

9 367 434,16 руб.

№ 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

14 431 498,49 руб.

№ 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

13 042 331,71 руб.

№ 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020

3 661 443,72 руб.

№ 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020

8 787 285,60 руб.

№28/3-21/19-43/2020 от01 июня 2020

7 029 828,48 руб.

Итого по договорам сумма аванса

29 326 896,14 руб.

20.05.2021 г. Истец в Претензиях № 381,№382 потребовал у Ответчика возврата денежных средств по Договорам подряда № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020, № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г., оплаты неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование коммерческим кредитом. Претензии № 381, № 382 направлены в адрес Ответчика 21.05.2021 г. РПО 19939754015269. Претензии также оставлены без ответа и удовлетворения.

03.06.2021 г. Истец в Претензиях № 433, № 434, № 435, № 436, № 437 потребовал у Ответчика возврата денежных средств по Договора подряда № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, оплаты неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование коммерческим кредитом. Претензии № 433, № 434, № 435, № 436, № 437 направлены в адрес Ответчика 21.05.2021 г. РПО19939754031511. Претензии также оставлены без ответа и удовлетворения.

Исходя из условий Договоров и положений действующего законодательства РФ, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика возврата исполненного обязательства по договорам, включая неотработанный аванс, в качестве неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ) в том случае, если к моменту расторжения договоров им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленных авансов.

Таким образом, требование о возврате неотработанных авансов в сумме 1 776 638,08 рублен, 2 439 973,04 рублен, 4 942 271,74 руб., 3 397 188,31 руб., 953 710,89 руб., 8 787 285,60 руб., 7 029 828,48 руб. Итого: 29 326 896,14 рублей является законным и обоснованным.

Пунктом 17.1 Договоров установлено, что «При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором».

Согласно п.19.8. Договоров «При расторжении Договора до завершения работ Субподрядчик возвращает Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи...».

Исходя из изложенного, срок по возврату суммы неотработанного аванса по Договорам подряда № 27/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020, № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г. составляет 27.04.2021 г. + 5 банковских дней = 03.05.2021 г., следовательно, с 04.05.2021 г. наступает гражданско-правовая ответственность Субподрядчика за неисполнение обязательства.

Срок по возврату суммы неотработанного аванса по Договорам подряда № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 составляет 21.05.2021 г. + 5 банковских дней = 27.05.2021 г., следовательно, с 28.05.2021 г. наступает гражданско-правовая ответственность Субподрядчика за неисполнение обязательства.

Также Истец полагает начислить проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке положений ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), проценты за пользование коммерческим кредитом с учетом п. 4.19 договоров, пени за просрочку выполнения работ согласно п. 17.3, 17.4 договоров, а также штрафа за несвоевременную передачу исполнительной документации и несвоевременное освобождение строительной площадки в порядке положений п. п. 8.2.17, 8.2.26, 17.5, 17.7, 19.8 договоров согласно следующим расчетам:

Расчет к иску по договору подряда № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. В связи с тем, что Ответчик не исполнил обязанности по возврату суммы неотработанного аванса, Истец имеет право требовать оплаты процентов за пользование по ст. 395 ГК РФ.

Период просрочки

Сумма

неотработанного аванса, руб.

Ключевая ставка

Сумма процентов, руб.

с 28.05.2021 г. по 13.06.2021 г.-17 дн.

1 776 638,08 руб.

5,00

1 776 638,08 руб. * 5,00% / 365 дн. *17дн. = 4137,38руб.

с 14.06.2021 г. по 06.07.2021 г.-23 дн.

1 776 638,08 руб.

5,50

I 776 638,08 руб. * 5,50% / 365 дн. *23ди. =6157,39руб.

итого

10 294,77рублей

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом п. 4.19. Договора:

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ: ((9,40 (март2020) + 9,94 (апр.2020) + 9,91 (май 2020) + 9,43 (июнь 2020) + 8,27 (июль 2020) + 7,69 (авг.2020) +7,54 (сент.2020) + 8,49 (окт.2020) + 8,56 (ноябрь2020) + 8,13 (дек.2020) + 8,27 (япв.2021) + 8,07 (февр.2021) + 8,07 (март2021)) /13 мес. = 8,59%

Дата перечисления аванса

Сумма

аванса

Период пользования

Средняя ставка

коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ

Сумма процентов, в руб.

17.03.2020

1 776638.08

17.03.2020-06.07.2021

477 дн.

8.59%

1 776   638,08   * 8.59 % * 0,01 * 477 дн. =    727 965,01

Расчет по п. 17.4. Договора «В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных сроков этапов Работ, установленных в пункте 5.2. настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ».

Период просрочки

Стоимость подлежащих выполнению работ, руб. п.3.1. Договора

Сумма неустойки, руб.

с 01.08.2020 г.

по 27.05.2021 г.   300 дн.

8525 985,67

8525 985,67руб. *0,1% *300дн. = 2 557 795,70

 

Согласно п. 4.19. Договоров «В случае неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором в срок, установленный пунктом 5.2. Договора, и (или) в случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, субподрядчик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) утачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательства, а в случае расторжения Договора, в порядке, предусмотренным пунктом 19.5.1 настоящего Договора, и возникновении в связи с этим у Субподрядчика обязанности по возврату аванса - по день фактического возврата аванса. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) средней ставки коммерческого кредита,

Расчет к иску по договору подряда № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г. в связи с тем, что Ответчик не исполнил обязанности по возврату суммы неотработанного аванса, Истец имеет право требовать оплаты процентов за пользование по ст. 395 ГК РФ.

Период просрочки

Сумма

неотработанного аванса, руб.

Ключевая ставка

Сумма процентов, руб.

с 28.05.2021 г. по 13.06.2021 г.-17дн.

2 439 973,04 руб.

5,00

2 439 973,04руб. * 5,00%/365 дн. * 17 дн. =5 682,13 руб.

с 14.06.2021 г. по 06.07.2021 г.-23 дн.

2 439 973,04 руб.

5,50

2 439 973,04руб. *5,50%/365 дн. *23дн. =8 456,34руб.

итого

14 138,47рублей

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом п. 4.19. Договора

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ: ((9,40 (март2020) + 9,94 (апр.2020) + 9,91 (май 2020) + 9,43 (июнь 2020) + 8,27 (июль 2020) + 7,69 (авг.2020) +7,54 (сеит.2020) + 8,49 (окт.2020) + 8,56 (ноябрь2020) + 8,13 (дек.2020) + 8,27 (яив.2021) + 8,07

Дата

перечисления аванса

Сумма аванса

Период пользования

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ

Сумма

процентов, в руб.

17.03.2020

2 439 973,04

17.03.2020-06.07.2021

477 дн.

8,59%

2 439   973,04   * 8,59 % * 0,01 * 477 дн.   =  999 761,87

Расчет по п.17.4. Договора «В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных сроков этапов Работ, установленных в пункте 5.2 настоящего Договора, Субподрядчик вытачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ».

Период просрочки

Стоимость подлежащих выполнению работ, руб. п.3.1. Договора

Сумма неустойки, руб.

с 01.08.2020 г. по 27.05.2021 г. 300 дн.

11 709 292,71

11 709 292,71 руб. * 0,1% *300 дн. = 3 512 787,81

Расчет к иску по договору подряда № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 г.  

Период просрочки

Сумма

неотработанного аванса, руб.

Ключевая ставка

Сумма процентов, руб.

с 28.05.2021 г. по 13.06.2021 г.-17 дн.

4 942 2 71,74 руб.

5,00

4 942 271,74 руб. * 5,00% / 365 дн. *17дн. =11 509.40руб.

с 14.06.2021 г. по 06.07.2021 г.-23дн.

4 942 271,74 руб.

5,50

4 942 271,74 руб. * 5,50% / 365 дн. *23дн. = 17 128.70руб.

итого

28 638,10рублей

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом п. 4.19. Договора

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ: 9,43 (июнь 2020) + 8,27 (июль 2020) + 7,69 (авг.2020) +7,54 (сент.2020) + 8,49 (окт.2020) + 8,56 (поябрь2020) + 8,13 (дек.2020) + 8.27 (янв.2021) + 8,07 (февр.2021) + 8.07 (март2021))10 мес.= 8.25%

Дата

перечисления аванса

Сумма аванса

Период пользования

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ

Сумма

процентов, в руб.

26.06.2020

4 942 271,74

26.06.2020-06.07.2021

376 дн.

8,25%

4 942 271,74 * 8,25 % * 0.01 * 376 дн. = 1533 092.69

Расчет по п.17.4. Договора «В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных сроков этапов Работ, установленных в пункте 5.2. настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ».

Период просрочки

Стоимость подлежащих выполнению работ, руб. п.3.1. Договора

Сумма неустойки, руб.

с 01.08.2020 г.

по 27.05.2021 г.   300 дн.

16 039 373,11

16 039373,11 руб. *0,1%*300дн. = 4811 811.93

Расчет к иску по договору подряда № 28/3-21/19-43/2020 от 01 июня 2020 г. в  связи  с  тем,   что  Ответчик  не  исполнил  обязанности  по  возврату  суммы неотработанного аванса, Истец имеет право требовать оплаты процентов за пользование по ст. 395 ГК РФ.

Период просрочки

Сумма

неотработанного аванса, руб.

Ключевая ставка

Сумма процентов, руб.

с 04.05.2021 г. по

13.06.2021 г.-41 дн.

7 029 828,48 руб.

5,00

7 029 828,48 руб. * 5,00% / 365 дн. *41 дн. = 39 482,60руб.

с 14.06.2021 г. по

28.06.2021 г.-15 дн.

7 029 828,48 руб.

5,50

7 029 828,48 руб. * 5,50% / 365 дн. * 15 дн, = 15 889,34руб.

итого

55 3 71,94руб.

Расчет процентов за пользование коммерческим кредитом п. 4.19. Договора.

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ: (9,43 (июнь 2020) + 8,27 (июль 2020) + 7,69 (авг.2020) +7,54 (сент.2020) + 8,49 (окт.2020) + 8,56 (ноябрь2020) + 8,13 (дек.2020) + 8,27 (янв.2021) + 8,07 (февр.2021) + 8,07 (март2021))/ 10 мес. = 8,25%

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ: 7,69 (авг.2020) +7,54 (сент.2020) + 8,49 (окт.2020) + 8,56 (ноябрь2020) + 8,13 (дек.2020) + 8,27 (янв.2021) + 8,07 (февр.2021) + 8,07 (март2021)/8 мес. =8,10%

Дата

перечисления аванса

Сумма аванса

Период пользования

Средняя ставка коммерческого кредита, установленная ЦБ РФ

Сумма

процентов, в руб.

04.06.2020

2 983 973,28

04.06.2020-28.06.2021 390 дн.

8,25%

2 983 973,28 * 8,25 % * 0,01 * 390 дн. = 960 093,40

28.08.2020

4 045 855,20

28.08.2020-28.06.2021

305 дн.

8,10%

4045855,20 * 8,10 % * 0,01 * 305 дн. = 999 528,52

ИТОГО:

7029 828,48

 

1 959 621,92

Расчет по п.17.4. Договора «В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных сроков этапов Работ, установленных в пункте 5.2. настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ».

Период просрочки

Стоимость подлежащих     выполнению работ, руб. 

п. 3.1. Договора

Сумма неустойки, руб.

с 21.09.2020 г.

по 27.04.2021 г.   219 дн.

8 787285,60

8 787 285,60руб. * 0,1% * 219 дн. = 1 924 415,55

Поскольку Ответчик не удовлетворил требований претензии, Истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, в порядке положений ст. 71 АПК РФ, суд полагает требования Истца подлежащими удовлетворению в части. 

В соответствии с ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ, независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

По смыслу указанной статьи и в соответствии со ст. 65 АПК РФ Истец по требованию о взыскании неосновательного обогащения должен доказать факт приобретения либо сбережения Ответчиком имущества, принадлежащего Истцу, отсутствие у Ответчика для этого правовых оснований, период такого пользования, а также размер суммы неосновательного обогащения.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 	

Как следует из материалов дела, денежные средства были перечислены на расчетный счет Ответчика, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

В силу положений п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Учитывая изложенное, принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора в уведомлениях о расторжении договоров, суд полагает, что договоры считаются расторгнутыми Истцом в порядке положений ст. 450.1, ч. 2 ст. 715 ГК РФ.

В силу п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

В материалы дела Ответчиком не было представлено относимых и допустимых доказательств в опровержение факта перечисления денежных средств, а также не представлено доказательств выполнения работ в полном объеме либо возврата Истцу полученных денежных средств, в связи с чем Ответчика следует признать лицом, неосновательно удерживающим денежные средства (ст. 1102 ГК РФ).

Требование Истца о взыскании денежных средств как неосновательного обогащения подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению с учетом вышеуказанных положений законодательства Российской Федерации.

Относительно требования о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ, начисления процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ суд полагает требование Истца обоснованным по праву согласно представленному расчету.

В отношении требования о начислении процентов за пользование коммерческим кредитом требования в порядке положений ст. ст. 329, 330, 823 ГК РФ подлежат удовлетворению с учетом положений п. 4.19 договоров, согласно которому в случае неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок, установленный пунктом 5.2. Договора, и (или) в случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Субподрядчик лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом), и к авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части) уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по день фактического исполнения обязательств, а в случае расторжения Договора, в порядке, предусмотренным пунктом 19.5.1 настоящего Договора, и возникновении в связи с этим у Субподрядчика обязанности по возврату аванса - по день фактического возврата аванса. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) средней ставки коммерческого кредита, установленной Центральным банком Российской Федерации, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.  

Принимая во внимание установленные обстоятельства, руководствуясь положениями п. 3 ст. 395 ГК РФ, требование Истца о начислении процентов на сумму неотработанного аванса и за пользование коммерческим кредитом, до момента фактического исполнения обязательства по оплате задолженности обосновано и подлежит удовлетворению.   

Требование о взыскании пени за нарушение сроков исполнения работ судом признается обоснованным по праву и по размеру с учетом положений п. 17.3 договоров (В случае просрочки исполнения Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Субподрядчиком исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора, уменьшенной на стоимость фактически выполненных Работ, что подтверждается подписанным Актом о приемке выполненных работ (услуг), за каждый факт просрочки) и п. 17.4 договоров (в случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ/промежуточных сроков этапов Работ, установленных в пункте 5.2. настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, не выполненных в надлежащий срок, за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ).

В отношении начисления сумма штрафа за нарушение обязательств по передаче исполнительной документации и освобождения строительной площадки суд также полагает обоснованными заявленные Истцом требования, учитывая положения договоров.

Согласно п. 8.2.17 договоров субподрядчик обязан вывезти в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания работ за пределы Строительной площадки Материалы, Изделия, Конструкции, Строительную технику, Временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Субподрядчику.

При расторжении Договора до завершения работ Субподрядчик возвращает Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи, и незавершенный строительством Объект, и представляет Подрядчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, документы, подтверждающие стоимость выполненных Работ, а также освобождает строительную площадку с результатом выполненных Работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора и передает Подрядчику Проектную, Рабочую и Исполнительную документации (п. 19.8 договоров).

Согласно п. 17.5 договоров, субподрядчик несет ответственность за несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего ему имущества, в данном случае Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф) в размере, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

За несвоевременное предоставление Субподрядчиком исполнительной документации Подрядчику, в том числе при досрочном расторжении настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить неустойку (штраф) Подрядчику в размере, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (п. 17.7 договоров).

Согласно п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. за каждый факт неисполнения или неналежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000 рублей (п. «б»). 

Основания для снижения неустойки в порядке положений п. 1 ст. 333 ГК РФ с учетом разъяснений в п. п. 71, 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в рамках настоящего дела отсутствуют.

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФинТехСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройВысотРегион»:

-  29 326 896,14 рублей суммы неотработанного аванса по договорам подряда,

- 124 586,86 рублей суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам № 27/З-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г., № 28/З-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г. за период с 04.05.2021 г. по 28.06.2021 г., 

- начислить проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 29.06.2021 г. по дату вынесения решения по делу в отношении неоплаченной части суммы задолженности в размере 15 817 114,08 рублей,

- 78 282,72 рубля суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ по договорам № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 за период с 28.05.2021 г. по 06.07.2021 г., 

- начислить проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 07.07.2021 г. по дату вынесения решения по делу в отношении неоплаченной части суммы задолженности в размере 13 509 782,06 рублей, 

- 4 431 619,57 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по договорам № 27/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г., № 28/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г. за период с 04.06.2020 г. по 28.06.2021 г., 

- начислить проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса, начиная с 29.06.2021 г. по дату вынесения решения по делу в отношении неоплаченной части суммы задолженности в размере 15 817 114,08 рублей, 

- 4 515 636,80 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса по Договорам подряда № 01 /3-21 /19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21 /19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 04/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, за период с 17.03.2020 г. по 06.07.2021 г., 

- начислить проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса, начиная с 07.07.2021 г. по дату вынесения решения по делу, в отношении неоплаченной части суммы задолженности в размере 13 509 782,06 рублей,  

- 16 640 920,86 рублей суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договорам № 01/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020, № 02/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020,№ 03/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020,№ 04/3-21/19-43/2020 от25 февраля 2020, № 06/3-21/19-43/2020 от 25 февраля 2020 за период с 01.08.2020 г. по 27.05.2021 г.,

- 4 329 934,98 рубля суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договорам № 27/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г., № 28/3-21/19-43/2020 от 01.06.2020 г. за период с 21.09.2020 г. по 27.04.2021 г.,

- 35 000 рублей суммы штрафа за несвоевременное возвращение строительной площадки по Договорам подряда,

- 35 000 рублей суммы штрафа за несвоевременную передачу исполнительной документации по Договорам подряда,

- расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья 							Киселева А.О.