268/2023-91365(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000 8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-4/2023

11 сентября 2023 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2023 года, решение в полном объёме изготовлено 11 сентября 2023 года. 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи А. Е. Босова, 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарём А. Ю. Саух,  с участием представителей  

от истца: ФИО1 по доверенности от 06.09.2022 № 142-по, ФИО2 по доверенности от 28.06.2023 № 137-по, от третьего лица: Л. П. Зин по доверенности от 01.01.2023 № 11/2023-01, 

ФИО3 по доверенности от 08.03.2023 № 170,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Регионэкопроект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований  относительно предмета спора (на стороне истца), —  

публично-правовая компания «Роскадастр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

и установил:  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми  (Министерство, заказчик) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью «Регионэкопроект» (Общество,  исполнитель) об обязании устранить выявленные недостатки оказанных услуг  по государственному контракту на оказание услуг по установлению местоположения  береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ  прибрежных защитных полос рек Летка, Луза на территории муниципального образования  муниципального района «Прилузский» Республики Коми от 05.10.2020   № 0307200030620001855 (Контракт).  

Исковые требования мотивированы тем, что в гарантийный период (в течение  трёх лет со дня подписания акта приёмки оказанных услуг от 08.12.2020 № 2) были  выявлены дефекты, препятствующие реализации цели Контракта — постановке объектов  на кадастровый учёт. 20.07.2022 Обществу была направлена претензия от 20.07.2022   № 02-06-6592, которая оставлена без исполнения.  

Считаясь надлежащим образом извещённым о судебном процессе, Общество  не обеспечило ни отзыв, ни явку представителя, в том числе и после признания явки  обязательной.  

Министерство со ссылкой на письма филиала публично-правовую компанию  «Роскадастр» (Роскадастр) по Республике Коми корректировало требования. В финальном  уточнении (от 08.09.2023) — с учётом пояснений представителей Министерства  в заседании 11.09.2023 — истец просил обязать ответчика:  

2.1. В соответствии с порядком, установленным приказом Росреестра  от 01.06.2021 № П/0241, дополнить cформированные в электронном виде документы  по описанию местоположения береговых линий (границ водных объектов) рек Луза, Летка  реквизитами решения уполномоченного органа об установлении береговой линии  (границы водного объекта) — приказа Министерства природных ресурсов и охраны  окружающей среды Республики Коми «Об утверждении перечня координат характерных  точек береговой линии (границы водного объекта), перечня координат и опорных точек  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Летка, Луза  на территории МО МР «Прилузский» Республики Коми» от 07.12.2020 № 2247.  

2.2. В описании местоположения береговых линий (границ водных объектов) рек  Луза, Летка (в формате mif) корректно сформировать формат количества ординат:  Multiple. Без использования кириллицы (русских букв).  

2.3. XML-файлы ZoneToGKN, содержащие сведения о водоохранной зоне рек  Луза, Летка, откорректировать в соответствии с приказом Росреестра от 01.08.2014   № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного  кадастра недвижимости в электронном виде» следующим образом:  

- корректно заполнить элемент «CodeZone» (наименование зоны  по классификатору);  

- в элементе «SourcePublication» дополнить информацией об источнике  официального опубликования;  

- в элементе «ContentRestrictions» (содержание ограничений) по описанию  местоположения границ водоохранных зон Луза, Летка на территории МО МР  «Прилузский» Республики Коми» прописать ограничения использования объектов  недвижимости в пределах ЗОУИТ в соответствии с приказом Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми «Об утверждении перечня  координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта), перечня  координат и опорных точек границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных  полос рек Луза, Летка на территории МО МР «Прилузский» Республики Коми»  от 07.12.2020 № 2247.  

Уточнение принято к рассмотрению (часть 1 статьи 49 АПК РФ). 

На основании определения от 04.07.2023 Роскадастр привлечён к участию в деле  третьим лицом без самостоятельных требований на стороне истца.  

В отзыве от 24.07.2023 и в судебном заседании Роскадастр подтвердил  невозможность внести в реестр сведения о границах прибрежной защитной полосы,  водоохранной зоны и береговой линии. Обращено внимание на то, что (1) ряд элементов  xml-файлов заполнены некорректно, (2) отсутствуют реквизиты решения  уполномоченного органа об установлении береговой линии (границы водного объекта),  (3) некорректно сформированы mif-файлы.  

Дело рассмотрено по имеющимся доказательствам в отсутствие Общества.  Выслушав представителей Министерства и Роскадастра, суд счёл уточнённые требования  правомерными и подлежащими удовлетворению.  

В предмет Контракта вошли услуги по установлению местоположения береговой  линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных  защитных полос рек Кожим, Косью, Черная, в результате которых (услуг) обеспечивается  подготовка документов и передача сведений о местоположении береговой линии  (границы) водного объекта, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных  полос в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости  (пункт 1.1). Согласно разделу 5 технического задания (приложения № 1 к Контракту) цель  

оказания услуг соотносится с целью ведения публичных реестров (информирование  граждан и юридически лиц), к числу задач отнесены собственно установление  местоположения береговой линии и границ, определение мест размещения специальных  информационных знаков при установлении границ на местности и передача сведений в  реестры.  

В пункте 1.2 Контракта оговорено, что исполнитель принял на себя обязательство  выполнить и те возможные работы и услуги, которые определённо не упомянуты  в Контракте, но необходимы для получения результата услуг, указанных в разделах 8  («Объёмы и основные виды услуг») и 11 («Перечень и форма представляемой  документации») технического задания.  

Общество в пункте 2.3.4 Контракта также обязалось устранить выявленный  заказчиком замечания, недоделки, низкое качество в сроки, предписанные заказчиком,  за собственный счёт.  

Срок представления гарантии качества устанавливается до окончания процедуры  внесения сведений в поименованные реестры, но не более трёх лет со дня подписания акта  приёмки оказанных услуг (пункт 7.1 Контракта).  

Работы приняты по указанному акту и оплачены. Причины обращения  за судебной защитой изложены выше.  

Контракт, заключённый сторонами в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе),  по своей правовой природе является смешанным договором и регулируется как общими  положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов  обязательств — подряда и возмездного оказания услуг (главы 37 и 39 Гражданского  кодекса Российской Федерации; далее — Кодекс).  

Конституирующими признаками договоров обоих видов являются  двухсторонность и возмездность, при этом взаимоотношения в рамках каждого договора  подчиняются правилу встречного исполнения, в силу которого на исполнителя  (подрядчика) возлагается обязанность оказать услуги (выполнить работы), а на заказчика  — принять эти услуги (работы) и оплатить их на условиях, предусмотренных договором  (статьи 702, 709, 711, 720 и 779 — 781 Кодекса).  

По смыслу статьи 721 Кодекса качество выполненной подрядчиком работы  должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего  рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором,  результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать  свойствами, указанными в договоре или обычно предъявляемым требованиям,  и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором  использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного  использования результата работы такого рода.  

В пункте 1 статьи 722 Кодекса установлено, что в случае, когда для результата  работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего  гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.  

Согласно пункту 1 статьи 723 Кодекса в случаях, когда работа выполнена  с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе  потребовать, в частности, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.  

Заказчик также вправе предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724  Кодекса), при этом, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 3024/11, в течение всего периода действия  гарантийного срока заказчик может ссылаться на то, что предмет подряда  

не соответствует условиям договора, кроме случаев, когда будет установлено, что такое  несоответствие произошло по его вине.  

По ходатайству Министерства к делу приобщена электронная копия материалов,  переданных исполнителем заказчику и принятых по акту. По инициативе суда  представители Роскадастра ещё раз в ходе заседания детально изучили уточнённые  требования Министерства и сообщили: в том случае, если выполнить действия, о которых  просит истец, все препятствия ко внесению спорных сведений в реестры будут сняты.  

При разрешении спора и оценке доводов истца суд исходил из отсутствия у него  обязанности назначить экспертизу, о проведении которой, несмотря на длительность  рассмотрения дела, не заявляла ни одна из сторон. Исходя из предмета Контракта, его  цели и задач, именно Роскадастр является сведущим и независимым лицом, способным  профессионально оценить качество и пригодность результата выполненных Обществом  работ. Такая оценка дана Роскадастром не в пользу ответчика.  

Согласно материалам истца и пояснениям представителей Роскадастра работы  выполнены с дефектами, препятствующими использованию их результата по назначению.  Доказательств, которые бы подтверждали, что недостатки возникли по вине самого  заказчика, не обеспечено, а в силу специфики услуг, необходимости в специальных  навыках и программном обеспечении Министерство лишено объективной возможности  каким-либо образом изменить полученные от Общества файлы.  

Основываясь на изложенном, суд удовлетворяет требования истца, относя на счёт  ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 — 170, 174, 176 и 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Регионэкопроект»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение тридцати дней со дня вступления  настоящего решения в законную силу устранить недостатки в работах, выполненных  в рамках государственного контракта на оказание услуг по установлению  местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон  и границ прибрежных защитных полос рек Летка, Луза на территории муниципального  образования муниципального района «Прилузский» Республики Коми от 05.10.2020   № 0307200030620001855, а именно:  

2.1. В соответствии с порядком, установленным приказом Росреестра  от 01.06.2021 № П/0241, дополнить cформированные в электронном виде документы  по описанию местоположения береговых линий (границ водных объектов) рек Луза, Летка  реквизитами решения уполномоченного органа об установлении береговой линии  (границы водного объекта) — приказа Министерства природных ресурсов и охраны  окружающей среды Республики Коми «Об утверждении перечня координат характерных  точек береговой линии (границы водного объекта), перечня координат и опорных точек  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Летка, Луза  на территории МО МР «Прилузский» Республики Коми» от 07.12.2020 № 2247.  

2.2. В описании местоположения береговых линий (границ водных объектов) рек  Луза, Летка (в формате mif) корректно сформировать формат количества ординат:  Multiple. Без использования кириллицы (русских букв).  

2.3. XML-файлы ZoneToGKN, содержащие сведения о водоохранной зоне рек  Луза, Летка, откорректировать в соответствии с приказом Росреестра от 01.08.2014   № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного  кадастра недвижимости в электронном виде» следующим образом:  

- корректно заполнить элемент «CodeZone» (наименование зоны  по классификатору);  

- в элементе «SourcePublication» дополнить информацией об источнике  официального опубликования;  

- в элементе «ContentRestrictions» (содержание ограничений) по описанию  местоположения границ водоохранных зон Луза, Летка на территории МО МР  «Прилузский» Республики Коми» прописать ограничения использования объектов  недвижимости в пределах ЗОУИТ в соответствии с приказом Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми «Об утверждении перечня  координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта), перечня  координат и опорных точек границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных  полос рек Луза, Летка на территории МО МР «Прилузский» Республики Коми»  от 07.12.2020 № 2247.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионэкопроект»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 рублей  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. 

4. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики  Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме.  

Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную  силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А. Е. Босов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.02.2023 8:05:00Кому выдана Босов Артём Евгеньевич