Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-81016/2019

28 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЭСТА" (196105, Санкт-Петербург город, улица Благодатная, 69, 1. лит.В, офис 2301, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  "МЕАНДР" (197022, Санкт-Петербург город, улица профессора Попова, дом 23, литера А, помещение 15Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 23.12.2019

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТА" (далее – ООО "ЭСТА") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МЕАНДР" (далее – ООО "МЕАНДР") о взыскании 1 930 165,57 руб. задолженности по договору подряда от 05.07.2016 № 103/2016-РНБ (далее – Договор).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Представитель истца не возражал против рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика, поддержал исковые требования в полном объеме.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ЭСТА" (подрядчиком) и ООО "МЕАНДР" (генподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте генподрядчика по разделам (инженерным системам):

1.1.1.       Вентиляция, противодымная вентиляция;

1.1.2.       Теплоснабжение приточных установок;

1.1.3.       Автоматизация систем вентиляции;

1.1.4.       холодоснабжение установок ПВ;

1.1.5.       Холодоснабжение (фреоновые системы);

1.1.6.       Отопление;

1.1.7.       Водоснабжение и канализация,

на объекте «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российская национальная библиотека» строительство 2-й очереди, г. Санкт-Петербург, расположенного по адресу: 

<

...> (Объект) и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно п. 1.2. Договора работы выполняются в соответствии с техническим заданием, графиком производства работ, локальными сметами.

В соответствии с п. 1 дополнительного соглашения от 06.10.2017 № 6 к Договору цена Договора составляет 104 866 948,79 руб. руб.; указанная сумма является твердой и изменению не подлежит.

В силу п. 2.3.1. Договора генподрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней от даты заключения Договора на основании счета подрядчика перечислить подрядчику авансовый платеж в размере 17 104 056,16 руб. Зачет аванса учитывается пропорционально выполненному объему работ согласно Договора.

По пункту 2.3.2. Договора оплата выполненных этапов работ производится генподрядчиком на расчетный счет подрядчика на основании актов сдачи-приемки этапа работ (акт оформляется по форме согласно приложению № 4), с обязательным оформлением выполненных работ актом приемки выполненных работ формы № КС-2 и справкой формы № КС-3, подписанными сторонами в порядке, установленном Договором.

Выполненные работы оплачиваются генподрядчиком с удержанием резерва в виде гарантийной суммы в размере 5% стоимости выполненных работ по этапу. Оплата производится генподрядчиком в течение 7 рабочих дней с момента получения счета подрядчика, с приложением подписанного сторонами акта сдачи-приемки этапа работ и счета-фактуры на выполненные работы. 

Согласно п. 2.3.4.1. Договора расчет за выполненные работы генподрядчик производит в течение 10 рабочих дней с момента выполнения подрядчиком всего объеме работ и представления документов, подтверждающих факт такого выполнения согласно п. 6.9. Договора, в том числе: приема-передачи полного комплекта рабочей и исполнительной документации, акта сдачи-приемки работ или акта об устранении выявленных недостатков (если в акте приемки работ были установлены недостатки выполненных работ), счета, счета-фактуры на оплату выполненных работ.

В силу пункта 3.1. Договора начало работ: с момента подписания Договора сторонами. Окончание работ: согласно графику производства работ.

В соответствии с п. 5 дополнительного соглашения от 06.10.2017 № 6 к Договору срок выполнения работ по Договору – до 12.11.2017.

Исходя из п. 6.12. Договора факт выполнения подрядчиком всего объема работ, предусмотренного Договором, подтверждается совокупностью следующих документов, подписанных уполномоченными представителями генподрядчика, подрядчика и переданных друг другу в соответствии с требованиями российского законодательства: полным комплектом рабочей и исполнительной документации, актом приемки результата работ по Договору и актом об устранении выявленных недостатков (если в акте приемки результата работ были установлены недостатки выполненных работ), актами предварительных испытаний, актами освидетельствования скрытых работ, счетами-фактурами на все выполненные объемы работ.

Сторонами подписаны к Договору дополнительное соглашение от 01.12.2016 № 1.1 о выполнении дополнительных работ на сумму 16 239 902,01 руб.; дополнительное соглашение от 01.12.2016 № 1.2 о выполнении дополнительных работ на сумму 1 229 791,44 руб.; дополнительное соглашение от 01.03.2017 № 2 о выполнении дополнительных работ на сумму 10 549 968,66 руб.; дополнительное соглашение от 15.05.2017 № 3 о выполнении дополнительных работ на сумму 2 756 564,96 руб.; дополнительное соглашение от 07.07.2017 № 4 о выполнении дополнительных работ на сумму 8 748 952,79 руб.; дополнительное соглашение от 01.09.2017 № 5 о выполнении дополнительных работ на сумму 1 560 333,86 руб. 

Подрядчик выполнил работы по Договору, что подтверждается актами формы КС-2 от 28.09.2016 № 1.1. на сумму 5 039 998,06 руб., от 28.09.2016 № 1.2. на сумму 44 451,82 руб., от 28.09.2016 № 1.3. на сумму 10 405,12 руб., от 28.09.2016 № 1.4. на сумму 2 791 520,41 руб., от 28.09.2016 № 1.5. на сумму 3 815 689,68 руб., от 28.09.2016 № 1.6. на сумму 2 800 730 руб., от 28.09.2016 № 1.7. на сумму 1 717 701,68 руб., от 03.10.2016 № 2.1. на сумму 3 488 053 руб., от 03.10.2016 № 2.2. на сумму 44 258,38 руб., от 03.10.2016 № 2.3. на сумму 18 011,88 руб., от 03.10.2016 № 2.4. на сумму 131 875,58 руб., от 03.10.2016 № 2.5. на сумму 581 840,31 руб., от 15.11.2016 № 3.1. на сумму 8 782 373,06 руб., от 15.11.2016 № 3.2. на сумму 234 734,78 руб., от 30.11.2016 № 4.1. на сумму 123 034,91 руб., от 30.11.2016 № 4.2. на сумму 119 210,78 руб., от 30.11.2016 № 4.3. на сумму 7 816 192, 61руб., от 30.11.2016 № 4.4. на сумму 3 309 548,83 руб., от 30.11.2016 № 4.5. на сумму 11 936 604,67 руб., от 30.11.2016 № 4.6. на сумму 1 526 185,57 руб., от 15.12.2016 № 5.1. на сумму 8 158 709,71 руб., от 15.12.2016 № 5.2. на сумму 1 821 952,80 руб., от 15.12.2016 № 5.3. на сумму 514 610,54 руб., от 15.12.2016 № 5.4. на сумму 1 016 063,71 руб., от 15.12.2016 № 5.5. на сумму 753 349,76 руб., от 16.03.2017 № 6.1. на сумму 278 122,93 руб., от 16.03.2017 № 6.2. на сумму 303 873,60 руб., от 16.03.2017 № 6.3. на сумму 455 582,66 руб., от 24.03.2017 № 7.1. на сумму 9 935 021,81 руб., от 24.04.2017 № 8.1. на сумму 270 749,58 руб., от 24.04.2017 № 8.2. на сумму 64 793,33 руб., от 15.05.2017 № 9.1. на сумму 431 733,22  руб., от 15.05.2017 № 9.2. на сумму 218 243,36 руб., от 07.07.2017 № 10.1 на сумму 1 160 256,24 руб., от 31.07.2017 № 11.1. на сумму 1 596 308,72 руб., от 17.08.2017 № 12.1. на сумму 75 478,27 руб., от 17.08.2017 № 12.2. на сумму 167 902,67 руб., от 02.10.2017 № 13.1. на сумму 812 699,75 руб., от 02.10.2017 № 13.1. на сумму 812 699,75 руб., 04.10.2017 № 14.1. на сумму 1 560 533,86 руб., от 04.10.2017 № 14.2. на сумму 1 253 278,169 руб., от 09.11.2017 № 15.1. на сумму 17 767,14 руб., от 09.11.2017 № 15.2. на сумму 72 068,56 руб., от 09.11.2017 № 15.3. на сумму 94 570,86 руб., от 09.11.2017 № 15.4. на сумму 240 448,33 руб., от 09.11.2017 № 15.5. на сумму 3 944 310,48 руб., от 09.11.2017 № 15.6 на сумму 602 795,50 руб., от 09.11.2017 № 15.7. на сумму 1 396 696,76 руб., от 09.11.2017 № 15.8. на сумму 160 247,07 руб., от 09.11.2017 № 15.9. на сумму 17 703,29 руб., от 09.11.2017 № 15.10. на сумму 672 073,25 руб., от 09.11.2017 № 15.11. на сумму – 884 043,03 руб., от 09.11.2017 № 1.1. на сумму 15 642,79 руб., от 09.11.2017 № 1.2. на сумму 199 916 руб., от 09.11.2017 № 1.3. на сумму 110 736 руб., от 09.11.2017 № 1.4., от 17.08.2017 № 12.1. на сумму 87 635,99 руб., и соответствующими справками формы КС-3.

Работы оплачены генподрядчиком не в полном объеме, в связи с чем задолженность составила 700 374,13 руб. 

Подрядчик направил генподрядчику претензию от 18.06.2019 с требованием оплатить задолженность.

Отказ ООО "МЕАНДР" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ЭСТА" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК  РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Факт выполнения работ подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.

Также истцом представлены акты освидетельствования работ, реестры паспортов и прилагаемых документов, акты приемки, реестры передачи исполнительной документации, счета на оплату.

Спорный объект введен в эксплуатацию согласно разрешению от 15.03.2018 № 78-11-11-2018. 

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на исковое заявление не представил.

Суд признает требование о взыскании 1 930 165,57 руб. задолженности подлежащим удовлетворению.

Истец предъявил также к возмещению 39 000 руб. расходов по оплате услуг представителя.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Часть 2 приведенной статьи предусматривает, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

В обоснование заявленного требования истцом представлены соглашение об оказании юридической помощи от 09.07.2019 № 43/2019, платежное поручение от 09.07.2019 № 59 на сумму 39 000 руб., подтверждающее оплату услуг по данному соглашению.

Оценив представленные доказательства разумности понесенных расходов, исходя из фактического объема проделанной работы, ее качества, характера рассмотренного спора, степени сложности формирования правовой позиции с учетом сложившейся судебной практики по данной категории споров и состоявшихся по рассматриваемому спору судебных актов, и времени, необходимого квалифицированному специалисту для подготовки к рассмотрению данного дела, подготовки процессуальных документов, правовой результат, достигнутый по делу, суд приходит к выводу о том, что заявленная ко взысканию сумма не является завышенной, подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕАНДР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭСТА» 1 930 165,57 руб. задолженности, 39 000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя и 32 302 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЭСТА» из федерального бюджета 1 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 09.07.2019 № 58.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                          Косенко Т.А.