АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-21072/2023 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации (резолютивная часть) 

18 марта 2024 года город Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе    судьи Плискиной Е.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным  имуществом Калтанского городского округа», Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», г. Красноярск (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

- об обязании исполнить договор от 29.12.2021 № 20.4200.376721 об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям;  

- о взыскании 29 841 руб. 23 коп. неустойки за период с 29.12.2022 по 27.10.2023, а также  неустойки в размере 78 руб. 79 коп. за каждый день просрочки исполнения договора за  период с 27.10.2023 по день фактического исполнения договора;  

- о взыскании 30 000 руб. неустойки за неисполнение судебного акта в месяц с момента  вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения решения  суда  

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь», ИНН 

<

***>, в  течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу, в соответствии с договором  от 29.12.2021 № 20.4200.376721 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям осуществить технологическое присоединение энергопринимающих  устройств объекта - «Кладбище», по адресу: Российская Федерация. Кемеровская область- Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калган, кадастровый номер земельного участка  42:31:0301001:902, а именно:  

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое  присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)  напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя  электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской  Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии  (мощности) на розничном рынке;  

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и согласовать  со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим  законодательством;  

- выполнить строительство ЛЭП-6 кВ от точки, указанной в пункте № 7  технических условий, до новой ТП 6/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП  уточнить проектом;  

- выполнить строительство ТП 6/0,4 кВ. Тип и мощность трансформаторов  уточнить проектом;  

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной  правоустанавливающими документами. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить  проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных  рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», ИНН  

<

***>, в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление  муниципальным имуществом Калтанского городского округа», ИНН 

<

***>,  35 947руб. 36 коп. неустойки за период с 30.12.2022 по 30.12.2023.  

В остальной части исковых требований о взыскании неустойки отказать. 

В случае неисполнения решения суда в течение 30 дней со дня вступления его в  законную силу, взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», ИНН  

<

***>, в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление  муниципальным имуществом Калтанского городского округа», ИНН 

<

***>,  судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по  настоящему делу до дня фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», ИНН  

<

***>, 8 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья Е.А. Плискина