Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-86787/2023

12 февраля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  12 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Даценко А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" (адрес:  Россия 192029, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ Д. 86, ЛИТЕР К, ПОМ. 21Н ОФИС 314-4, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  Россия 187342, КИРОВСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЛАДОЖСКАЯ Д.3/А, ОГРН: 

<

***>);

об обязании и взыскании

 

при участии

- от истца: Ровинских С.А., по доверенности от 09.01.2024,

- от ответчика: ФИО2, по доверенности от 01.01.2024, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ" (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к акционерному обществу "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее – ответчик) об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца по:

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2864/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2865/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2866/005-ПСФ-22 и взыскать неустойки в размере 277 850,69 руб.

К судебному заседании представитель истца уточнил исковые требования, согласно заявлениям от 16.01.2024 и 30.01.2024, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), где истец просил обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца по:

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2864/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2865/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2866/005-ПСФ-22 и взыскать неустойки в размере 456 947,24 руб. 

2. Обязать ответчика в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Истца по:

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2864/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2865/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2866/005-ПСФ-22 и взыскать неустойки, начисленную по состоянию на 01.12.2023 в размере 456 947,24 руб. 

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования, ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям изложенным в отзыве.

Занесенным в протокол судебного заседания определением, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции. 

          Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

ООО «КМЗ «Ижора-Металл» (далее - Заявитель) обратился 28.09.2022 к АО «ЛОЭСК» (далее - Сетевая организация):

- с заявкой № 22-10/12-2771Ф на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Истца для электроснабжения земельного участка для размещения объектов промышленности 3 класса опасности по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Красноборское городское поселение, г.п. Красный Бор, ул. Полевая, з/у 1а, кад. № 47:26:0206003:693 (далее - Объект 1);

- с заявкой № 22-10/12-2774Ф на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Истца для электроснабжения земельного участка для размещения объектов промышленности 3 класса опасности по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Красноборское городское поселение, г.п. Красный Бор, д.3, кад. № 47:26:0206003:215 (далее - Объект 2);

- с заявкой № 22-10/12-2775 на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств Истца для электроснабжения земельного участка для размещения объектов промышленности 3 класса опасности по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Красноборское городское поселение, г.п. Красный Бор, д.1, кад. №47:26:0206003:220 (далее - Объект 3).

На основании рассмотрения заявок на технологическое присоединение между истцом и ответчиком были заключены типовые договоры на технологическое присоединение:

1) Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2864/005-ПСФ-22 от 03.11.2022г. энергопринимающих устройств ООО «КМЗ «Ижора-Металл» для электроснабжения земельного участка для размещения объектов промышленности 3 класса опасности по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Красноборское городское поселение, г.п. Красный Бор, ул. Полевая, з/у 1а, кад. № 47:26:0206003:693

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составил 80 464,80 руб. (Восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 80 копеек), в т.ч. НДС 20%. Истец произвел предоплату в размере 100 % стоимости платы, что подтверждается платежным поручением № 242 от 03.11.2022г.

2) Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2865/005-ПСФ-22 от 03.11.2022г. энергопринимающих устройств ООО «КМЗ «Ижора-Металл» для электроснабжения земельного участка для размещения объектов промышленности 3 класса опасности . по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Красноборское городское поселение, г.п. Красный Бор, ул. Полевая, д.З, кад. № 47:26:0206003:215

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составил 337 340,01 руб. (Триста тридцать семь тысяч триста сорок рублей 01 копейка), в т.ч. НДС 20%. Истец произвел предоплату в размере 100 % стоимости платы, что подтверждается платежным поручением № 243 от 03.11.2022г.

3) Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2866/005-ПСФ-22 от 03.11.2022г. энергопринимающих устройств ООО «КМЗ «Ижора-Металл» для электроснабжения земельного участка для размещения объектов промышленности 3 класса опасности по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Красноборское городское поселение, г.п. Красный Бор, ул. Полевая, д.1, кад. № 47:26:0206003:220

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составил 251 714,94 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча семьсот четырнадцать рублей 94 копейки), в т.ч. НДС 20%. Истец произвел предоплату в размере 100 % стоимости платы, что подтверждается платежным поручением № 241 от 03.11.2022.

В соответствии с п. 5 указанных договоров технологическое присоединение производится по истечению четырех месяцев со дня заключения договора, который вступает в силу с момента перечисления первого авансового платежа. 

Оплата истцом произведена единовременно и в порядке 100% предоплаты 03.11.2022, следовательно, мероприятия по технологическому присоединению электроустановок истца должны быть завершены 03.03.2023.

Однако по состоянию на 16.08.2023 ответчик не исполнил обязательства по договорам и не осуществил технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца для электроснабжения Объектов.

Вместе с тем, согласно абз. 9 пп. "б" п. 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно. 

В п. 1 договора установлено, что максимальная мощность энергопринимающих устройств истца составляет 150 (кВт).

В силу п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определит день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

В соответствии с п. 17 договоров и с абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей за несоблюдение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в п. п. 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном абз. 3 пп. "в" п. 16 Правил порядке, за год просрочки.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств, является неустойка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

Расчет неустойки не оспорен ответчиком, проверен и принят арбитражным судом.  

В соответствии со статьей 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Поскольку доказательства перечисления истцу неустойки ответчик не представил, суд взыскивает с него в пользу истца неустойку в размере 456 947,24 руб., подтвержденная материалами дела.

          Требование о взыскании с ответчика 456 947,24 руб. неустойки является правомерной, соответствует статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные сторонами в материалы дела доказательства оцениваются арбитражным судом полно, всесторонне и объективно, в их совокупности и взаимной связи.

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении с настоящим иском в суд истцом уплачена госпошлина не в полном размере, которая взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета.

 

Руководствуясь статьями 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

Принять уточнение  истцом исковых требований согласно заявлений от 16.01.2024 и 30.01.2024.

Обязать АО «ЛОЭСК» в течение 30 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» по:

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2864/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2865/005-ПСФ-22;

- договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-2866/005-ПСФ-22.

Взыскать с АО «ЛОЭСК» в пользу ООО «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» 456 947,24 руб. неустойки и 14 557,01 руб. расходов по госпошлине.

Взыскать с АО «ЛОЭСК» в доход федерального бюджета 3 581,99 руб. госпошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                            Даценко А.С.