ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ А40-38620/18-113-277

г.Москва

13 марта 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 12 марта 2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 13 мая 2019 г.

Арбитражный суд г.Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г.Алексеева

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ГУП «Мосгортранс» к ответчику ООО «Ремком»,

о взыскании 2 169 280,36 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 26 декабря 2018 г. № 65-01-20/4076;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 30 марта 2018 г.;

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности в размере 2 169 280,36 рублей по договору от 1 июня 2016 г. № 01-06/КС (далее – Договор), заключённому между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик), а также неустойки за просрочку оплаты.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17 мая 2018 г. в удовлетворении исковых требований было отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2018г. решение Арбитражного суда города Москвы от 17 мая 2018 г. оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13 ноября 2018 г. решение Арбитражного суда города Москвы от 17 мая 2018 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда  от 1 августа 2018 г. отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

От истца поступило ходатайство об отказе от иска в части взыскания неустойки.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что отказ от иска в части может быть принят, производство по делу в части подлежит прекращению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс) истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказ истца от данного иска в части не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Полномочия лиц, заявивших ходатайство об отказе от иска, судом проверены.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса производство по делу подлежит прекращению в части, если суд установит, что истец отказался от иска в части и отказ принят судом.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска.

Ответчик по иску возражал по доводам отзыва на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Договор заключён на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по переустройству контактной сети для первой очереди строительства пешеходного перехода на объекте: «Калининско-Солнцевская линия от ст. «Парк Победы» до ст. «Раменки», по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, пересечение Ломоносовского и Мичуринского проспектов».

Цена Договора была установлена локальными сметами № 1 и № 2 и составила 2 169 280,36 рублей.

В период с 1 июня 2016 г. по 31 июля 2016 г. истцом были выполнены работы на сумму 2 169 280,36 рублей.

Работы были приняты ответчиком без замечаний и претензий к качеству работ и срокам выполнения.

Согласно п. 6.3 Договора подрядчик оплачивает выполненные в отчетном периоде работы в течение 20-ти дней после подписания КС-2 и КС-3 за отчетный период.

КС-2 №1.1 и № 1.2. (форма) и КС-3 №1 были подписаны сторонами 31 июля 2016 г.

Ответчик предоставил гарантийное письмо от 29 марта 2017 г. № 13 о том, что он признает долг и гарантирует оплату задолженности по договору в срок до 5 мая 2017 г.

Работы по договору были приняты ответчиком без замечаний и претензий к качеству и срокам выполнения, что подтверждается подписанными актами выполненных работ (КС-2, КС-3).

Как установлено судом, согласно пунктам 6.1, 6.2 Договора сторонами предусмотрено предоставление исполнительной документации на выполненные в отчётном периоде работы, которая также подлежит проверке и принятию подрядчиком (ответчиком).

Согласно имеющимся материалам дела, исполнительная документация на спорные работы направлена истцом ответчику только 7 мая 2018 г.

Кроме того, в силу положений статей 711, 746 Гражданского кодекса, пункта 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно статье 726 Гражданского кодекса подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Таким образом, ответчик, отказываясь оплачивать переданные результаты подрядных работ ввиду непредоставления исполнительной документации, обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования принятого им объекта подряда по назначению.

Соответственно, отсутствие какой-либо исполнительной документации не повлияло на возможность передачи ответчиком указанных работ заказчику, что свидетельствует о возможности использования результата работы для целей, указанных в договоре без нее.

В силу пункта 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации.

Состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 9 ст. 52 Градостроительного кодекса).

Согласно Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02- 2006), утвержденным приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128, исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.

В свою очередь, детальный перечень проектно-сметной и исполнительной документации определен пунктами 3.4, 3.5, 4.17, 4.18 СНиП 03.01.2004-87.

Таким образом, согласно условиям Договора, а также положениям ч.1 ст.720 Гражданского кодекса, подписание КС-2 и КС-3 не осуществляется без проверки наличия и верности составления исполнительной документации. Передача исполнительной документации предшествует подписанию актов приемки работ. 

К аналогичным выводам пришли суды при рассмотрении дел А56-57257/18,А22-3812/2017, А56-59423/2017.

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Как следует из положений статьи 421 Гражданского кодекса, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 333 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса, суд

Р Е Ш И Л :

1.Принять отказ от иска в части взыскания неустойки в размере 339 709,3 рублей, рассчитанной за период с 21 августа 2016 г. по 25 января 2018 г. Производство по делу в указанной части прекратить.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремком» (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного унитарного предприятия города москвы «Мосгортранс» (ОГРН 

<

***>):

задолженность в размере 2 169 280 (два миллиона сто шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей 336 копеек;

расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 846 (тридцать три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей.

3.Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев