АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск  «20» июня 2024 года Дело № А19-19174/2022  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Зыряновой А.Э.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТУЛУНА  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, адрес: 665259, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛУН ГОРОД, УГОЛЬЩИКОВ  МИКРОРАЙОН, ДОМ 43)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТРОЙПЛЮС»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664047, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ИРКУТСК ГОРОД, КАРЛА ЛИБКНЕХТА 

<

...>)  

об устранении недостатков работ, 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СИБСТРОЙПЛЮС» в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу решения  суда в рамках исполнения гарантийных обязательств по Контракту № 02-2021 от  24.05.2021 безвозмездно устранить следующие недостатки выполненных работ по  капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 25» (благоустройство территории),  расположенного по адресу: 

<

...>:  

- устранить неровности дна водоотводных лотков Л1 и Л2 с соблюдением  нормативного уклона;  

- водоотводной лоток Л2 в месте, где находится спортивная площадка привести в  соответствие с проектной документацией (в проекте все лотки выведены на асфальтовое  дорожное покрытие);  

- заделать вырубку на асфальтовом покрытии размером 25х35 кв.см.,  расположенную с левой стороны здания школы около ворот;  

- укрепить на волейбольной спортивной площадке железные стойки в количестве  двух штук., расположенных по краям центра площадки для натягивания сетки;  

- провести укладку верхнего слоя асфальта с левой и с правой стороны здания  школы в соответствии с проектно-сметной документацией;  

- высадить на двух клумбах (вдоль лицевой стороны здания школы) луковичные  цветы в количестве 381 шт.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «СИБСТРОЙПЛЮС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА ТУЛУНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме  6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.Э. Зырянова