Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-223862/18-51-1799

город Москва

26 марта 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 марта 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТЭЛ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «МР ГРУПП» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании по договору подряда № 16-09-16 от 16 сентября 2016 года долга в размере 8 867 206 руб. 04 коп., неустойки в размере 641 949 руб. 23 коп.,

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 14 марта 2019 года; 

от ответчика – ФИО3, по дов. № 1133-МРГ-С/14-08-19 от 14 августа 2018 года; 

У С Т А Н О В И Л:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКТЭЛ ИНЖИНИРИНГ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «МР ГРУПП» (далее – ответчик) о взыскании по договору подряда № 16-09-16 от 16 сентября 2016 года долга в размере 8 867 206 руб. 04 коп., неустойки в размере 641 949 руб. 23 коп.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве, заявил о снижении неустойки.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 16 сентября 2016 года между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор подряда № 16-09-16 на выполнение полного комплекса работ по доработке, а именно обследованию, проектированию, строительству и пуско-наладке канализационных очистных сооружений бытового стока (КОС), производительностью 3750 м3/сутки в пределах застройки, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, деревня Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал Северный, сооружение 14 «А».

В соответствии с пунктом 1.3. договора, работы по договору выполняются в следующем порядке: I этап - «Обследование»; II этап — «Проектирование стадии «Р»; III этап - «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы».

В соответствии с пунктами 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 2.3.2. договора, I этап «Обследование» - срок выполнения работ по этапу I «Обследование» составляет 4 недели с момента перечисления авансового платежа, предусмотренного пунктом 3.3.1. договора. II этап - «Проектирование стадии «Р» - срок выполнения работ 2 недели с момента окончания этапа I «Обследование» и перечисления авансового платежа, предусмотренного пунктом 3.4.1. договора. III этап - «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы» - общий срок выполнения работ - устанавливается сторонами дополнительно путем заключения дополнительного соглашения к договору, которое подлежит заключению в течение 10 календарных дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу II «Проектирование стадии Р». Течение срока начинается с момента выполнения подрядчиком работ по этапу II «Проектирование стадии Р», а также после наступления последнего из событий: перечисления авансового платежа, предусмотренного пунктом 3.5.1. договора, подписания сторонами акта о передаче площадки.

В соответствии с пунктами 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. договора, цена договора является твердой и составляет 7 205 516 руб. 80 коп., в частности по этапам: этап «Обследование» - 500 000 руб., этап «Проектирование стадии Р» - 400 000 руб., этап «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы» - 6 305 516 руб. 80 коп. Цена договора включает в себя все затраты и расходы подрядчика, необходимые для выполнения им своих обязательств по договору.

В соответствии с пунктами 3.3., 3.3.1., 3.3.2. договора «Оплата работ по I этапу «Обследования»» авансовый платеж в размере 50 % от суммы, предусмотренной п.3.1.1., в том числе НДС 18%, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Договора и выставления счёта на оплату. Окончательный платеж в размере 50 процентов от суммы, предусмотренной п.3.1.1., в том числе НДС 18%, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приемки-сдачи выполненной работы и документов, предусмотренных пунктом 2.4. Договора.

В соответствии с пунктами 3.3., 3.3.1., 3.3.2. договора «Оплата работ по этапу II «Проектирование стадии Р»» осуществляется в следующем порядке: авансовый платеж в размере 50 процентов от суммы, предусмотренной пунктом 3.1.2., в том числе НДС 18%, за разработку проектной документации стадии «Р», перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании счета, предоставленного Подрядчиком. Окончательный платеж в размере 50 процентов от суммы, предусмотренной пунктом 3.1.2., в том числе НДС 18%, перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента получения проектной документации и подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с пунктом 2.5. Договора и счета, предоставленного Подрядчиком.

В соответствии с пунктами 3.5., 3.5.1., 3.5.2. договора «Оплата работ по этапу III «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы»» авансовый платеж по этапу в размере 50 процентов от суммы, предусмотренной пунктом 3.1.3., в том числе НДС 18%, перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней на основании счета, предоставленного Подрядчиком. Оплата выполненных в отчетном месяце работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с пропорциональным зачетом авансового платежа, указанного в п. 3.5.1. Договора.

22 ноября 2016 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение дополнительных работ по обследованию, проектированию, строительству и пуско-наладке Канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 3750 м3/сутки в пределах застройки, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, деревня Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал «Северный», сооружение 14А (далее по тексту дополнительного соглашения -«Объект») в соответствии со Сметой (Приложение 1 к Дополнительному соглашению). Общая стоимость работ по Дополнительному соглашению с учетом материалов и оборудования составляет 2 298 798 рублей, 00 коп. с учетом НДС. Подрядчик выполняет работу, предусмотренную в пункте 1 Дополнительного соглашения в срок 60 рабочих дней момента оплаты 50% суммы, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения. Оплата 50% стоимости работ в размере 1 149 399 рублей 00 коп. (с учетом НДС) согласно пункту 3 настоящего Дополнительного соглашения производится на условиях предоплаты в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения на основании выставленного счета. По окончании работ по Дополнительному соглашению, Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3) и исполнительную документацию. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения указанных документов подписывает КС-2 или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания с указанием недоработок, которые Подрядчик обязан устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, которые в любом случае не могут превышать 5 рабочих дней с момента направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ. В случае неустранения Подрядчиком в сроки указанных в мотивированном отказе Заказчика недостатков работ, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на счет Подрядчика. Окончательная оплата дополнительных работ производится Заказчиком в течение 20 календарных дней после подписания им Акта сдачи-приемки работ (по форме КС-2), указанного в пункте 5 Дополнительного соглашения и на основании выставленного счета Подрядчика. 

30 ноября 2016 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение дополнительных работ по обследованию, проектированию, строительству и пуско-наладке Канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 3750 м3/сутки в пределах застройки, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, деревня Сапроново, микрорайон «Купелинка», квартал «Северный», сооружение 14А (далее по тексту дополнительного соглашения -«Объект») в соответствии со Сметой (Приложение 1 к Дополнительному соглашению). Общая стоимость работ по Дополнительному соглашению с учетом материалов и оборудования составляет 1 017 036 рублей, 50 коп. с учетом НДС. Подрядчик выполняет работу, предусмотренную в пункте 1 Дополнительного соглашения в срок 20 рабочих дней момента оплаты 50% суммы, указанной в пункте 2 Дополнительного соглашения. Оплата 50% стоимости работ в размере 508 518 рублей, 25 коп. (с учетом НДС) согласно пункту 3 настоящего Дополнительного соглашения производится на условиях предоплаты в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения на основании выставленного счета. По окончании работ по Дополнительному соглашению, Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3) и исполнительную документацию. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения указанных документов подписывает КС-2 или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания с указанием недоработок, которые Подрядчик обязан устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, которые в любом случае не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ. В случае неустранения Подрядчиком в сроки указанных в мотивированном отказе Заказчика недостатков работ, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на счет Подрядчика. Окончательная оплата дополнительных работ производится Заказчиком в течение 20 календарных дней после подписания им Акта сдачи-приемки работ (по форме КС-2), указанного в пункте 5 Дополнительного соглашения и на основании выставленного счета Подрядчика. 

30 января 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3 к договору, согласно условиям которого стороны пришли к соглашению дополнить Договор №16-09-16 от 16.09.2016 г. пунктом 3.5.1.1., в следующей редакции: «3.5.1.1. Стороны договорились произвести оплату на сумму 1 299 200 рублей 00 коп. с учетом НДС 18 % за установку воздуходувки. Оплата производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней получения от Подрядчика соответствующих счетов двумя равными платежами.». В рамках настоящего дополнительного соглашения Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по ремонту блока доочистки (далее - работы). Виды работ: демонтаж существующего нерабочего оборудования и монтаж оборудования из перечня в соответствии с Приложением № 1 к настоящему дополнительному соглашению и рабочей документацией. Стоимость работ по ремонту блока доочистки составляет 5 710 000  рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18 % в размере 871 016 рублей, 95 коп. Оплата работ производится в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 50 (пятьдесят) процентов от суммы, просмотренной п. 2 Дополнительного соглашения, в т.ч. НДС 18 %, перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и получения счета, предоставляемого Подрядчиком. Окончательный платеж в размере 50 процентов от суммы, предусмотренной п.2 настоящего Дополнительного соглашения, в том числе НДС 18%, перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании счета, предоставляемого Подрядчиком. Выполнение работ по Дополнительному соглашению осуществляется в течение 75 календарных дней с момента поступления авансового платежа на корреспондентский счет банка Подрядчика.

03 апреля 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 5 к договору на выполнение дополнительных работ по доработке канализационных очистных сооружений «Видное», производительностью 3750 мЗ/сутки (далее - «Дополнительные работы»), в соответствии с проектной документацией. Шифр 16-09-16-ОВ,АТХ,КЖ,ТХ,ЭОМ «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 3750 м3/сут.». Стоимость Дополнительных работ составляет 10 292 578,63 руб., в том числе НДС 18% в размере 1 570 054,37 руб., и определяется на основании Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению «Сметный расчет по доработке канализационных очистных сооружений «Видное», производительностью 3750 м3/сутки по этапу СМР». Оплата Дополнительных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке: авансовый платеж в размере 70  процентов от Стоимости Дополнительных работ, указанной в пункте 2 настоящего Дополнительного соглашения и Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению в сумме 7 204 805,04 руб., в том числе НДС 18 % - 1 099 038,06 руб., перечисляется на счет Подрядчика в срок до 18.08.2017г. на основании счета, предоставляемого Подрядчиком. Окончательный платеж в размере 30 процентов от суммы, указанной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению в сумме 3 087 773,59 руб., в том числе НДС 18% - 471 016,31 руб., перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по факту выполнения дополнительных работ в полном объеме, на основании счета, предоставляемого Подрядчиком.

10 апреля 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 4 к договору, согласно условиям которого стороны согласовали внести изменения в Приложение №1 к Договору «Сметный расчет по этапу СМР» и изложить указанное приложение в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. По согласованию Сторон, размер авансового платежа, предусмотренного статье 3.5. Договора «Оплата работ по этапу III «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы», связанный с изменением стоимости таких работ, подлежит перерасчету исходя из стоимости таких работ и составляет 4 069 371 рубль 35 коп. Оплата разницы между оплаченным и подлежащим оплате согласно настоящему Дополнительному соглашению авансовому платежу в размере 916 612 рублей 96 копеек производится Заказчиком в течение 10  рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения. В связи с изменениями стоимости выполняемых работ по этапу III, Стороны согласовали изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Цена Договора является твердой и составляет 9 545 916 рублей 51 коп., в том числе НДС 18 % в размере 1 456 156 рублей 76 коп., в частности по этапам:»... далее по тексту. В связи с изменениями стоимости выполняемых работ по этапу III, Стороны согласовали изложить пункт 3.1.3. Договора в следующей редакции: «3.1.1. Этап «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы» - 8 645 916 рублей 51 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 318 868 руб. 62 коп.».

10 апреля 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 6 к договору на выполнение дополнительных работ по ремонту очистных сооружений. Виды дополнительных работ: установка системы дезодорирующих модулей на очистных сооружениях заказчика находящихся по адресу: 

<

...> НА в соответствии с Приложением № 1 к дополнительному соглашению. Стоимость работ по установке системы дезодорирующих модулей составляет 1 953 887 рублей 10 коп., с учетом НДС 18 %. Оплата работ производится в следующем порядке: авансовый платеж в размере 30 процентов от суммы, просмотренной п. 2 Дополнительного соглашения, в размере 586 166 рублей 13 копеек в том числе НДС 18%, перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Соглашения, на основании счета, предоставляемого Подрядчиком. Окончательный платеж в размере 70 процентов от суммы, предусмотренной п.2 Соглашения, в сумме 1 367 720 рублей 97 копеек, в том числе НДС 18%, перечисляется на счёт подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2) на основании счёта, предоставляемого Подрядчиком. Выполнение работ по настоящему Соглашению осуществляется в срок до 31 мая 2017г, дата начала работ - с момента оплаты авансового платежа.

30 июня 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3.1. к договору, согласно условиям которого стороны пришли к соглашению изложить в новой редакции Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 30.01.2017 к Договору №16-09-16 от 16.09.2016. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик выполняет работу, предусмотренную Дополнительным соглашением №3 от 30.01.2017 к Договору №16-09-16 от 16.09.2016 года в срок до 31 июля 2017 года.

10 августа 2017 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 7 к договору на выполнение дополнительных работ по доработке канализационных очистных сооружений «Видное», производительностью 3 750 м3/сутки. При этом Состав работ определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению «Перечень мероприятий». Стоимость работ исчисляется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Дополнительному соглашению «Сметный расчет» и составляет 428 556 руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) - 65 372,94 руб.. Оплата предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением работ производится Заказчиком в следующем порядке: авансовый платеж в размере 70 процентов от суммы, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, что составляет 299 989 руб. 20 коп., в т.ч. НДС (18 %) 45 761 руб. 06 коп., перечисляется на счет Подрядчика в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения, на основании счета, предоставляемого Подрядчиком. Окончательный платеж в размере 30 процентов от суммы, указанной в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, что составляет 128 566 руб. 80 коп., в т.ч. НДС (18 %) 19 611 руб. 88 коп., перечисляется на счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании счета, предоставляемого Подрядчиком. Сдача-приемка выполненных работ, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, производится по окончанию их выполнения в порядке, установленном п. 2.6. Договора.

Приложенное к исковому заявлению дополнительное соглашение № 8 от 29 ноября 2017 года со стороны ответчика не подписано, соответственно, не может считаться заключенным.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статей 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Факт выполнения работ по дополнительному соглашению № 3.1. на сумму 300 000 руб. подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 3 от 25.07.2017. Согласно условиям дополнительного соглашения № 3, срок их оплаты – 10 рабочих дней, то есть до 10.08.2017.

Факт выполнения работ по дополнительному соглашению № 4  на сумму 477 826 руб. подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 2 от 25.07.2017. Согласно условиям дополнительного соглашения № 4, срок их оплаты – 10 рабочих дней, то есть до 10.08.2017.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Таким образом, ст. 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абзац 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ).

18 октября 2017 года истец в одностороннем порядке составил формы КС-2, КС-3 № 3 по дополнительному соглашению № 4 на сумму 4 917 041 руб. 83 коп., передал их нарочно ответчику 19.10.2017. Срок их рассмотрения по условиям договора – 5 рабочих дней, срок оплаты – 10 рабочих дней. Поскольку мотивированного отказа от приемки работ ответчик в адрес истца не направил, работы считаются принятыми без претензий и замечаний и подлежащими оплате в срок до 10.11.2017.

18 октября 2017 года истец в одностороннем порядке составил формы КС-2, КС-3 № 2 по дополнительному соглашению № 5 на сумму 3 997 449 руб. 60 коп., передал их нарочно ответчику 19.10.2017. Срок их рассмотрения по условиям договора – 5 рабочих дней, срок оплаты – 10 рабочих дней. Поскольку мотивированного отказа от приемки работ ответчик в адрес истца не направил, работы считаются принятыми без претензий и замечаний и подлежащими оплате в срок до 10.11.2017.

18 октября 2017 года истец в одностороннем порядке составил формы КС-2, КС-3 № 3 по дополнительному соглашению № 5 на сумму 668 800 руб., передал их нарочно ответчику 19.10.2017. Срок их рассмотрения по условиям договора – 5 рабочих дней, срок оплаты – 10 рабочих дней. Поскольку мотивированного отказа от приемки работ ответчик в адрес истца не направил, работы считаются принятыми без претензий и замечаний и подлежащими оплате в срок до 10.11.2017.

18 октября 2017 года истец в одностороннем порядке составил формы КС-2, КС-3 № 4 по дополнительному соглашению № 5 на сумму 1 586 238 руб., передал их нарочно ответчику 19.10.2017. Срок их рассмотрения по условиям договора – 5 рабочих дней, срок оплаты – 10 рабочих дней. Поскольку мотивированного отказа от приемки работ ответчик в адрес истца не направил, работы считаются принятыми без претензий и замечаний и подлежащими оплате в срок до 10.11.2017.

02 ноября 2017 года истец в одностороннем порядке составил формы КС-2, КС-3 № 1 по дополнительному соглашению № 5 на сумму 4 040 091 руб. 03 коп., передал их нарочно ответчику 02.11.2017. Срок их рассмотрения по условиям договора – 5 рабочих дней, срок оплаты – 10 рабочих дней. Поскольку мотивированного отказа от приемки работ ответчик в адрес истца не направил, работы считаются принятыми без претензий и замечаний и подлежащими оплате в срок до 24.11.2017.

Как установлено ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Согласно ст. 182 ГК РФ полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель.

В данном случае, полномочия лиц, принимавших акты и справки, явственно следовали из обстановки, истории деловых отношений сторон.

Доказательств передачи ответчику по дополнительному соглашению № 7  форм КС-2, КС-3 № 1 от 21.11.2017 на сумму 428 556 руб. материалы дела не содержат. Представленное истцом письмо исх. № 002-859 не может подтверждать факт передачи ответчику указанных форм КС-2, КС-3, поскольку оно датировано 02.11.2017.

Пунктом 9.10. договора предусмотрено, что любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями.

Дополнительное соглашение № 8 к договору ответчиком не подписано, доказательств согласования с ответчиком работ, указанных в односторонних формах КС-2, КС-3 № 1 от 29.11.2017 на сумму 3 366 296 руб. 25 коп. истец не представил.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении ответа на свое сообщение в течение 10 дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

В силу пункта 4 статьи 743 ГК РФ подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В силу п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Поскольку предъявленные истцом к приемке работы на сумму 3 366 296 руб. 25 коп. не были согласованы в порядке, предусмотренном статьей 743 ГК РФ, а также не оформлены дополнительными соглашениями, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания с заказчика стоимости дополнительных несогласованных работ.

Таким образом, требования истца о взыскании по договору подряда № 16-09-16 от 16 сентября 2016 года долга подлежит частичному удовлетворению на сумму 5 875 207 руб. 50 коп.

Пунктом 6.2.1. договора предусмотрено, что в случае несвоевременной оплаты заказчиком выполненных работ подрядчик имеет право взыскать с заказчика неустойку в размере 0,01 % от цены работ по конкретному этапу за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

Согласно расчету истца неустойка с учетом 10 % ограничения составляет 641 949 руб. 23 коп.

Как установлено судом, расчет неустойки произведен истцом без учета установленных сроков на рассмотрение форм КС-2, КС-3, и сроков для оплаты, установленных договором и дополнительными соглашениями, указанными выше судом.

Судом произведен расчет неустойки, с учетом вышеуказанных сроков для оплаты, неустойка составляет: 200 206 руб. 39 коп.

Ответчиком заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. (п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 года № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ»).

Суд, оценив размер начисленной истцом неустойки с учетом всех обстоятельств дела, приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ к рассматриваемым правоотношениям.

При этом суд учитывает правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении Пленума № 81 от 22 декабря 2011 года, в соответствии с которой сопоставление ставки рефинансирования с установленной договором ставкой пени за каждый день и за календарный год по существу представляет собой переоценку условий заключенной сделки без приведения иных объективных доказательств исключительности обстоятельств неисполнения обязательств, а также тот факт, что неустойка имеет как компенсационный по отношению к убыткам характер, так и является мерой понуждения к надлежащему исполнению обязательств, в связи с чем, безосновательно - в отсутствие доказательств должника о размере возможной суммы убытков кредитора, а равно принятия мер к ликвидации задолженности - снижение размера начисленных санкций повлечет за собой фактическое освобождение просрочившего исполнение должника от ответственности за нарушение обязательства, размер которой стороны согласовали сами при заключении сделки.

Каких-либо доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, обосновывающих необходимость применения судом статьи 333 ГК РФ, ответчик не представил.

При таких обстоятельствах оснований для применения статьи 333 ГК РФ у суда не имеется, исковые требования о взыскании неустойки подлежат частичному удовлетворению на сумму 200 206 руб. 39 коп.

Поскольку истцу предоставлялась отсрочка уплаты госпошлины, исковые требования удовлетворены судом частично, с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 45 072 руб., с истца в доход федерального бюджета Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 25 474 руб.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МР ГРУПП» в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТЭЛ ИНЖИНИРИНГ» по договору подряда № 16-09-16 от 16 сентября 2016 года долг в размере 5 875 207 руб. 50 коп., неустойку в размере 200 206 руб. 39 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МР ГРУПП» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 45 072 руб.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТЭЛ ИНЖИНИРИНГ» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 25 474 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова