АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, 

<

...>

Тел/факс 

<

***>, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-11090/2024

г. Астрахань

08 октября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 сентября 2025 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Чижовой С.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Уразгалиевлй С.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Р-ТрансГрупп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании передать исполнительную документацию, акты, справки по договору подряда № 17 от 14.05.2024, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании неустойки, возмещении расходов,

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании основного долга в сумме 618 245 руб. 21 коп. по договору подряда № 17 от 14.05.2024, неустойки в сумме 70 109 руб. 01 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца/ответчик: в с/з 13.08.2025 ФИО1, представитель по доверенности от 09.01.2025,

от ответчика/истец: в с/з 21.08.2025 ФИО2, представитель по доверенности от 20.01.2025 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Р-Трнанс Групп» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» об обязании передать результат выполнения работ по договору подряда № 17 от 24.05.2024 в виде : исполнительной документации, актов скрытых работ, акта выполненных работ, подписанных со стороны подрядчика в течение 10 дней с момента вступления законную силу решения суда, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 60 385 руб. 25 коп., взыскании неустойки в сумме 115 833 руб. 33 коп., взыскании неустойки в размере 2000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до фактического исполнения решения суда, начиная с 11 дня, после вступления в законную силу решения суда, возмещении судебных расходов по госпошлине в суме 62 323 руб.

Согласно заявлению от 13.05.2025 истец ООО «Р-Транс Групп» изменил исковые требований, уточнив перечень исполнительной документации, актов, справок, которые просит передать, увеличил сумму судебной неустойки до 6000 руб., отказался от требований о взыскании неустойки в сумме 115 833 руб. 33 коп.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ изменение и увеличение исковых требований принято судом. 

В арбитражный суд 22.05.2025 от Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» поступило встречное исковое заявление к Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Трнанс Групп» о взыскании основного долга в сумме 619 745 руб. 21 коп., неустойки в сумме 70 279 руб. 11 коп. по договору подряда № 17 от 24.05.2024.

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.05.2025 суд определил принять встречный иск Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» к Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Трнанс Групп» о взыскании основного долга в сумме 619 745 руб. 21 коп., неустойки в сумме 70 279 руб. 11 коп., для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

В соответствии с заявлением от 30.05.2025 истец ООО «Р-Транс Групп» изменил исковые требования по перечню истребуемой документации, просит суд:

№1 .Обязать ООО НПО «Феррит» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ООО «Р-Транс Групп» исполнительную документацию на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу:

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административному зданию по адресу:

<

...> в рамках договора подряда № 17 от 14.05.2024 года в следующих составах разделов исполнительской документации:

- исполнительная документация на работы по перекладке сети водопровода, состоящая из: 

1. Реестр исполнительной документации 

2.Общий журнал работ и специальные журналы работ:

Общий журнал работ

Журнал сварочных работ (СНиП 3.03.01-87)

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

Журнал входного контроля качества

Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации) 3.Исполнительные схемы:

Исполнительные съемки прокладки трубопроводов В1, В2, В4, ТЗ, К1 (с отметками)

Исполнительная схема устройства траншей под выпуска канализации (с подсчетом объемов грунта)

Исполнительная схема устройства основания под выпуски канализации

 4. Акт освидетельствования скрытых работ: Прокладка трубопроводов под полами Тепловая изоляция трубопроводов

Монтаж системы трубопроводов В1, В2, В4, ТЗ, К1 и крепление к конструкциям здания

Устройство прохода трубопроводов ХГСВ через стены Антикоррозионная обработка трубопроводов

Устройство естественного основания под выпуски канализации (подземная

часть)

Устройство несжимаемого основания под выпуски канализации (подземная

часть)

Устройство выпусков канализации (подземная часть)

Устройство теплоизоляции выпусков канализации (подземная часть)

Обратная засыпка выпусков ливневой канализации (подземная часть)

Монтаж кронштейнов крепления трубопроводов пожарного водоснабжения к

металлоконструкциям каркаса здания

Антикоррозионная защита сварных соединений трубопроводов

противопожарного водоснабжения

Монтаж пожарных кранов в комплекте

Герметизация мест прохода трубопроводов через наружные стены

Монтаж очистных установок

 5.Акты приемки и испытаний:

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГСВ (с заключением)

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность трубопроводов В1, В2, В4,14, К1

Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков на пролив Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и

т.д.)

Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения

Акт обследования водомерного узла

Акт об окончании монтажных работ

6. Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков

7. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

8. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

9. Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве.

6.

В комплект приемо-сдаточной документации входит пакет разрешительной документации:

СРО монтажной организации

Удостоверения на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.)

- исполнительная документация на реконструкцию системы теплоснабжения, состоящая из Раздела №2 Технических условий на реконструкцию системы теплоснабжения №03-04X939 от 05.12.2023 года, а именно:

2. Необходимые условия подключения

2.1. Тепловая нагрузка: уточнить при проектировании.

2.2.Условия подключения:

2.2.1.Точку подключения теплового ввода объекта выполнить в подземнуютепловую сеть 2Т Ду 200 мм, после места врезки МКД по ул. Ульяновых, 3, околоближайшей неподвижной опоры с установкой шаровой отключающей арматуры.

2.2.2.Диаметр теплового ввода к объекту принять по расчёту.

2.2.3. Трубы применить ИЗОПРОФЛЕКС 11 5А. Арматуру применить шаровую, с установкой под «ковер».

2.2.4. Для определения положения тепловой сети представить на согласование сводный план сетей объекта и проект благоустройства территории.

2.2.5. Подключение системы отопления выполнить по зависимой схеме.

2.2.6. Подключение горячего водоснабжения выполнить по открытой схеме.

2.2.7. Номер элеватора принять в соответствии с подключаемой тепловой нагрузкой.

2.2.8 Количество нагревательных приборов и диаметр трубопроводов системы отопления объекта принять по расчету.

2.2.9.Трубы применить стальные.

2.2.10.Заменить существующий температурный регулятор жидкости нааналогичный либо на регулирующий клапан системы ГВС.

2.2.1 1 .Оснастить ИТП средствами автоматизации в соответствии с требованиями п. 8.2 СП 41 -1 01-95 «Проектирование тепловых пунктов».

2.2.12.Помещение ИТП принять в соответствии с требованиями норм.

2.2.13.Получить технические условия Общества на установку приборов учетарасхода тепловой энергии.

2.3 Проект выполнить организацией, имеющей свидетельство на право проектирования, согласовать с Обществом, один экземпляр передать в отдел производственно-технического обеспечения и метрологии Общества для контроля.

2.4. Все виды работ в установленном порядке сдать ответственному представителю теплоснабжающей организации.

№2.Обязать ООО НПО «Феррит» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ООО «Р-Транс Групп» Акты выполненных работ (КС №2) и Справки о стоимости (КС-№3) на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу: 

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административному зданию по адресу 

<

...>, Акты скрытых работ в рамках договора подряда № 1 7 от 14.05.2024 года и в соответствии с его условиями.

№3. В случае неисполнения решения суда о выполнении обязательств подоговору подряда №17 от 24 мая 2024 года в части передачи исполнительнойдокументации, Акта выполненных работ (КС №2) и справки о стоимости (КС-№3) наработы по перекладке сети водопровода к административному зданию поадресу: 

<

...> и реконструкцию системы теплоснабженияадминистративному зданию по адресу 

<

...>, актов скрытыхработ в рамках договора подряда № 17 от 14.05.2024 года и в соответствии с егоусловиями взыскать с ООО НПО Феррит судебную неустойку в размере 6000 руб. закаждый день просрочки до момента фактического исполнения решения суда, начинаяс четвёртого рабочего дня после вступления в законную силу решения суда понастоящему делу.

№4. Взыскать с ООО НПО Феррит в пользу ООО Р-транс Групп судебные издержки на оплату госпошлины в размере 62 323 руб.

Истец отказался от требований о взыскании неустойки в сумме 115 833 руб. 33 коп.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ изменение исковых требований с учетом увеличения перечня документов принято судом. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 04.07.2025 судебное заседание отложено на 13.08.2025 с учетом увеличения исковых требований и в связи ходатайством ответчика/истца о назначении судебной экспертизы. 

Ответчик /истец ООО НПО «Феррит» в судебное заседание не явился, направил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать основной долг в сумме 618 245 руб.21 ко., неустойку в сумме 70 109 руб. 01 коп. , а также ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уменьшение встречных исковых требований принято судом. 

В связи с ходатайством ответчика/истца ООО НПО «Феррит» в судебном заседании 13.08.2025 объявлен перерыв до 21.08.2025, 15.00 час. для представления платежных документов о перечислении на депозит суда денежных средств для оплаты судебной экспертизы. 

Судебное заседание 21.08.2025, 15.00 час. продолжено с участием представителя ответчика/истца ООО НПО «Феррит», в отсутствии представителя истца/ответчика ООО «Р-Транс Групп».

В судебном заседании представитель ответчика/истца ООО НПО «Феррит» заявил ходатайство об отложении судебного заседания для представления платежных документов о перечислении на депозит суда денежных средств для оплаты судебной экспертизы. 

В соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в связи с ходатайством ответчика/истца ООО НПО «Феррит» суд объявлял перерыв до 04.09.2025, 11 час. 50 мин., 18.09.2025, 14.00 час., 24.09.2025 для перечисления на депозит суда денежных средств для оплаты судебной экспертизы. 

Объявление о перерыве размещено в соответствии с рекомендациями, данными в пункте 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 (ред. от 27.06.2017) "О процессуальных сроках" в информационном сервисе "Календарь судебных заседаний" на официальном сайте Арбитражного суда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В судебное заседание 04.09.2025, 11 час. 50 мин., 18.09.2025, 14.00 час., 24.09.2025 стороны не явились, платежных документов о перечислении на депозит суда денежных средств не представили.

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд продолжил рассмотрение дела в отсутствии сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания. 

В соответствии с пунктом 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 АПК РФ).

В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 Кодекса, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам.

Суд предоставил ответчику/истцу время для внесения на депозит суда денежных средств для оплаты судебной экспертизы, в период с 21.08.2025 по 24.09.205 в судебном заседании объявлялись перерывы.

Ответчиком/истцом ООО НПО «Феррит», заявившим ходатайство о назначении судебной экспертизы, не исполнена обязанность по внесению на депозит суда денежных средств для оплаты судебной экспертизы. 

В соответствии со ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 22 Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" суд отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика/истца ООО НПО «Феррит» о назначении судебной экспертизы.

От истца/ответчика ООО «Р-Транс Групп» 19.09.2025 поступило письменное ходатайство об изменении исковых требований, истец просит:

№1.Обязать ООО НПО «Феррит» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ООО «Р-Транс Групп» исполнительную документацию на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу:

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административному зданию по адресу:

<

...> в рамках договора подряда № 17 от 14.05.2024 года в следующих составах разделов исполнительской документации:

- исполнительная документация на работы по перекладке сети водопровода, закрепленная в СП 74.13330.2023 "Тепловые сети " (СНиП 3.05.03-85), который разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», состоящая из : 

1. Реестр исполнительной документации

2.Общий журнал работ и специальные журналы работ:

Общий журнал работ

Журнал сварочных работ (СНиП 3.03.01-87)

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

Журнал входного контроля качества

Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации)

3.Исполнительные схемы:

Исполнительные съемки прокладки трубопроводов В1, В2, В4, Т3, К1 (с отметками)

Исполнительная схема устройства траншей под выпуска канализации (с подсчетом объемов грунта)

Исполнительная схема устройства основания под выпуски канализации

4. Акт освидетельствования скрытых работ:

Прокладка трубопроводов под полами

Тепловая изоляция трубопроводов

Монтаж системы трубопроводов В1, В2, В4, Т3, К1 и крепление к конструкциям здания

Устройство прохода трубопроводов ХГСВ через стены

Антикоррозионная обработка трубопроводов

Устройство естественного основания под выпуски  канализации (подземная часть)

Устройство несжимаемого основания под выпуски  канализации (подземная часть)

Устройство выпусков  канализации (подземная часть)

Устройство теплоизоляции выпусков канализации (подземная часть)

Обратная засыпка выпусков ливневой канализации (подземная часть)

Монтаж кронштейнов крепления трубопроводов пожарного водоснабжения к металлоконструкциям каркаса здания

Антикоррозионная защита сварных соединений трубопроводов противопожарного водоснабжения

Монтаж пожарных кранов в комплекте

Герметизация мест прохода трубопроводов через наружные стены

Монтаж очистных установок

5.Акты приемки и испытаний:

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГСВ (с заключением)

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность  трубопроводов В1, В2, В4, Т4, К1

Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков на пролив

Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и т.д.)

Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения

Акт обследования водомерного узла

Акт об окончании монтажных работ

6. Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков

7. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

8. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

9. Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве.

В комплект приемо-сдаточной документации входит пакет разрешительной документации:

СРО монтажной организации

Удостоверения на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.)

- исполнительная документация на реконструкцию системы теплоснабжения, состоящая из Переченя и состава исполнительной документации по разделу «Наружные сети водоснабжения и канализации (сети водопровода)», закрепленные в СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", который (свод правил) разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

— Общий журнал работ ;

— Журнал входного контроля качества

—Журнал прокладки кабелей

— Журнал разделки кабельных муфт

- Исполнительные схемы

— Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения

— Схема прокладки внутриплощадочных низковольтных сетей

— Схема наружного освещения

-Акты освидетельствования скрытых работ

— Устройство траншеи для кабеля

— Устройство постели для кабеля

— Прокладка труб или лотков для защиты кабеля

— Монтаж кабеля

— Засыпка кабеля песком

— Устройство механической защиты или сигнальной ленты

— Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением

— Устройство и герметизация ввода в здание

— Монтаж кабельных муфт

- Акты испытаний, приемки, ведомости— Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием

— Акт технической готовности электромонтажных работ

— Ведомость изменений и отступлений от проекта

— Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

— Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию— Ведомость смонтированного электрооборудования

— Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой— Паспорт заземляющего устройства

- Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование.

- Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

№2.Обязать ООО НПО «Феррит» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу передать ООО «Р-Транс Групп» Акты выполненных работ (КС №2) и Справки о стоимости (КС-№3) на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу:

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административному зданию по адресу:

<

...>, Акты скрытых работ в рамках договора подряда № 17 от 14.05.2024 года и в соотвествии с его условиями.

№3. В случае неисполнения решения суда о выполнении обязательств по договору подряда №17 от 24 мая 2024 года в части передачи исполнительной документации, Акта выполненных работ (КС №2) и справки о стоимости (КС-№3) на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу:

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административному зданию по адресу:

<

...>, актов скрытых работ в рамках договора подряда № 17 от 14.05.2024 года и в соотвествии с его условиями взыскать с ООО НПО Феррит судебную неустойку в размере 6000 руб. за каждый день просрочки до момента фактического исполнения решения суда, начиная с четвёртого рабочего дня после вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. 

№4. Взыскать с ООО НПО Феррит в пользу ООО Р-транс Групп судебные издержки на оплату госпошлины в размере 62 323 руб.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ изменение исковых требований, с учетом уменьшения перечня истребуемых документов принято судом. 

Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Из содержания приведенных норм Арбитражного процессуального кодекса РФ следует, что отложение судебного заседания является гарантией соблюдения процессуального права ответчика, не явившегося в судебное заседание, на представление возражений и соответствующих доказательств (часть 1 статьи 41 АПК РФ) в случаях, потенциально угрожающих таким правам, в частности, при изменении предмета или основания иска, увеличении размера исковых требований.

Вместе с тем, если истец не заявлял каких-либо новых требований, не увеличивал исковые требования, а только уменьшил их, то, соответственно, ответчику известен предмет искового требования и отсутствие представителя ответчика при рассмотрении уточненного иска в данном случае не может расцениваться как нарушение принципа справедливости и состязательности судебного разбирательства.

Учитывая , что в заявлении от 19.09.2025 ООО «Р-Транс Групп» изменил исковые требования, уменьшив перечень истребуемой документации и ответчику ООО НПО «Феррит» известен предмет исковых требований, суд считает возможным продолжить судебное заседание в отсутствии сторон. 

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования и встречные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 14 мая 2024 года между ООО «РТранс Групп» (Заказчик) и ООО НПО «Феррит» (Подрядчик) заключен договор подряда №17 от 24.05.2024 года на выполнение работ по перекладке сети водопровода к административному зданию по ул. Ульяновых, 3 «а» в Кировской районе г. Астрахани и реконструкцию системы теплоснабжения административного здания по ул. Ульяновых, 3 «а» в Кировской районе г. Астрахани в соответствии с проектной документацией предоставленной исполнителю, а также в соответствии со с спецификацией (приложение № 1) к договору.

Согласно пункту 3.1 Цена договора составляет: 1 250 000 руб. из которых: 650 000 руб. стоимость работ, 600 000 руб. - стоимость материалов. 

Согласно п.1.3 договора, работы выполняются из материалов исполнителя (ответчика) перечисленных в Приложении №2 к договору. Остальные материалы закупает заказчик (истец) на основании заявки исполнителя (ответчика).

На основании счета № 42 от 23.05.2024, в соответствии с платежным поручением № 400 от 24.05.2024 ООО «РТранс Групп» произведена предоплата по договору в размере 795 000 руб. 

Срок выполнения работ по договору определен как 30 рабочих дней с даты подписания договора (пункт 2.2), который истекает 08.07.2024 г. 

Истец ООО «РТранс Групп» направил в адрес ответчика претензию от 25.10.2025 требованием в пятидневный срок представить подписанные экземпляры актов выполненных работ, актов скрытых работ, исполнительную документацию в рамках заключенного договора подряда № 17 от 24.05.2024 года. 

В ответ на претензию истца ООО «РТранс Групп» , 28.10.24 года ответчик ООО НПО «Феррит» указал об исполнении работ на объекте заказчика, увеличении стоимости работ на 184 745 руб. 21 коп., в связи с выполнением дополнительных работ, приложив дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2024, акт о приемке выполненных работ № 17 от 24.05.2024 на сумму 814 745 руб. 21 коп.

 Исковые требования ООО «РТранс Групп» связаны с тем, что ответчиком нарушены принятые на себя обязательства по выполнению подрядных работ в том объеме, стоимости и сроки, которые согласованы в договоре подряда № 17 от 24.05.2024 года, не представлены акты, ,справки о стоимости работ на сумму согласованную в договоре, не передана исполнительная документация. 

В обоснование встречных исковых требований ООО НПО «Феррит» указывает, что ответчиком не исполнены обязательства по оплате работ и материалов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Таким образом, обязанность заказчика по оплате работ наступает после сдачи ему результата работ. Надлежащим доказательством выполнения работ по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", далее - Информационное письмо N 51).

В соответствии с условиями договора № 17 от 24.05.2024 исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с проектной документацией на перекладку сети водопровода и реконструкцию системы теплоснабжения административного здания, расположенного в Кировском районе г. Астрахани, ул. Ульяновых,3 «а»

Согласно пункту 1.3 договора, работы выполняются из материалов исполнителя (ответчика) перечисленных в Приложении №2 к договору. Остальные материалы закупает заказчик (истец) на основании заявки исполнителя (ответчика).

В приложении № 1 к договору стороны предусмотрели наименование работ и их стоимость на общую сумму 650 000 руб.:

реконструкция систем теплоснабжения административного здания – 550 000 руб.

перекладка сети водопровода к административному зданию -100 000 руб.

В приложении № 2 стороны согласовали перечень материалов: для перекладки сети водопровода на сумму 100 000 руб., для реконструкции систем теплоснабжения административного здания –500 000 руб., всего 600 000 руб.

В соответствии с пунктом 3.3. договора, по платежному поручением № 400 от 24.05.2024 заказчиком ООО «РТранс Групп» произведена предоплата по договору в размере 795 000 руб. , из которых 600 000 руб. – 100% оплата стоимости материалов, 195 000 руб. – авансовый платеж составляющий 30% от стоимости работ.

Согласно письму № 02/06 от 02.06.2025 исполнителем ООО НПО «Феррит» направлен акт № 2 от 17.07.2024 о приемке выполненных работ с использованным подрядчиком материалов, на общую сумму 968 500 руб. (600 000 руб. стоимость работ по договору + 368 500 руб. стоимость материалов).

Исполнителем ООО НПО «Феррит» выставлен счет № 50 от 17.06.2024 на оплату материалов на сумму 368 500 руб. 

По платежному поручению № 453 от 17.06.2024 заказчик ООО «РТранс Групп» согласно пункту 1.3 договора оплатил остальные материалы на сумму 370 000 руб. 

В ответ на претензию от 25.10.2025 письмом от 28.10.2024 ООО НПО «Феррит» направил в адрес заказчика акт о приёмке выполненных работ № 1 от 17.07.2024 на сумму 814 745 руб.21 коп. (650 000 руб. стоимость работ по договору + 184 745 руб. 21 коп.- стоимость дополнительных работ) и дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в п. 3.1 договора № 17 от 23.05.2024 и приложение № 1, включив стоимость дополнительных работ на сумму 184 745 руб. 21 коп., стоимость исполнительной документации – 30 000 руб. 

Односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ (пункт 14 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Заказчик не заявлял возражений по качеству выполненных работ. Из материалов дела следует, что заказчик не подписал акт о приемки выполненных работ № 1 от 17.07.2024 и дополнительное соглашение к договору, в связи с наличием возражений по стоимости дополнительно предъявленных к оплате работ, а также отсутствием исполнительной документации. 

В силу пункта 5 статьи 709 ГК РФ если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

Согласно пункту 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

В силу пункта 4 указанной статьи подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком, могут быть отнесены исключительно те, которые, исходя из имеющейся информации на момент заключения договора объективно не могли быть учтены, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

В пунктах 1, 2 статьи 744 ГК РФ установлено право заказчика вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

В предмет доказывания по спору об оплате заказчиком дополнительных работ входят следующие обстоятельства: предусмотренная договором возможность изменения условий; необходимость выполнения работ и уведомление об этом заказчика согласование сторонами дополнительного объема, видов и стоимости работ; выполнение согласованных дополнительных работ подрядчиком; сдача подрядчиком выполненных работ заказчику.

Подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика (пункт 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Согласно пунктам 9.1,9.2 договора изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается , за исключением из изменения по соглашению сторон в следующих случаях: при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ, качества выполненных работ и иных условий договора. 

В указанных случаях одна из сторон направляет другой стороне соответствующее письменное предложение с обоснованием предлагаемых изменений . Эта другая сторона в течении 5 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внесении изменений в условия настоящего договора , о чем в письменной форме уведомляет другую сторону . При этом , письма (уведомления) сторон с указанными предложениями и решением на него имеют силу в том случае , если они подписаны и скреплены печатями сторон ( при наличии).

Из вышеприведенных обстоятельств следует, что исполнитель ООО НПО «Феррит» сообщил заказчику о выполнении дополнительных работ и увеличении договорной цены работ после фактического выполнения работ.

Доказательства согласования выполнения дополнительных работ и увеличения цены договора, до выполнения работ ООО НПО «Феррит», в порядке статьи 65 АПК РФ не представлены.

Суд предлагал назначить судебную экспертизу для определения необходимости выполнения дополнительных работ в целях надлежащего исполнения договора подряда. ООО НПО «Феррит» заявило ходатайство о назначении судебной экспертизы, но обязанность по перечислению денежных средств на депозит суда не исполнило. В связи с чем, суд отказал в назначении судебной экспертизы.

Доказательства того, то дополнительные работы объективно не могли быть учтены, но должны быть произведены, в материалы дела не представлены, о приостановке работ по указанным причинам подрядчик не заявлял. Заявленная подрядчиком стоимость дополнительных работ превышает десять процентов общей стоимости строительства.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что в данном случае достаточные и допустимые доказательства, подтверждающие выполнение работ истцом в заявленном объеме, а также получение согласия заказчика на выполнение спорных работ, не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для оплаты заказчиком дополнительных работ.

С учетом оплаты заказчиком полной стоимости материалов (600 000 руб. + 370 000 руб.), внесение авансового платежа в сумме 195 000 руб. за выполнение работ по договору подряда, оставшаяся сумма неоплаченных работ составляет 455 000 руб. (650000-195000).

Согласно пункту 2.5 заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ обязан его рассмотреть и направить исполнителю один экземпляр подписанного акта, либо мотивированный отказ.

В соответствии с пунктом 3.3. договора окончательный расчет осуществляется заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты принятия результата работ и подписания акта выполненных работ, при отсутствии замечаний со стороны заказчика. 

Согласно пункту 5.2 в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств , предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, исполнитель вправе требовать уплаты неустоек.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором, начиная со дня следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской федерации от невыплаченной в срок сумы. 

В силу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ и части 1 статьи 65 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

Из материалов дела следует, что 29.10.2024 подрядчиком направлен в адрес заказчика акт о приемки выполненных работ.

Согласно отчету об отслеживании отправлений неудачная попытка вручения корреспонденции состоялась 31.10.2024. Соответственно с указанной даты заказчик имел возможность принять работы и подписать акт в срок до 07.11.2024, следовательно окончательный срок оплаты составляет 14.11.2024.

Оснований для отказа в приёмке согласованных договором подряда работ у заказчика не имелось. Сторонами не заявлялось о том, что работы выполнены ненадлежащим образом. 

За нарушение срока оплаты истец по встречному иску начислил неустойку в сумме 70 109 руб. 01 коп. за период с 15.11.2024 по 25.04.2025.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

С учетом установленной судом суммы задолженности 455 000 руб. неустойка составляет 41 769 руб.

Отсутствие исполнительной документации, на которую ссылается заказчик, не является основанием для отказа от оплаты выполненных работ по договору подряда, поскольку обязанность оплаты не поставлена в зависимость от наличия или отсутствия исполнительной документации.

В данном случае заказчик ООО «РТранс-Групп» обратился с самостоятельными исковыми требованиями об истребовании у подрядчика НПО «Феррит» исполнительной документации. 

В силу части 1.5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) исполнительная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и отображающую фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации.

Состав и порядок ведения исполнительной документации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.

Из анализа Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (далее - Приказ N 344/пр) следует, что приведенный нормативный правовой акт предназначен для ориентира при создании исполнительной документации в строительстве, целью которой является подтверждение соответствия объекта нормам технических регламентов, его готовности к вводу в эксплуатацию, и обеспечение возможности его последующей должной эксплуатации (часть 11.1 статьи 55, части 5, 7, 8 статьи 55.24 ГрК РФ).

Однако само по себе отсутствие исполнительной документации, равно как и несоставление актов освидетельствования скрытых работ, не опровергает факта выполнения работ и не может заведомо лишать результат качественно выполненных работ потребительской ценности при создании объекта капитального строительства подрядчиком, хотя и затрудняет его эксплуатацию (статья 723 ГК РФ).

Рассматривая исковые требования ООО «Р-Транс Групп» об истребовании исполнительной документации , суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В рассматриваемом случае конкретный перечень исполнительной документации, подлежащей передаче заказчику с результатом работ, сторонами договора не согласован.

Исходя из п. 11 Обзора судебной практики N 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 06.07.2016) исполнительная документация необходима как для безопасной эксплуатации объекта, так и для проведения ремонтных работ.

Следовательно, требования Истца об истребовании исполнительной документации могут быть удовлетворены при наличии доказательств того, что при ее отсутствии объект не будет отвечать требованиям безопасности либо не сможет эксплуатироваться. (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2024 по делу А40-72995/2023, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.07.2024 N Ф07-8591/2024 по делу N А05-10944/2023)

Результатом работ по договору подряда № 17 от 24.05.2024 года является перекладка сети водопровода и реконструкции системы теплоснабжения в соответствии с проектной документацией к административному зданию.

Согласно п.1.2 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. 

Согласно п.1.4 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией и выполненными на основании проектной документации, рабочей документации работами осуществляется ведение исполнительной документации. 

Согласно п.1.5 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, Исполнительная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и отображающую фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации. Состав и порядок ведения исполнительной документации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства

Согласно п.3 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

Согласно п.6 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. Таким образом, именно на ответчике (подрядчике, лице, осуществляющем строительство) лежит обязанность по ведению Исполнительной документации.

Порядок ведения и состав Исполнительной документации закреплены в Приказе МинСтроя РФ от 16 мая 2023 года №344\пр, Письме Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 09 сентября 2018 года №09-00-06\8998, соответственно, отдельного утверждения состава и перечня исполнительной документации в рамках договора №17 от 14 мая 2024 года не требовалось.

 Исполнительная документация необходима заказчику (застройщику) для того, чтобы пройти проверку в органах строительного контроля и надзора и ввести объект в эксплуатацию;- проверить объемы, прочность постройки, в ходе эксплуатации объекта узнать необходимые данные для его реконструкции или капитального ремонта. 

Перечень и состав исполнительной документации по разделу сети теплоснабжения закреплен в СП 74.13330.2023 "Тепловые сети " (СНиП 3.05.03-85), который разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22 июля 2008 №123- ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно Раздела 1 «Область применения» СП 74.13330.2023 "Тепловые сети " (СНиП 3.05.03-85) установлено, что: 

пункт 1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к производству работ на тепловых сетях и сооружениях на них, исключая тепловые пункты и насосные станции. 

пункт 1.2 Настоящий свод правил распространяется на строительство новых, реконструкцию и ремонт тепловых сетей, транспортирующих горячую воду температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. 

пункт 1.3 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении, а также при ремонте существующих тепловых сетей, в том числе при разработке организационнотехнических решений (проект производства работ (ППР), программ испытаний и пуско-наладочных работ (ПНР)). 

Согласно п.4.2 СП 74.13330.2023 "Тепловые сети " (СНиП 3.05.03-85) Законченные строительством тепловые сети следует принимать в эксплуатацию в соответствии с требованиями СП 68.13330.

Согласно п.4.10 (свода правил) СП 68.13330: После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных проектной документацией, лицом, осуществляющим строительство, направляется застройщику (техническому заказчику) заявление (приложение А) о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с приложением:

 - исполнительной документации, общего и специальных журналов учета выполнения работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов;

 - журнала авторского надзора по объекту строительства в целом или отдельным зданиям и сооружениям, а также по пусковым комплексам, если таковые предусмотрены проектной документацией, 

- при осуществлении авторского надзора; - сертификатов, технических паспортов, протоколов испытаний и других документов, удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ; - актов испытаний и опробования технических устройств, систем инженернотехнического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; - материалов проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора;

 - подтверждения соответствия объекта требованиям энергетической эффективности и оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- иной документации, подтверждающей факт выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Состав Исполнительной документации по разделу «Сети теплоснабжения» включает в себя: 

Общий журнал работ и специальные журналы работ: — Общий журнал работ ; — Журнал входного контроля качества — Журнал прокладки кабелей — Журнал разделки кабельных муфт,

  Исполнительные схемы — Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения — Схема прокладки внутриплощадочных низковольтных сетей — Схема наружного освещения,

 Акты освидетельствования скрытых работ — Устройство траншеи для кабеля — Устройство постели для кабеля — Прокладка труб или лотков для защиты кабеля — Монтаж кабеля — Засыпка кабеля песком — Устройство механической защиты или сигнальной ленты — Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением — Устройство и герметизация ввода в здание — Монтаж кабельных муфт,

 Акты испытаний, приемки, ведомости — Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием — Акт технической готовности электромонтажных работ — Ведомость изменений и отступлений от проекта — Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ — Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию — Ведомость смонтированного электрооборудования — Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой — Паспорт заземляющего устройства,

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

Перечень и состав исполнительной документации по разделу «Наружные сети водоснабжения и канализации (сети водопровода)» закреплены в СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", который (свод правил) разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и устанавливает требования к проектированию и строительству, включая реконструкцию и капитальный ремонт, наружных сетей и сооружений централизованных или нецентрализованных систем водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных и городских округов, производственных и сельскохозяйственных объектов.

 Согласно Раздела 4 «Общие положения» СП 129.13330.2019 следует, что :

 пункт 4.1 При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации кроме требований проектов, рабочих проектов (далее - проекты) и настоящего свода правил должны соблюдаться требования СП 48.13330, СП 66.13330, СП 86.13330, СП 126.13330, СП 249.1325800, СП 272.1325800, СП 273.1325800, СП 341.1325800, СП 399.1325800, СП 503.1325800. 

пункт 4.2 Законченные строительством трубопроводы и сооружения водоснабжения и канализации следует принимать в эксплуатацию в соответствии с СП 68.13330. 

Согласно п.4.10 (свода правил) СП 68.13330: После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных проектной документацией, лицом, осуществляющим строительство, направляется застройщику (техническому заказчику) заявление (приложение А) о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с приложением: - исполнительной документации, общего и специальных журналов учета выполнения работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов; - журнала авторского надзора по объекту строительства в целом или отдельным зданиям и сооружениям, а также по пусковым комплексам, если таковые предусмотрены проектной документацией, - при осуществлении авторского надзора; - сертификатов, технических паспортов, протоколов испытаний и других документов, удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ; - актов испытаний и опробования технических устройств, систем инженернотехнического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; - материалов проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора; - иной документации, подтверждающей факт выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Состав Исполнительной документации по разделу «Наружные сети водоснабжения и канализации» включает в себя:

 1. Реестр исполнительной документации

 2.Общий журнал работ и специальные журналы работ: Общий журнал работ Журнал сварочных работ (СНиП 3.03.01-87) Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений Журнал входного контроля качества Журнал авторского надзора  (заполняется ответственным лицом от проектной организации) 

3.Исполнительные схемы: Исполнительные съемки прокладки трубопроводов В1, В2, В4, Т3, К1 (с отметками) Исполнительная схема устройства траншей под выпуска канализации (с подсчетом объемов грунта) Исполнительная схема устройства основания под выпуски канализации 

4. Акт освидетельствования скрытых работ: Прокладка трубопроводов под полами Тепловая изоляция трубопроводов Монтаж системы трубопроводов В1, В2, В4, Т3, К1 и крепление к конструкциям здания Устройство прохода трубопроводов ХГСВ через стены Антикоррозионная обработка трубопроводов Устройство естественного основания под выпуски  канализации (подземная часть) Устройство несжимаемого основания под выпуски  канализации (подземная часть) Устройство выпусков  канализации (подземная часть) Устройство теплоизоляции выпусков канализации (подземная часть) Обратная засыпка выпусков ливневой канализации (подземная часть) Монтаж кронштейнов крепления трубопроводов пожарного водоснабжения к металлоконструкциям каркаса здания Антикоррозионная защита сварных соединений трубопроводов противопожарного водоснабжения Монтаж пожарных кранов в комплекте Герметизация мест прохода трубопроводов через наружные стены Монтаж очистных установок 

5.Акты приемки и испытаний: Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГСВ (с заключением) Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность  трубопроводов В1, В2, В4, Т4, К1 Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков на пролив Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и т.д.) Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения Акт обследования водомерного узла Акт об окончании монтажных работ.

 6. Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков 

 7. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами. 

8. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. 

9. Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве В комплект приемо-сдаточной документации входит пакет разрешительной документации: СРО монтажной организации Удостоверения на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.).

Из вышеприведенных положений следует, что состав исполнительной документации объекта предусмотрен действующим законодательством.

Заказчиком ООО «Р-транс Групп» была разработана проектная документация по реконструкции системы теплоснабжения административного здания по ул. Ульяновых , 3а в Кировском районе г.Астрахани «Тепловые сети» и рабочая документация «Перекладка сети водопровода административного здания по ул. Ульяновых , 3а в Кировском районе г.Астрахани, ООО «Астраханские тепловые сети» выдано техническое задание по реконструкции системы теплоснабжения» (л.д. 91-100).

Вопреки доводам ответчика, в материалы дела не представлены доказательства запроса подрядчиком у заказчика дополнительной документации, о приостановке работ , в связи с отсутствием документации, не заявлено. 

Из писем МУП г,Астрахани «Астрводоканал» от 10.03.2025, ООО «Астраханские тепловые сети» от 06.03.2025 следует, что исполнительная документация необходима для ввода сетей теплоснабжения и вододоснабжения в эксплуатацию ресурсоснабжающими организациями.

Наличие у подрядчика исполнительной документации следует из текста дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 17 от 23.05.2024.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ООО «РТрансГрупп» об обязании ООО НПО «Феррит» передать исполнительную документацию, предусмотренную нормативными актами, а также акты скрытых работ. 

В части исковых требований ООО «РТрансГрупп» о передачи актов выполненных работ КС -2 , справки КС-3, суд не находит оснований для их удовлетворения, поскольку из письма 28.10.2024 следует что исполнителем направлены акты о приемке выполненных работ, счет на оплату, которые фактически получены заказчиком 29.11.2024.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора - взыскателя (судебная неустойка).

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018), в силу п. 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об огвегственности за нарушение обязательств" суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в дальнейшем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, чч. 1 и 2 ст. 324 АПК РФ).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Таким образом, такая мера как присуждение судебной неустойки, в случае неисполнения решения суда, должна побудить ответчика к исполнению решения суда, поскольку это будет для него явно более выгодным, чем неисполнение.

По смыслу статей 308.3 и 330 ГК РФ судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Согласно пункту 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Учитывая, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несет в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом в целях дополнительного воздействия па должника, и присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению. 

Частью 1 статьи 174 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта.

Таким образом, суд частично удостоверяет исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» об обязании Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» исполнительную документацию на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу:

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административного здания по адресу:

<

...> по договору подряда № 17 от 14.05.2024 года, в составе разделов исполнительской документации, в течении трех дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Суд приходит к выводу, что в целях выполнения установленной законом стимулирующей функции, с ответчика взысканию подлежит судебная неустойка в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Данный размер неустойки является разумным, неустойка в указанном размере соответствует требованиям справедливости и соразмерности.

В силу части 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Право на отказ от требований вытекает из конституционно значимого принципа диспозитивности, который, в частности, означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 N 10-П).

Из заявлении ООО «Р-ТрансГрупп» об изменение исковых требований, подписанных руководителем, следует что истец отказался от взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 60 385 руб. 25 коп. и пени в сумме 115 833 руб. 33 коп. Производство по делу в этой части подлежит прекращению.

При подаче иска в суд ООО «Р-ТрансГрупп» по платежному поручению № 646 от 08.11.2024 оплатило госпошлину в сумме 52 323 руб.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, государственная пошлина в сумме 50 000 руб. по исковым требованиям неимущественного характера подлежит взысканию с ответчика ООО НПО «Феррит» в пользу первоначального истца ООО «Р-ТрансГрупп». Из федерального бюджета подлежит возврату государственная пошлина в сумме 12 323 руб.

Учитывая частичное удовлетворение встречных исковых требований ООО НПО «Феррит», расходы по госпошлине по имущественным требованиям подлежат взысканию с ответчика ООО «Р-ТрансГрупп» пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, в сумме 28 447 руб. Остальная сумма относится на расходы ООО НПО «Феррит».

В результате зачёта требований по первоначальному иску и по встречным исковым требованиям, в части возмещения расходов по госпошлине:

с Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» подлежат взысканию судебные расходы по госпошлине в сумме 21 553 руб.,

с Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» в пользу Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» подлежит взысканию основной долг в сумме 455 000 руб., неустойка в сумме 41 769 руб.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) передать Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в течении трех дней с даты вступления решения суда в законную силу, исполнительную документацию на работы по перекладке сети водопровода к административному зданию по адресу:

<

...> и реконструкцию системы теплоснабжения административного здания по адресу:

<

...> по договору подряда № 17 от 14.05.2024 года, в следующих составах разделов исполнительской документации:

- исполнительная документация на работы по перекладке сети водопровода, закрепленная в СП 74.13330.2023 "Тепловые сети " (СНиП 3.05.03-85), который разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом требований федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», состоящая из : 

1. Реестр исполнительной документации

2.Общий журнал работ и специальные журналы работ:

Общий журнал работ

Журнал сварочных работ (СНиП 3.03.01-87)

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

Журнал входного контроля качества

Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации)

3.Исполнительные схемы:

Исполнительные съемки прокладки трубопроводов В1, В2, В4, Т3, К1 (с отметками)

Исполнительная схема устройства траншей под выпуска канализации (с подсчетом объемов грунта)

Исполнительная схема устройства основания под выпуски канализации

4. Акт освидетельствования скрытых работ:

Прокладка трубопроводов под полами

Тепловая изоляция трубопроводов

Монтаж системы трубопроводов В1, В2, В4, Т3, К1 и крепление к конструкциям здания

Устройство прохода трубопроводов ХГСВ через стены

Антикоррозионная обработка трубопроводов

Устройство естественного основания под выпуски  канализации (подземная часть)

Устройство несжимаемого основания под выпуски  канализации (подземная часть)

Устройство выпусков  канализации (подземная часть)

Устройство теплоизоляции выпусков канализации (подземная часть)

Обратная засыпка выпусков ливневой канализации (подземная часть)

Монтаж кронштейнов крепления трубопроводов пожарного водоснабжения к металлоконструкциям каркаса здания

Антикоррозионная защита сварных соединений трубопроводов противопожарного водоснабжения

Монтаж пожарных кранов в комплекте

Герметизация мест прохода трубопроводов через наружные стены

Монтаж очистных установок

5.Акты приемки и испытаний:

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГСВ (с заключением)

Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность  трубопроводов В1, В2, В4, Т4, К1

Акт испытания системы внутренней канализации и водостоков на пролив

Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Акты индивидуального испытания оборудования (насосы, водонагреватели и т.д.)

Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации

Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения

Акт обследования водомерного узла

Акт об окончании монтажных работ

6. Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков

7. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На все поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами

8. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

9. Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве.

В комплекте приемо-сдаточной документации подлежит передаче пакет разрешительной документации:

СРО монтажной организации

Удостоверения на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.);

- исполнительная документация на реконструкцию системы теплоснабжения, состоящая из Переченя и состава исполнительной документации по разделу «Наружные сети водоснабжения и канализации (сети водопровода)», закрепленные в СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", который (свод правил) разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а именно:

 Общий журнал работ ;

 Журнал входного контроля качества,

 Журнал прокладки кабелей,

 Журнал разделки кабельных муфт,

 Исполнительные схемы,

 Акт разбивки трассы для прокладки наружных сетей электроснабжения,

 Схема прокладки внутриплощадочных низковольтных сетей,

 Схема наружного освещения,

Акты освидетельствования скрытых работ,

Устройство траншеи для кабеля,

Устройство постели для кабеля,

Прокладка труб или лотков для защиты кабеля,

Монтаж кабеля,

Засыпка кабеля песком,

Устройство механической защиты или сигнальной ленты,

Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением,

Устройство и герметизация ввода в здание,

Монтаж кабельных муфт,

Акты испытаний, приемки, ведомости,

Акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием,

Акт технической готовности электромонтажных работ,

Ведомость изменений и отступлений от проекта,

Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ,

Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию,

Ведомость смонтированного электрооборудования,

Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции проводок, кабелей перед прокладкой, Паспорт заземляющего устройства,

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование,

Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта;

Акты скрытых работ выполненных по договору подряда № 17 от 14.05.2024 года.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебную неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок, в размере 1000 руб., за каждый день неисполнения решения суда в трехдневный срок с даты его вступления в законную силу по день фактического исполнения решения суда. 

Прекратить производство по исковым требованиям Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 60 385 руб. 25 коп. и пени в сумме 115 833 руб. 33 коп. 

В остальной части иска Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» - отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы по госпошлине в сумме 50 000 руб. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12 323 руб., уплаченную по платежному поручению № 646 от 08.11.2024.

Встречные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) основной долг в сумме 455 000 руб., неустойку в сумме 41 769 руб., судебные расходы по госпошлине в сумме 28 447 руб. 

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований НПО «Феррит» - отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 83 руб., уплаченную по платежному поручению № 36 от 13.05.2025.

В результате зачёта требований по первоначальному иску и по встречным исковым требованиям, в части возмещения расходов по госпошлине:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы по госпошлине в сумме 21 553 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Р-Транс Групп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью НПО «Феррит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) основной долг в сумме 455 000 руб., неустойку в сумме 41 769 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья

С.Ю. Чижова