63/2023-323981(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-11028/2021

г. Новосибирск

09 ноября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в судебном заседании  вопрос о вынесении дополнительного решения по иску Администрации  Северного района Новосибирской области (ОГРН 1045406828455),  

с. Северное, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Стройкомплект» (ОГРН 1117017003840), г. Томск,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора: 1) общество с ограниченной ответственностью  «ПРОЛЭНД», 2) общество с ограниченной ответственностью  «Автодорпроект», 3) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и  энергетики Новосибирской области, 4) индивидуальный предприниматель  Понамарев Валентин Николаевич, г. Татарск Новосибирской области,  

о расторжении муниципального контракта, об обязании устранить замечания,  указанные в реестре предписаний, о взыскании 4 969 721,65 рублей,  

по встречному иску о взыскании 12 741 607,02 рублей,  при участии представителей:  

истца - Михонин В.Г., доверенность № 8 от 14.06.2023, паспорт, диплом; 

ответчика – не явился, извещен надлежащим образом;  третьих лиц - не явились, извещены надлежащим образом,  

руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 178 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Стройкомплект» в течение месяца со дня вступления решения в  законную силу при соблюдении технологии выполнения работ устранить  следующие недостатки выполненных работ:  

в техническом помещении АБК, где размещен водонагреватель и бак  запаса холодной воды деформация линолеума (волны), отслоение  противопожарной краски на металлоконструкциях каркаса здания в  сортировочном корпусе, дополнительное отслоение краски на транспортере  сортировочной линии в сортировочном корпусе, плитка на полу волнами и  хрустит под ногами, отстала у входной двери в сортировочном корпусе,  затекание воды на пол склада холодного помещения в сортировочном  корпусе.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк