АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж Дело № А14-17574/2020  «28» декабря 2020 г.  

Резолютивная часть решения объявлена 21.12.2020.  Решение изготовлено в полном объеме 28.12.2020.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в судебном разбирательстве дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СИГМА»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Региональный проект», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору № 17-Ш от 04.04.2019 и процентов  за пользование чужими денежными средствами  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 18.11.2020;  от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 01.12.2020;  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СИГМА»  (далее – истец, ООО «ТД СИГМА») обратилось в арбитражный суд с  исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Региональный проект» (далее – ответчик, ООО  «СК «Региональный проект») о взыскании 2 958 686,58 руб. задолженности  по договору № 17-Ш от 04.04.2019, 281 794,26 руб. процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 13.09.2019 по 15.10.2020, а также  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с  16.10.2020 по день фактической уплаты задолженности.  

Определением суда от 20.11.2020 указанное исковое заявление принято  к производству, предварительное судебное заседание и судебное  разбирательство по делу назначены на 16.12.2020.  

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном  объеме.  

Представитель ответчика представил отзыв на исковое заявление, в  котором указал на то, что истцом при определении суммы задолженности не  учтена оплата от 09.09.2020 на сумму 200 000 руб., а также представил  контррасчет процентов с учетом частичной оплаты долга.  

На основании статей 66, 159 АПК РФ указанные документы  приобщены к материалам дела.  

С учётом того, что определением суда от 20.11.2020 дело назначено к  судебному разбирательству, стороны не заявили возражений против  рассмотрения дела в судебном заседании, суд вынес определение о  завершении предварительного судебного заседания и переходе к судебному  разбирательству.  

В судебном заседании 16.12.2020 в порядке статьи 163 АПК РФ  объявлялся перерыв до 12 час. 00 мин. 21.12.2020, о чем на сайте  арбитражного суда размещена соответствующая информация.  

В судебном заседании после перерыва представитель истца заявил  ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым  просил взыскать с ответчика 2 758 686,58 руб. задолженности по договору   № 17-Ш от 04.04.2019, 280 774,26 руб. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 13.09.2019 по 15.10.2020, а также  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с  16.10.2020 по день фактической уплаты задолженности.  

На основании статей 49, 159 АПК РФ уточнение исковых требований  принято судом к рассмотрению.  

Представитель истца поддержал заявленные требования с учетом  принятых судом уточнений.  

Представитель ответчика возражений относительно уточненных сумм  задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами  не заявил.  

Из материалов дела следует, что 04.04.2019 между  ООО «СК «Региональный проект» (заказчик) и ООО «ТД ИТЦ» (подрядчик,  впоследствии изменило наименование на ООО «ТД СИГМА») был заключен  договор подряда № 17-Ш, по условиям которого подрядчик обязуется своими  силами и средствами с использованием своих материалов выполнить  поставку и комплекс строительно-монтажных работ систем пожарной  сигнализации и управления дымоудалением (АПС), системы оповещения и  управления эвакуацией (СОУЭ), охранной сигнализации (ОС), системы  контроля и управления доступом (СКУД), локальной вычислительной сети  (ЛВС), ограничение доступа на территорию, телефонизации, системы  видеонаблюдения (СОТ), внутреннее телевидение на строительном объекте:  «Общеобразовательная школа 1101 место по адресу: г. Воронеж, жилой  массив Олимпийский, 14» в соответствии с условиями настоящего договора,  локальными сметными расчетами, сводным сметным расчетом и  протоколами согласования договорной цены, а заказчик обязуется создать  

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную договором цены (пункт 1.1. договора).  

Виды работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору,  определены в локальных сметных расчетах, а также в сводном сметном  расчете и протоколе согласования договорной цены (пункт 1.2. договора).  

Согласно пунктам 3.1., 3.2. договора общая стоимость работ составляет  23 990 000 руб. и определяется согласованными сторонами сметами. В цену  договора включаются все затраты подрядчика на выполнение работ:  применимые налоги и сборы, затраты на заработную плату, а также иные  расходы подрядчика, в том числе на закупку необходимых материалов для  выполнения работ по договору.  

В соответствии с пунктом 3.3. договора оплата по договору  производится в следующем порядке: в течение 5 рабочих дней с момента  подписания договора заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика  аванс на материалы в размере 5 000 000 руб.; расчет за выполненные работы  производится заказчиком поэтапно на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ, счета-фактуры не позднее 10 банковских  дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.  

В пункте 4.1. договора стороны предусмотрели следующие сроки  выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора,  окончание монтажных работ – 31.08.2019.  

Истец передал оборудование и выполнил работы на общую сумму  23 010 686,58 руб., что подтверждается актами КС-2, КС-3 от 30.08.2019,  15.01.2020.  

Обязательство по оплате выполненных работ исполнено ответчиком  частично, задолженность по расчетам истца составила 2 758 686,58 руб.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № 62-5 от 15.05.2020 с  требованием об оплате задолженности.  

Неисполнение требований претензии послужило основанием для  обращения истца в суд с настоящими исковыми требованиями.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства,  заслушав пояснения представителей сторон, оценив все в совокупности, суд  находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по  следующим основаниям.  

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не  допускается.  

Исходя из существа заявленных исковых требований и правовой  природы отношений сторон, вытекающих из договора подряда № 17-Ш от  04.04.2019, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 25 ГК  РФ об ответственности за нарушение обязательств и нормы главы 37 ГК РФ  о договорах подряда (строительного подряда).  

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в  установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик  обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,  принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).  

В соответствии со статьей 711 ГК РФ, если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных  ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика  досрочно.  

На основании пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных  подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором  строительного подряда.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате  выполненных работ является сдача результата работ заказчику (статьи 711,  746 Гражданского кодекса РФ).  

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком  и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими  сторонами.  

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание  своих требований и возражений.  

Факт выполнения истцом работ и принятие их заказчиком  подтверждается представленными в материалы дела документами: договором  подряда № 17-Ш от 04.04.2019, актами КС-2, КС-3 от 30.08.2019, 15.01.2020,  подписанными сторонами без замечаний и возражений и т.д.  

Ответчик заявленные требования по существу не оспорил,  доказательств наличия задолженности в меньшем размере не представил.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2  статьи 9 АПК РФ).  

Согласно пункту 3¹ статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые  ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений,  считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены  или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно  существа заявленных требований.  

Учитывая изложенное, суд считает требование истца о взыскании  2 758 686,58 руб. задолженности по договору подряда № 17-Ш от 04.04.2019  обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

За просрочку оплаты выполненных работ истцом начислены проценты  за пользование чужими денежными средствами за период с 13.09.2019 по  15.10.2020, а также заявлено требование о продолжении начисления  

процентов за пользование чужими денежными средствами по день  фактической оплаты долга.  

В силу части 1 статьи 395 ГК РФ (в редакции с 01.08.2016) в случаях  неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата,  иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.  Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,  действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если  иной размер процентов не установлен законом или договором.  

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами  осуществлен истцом аналогично с примененной ответчиком в контррасчете  методикой, период просрочки определен верно, применены действующие в  соответствующие периоды размеры ключевой ставки Банка России.  

Так как используемые сторонами в расчете и контррасчете периоды,  ставки, базы начисления, иные коэффициенты идентичны, суд не находит  оснований для перерасчета требований в указанной части (статья 70 АПК  РФ).  

Истец также просит продолжить начисление процентов на сумму  задолженности по день фактической оплаты долга.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование  чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств  кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не  установлен для начисления процентов более короткий срок.  

Согласно пункту 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи  395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из  периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование  чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день  уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы  процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в  резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента  фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При  этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты  задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.  

С учетом указанных обстоятельств, требование истца о взыскании  процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит  удовлетворению в сумме 302 171,82 руб. за период с 13.09.2019 по  21.12.2020, и с 22.12.2020 и по день фактической оплаты долга  (2 758 686,58 руб. с учетом поступающих оплат), исходя из ключевой ставки  Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки.  

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,  взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21. Налогового  кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые  требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме  38 304 руб. Истец при обращении в суд платежным поручением № 168 от  18.11.2020 уплатил государственную пошлину в сумме 39 202 руб. В связи с  чем, на основании статьи 110 АПК РФ следует взыскать с ответчика в пользу  истца 38 304 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40. НК РФ излишне  уплаченная государственная пошлина в сумме 898 руб. подлежит возврату  истцу из федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Региональный проект», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом СИГМА», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 2 758 686,58 руб. задолженности, 302 171,82 руб.  процентов за пользование чужими денежными средствами за период с  13.09.2019 по 21.12.2020, проценты за пользование чужими денежными  средствами на сумму 2 758 686, 58 руб., начиная с 22.12.2020 и по день  фактической оплаты задолженности (с учетом поступающих оплат), исходя  из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды  просрочки, 38 304 руб. расходов по государственной пошлине.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый  Дом СИГМА», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 898 руб.  излишне уплаченной государственной пошлины из Федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Г.В. Семенов