ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Резолютивная часть решения

Дело № А68-653/2024

28 января 2025 года

город Тула

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «ФартСтрой» в течении 30 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу (при условии достижения среднесуточной температуры воздуха выше +10 С) устранить недостатки выполненных работ в рамках гарантийных обязательств по контракту на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в ЦПКиО № 2021.5110 от 28.09.2021, а именно: восстановить разрушенное асфальтобетонное покрытие вдоль бортовых камней на дорожке к прудам, экологической тропе в объеме порядка 300 кв.м.  

Взыскать с ООО «ФартСтрой» в пользу ГУ ТО «Тульские парки» в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 6 000 руб.  

Судебные расходы по оплате судебной экспертизы отнести на ответчика. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок после его принятия через Арбитражный суд Тульской области.  

Судья Е.А. Разоренова