АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-1385/2021

г.Чита

10 февраля 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 11985 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Забайкальского края денежные средства в сумме 380000 руб. по платежному поручению от 14.01.2025 № 94.  

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о снижении размера неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность за выполненные и принятые работы по договору подряда № 11А/ПД/2019 в сумме 3069951,91 руб., неустойку в сумме 2871019,03 руб. за период с 15.09.2020 по 13.11.2024, неустойку с последующим начислением в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, начиная с 14.11.2024 и до момента фактического исполнения денежного обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

задолженность за выполненные, но не принятые работы по договору подряда № 11А/ПД/2019 в сумме 259243,83 руб., неустойку в сумме 239904,25 руб. за период с 25.09.2020 по 13.11.2024, неустойку с последующим начислением в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, начиная с 14.11.2024 и до момента фактического исполнения денежного обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность за выполненные дополнительные работы на объекте: «Строительство разреза по добыче каменного угля на Зашуланском месторождения, I очередь», в Красночикойском районе Забайкальского края в сумме 13337580 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2215715,35 руб. за период с 11.08.2020 по 24.07.2023.  

Начиная с 25.07.2023 взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) производить по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерациив в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды от стоимости неоплаченных дополнительных работ, с учетом их уменьшения в случае погашения за каждый день просрочки платежа и до момента фактического исполнения денежного обязательства  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 132038 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы за проведение дополнительной экспертизы в сумме 50000 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Забайкальского края денежные средства в сумме 60000 руб. по платежному поручению от 27.03.2024 № 9.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Л.В. Бочкарникова