АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

18 октября 2023 года

 

Дело № А33-8386/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 11 октября 2023 года.

В полном объёме решение изготовлено 18 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Бахрамовой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЕнисейГрупп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании выполнить работы, взыскании пени,

в присутствии до перерыва:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 15.05.2023 №01-50/59,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Медведевой К.А., 

 

установил:

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЕнисейГрупп» (далее – ответчик) об обязании за счет собственных средств:

- выполнить работы по устранению дефектов - отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №01193000389200000210001 от 12.05.2020 в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами со дня вступления в законную силу судебного акта;

- выполнить работы по устранению дефектов - трещина при въезде на дворовую территорию и выкрашивание асфальтового покрытия в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01193000389200000250001 от 06.05.2020 в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами со дня вступления в законную силу судебного акта;

- выполнить работы по устранению дефектов - горловины люков колодцев провалены ниже   уровня   асфальтобетонного   покрытия  в  дворовом   проезде   многоквартирного  дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №01193000389200000210001 от 12.05.2020 в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами со дня вступления в законную силу судебного акта;

а также о взыскании пени за неисполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01193000389200000250001 от 06.05.2020 в размере 34 766,90 руб.; пени за неисполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01193000389200000280001 от 12.05.2020 в размере 19 464,88 руб.; пени за неисполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01193000389200000210001 от 12.05.2020 в размере 1 576,82 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 03.04.2023 возбуждено производство по делу.

Определением от 08.08.2023 принять частичный отказ от иска. Производство по делу № А33-8386/2023 в части требования об обязании ООО «ЕнисейГрупп» выполнить работы по устранению дефектов - горловины люков колодцев провалены ниже уровня асфальтобетонного покрытия в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01193000389200000210001 от 12.05.2020 прекращено.

В соответствии со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании, состоявшемся 05.10.2023 объявлен перерыв до 11.10.2023.

После перерыва стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание представителей не направили. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 21.04.2020 между Администрацией (Заказчик) и ООО «ЕнисейГрупп» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 01193000389200000210001, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в 

<

...> в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

В пункте 6.1. контракта согласован срок выполнения; работ: с даты заключения контракта по 20.08.2020.

Согласно пунктам 2.1. и 2.2. контракта качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документам и законодательством Российской Федерации для данного вида работ, в том числе требованиям нормативных документов, указанных в Техническом задании. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

Цена настоящего контракта составляет 591 911,20 руб., является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (пункты 4.1., 4.3. контракта).

Согласно пункту 7.4.1. заказчик имеет право требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

Согласно пункту 7.1.5. подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, установленного настоящим контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления указанных недостатков.

Согласно пунктам 3.1., 3.2. и 3.3. гарантия качества устанавливается на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года и распространяется на все, что составляет результат   выполненных   работ.   Гарантийный   срок   исчисляется   с   момента   передачи подрядчиком результата выполненных работ заказчику по акту о приемке выполненных работ Если в период действия гарантийного срока в выполненных работах выявятся недостатки то подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим контрактом. Выявленные недостатки фиксируются сторонами в соответствующем акте с указанием перечня недостатков и сроками их устранения.

Согласно п. 10.3 и 10.3.1. муниципального контракта № 01193000389200000250001 от 06.05.2020 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контакта, лицензии на осуществление банковских операций). В размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Работы по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в 

<

...> выполнены в полном объеме, отремонтированный дворовой проезд принят заказчиком, что следует из подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 20.08.2020 № 3, справки по форме № КС-З от 20.08.2020 № 4 на сумму 591911,20 руб.

Работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 686759 от 16.09.2020 и № 830033 от 28.08.2020.

21.05.2021 при проведении общественной комиссией по развитию горской среды осмотра технического состояния дворовых территорий, по мониторингу недостатков дворовых территорий, благоустроенных в 2020 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», при осмотре дворового проезда по ул. Ленина, д. 30 выявлено отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части.

03.06.2021 за исх.№ 01-46/3752 Администрацией ЗАТО г. Железногорск было направлено требование ООО «ЕнисейГрупп» об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

17.06.2021 за вх.№ 0129/5357 поступило уведомление от ООО «ЕнисейГрупп» об устранении выявленных недостатков в срок до 30.07.2021.

15.07.2021 за исх.№ 12-07-2/1104 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении в срок до 19.07.2021 графика производства работ по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

06.08.2021 за исх.№ 12-07-2/1207 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении в срок до 13.08.2021 графика производства работ по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

24.08.2021 за исх.№ 01-46/5943 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлена претензия о проведении работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту в срок до 30.08.2021.

26.08.2021 за исх№ 149 ООО «ЕнисейГрупп» направлен ответ на претензию, согласно которому заявленные требования будут выполнены после получения пропусков на сотрудников.

27.08.2021 за исх.№ 01-46/6033 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено сообщение о предоставлении анкетных данных сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

11.10.2021 телефонограммой № 339 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила директора ООО «ЕнисейГрупп» ФИО2 о комиссионном осмотре дворовой территории по ул. Ленина, д. 30 в 09.00 час. 13.10.2021, предложила обеспечить явку представителя ООО «ЕнисейГрупп».

Комиссионным актом осмотра дворовой территории по ул. Ленина, д. 30 от 13.10.2021 установлено, что ремонт дворового проезда произведен в 2020 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», подрядной организацией ООО «ЕнисейГрупп», согласно заключенному муниципальному контракту №01193000389200000210001 от 12.05.2020; при осмотре дворового проезда наблюдается отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части, а также нарушение водоотвода возле 3 подъезда. По результатам осмотра комиссии принято решение об установлении подрядной организации ООО «ЕнисейГрупп» срока для устранения выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств до 01.11.2021.

14.10.2021 за исх.№ 01-46/7344 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлен акт и претензия с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 01.11.2021.

20.10.2021 за исх.№ 197 000 «ЕнисейГрупп» отказало Администрации ЗАТО г Железногорск в удовлетворении претензии и устранении выявленных недостатков.

Комиссионным актом обследования начального канализационного колодца. Расположенного во дворе МКД по ул. Ленина, 30 от 26.10.2021 установлено: во дворе МВД по ул Ленина 30 проводилось асфальтирование дворовой территории; выравнивание люка указанного колодца относительно асфальтового покрытия было выполнено путем вставки металлической трубы между бетонными кольцами колодца. В результате произошло частичное разрушение бетонного кольца колодца в месте вставки трубы и просадка люка колодца относительно асфальтового покрытия. Труба вставлена посередине колодца, что препятствует безопасному спуску в него обслуживающего персонала.

20.12.2021  за исх.№ 01-46/9154 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлен комиссионный акт от 26.10.2021 и требование об устранении выявленных замечаний.

07.02.2022  за исх.№ 01-46/802 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп», в связи с отсутствием ответа на требование от 20.12.2021, вновь направлено требование о предоставлении графика выполнения работ и ответа по устранению недостатков в срок до 11.02.2022.

08.02.2022 за исх.№ 2 ООО «ЕнисейГрупп» уведомило Администрацию ЗАТО г. Железногорск о намерении исполнить гарантийные обязательства и устранить выявленные недостатки в срок до 30.06.2022.

28.04.2022 за исх.№ 01-46/3210 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении графика производства работ, а также анкетных данных на сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

05.05.2022 за исх.№ 40 ООО «ЕнисейГрупп» направило в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск график производства работ по устранению замечаний, в рамках гарантийных обязательств, с указанием срока устранения в течение 30 календарных дней, после получения разрешительных документов на въезд в г. Железногорск.

06.05.2022 за исх.№ 12-07-2/633 Администрацией ЗАТО г. Железногорск вновь предложено ООО «ЕнисейГрупп» представить анкетные данные на сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

20.05.2022 за исх.№ 12-07-2/682 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

01.06.2022 за исх.№ 01-46/4027 Администрация ЗАТО г. Железногорск повторно уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

22.06.2022 за исх.№70 ООО «ЕнисейГрупп» обратилось в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с просьбой продлить срок на въезд сотрудников ООО «ЕнисейГрупп» в г. Железногорск, указав срок устранения недостатков с 28.06.2022 по 30.06.2022.

28.06.2022 за исх.№ 12-07-2/874 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

В связи с неисполнением гарантийных обязательств, 12.07.2022 за исх.№ 01-46/4956 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» об обращении в суд с требованием о понуждении к выполнению гарантийных обязательств.

20.07.2022 за исх.№83 ООО «ЕнисейГрупп» обратилось в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с просьбой продлить срок на въезд сотрудников ООО «ЕнисейГрупп» в г. Железногорск, указав срок устранения недостатков с 28.07.2022 по 04.08.2022.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 24.04.2020 между Администрацией (Заказчик) и ООО «ЕнисейГрупп» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 06.05.2020 № 01193000389200000250001, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в 

<

...> в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

В пункте 6.1. контракта согласован срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 20.08.2020.

Согласно пунктам 2.1. и 2.2. контракта качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документам и законодательством российской Федерации для данного вида работ, в том числе требованиям нормативных документов, указанных в Техническом задании. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

Цена настоящего контракта составляет 311 882,56 руб., является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (пункты 4.1., 4.3. контракта).

Согласно пункту 7.4.1. заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

Согласно пункту 7.1.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, установленного настоящим контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления указанных недостатков.

Согласно пунктам 3.1., 3.2. и 3.3. гарантия качества устанавливается на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года и распространяется на все, что составляет результат выполненных работ. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи подрядчиком результата выполненных работ заказчику по акту о приемке выполненных работ. Если в период действия гарантийного срока выполненных работах выявятся недостатки, то подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим контрактом. Выявленные недостатки фиксируются сторонами в соответствующем акте с указанием перечня недостатков и сроками их устранения.

Согласно п. 10.3 и 10.3.1. муниципального контракта № 01193000389200000280001 от 12.05.2020 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня   начисляется   за  каждый   день  просрочки   исполнения   Подрядчиком   обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контакта, лицензии на осуществление банковских операций). В размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Работы по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в 

<

...> выполнены в полном объеме, отремонтированный дворовой проезд принят заказчиком, что следует из подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 15.10.2020 № 11, справки по форме № КС-3 от 15.10.2020 № 12 на сумму 311 882,50 руб.

Работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями №400961 от 13.11.2020 и №522388 от 17.11.2020.

26.05.2021 при проведении общественной комиссией по развитию горской среды осмотра технического состояния дворовых территорий, по мониторингу недостатков дворовых территорий, благоустроенных в 2020 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», при осмотре дворового проезда по пр. Ленинградский, д. 23 выявлено, что при въезде на дворовую территорию наблюдается трещина, при осмотре дворового проезда выкрашивание асфальтового покрытия.

03.06.2021 за исх.№ 01-46/3752 Администрацией ЗАТО г. Железногорск было направлено требование ООО «ЕнисейГрупп» об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

17.06.2021 за вх.№ 0129/5357 поступило уведомление от ООО «ЕнисейГрупп» об устранении выявленных недостатков в срок до 30.07.2021.

15.07.2021 за исх.№ 12-07-2/1104 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении в срок до 19.07.2021 графика производства работ по гарантийным обязательствам.

06.08.2021 за исх.№ 12-07-2/1207 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении в срок до 13.08.2021 графика производства работ по гарантийным обязательствам.

24.08.2021 за исх.№ 01-46/5943 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлена претензия о проведении работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту в срок до 30.08.2021.

27.08.2021 за исх.№ 01-46/6033 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено сообщение о предоставлении анкетных данных сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

11.10.2021 телефонограммой № 339 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила директора ООО «ЕнисейГрупп» ФИО2 о комиссионном осмотре дворовой территории по пр. Ленинградский, д. 23 в 09.00 час. 13.10.2021, предложила обеспечить явку представителя ООО «ЕнисейГрупп».

Комиссионным актом осмотра дворовой территории по пр. Ленинградский, д. 23 от 13.10.2021 установлено, что ремонт дворового проезда произведен в 2020 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», подрядной организацией ООО «ЕнисейГрупп», согласно заключенному муниципальному контракту № 01193000389200000250001 от 06.05.2020; при осмотре дворового проезда наблюдается при въезде на дворовую территорию выкрашивание асфальтобетонного слоя и наличие трещин в покрытии. По результатам осмотра комиссии принято решение об установлении подрядной организации ООО «ЕнисейГрупп» срока для устранения выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств до 01.11.2021.

14.10.2021 за исх.№ 01-46/7344 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлен акт и претензия с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 01.11.2021.

20.10.2021 за исх.№ 197 ООО «ЕнисейГрупп» отказало Администрации ЗАТО г. Железногорск в удовлетворении претензии и устранении выявленных недостатков.

20.12.2021  за исх.№ 01-46/9154 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» повторно направлено требование об устранении выявленных недостатков.

07.02.2022  за исх.№ 01-46/802 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп», в связи с отсутствием ответа на требование от 20.12.2021, вновь направлено требование о предоставлении графика выполнения работ и ответа по устранению недостатков в срок до 11.02.2022.

08.02.2022 за исх.№ 2 ООО «ЕнисейГрупп» уведомило Администрацию ЗАТО г. Железногорск о намерении исполнить гарантийные обязательства и устранить выявленные недостатки в срок до 30.06.2022.

28.04.2022 за исх.№ 01-46/3210 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении графика производства работ, а также анкетных данных на сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

05.05.2022 за исх.№ 40 ООО «ЕнисейГрупп» направило в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск график производства работ по устранению замечаний, в рамках гарантийных обязательств, с указанием срока устранения в течение 30 календарных дней, после получения разрешительных документов на въезд в г. Железногорск.

06.05.2022 за исх.№ 12-07-2/633 Администрацией ЗАТО г. Железногорск вновь предложено ООО «ЕнисейГрупп» представить анкетные данные на сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

20.05.2022 за исх.№ 12-07-2/682 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

01.06.2022 за исх.№ 01-46/4027 Администрация ЗАТО г. Железногорск повторно уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

22.06.2022 за исх.№70 000 «ЕнисейГрупп» обратилось в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с просьбой продлить срок на въезд сотрудников 000 «ЕнисейГрупп» в г. Железногорск, указав срок устранения недостатков с 28.06.2022 по 30.06.2022.

28.06.2022 за исх.№ 12-07-2/874 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила 000 «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

В связи с неисполнением гарантийных обязательств, 12.07.2022 за исх.№ 01-46/4956 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила 000 «ЕнисейГрупп» об обращении в суд с требованием о понуждении к выполнению гарантийных обязательств.

20.07.2022 за исх.№83 000 «ЕнисейГрупп» обратилось в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с просьбой продлить срок на въезд сотрудников 000 «ЕнисейГрупп» в г. Железногорск, указав срок устранения недостатков с 28.07.2022 по 04.08.2022.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 27.04.2020 между Администрацией (Заказчик) и ООО «ЕнисейГрупп» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 01193000389200000280001, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в 

<

...> в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

В пункте 6.1. контракта согласован срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 20.08.2020.

Согласно пунктам 2.1. и 2.2. контракта качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документам и законодательсвом российской Федерации для данного вида работ, в том числе требованиям нормативных документов, указанных в Технческом задании. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при'выполнении работ материалов и оборудования.

Цена настоящего контракта составляет 1 917 692 руб., является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (пункты 4.1., 4.3. контракта).

Согласно пункту 7.4.1. заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

Согласно пункту 7.1.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, установленного настоящим контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления указанных недостатков.

Согласно пунктам 3.1., 3.2. и 3.3. гарантия качества устанавливается на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года и распространяется на все, что составляет результат выполненных работ. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи подрядчиком результата выполненных работ заказчику по акту о приемке выполненных работ. Если в период действия гарантийного срока выполненных работах выявятся недостатки, то подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим контрактом. Выявленные недостатки фиксируются сторонами в соответствующем акте с указанием перечня недостатков и сроками их устранения.

Согласно п. 10.3 и 10.3.1. муниципального контракта № 01193000389200000210001 от 12.05.2020 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контакта, лицензии на осуществление банковских операций). В размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Работы по ремонту дворового проезда многоквартирного дома в 

<

...> выполнены в полном объеме, отремонтированный дворовой проезд принят заказчиком, что следует из подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 14.10.2020 № 1, справки по форме № КС-3 от 14.10.2020 № 2 на сумму 1 917 692,95 руб.

Работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 522390 от 17.11.2020 и № 711938 от 29.10.2020.

21.05.2021 при проведении общественной комиссией по развитию горской среды осмотра технического состояния дворовых территорий, по мониторингу недостатков дворовых территорий, благоустроенных в 2020 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», при осмотре дворового проезда по пр. Ленинградский, д. 95 выявлено: при въезде на дворовую территорию на дворовом проезде вокруг ливневого колодца наблюдается разрушение асфальтобетонного слоя.

03.06.2021 за исх.№ 01-46/3752 Администрацией ЗАТО г. Железногорск было направлено требование ООО «ЕнисейГрупп» об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

17.06.2021 за вх.№ 0129/5357 поступило уведомление от ООО «ЕнисейГрупп» об устранении выявленных недостатков в срок до 30.07.2021.

15.07.2021 за исх.№ 12-07-2/1104 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении в срок до 19.07.2021 графика производства работ по гарантийным обязательствам.

06.08.2021 за исх.№ 12-07-2/1207 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении в срок до 13.08.2021 графика производства работ по гарантийным обязательствам.                    >

24.08.2021 за исх.№ 01-46/5943 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлена претензия о проведении работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту в срок до 30.08.2021.

26.08.2021 за исх№ 149 ООО «ЕнисейГрупп» направлен ответ на претензию, согласно которому заявленные требования будут выполнены после получения пропусков на сотрудников.

27.08.2021 за исх.№ 01-46/6033 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено сообщение о предоставлении анкетных данных сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

11.10.2021 телефонограммой № 339 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила директора ООО «ЕнисейГрупп» ФИО2 о комиссионном осмотре дворовой территории по ул. Ленина, д. 30 в 09.00 час. 13.10.2021, предложила обеспечить явку представителя ООО «ЕнисейГрупп».

Комиссионным актом осмотра дворовой территории по пр. Ленинградский, д. 95 от 13.10.2021 установлено, что ремонт дворового проезда произведен в 2020 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», подрядной организацией ООО «ЕнисейГрупп», согласно заключенному муниципальному контракту № 01193000389200000210001 от 12.05.2020; при въезде на дворовую территорию на дворовом проезде наблюдается наличие трещин. Вокруг ливневого колодца разрушение асфальтобетонного слоя. По результатам осмотра комиссии принято решение об установлении подрядной организации ООО «ЕнисейГрупп» срока для устранения выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств до 01.11.2021.

14.10.2021 за исх.№ 01-46/7344 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлен акт и претензия с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 01.11.2021.

20.10.2021 за исх.№ 197 ООО «ЕнисейГрупп» отказало Администрации ЗАТО г. Железногорск в удовлетворении претензии и устранении выявленных недостатков.

Комиссионным актом обследования колодцев К-168 и К-169 ливневой канализации, расположенных на проезде в районе дома 95 по пр. Ленинградский от 09.11.2021 установлено: горловины люков колодцев провалены ниже уровня асфальтобетонного покрытия, трубопроводы ливневой канализации в удовлетворительном состоянии.

20.12.2021 за исх.№ 01-46/9154 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлен комиссионный акт от 09.11.2021 и требование об устранении выявленных замечаний.

07.02.2022 за исх.№ 01-46/802 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп», в связи с отсутствием ответа на требование от 20.12.2021, вновь направлено требование о предоставлении графика выполнения работ и ответа по устранению недостатков в срок до 11.02.2022.

08.02.2022 за исх.№ 2 ООО «ЕнисейГрупп» уведомило Администрацию ЗАТО г. Железногорск о намерении исполнить гарантийные обязательства и устранить выявленные недостатки в срок до 30.06.2022.

28.04.2022 за исх.№ 01-46/3210 Администрацией ЗАТО г. Железногорск в адрес ООО «ЕнисейГрупп» направлено требование о предоставлении графика производства работ, а также анкетных данных на сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

05.05.2022 за исх.№ 40 ООО «ЕнисейГрупп» направило в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск график производства работ по устранению замечаний, в рамках гарантийных обязательств, с указанием срока устранения в течение 30 календарных дней, после получения разрешительных документов на въезд в г. Железногорск.

06.05.2022 за исх.№ 12-07-2/633 Администрацией ЗАТО г. Железногорск вновь предложено ООО «ЕнисейГрупп» представить анкетные данные на сотрудников, для оформления документов на въезд в ЗАТО г. Железногорск.

20.05.2022 за исх.№ 12-07-2/682 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

01.06.2022 за исх.№ 01-46/4027 Администрация ЗАТО г. Железногорск повторно уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

22.06.2022 за исх.№70 ООО «ЕнисейГрупп» обратилось в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с просьбой продлить срок на въезд сотрудников ООО «ЕнисейГрупп» в г. Железногорск, указав срок устранения недостатков с 28.06.2022 по 30.06.2022.

28.06.2022 за исх.№ 12-07-2/874 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» о готовности документов на въезд сотрудников общества на территорию ЗАТО г. Железногорск.

В связи с неисполнением гарантийных обязательств, 12.07.2022 за исх.№ 01-46/4956 Администрация ЗАТО г. Железногорск уведомила ООО «ЕнисейГрупп» об обращении в суд с требованием о понуждении к выполнению гарантийных обязательств.

20.07.2022 за исх.№83 ООО «ЕнисейГрупп» обратилось в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с просьбой продлить срок на въезд сотрудников ООО «ЕнисейГрупп» в г. Железногорск, указав срок устранения недостатков с 28.07.2022 по 04.08.2022.

Поскольку, ответчиком в добровольном порядке претензия об устранении выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств по муниципальным контрактам не исполнена, Администрация ЗАТО г. Железногорск обратилась в суд с требованием о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по указанным контрактам.

Ответчик в материалы дела отзыв на исковые требования не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Спорные правоотношения вытекают из договора подряда и регулируются общими положениями, а также нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона N 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно статье 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу пункта 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Положения названных норм закрепляют презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока. В этой связи бремя доказывания распределяется между сторонами таким образом, что заказчик обязан доказать наличие недостатков работ, а на подрядчика возлагается обязанность доказать наличие обстоятельств, освобождающих его от ответственности за такие недостатки.

Как следует из материалов дела, заказчиком в период гарантийного срока по муниципальным контрактам были выявлены следующие недостатки:

- отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №01193000389200000210001 от 12.05.2020 в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами со дня вступления в законную силу судебного акта;

- трещина при въезде на дворовую территорию и выкрашивание асфальтового покрытия в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 01193000389200000250001 от 06.05.2020 в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами со дня вступления в законную силу судебного акта;

- горловины люков колодцев провалены ниже уровня асфальтобетонного   покрытия  в  дворовом   проезде   многоквартирного  дома в 

<

...>, в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту №01193000389200000210001 от 12.05.2020 в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами со дня вступления в законную силу судебного акта.

В ходе судебного разбирательства ответчиком частично выполнены работы по устранению дефектов.

Ответчиком возражения относительно выявленных истцом некачественно выполненных работ не представлены, указанные недостатки признаны, о чем свидетельствует письмо от 08.02.2022 № 2, направленное ответчиком в адрес истца.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценив материалы дела, на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание факт установления некачественно выполненных работ в период гарантийного срока, суд приходит к выводу, что уточненные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Также истцом предъявлено требование о взыскании неустойки в размере 55 808,60 руб. за период с 01.11.2021 по 19.01.2023.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности просрочки исполнения.

Согласно пункту 7.1.5. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, установленного настоящим контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления указанных недостатков.

Согласно п. 10.3 и 10.3.1. в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня   начисляется   за  каждый   день  просрочки   исполнения   Подрядчиком   обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контакта, лицензии на осуществление банковских операций). В размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Проверив расчет неустойки, суд признает его неверным на основании следующего.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ N 497 с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 данного Федерального закона.

В силу абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Исходя из буквального содержания подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 и абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве мораторий на уплату неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций предоставляется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должниками денежных обязательств.

Вместе с тем, введенный Постановлением Правительства РФ N 497 мораторий на удовлетворение требований кредиторов как инструмент государственного регулирования экономики антикризисной направленности имеет цель минимизировать последствия санкционного режима в 2022 году, обеспечить стабильность экономики государства путем оказания поддержки хозяйствующим субъектам.

Разъяснения, касающиеся цели и направленности моратория, вводимого в определенных случаях, даны в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума ВС РФ N 44).

В силу пункта 7 указанного постановления в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса), неустойка (статья 330 Гражданского кодекса), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

При этом возникновение долга по причинам, не связанным с теми, в связи с которыми введен мораторий, не имеет значения. Освобождение от ответственности направлено на уменьшение финансового бремени на должника в тот период его просрочки, когда она усугубляется объективными, непредвиденными и экстраординарными обстоятельствами.

Мораторием предусмотрен запрет на начисление неустоек, иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Согласно расчету суда, обоснованно заявленным является размер неустойки на сумму  32 733,28 руб. за период с 01.11.2021 по 31.03.2022, а также с 02.10.2022 по 19.01.2023, с учетом периода моратория.

В связи с чем, суд признает требования истца о взыскании неустойки обоснованными и подлежащими удовлетворению частично на сумму 32 733,28 руб.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При прекращении производства по делу в связи с отказом истца (заявителя) от иска (заявления) следует учитывать, что государственная пошлина не возвращается, если установлено, что отказ связан с добровольным удовлетворением ответчиком (заинтересованным лицом) заявленных требований после подачи искового заявления (заявления) в арбитражный суд (абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ).

В этом случае арбитражный суд должен рассмотреть вопрос об отнесении на ответчика (заинтересованное лицо) расходов по уплате государственной пошлины исходя из положений статьи 110 АПК РФ с учетом того, что заявленные в суд требования фактически удовлетворены (п. 11 Информационного письма Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46).

При этом судебные расходы распределяются между сторонами с учетом того, что уменьшение истцом размера исковых требований в суде первой инстанции было связано с добровольным удовлетворением ответчиком иска в части основного долга в ходе рассмотрения дела, т.е. заявленные в суд требования в части основного долга были фактически удовлетворены (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1).

Как следует из материалов дела, ответчиком после обращения истца с иском устранены недостатки.

Поскольку требование истца ответчиком удовлетворены в части после подачи искового заявления, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрения иска подлежат взысканию ответчика в полном объеме.

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

Государственная пошлина за рассмотрение иска составляет 8 232 руб.

Учитывая результат рассмотрения спора: частичное удовлетворение исковых требований на 58,65 %, - в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 7309,07 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейГрупп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца в период года с устойчивыми положительными температурами с момента вступления решения арбитражного суда по настоящему делу в законную силу устранить следующие недостатки:

- отклонение по вертикали крышки люка относительно поверхности проезжей части в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>;

- трещина при въезде на дворовую территорию и выкрашивание асфальтового покрытия в дворовом проезде многоквартирного дома в 

<

...>.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕнисейГрупп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 32 733,28 руб. неустойки.

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕнисейГрупп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 7 309,07 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.А. Бахрамова