АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-8502/2019

04 сентября 2020 года

г. Улан-Удэ

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 04 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 104 345 руб. 92 коп – пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018,  

при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» о взыскании 108 475 руб. 92 коп – пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018.

Определением от 17.02.2020 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства, принято уменьшение размера исковых требований до суммы 104 345 руб. 92 коп – пени за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018.

Определением от 13.05.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В обоснование исковых требований истец указал, что между сторонами заключен контракт №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу 

<

...>. 

Истец пояснил, что ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, в связи с чем, подлежит уплате неустойка. 

В качестве правового обоснования истец сослался на статьи 309, 329, 330, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В судебное заседание истец не явился, извещен о времени и месте судебного заседания в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается почтовым уведомлением №67000847854571.

Ответчик в судебное заседание не явился, считается извещенным надлежащим образом в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определение, направленное ответчику заказным судебным письмом №67000847854564, возвращено отделением почтовой связи за истечением срока хранения. 

В судебном заседании от 24 августа 2020г судом объявлялся перерыв до 11 часов 30 минут 28 августа 2020г. 

Информация о времени и месте судебного заседания, о перерыве размещена судом на официальных сайтах Арбитражного суда Республики Бурятия и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации.

Ответчик отзыв на иск, заявлений, ходатайств не представил. 

Согласно части 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

В соответствии с контрактом №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018 Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (далее – подрядчик, Общество) обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания, по заданию Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – заказчик, Учреждение) с использованием своих материалов, а заказчик обязуется принять результат и оплатить обусловленную контрактом цену. Объем работ, требования к работам, к результатам работ определены в техническом задании (приложение №1), рабочей документации (приложение №2). 

Согласно пункту 2.1 контракта  стоимость работ составляет 9 492 598 руб 50 коп. 

Согласно пункту 3.2 контракта подрядчик должен приступить к выполнению своих обязанностей по контракту в день заключения контракта и завершить работы не позднее 30.06.2019г. Состав и сроки выполнения подрядчиком работ определяются в графике выполнения работ (приложение №4). 

В соответствии с  Техническим заданием, являющимся приложением № 1  к контракту,  выполнение работ предусмотрено в два этапа: 1 этап – с момента заключения контракта и не позднее 20 декабря 2018 года; 2 этап – с 21 декабря 2018 года и не позднее 30 июня 2019 года. 

Приложением  № 3  к контракту  предусмотрены  объемы финансирования  в  2018г - 6 507 598 руб 50коп , в  2019г  - 2 985 000 руб, итого 9  492 598 руб 50 коп . 

Между сторонами возникли правоотношения по договору подряда на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, которые регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из материалов дела следует, что подрядчиком работы выполнены в полном объеме на сумму 9 492 598 руб 50 коп, что подтверждается подписанными сторонами актами ф.КС-2 

от 21.12.2018 №1 на сумму 1 343 131 руб 28 коп , 

от 21.12.2018 №2 на сумму 990 803 руб 66 коп, 

от 21.12.2018 №3 на сумму 39 117 руб 44 коп, 

от 21.12.2018 №4 на сумму 33 682 руб 86 коп, итого на  сумму 2 406 735  руб 24 коп 

от 31.01.2019 №5 на сумму 815 386 руб 45 коп, 

от 31.01.2019 №6 на сумму 253 216 руб 79 коп,

от 31.01.2019 №7 на сумму 477 748 руб 97 коп, итого  на  сумму 1 546 352  руб 21 коп

от 20.03.2019 №8 на сумму 1 256 325 руб 18 коп,

от 20.03.2019 №9 на сумму 191 480 руб 14 коп,

от 20.03.2019 №10 на сумму 172 256 руб 90 коп, итого  на  сумму 1 620 062  руб 22 коп

от 01.07.2019 №11 на сумму 934 448 руб 83 коп,

от 01.07.2019 №12 на сумму 116 835 руб 00 коп,

от 01.07.2019 №13 на сумму 119 633 руб 00 коп,

от 01.07.2019 №14 на сумму 750 089 руб 00 коп,

от 01.07.2019 №15 на сумму 389 487 руб 00 коп,

от 01.07.2019 №16 на сумму 1 498 329 руб 75 коп,

от 01.07.2019 №17 на сумму 110 626 руб 25 коп,

а также минусовыми актами от 01.07.2019 №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Предметом иска является требование о взыскании 104 345 руб. 92 коп – неустойки за просрочку выполнения работ за период с 21.12.2018 по 04.07.2019.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно пунктам 8.5, 8.6 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Согласно пункту 3.2 контракта  срок окончания работ - 30.06.2019г.

В приложении №1 выполнение работ предусмотрено в два этапа:  1 этап – не позднее 20 декабря 2018 года;  2 этап – не позднее 30 июня 2019 года. 

Из материалов дела следует, что работы выполнены ответчиком с нарушением срока.

Согласно Графику оплаты работ (приложение №3 к контракту) следует, что в 2018г (1 этап) объем работ должен составлять сумму 6 507 598 руб 50 коп , в 2019г (2 этап) объем работ должен составлять сумму 2 985 000 руб 00 коп.

Из  материалов  дела  следует, что  работы  по  первому  этапу  на  сумму 6 507 598 руб 50 коп  завершены  01.07.2019г.

За  просрочку выполнения  работ по второму этапу истец  начислил пени за  просрочку  выполнения  работ  на сумму 1 838 800 руб 92  коп  за  период с 01.07.2019г  по 04.07.2019г.

Учитывая, что по второму  этапу акты  выполненных  работ ф.КС-2  от  01.07.2019г  подписаны  сторонами  03.07.2019г , требования  истца  подлежат  удовлетворению за  период с 01.07.2019г  по 03.07.2019г .

Размер пени за просрочку  выполнения работ  за период с 21.12.2018 по 01.07.2019 составляет 102 918 руб 47 коп из расчета 

Месяц

Сумма

Ставка ЦБ РФ

Начало просрочки

Окончание просрочки

Количество дней

Сумма пени

1 этап

6507598,5

7,75%

21.12.2018

21.12.2018

1

1681,13

Работы

-2406735,24

 21.12.2018 

 

4100863,26

7,75%

22.12.2018

31.01.2019

41

43434,98

Работы

-1546352,21

 31.01.2019

 

2554511,05

7,75%

01.02.2019

20.03.2019

48

31675,94

Работы

-1620062,22

 20.03.2019

 

934448,83

7,75%

21.03.2019

16.06.2019

88

21 243,14

934448,83

7,50%

17.06.2019

01.07.2019

15

3 504,18

2 этап

1838 801,76

7,50%

01.07.2019

03.07.2019

3

1 379,10

Итого

102918,47

 

Возражений от ответчика не поступило, контр-расчет неустойки не представлен.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации требования истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения  работ по контракту №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018 обоснованы и подлежат удовлетворению в размере 102 918 руб. 47 коп.

В остальной части требование истца судом отклоняется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины суд относит на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И Л:

Иск  удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 102 918 руб 47 коп – пени   за  просрочку  выполнения  работ по контракту №010220001618005036-0205712-01 от 29.11.2018, 4 073  руб 42 коп  -  расходы  по уплате  государственной  пошлины.

В  удовлетворении иска в остальной части  отказать. 

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

СудьяЛ.Ф. Салимзянова