Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-43535/2018

18 октября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  11 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  18 октября 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Яценко О.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Строительная техника и комплектация" (адрес: 196158, 

<

...>, литер А, помещение 501, ОГРН:  

<

***>)

ответчик: закрытое акционерное общество "ИСТПГ "Содружество" (адрес: 196247, 

<

...>, помещение 520А, ОГРН:  

<

***>)

о взыскании 112 958 руб.

 

при участии

- от истца: не явился (извещен)

- от ответчика: не явился (извещен) 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная техника и комплектация" (далее – ООО "Строительная техника и комплектация") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "ИСТПГ "Содружество" (далее – ЗАО "ИСТПГ "Содружество") о взыскании 112 958 руб. неустойки за нарушение срока оплаты работ по договору субподряда от 03.08.2015 № 1ВСС/2015-ВПЕ (далее – Договор) за период с 24.10.2016 по 11.01.2018.

Истец и ответчик в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражает против удовлетворения иска.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие истца и ответчика.

Исследовав материалы дела, суд  установил следующее.

Между ООО «СтройСпецСвязь» и ЗАО "ИСТПГ "Содружество" заключен Договор, в соответствии с которым  ООО «СтройСпецСвязь» (субподрядчик) обязалось выполнить работы по выносу, защите слаботочных сетей по титулу «Строительство  вторых ж/д путей и электрификации участка Выборг-Приморск-Ермилово Октябрьской ж.д.», объекты «Реконструкции станции Ермилово Окт. Ж.д.», по адресу: ЛО, Выборгский район ст. Попово, а ЗАО "ИСТПГ "Содружество" (подрядчик) - принять результат выполненных работ и оплатить его в установленные  порядке и сроки в течение 20 дней с даты получения от субподрядчика полного комплекта документов , в том числе счёт, счёт-фактура, акт приёмки выполненных работ, комплект исполнительной документации (пункт 3.1.4 Договора).

ООО «СтройСпецСвязь» и ООО «Строительная техника и комплектация» заключили договор уступки права требования от 23.01.2017 №1- ЦС/17, в соответствии с которым последнему перешло право требования с ответчика по Договору денежной суммы в размере 4 554 814,40руб., а также всех возможных убытков, неустоек, пеней, процентов, штрафов, сумм неосновательного обогащения и иных сумм. 

В соответствии с пунктом 7.3 Договора за задержку расчётов за выполненные надлежащим образом и принятые в обусловленном Договором порядке строительно-монтажные работы подрядчик по требованию субподрядчика уплачивает штрафную неустойку в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы.

Вступившими в законную силу судебными актами по делу № А56-85768/2016 установлено ненадлежащее исполнение ЗАО "ИСТПГ "Содружество" по исполнению обязательств по оплате выполненных по Договору работ.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в установленный Договором срок истец на основании пункта 1 статьи 330 ГК РФ начислил неустойку в размере 112 958 руб. за период с 24.10.2016 по 11.01.2018, рассчитав ее в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

Вместе с тем с учётом направления истцом ответчику уведомления от 13.10.2016 о готовности строительно-монтажных работ и предусмотренного пунктом 3.1.4 Договора срока их оплаты, дату начала начисления неустойки следует исчислять с 04.12.2016. За период с 04.12.2016 по 11.01.2018 неустойка составляет 102 782,22 руб.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в части взыскания  102 782,22 руб. неустойки, в удовлетворении остальной части иска следует отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины, а также 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, подтвержденные договором от 07.02.2018 № 1-СТК/2017 и платежным поручением от 03.04.2018 № 116, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с закрытого акционерного общества "ИСТПГ "Содружество" в пользу общество с ограниченной ответственностью "Строительная техника и комплектация" 102 782,22 руб. неустойки, 45 495 руб. расходов на оплату услуг представителя и 3 994 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                            Яценко О.В.