АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А45-25316/2017

г. Новосибирск

26 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2018 года.

Решение в полном объёме изготовлено 26 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Цыбиной А.В., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Акварель плюс» (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск,

к акционерному обществу «Строительный трест № 43» (ОГРН 

<

***>), г Новосибирск,

об обязании передать исполнительную документацию,

при участии представителей

истца: ФИО2, доверенность от 09.01.2018, паспорт,

ответчика: ФИО3, доверенность от 09.01.2018 № 01/18, паспорт,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Акварель плюс» (далее – истец) обратилось с иском (исковое требование уточнялось истцом 26.10.2017, 23.11.2017, 29.12.2017, 31.01.2018, 21.02.2018) об обязании акционерного общества «Строительный трест № 43» (далее – ответчик) в течение трёх рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать истцу исполнительную документацию по строительству объекта Детский сад на 75 мест по ул. Гоголя в Центральном районе г. Новосибирска на земельном участке с кадастровым номером 54:35:101120:377, по договору генерального подряда от 20.05.2016 № 17/16, в составе: паспортов качества, сертификатов соответствия на применяемые материалы при устройстве теплотрассы и прокладки трубопроводов; общего журнала работ по устройству теплотрассы и прокладке трубопроводов.

По утверждению истца, во исполнение п. 6.2 договора ответчик обязался вести исполнительную документацию на работы, выполненные по договору. Согласно п. 2.4.9 договора ответчик обязан в течение 30 дней со дня подписания акта приёмки выполненных работ предоставить истцу исполнительную документацию согласно СНиП.

Так как ответчик до настоящего времени не передал истцу указанную выше исполнительную документацию, истец, основываясь на указанных выше пунктах договора генподряда, а также на статьях 11, 12, 301, 309, 726, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил суд удовлетворить его исковое требование, обязав ответчика представить ему исполнительную документацию.

Ответчик отзывом исковое требование не признал, мотивируя возражения тем, что истец не доказал, каким нормативным актом или пунктом договора предусмотрена обязанность ответчика вести общий журнал работ по устройству теплотрассы и прокладке трубопроводов (общий журнал истцу, по утверждению ответчика, передан) и к каким материалам ему следует представить сертификаты соответствия. Также ответчик заявил о том, что обязательство по передаче истцу исполнительной документации у него не возникло, так как истец уклоняется от приёмки выполненных работ. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд пришёл к следующим выводам.

Присуждение к исполнению обязательства в натуре как способ защиты гражданских прав предусмотрен статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнение обязательства в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося обязательства.

Пунктом 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. Согласно Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, далее - Требования), исполнительная документация ведётся лицом, осуществляющим строительство.

Пунктом 3 Требований установлено, что исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. Состав исполнительной документации определён в пунктах 5.1.-5.6., 6 Требований.

В силу статьи 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре. 

Указанный выше способ защиты нарушенного права может быть применен при наличии у ответчика документации, передачи которой требует истец, а также при наличии обязательства ответчика по составлению и передаче истцу данной документации.

20.05.2016 истец (заказчик) и ответчик (генподрядчик) заключили договор генерального подряда № 17/16 (далее – договор генподряда), по условиям которого заказчик поручил, а генподрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по строительству объекта «Детский сад на 75 мест по ул. Гоголя в Центральном районе г. Новосибирска, на земельном участке с кадастровым номером 54:35:101120:377».

Пунктом 2.4.9 договора генподряда установлена обязанность генподрядчика представить заказчику исполнительную документацию согласно СНиП в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Согласно п. 5.3 договора генподряда все приобретённые генподрядчиком для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль. Подлинники этих документов должны быть предоставлены заказчику после приёмки работ, выполненных с использованием этих материалов, конструкций, оборудования.

С момента начала работ и до их завершения генподрядчик ведёт журнал производства работ, общий журнал производства работ и специальные журналы производства работ, предусмотренные действующей нормативно-технической документацией (п. 6.2 договора генподряда).

Как следует из объяснений сторон, данных в судебном заседании, стороны прекратили исполнение договора - 08.06.2017 истец заявил об отказе от исполнения договора генподряда, утверждая о нарушении ответчиком срока окончания выполнения работ. В настоящее время у сторон имеется спор в Арбитражном суде Новосибирской области по обстоятельствам выполнения работ по договору генподряда (дало № А45-15379/2017).

В качестве доказательств, подтверждающих выполнение ответчиком работ, истец представил акты формы № КС-2 о приёмке выполненных работ от 31.10.2016 № 12 (работы по кирпичной кладке и устройству фасада), № 11 (земляные работы), № 10 (возведение коробки), от 30.09.2016 № 9 (работы по кирпичной кладке), № 8 (устройство монолитной ванны бассейна), № 6 (устройство свайного поля), № 5 (подготовка территории строительства), от 31.08.2016 № 4 (гидроизоляция, утепление стен подвала), № 3 (устройство фундамента), от 30.06.2016 № 1 (земляные работы), № 2 (устройство фундамента).

Таким образом, в составе работ, выполнение которых признаётся истцом, и приёмка которых истцом выполнена, отсутствуют работы по устройству теплотрассы.

Истцом оспаривается выполнение ответчиком работ, указанных в односторонних актах формы № КС-2 о приёмке выполненных работ от 30.11.2016 № 13 (устройство лестничных клеток, перекрытий), № 14 (кирпичная кладка, фасад), № 15 (благоустройство территории), № 16 (вынос трассы 10 кВ), № 17 (тепловые сети), от 30.04.2017 № 18 (фундаменты под лестницы, приямки, лестницы в подвал), № 19 (внутренние стены и перегородки), № 21 (витражные конструкции и окна), № 22 (отделочные работы), № 23 (вентиляция), № 27 (водоснабжение и канализация), от 31.03.2017 № 20 (устройство кровли из пвх мембраны).

Как следует из искового заявления (с учётом его уточнения от 21.02.2018), истец требует обязать ответчика передать ему исполнительную документацию по непринятым работам.

Суд, исходя из п.п. 2.4.9, 5.3 договора генподряда, соглашается с ответчиком в том, что поскольку работы, к которым истец требует обязания ответчика представить исполнительную документацию, не приняты истцом, соответственно, обязательство ответчика по предоставлению исполнительной документации не наступило.

Также суд отмечает, что договором генподряда перечень исполнительной документации, подлежащий передаче заказчику, сторонами не согласован. Обязательство по ведению ответчиком общего журнала работ по устройству теплотрассы и прокладке трубопроводов из договора генподряда не следует. Нормативное обоснование данного требования истцом не представлено. Общий журнал работ передан ответчиком истцу 13.11.2017 (л.д. 85 т. 2).

Суд отклонил утверждение истца о том, что ответчик обязан представить исполнительную документацию согласно СНиП, поскольку строительные нормы и правила Российской Федерации имеют рекомендательный характер и приобретают статус обязательных при наличии ссылки на их применение в договоре подряда при строительстве конкретного объекта. 

Однако, в тексте договора генподряда отсутствуют ссылки на реквизиты СНиП, подлежащих применению при составлении исполнительной документации. 

Нормативного обоснования обязанности представления ответчиком паспортов качества, сертификатов соответствия на применяемые материалы при устройстве теплотрассы и прокладке трубопроводов истец суду так же не представил, как не представил и перечень тех материалов, на которые следует представить вышеупомянутые документы.

Таким образом, суд пришел выводу о том, что истцом не доказан факт наличия у ответчика обязанности по предоставлению истребуемых документов, основанной на нормах права или возникшей из договора генподряда. Кроме того, исходя из п.п. 2.4.9, 5.3 договора генподряда, у истца до приёмки работ по устройству теплотрассы и прокладке трубопроводов не возникло право требования у ответчика представления исполнительной документации. Исковое требование удовлетворению не подлежит ввиду его необоснованности.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на истца в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в иске отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

СудьяА.В. Цыбина