именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

10. 08. 2022 года.                                                        Дело № А40-31820/22-43-235                     

Резолютивная часть решения объявлена 05.08. 2022 года.

Решение изготовлено в полном объеме 10. 08. 2022 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

АО " ГУОВ " (ОГРН 

<

***>) к АО 1015 УСМР (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 5 250 867 руб. 83 коп. – убытков, неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № Д-320 от 20.12.2021 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 5 250 867 руб. 83 коп. – убытков, неустойки, на основании статей 15, 309, 310, 397, 723 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва ответчика и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между АО «ГУ OB» (Генподрядчик) и ЗАО     «Инвестстрой-15» (Первоначальный Подрядчик) 13.07.2012 заключен договор № 1214187376952090942000000/3155 на полный комплекс работ по объекту: «Строительство 5-ти (пяти) жилых домов на территории центра специального назначения по адресу: Московская область, н.п. Кубинка-2, военный городок № 120, в/ч 01355» (шифр объекта 156/688), далее - Договор.

В соответствии с соглашением от 25.06.2014 о замене стороны, все права и обязанности по Договору от Первоначального  Подрядчика перешли к АО «1015 УСМР» (далее - Подрядчик).

Разделом 15 Договора стороны согласовали гарантии качества работ.

Так п. 15.1 Договора установлено что Подрядчик гарантирует: возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; высокое качество всех работ и Материалов, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Подрядчиком Оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей; достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется с даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ и/или поставленному оборудованию по Договору, при отсутствии виновных действий со стороны Генподрядчика и третьих лиц (п. 1.8 Договора).

Гарантийный срок начинается с момента получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию к составляет: на работы (Результат работ, выполненных по Договору), - 5 лет, на установленное Оборудование - в соответствии с гарантийными сроками, указанными в нормативно-технической документации на Оборудование (п. 15.2 Договора).

Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) или Оборудование (часть Оборудования), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его Подрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Генподрядчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов инедостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (п. 15.3 Договора).

Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Генподрядчика о выявленных дефектах направить своего представителя (п. 15.4 Договора).

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Генподрядчик имеет право заменить неисправное оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика (п. 15.7 Договора).

Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В акте также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранения за счет Подрядчика (п. 1.4. Договора).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по шифру 156/688 на корпус № 4 выдано 29.07.2016 № 50-50511103-633-2016-153

15.10.2020г. комиссией в составе представителей ФКП «УЗКС МО РФ», ФГУП «ГВСУ по СО», АО «ГУОВ», ООО «1015 УСМР», войсковой части 01355 составлен рекламационный акт № 1 по факту обрушения боковой стены переходной лоджии 15-го этажа, 3-го подъезда, 4-го корпуса из-за отсутствия скрытого крепления к стене фасада. Актом установлен срок устранения выявленных замечаний 30.10.2020г.

АО «ГУОВ» обратилось в адрес Подрядчика с письмом от 20.10.2020 № исх-10892 с указанием на необходимость обеспечение явки уполномоченного представителя АО «1015 УСМР» на объект 20.10.2020 для участия в комиссии по определению ущерба с составлением акта. Кроме того, письмом установлено требование устранить обрушение и провести осмотр всех балконов 4-го корпуса на предмет обнаружения трещин и обрушений в десятидневный срок со дня получения данного обращения.

30.10.2020г. комиссией в составе представителей ФКП «УЗКС МО РФ», ФГУП «ГВСУ по СО», АО «ГУОВ», ООО «1015 УСМР», войсковой части 01355 составлен рекламационный акт № 2 по факту обрушения боковой стены переходной лоджии 15-го этажа, 3-го подъезда, 4-го корпуса из-за отсутствия скрытого крепления к стене фасада. Актом установлен срок устранения выявленных замечаний 30.11.2020г.

03.11.2020г. произведено визуальное обследование с составлением Акта, фото фиксация и контрольные вскрытия ограждений переходных балконов с целью определения технического состояния и выявление отступлений от проектных и нормативных требований данной конструкции в жилом доме № 4 по адресу: Московская область, н.п. Кубинка-2, военный городок № 120, в/ч 01355.

В ходе визуального осмотра ограждений балкона здания выявлено следующее: В 3-м подъезде 4-го корпуса на 15-м этаже обнаружено обрушение верхней части боковой стены переходных балконов; Отсутствует анкеровка кладки ограждения балконов с основной наружной стеной, крен и образование зазоров до 10 мм; Отсутствует компенсационные зазоры между плитой перекрытия и боковой стеной переходных балконов; На переходных балконах, при контрольных вскрытиях, не обнаружены металлические стойки диаметром 8 мм с шагом 1000мм согласно разделу АР (лист 27 узел 37 в рабочей документации 634-12-12-02-01 -АР, разработанной ЗАО «ИНВЕСТРОЙ-15»). На   переходных   балконах   не   обнаружены   фартук   и   оцинкованной кровельной стали согласно разделу АР (лист 25 узел 20 в рабочей документации 634-12-12-02-01-АР, разработанной ЗАО « ИНВЕСТРОЙ-15»). При контрольных вскрытиях узлов сопряжения ограждения балкона с наружной стеной с 8 по 15 этажей обнаружены перфорированные направляющие с креплением в облицовочный кирпич. Данное крепление не отвечает требованиям безопасности.

09.11.2020г. в адрес АО «ГУОВ» поступило обращение из Департамента строительства Минобороны РФ о принятии в кратчайшие сроки мер направленных на восстановление эксплуатационной надежности здания в целях исключения гибели и травматизма людей.

18.11.2020 в адрес АО «1015 УСМР» направлена претензия № исх-2961/сп с требованием устранить выявленные недостатки (дефекты) в кратчайшие сроки и сдать результат выполненных работ Генподрядчику.

Вышеуказанная претензия Подрядчиком оставлена без рассмотрения.

В свою очередь АО «ГУОВ» составлен Локальный сметный расчет № 1 на усиление балконов корпуса № 4 в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2021г. в базе ФЕР-2001 ред. 2017 изм.1-4 который составил 4 039 129,10 руб.

15.07.2021в адрес АО «1015 УСМР» направлена претензия № исх-2260/сп с требованием выплатить стоимость убытков и неустойки за нарушение сроков устранения недостатков.

Вышеуказанная претензия Подрядчиком оставлена без рассмотрения.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п.1 ст. 15 ГК РФ).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п.2. ст. 15 ГК РФ).

В случае неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков (ст.397 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены, возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом,   Генподрядчик имеет право заменить неисправное оборудование и устранить дефекты и недоделки третьих лиц за счет Подрядчика (п. 15.7 Договора).

Убытки, состоящие из расходов на устранение выявленных строительных недостатков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств в размере 4 039 129,10 руб., подтверждаются локальным сметным расчётом № 1 и иными документами.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного, суд читает, что материалами дела подтвержден факт неправомерного поведения ответчика, размер убытков, а также доказано наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением  истцу убытков в заявленном размере

Требование истца о взыскании убытков в сумме 4 039 129 руб. 10 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Пункт 17.5 Договора предусматривает возможность начисления неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по устранению выявленных дефектов за каждый день, в случае нарушения срока устранения недостатков.

Согласно рекламационного акта от 15.10.2020 № 1 установлен срок устранения выявленных замечаний 30.10.2020г.

Согласно представленного расчета неустойка за период с 31.10.2020г. по 26.08.2021г. составляет 1 211 738 руб. 73 коп. 

Согласно ст.12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 1 211 738 руб. 73 коп. –законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 395, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с АО 1015 УСМР (ОГРН 

<

***>) в пользу АО " ГУОВ " (ОГРН 

<

***>) 5 250 867 руб. 83 коп., в том числе: 4 039 129 руб. 10 коп. – убытков, 1 211 738 руб. 73 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 49 254 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

ФИО1