АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-26076/22

15 февраля 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

 Арбитражный суд Ростовской области в составе: судьи Пипник Т. Д.,  

 при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФГУП  "Росморпорт" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>  

 к акционерному обществу "Ростовский порт" ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>  

 об обязании выполнить ремонтные работы. 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество "Ростовский порт" ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***> в течение 12 месяцев с момента вступления решения в законную силу  выполнить следующие ремонтные работы:  

на Причале № 1, расположенном по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, ст.  Ольгинская, ул. Левобережная, 17:  

- выполнить ремонтную подсыпку дна щебнем в местах переуглублений на ПК55- 115,83 и предоставить подтверждающие документы в виде промеров глубин перед  причалом на расстоянии 20 перед кордоном;  

- выполнить ремонт шпунтовой стенки, колесоотбойного и шапочного бруса в  местах отслоения защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры;  

- выполнить засыпку крупным щебнем места образования пустот под плитами  покрытия территории на ПК65;  

- навесить дополнительно отбойные устройства в местах обрыва; 

на Причале № 2, расположенном по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, ст.  Ольгинская, ул. Левобережная, 17:  

- выполнить ремонтную подсыпку дна щебнем в местах переуглублений на ПК0- 25, ПК105-115 и предоставить подтверждающие документы в виде промеров глубин перед  причалом на расстоянии 20 перед кордоном;  

- устранить зазор (100 мм от дна) в районе дна шпунтовой стенки на ПК115,5 и на  ПК3 между замками шириной 40 мм;  

- выполнить ремонт шпунтовой стенки, колесоотбойного и шапочного бруса в  

местах отслоения защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры;  

- выполнить засыпку крупным щебнем места образования пустот под плитами  

покрытия территории на ПК106; 

на Причале № 3, расположенном по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, ст.  

Ольгинская, ул. Левобережная, 17: 

- выполнить ремонтную подсыпку дна щебнем в местах переуглублений на ПК143- 

152 и предоставить подтверждающие документы в виде промеров глубин перед причалом  

на расстоянии 20 перед кордоном; 

- устранить зазоры между шпунтами на ПК38-ПК40 в местах нарушения  

грунтонепроницаемости; 

- выполнить ремонт с обеспечением герметичности шпунтов на ПК24-ПК26, ПК98,  

ПК117 в местах разрушения бетона на глубину до 300 мм; 

- выполнить ремонт шпунтовой стенки, колесоотбойного и шапочного бруса в  

местах отслоения защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры;  

- выполнить засыпку крупным щебнем места образования пустот под плитами  

покрытия территории на ПК41, ПК42, ПК51; 

- выполнить ремонт плит покрытия на ПК78-80, ПК100-102, ПК120-122, ПК131- 

133, ПК140,141, ПК152; 

на Причале № 4, расположенном по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, ст.  

Ольгинская, ул. Левобережная, 17: 

- выполнить ремонтную подсыпку дна щебнем в местах переуглублений на  

ПК0-132 и предоставить подтверждающие документы в виде промеров глубин перед  

причалом на расстоянии 20 перед кордоном; 

- выполнить ремонт шпунтовой стенки, колесоотбойного и шапочного бруса в  

местах отслоения защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры;  

- предоставить подтверждающие документы на выполнение работ по засыпке  

крупным щебнем места просадок прикордонной территории на ПК110; 

- навесить дополнительно отбойные устройства в местах обрыва;  

- выполнить ремонт плит покрытия на ПК14-ПК16, ПК20-22, ПК23-25, ПК54-56,  

ПК67-69, ПК100-108, ПК128-131; 

- навесить дополнительно отбойные устройства в местах обрыва;  

на Причале № 6, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.  

Береговая, 30: 

- привести отметку дна перед причалом к проектным значениям;  

на Причале № 7, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.  

Береговая, 30: 

- выполнить сварной шов в местах сопряжения полосы усиления и шпунта на  

участках непровара на ПК41, ПК49, ПК51-53, ПК63, ПК70, ПК83, ПК88, ПК96, ПК98; 

- привести отметку дна перед причалом к проектным значениям;  - восстановить покрытие территории причала на участках отсутствия;  

на Причале № 8, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.  

Береговая, 30: 

- привести отметку дна перед причалом к проектным значениям и предоставить  

подтверждающие документы в виде промеров глубин перед причалом на расстоянии 20  

перед кордоном; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на участках разрушения и отслоения  

защитного слоя бетона; - выполнить покрытие территории причала на участках отсутствия; 

на Причале № 9, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.  

Береговая, 30: 

- при производственной необходимости привести отметку дна перед причалом к  

проектным значениям и предоставить подтверждающие документы в виде промеров  

глубин перед причалом на расстоянии 20 перед кордоном; 

- заварить стальные заплатки на участках отверстий шпунтов, обеспечить  

герметичность по длине шпунтовой стенки; 

- выполнить ремонт шпунтовой стенки на участке коррозионных повреждений на  

ПK101, ПK130 и ПK140; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на участках разрушения и отслоения  

защитного слоя бетона; 

- вывесить отбойные устройства на ПK26, ПK50, ПK108, ПK115, ПK149;  - выполнить покрытие территории причала на участках отсутствия;  

на Причале № 10, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. Береговая, 30: - выполнить ремонт железобетонного коллектора на ПК1; 

- привести отметку дна перед причалом к проектным значениям и предоставить  

подтверждающие документы в виде промеров глубин перед причалом на расстоянии 20  

перед кордоном; 

- заварить стальные заплатки на участках отверстий шпунтов, обеспечить  

герметичность по длине шпунтовой стенки; 

- выполнить ремонт шпунтовой стенки на участке коррозионных повреждений на  

ПК68, ПК80, ПК125, ПК129, ПК132, ПК140; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на участках разрушения и отслоения  

защитного слоя бетона; 

- выполнить антикоррозионную обработку шпунтовой стенки в зоне переменного  

уровня акватории; 

- вывесить отбойные устройства на ПК50-85, ПК89-94, ПК95-105, ПК105;  - выполнить покрытие территории причала на участках отсутствия;  

на Причале № 11, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. Береговая, 30: 

- привести отметку дна перед причалом к проектным значениям и предоставить  

подтверждающие документы в виде промеров глубин перед причалом на расстоянии 20  

перед кордоном; 

- заварить стальные заплатки на участках отверстий, обеспечить герметичность по  

длине шпунтовой стенки; 

- выполнить ремонт стенки на ПК28, ПК75 на участках коррозионных разрушений  

шпунта; 

- выполнить антикоррозионную защиту стенки в зоне переменного уровня  

акватории; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на участках сколов и отслоения защитного  

слоя бетона; 

- выполнить засыпку территории на ПК32, ПК145 на участках просадки.  

Установить наблюдения; 

- вывесить отбойные устройства на ПК0-7, ПК10-20, ПК45, ПК105, ПК130, ПК150,  

ПК155, ПК165; - поднять выше существующей отметки отбойные устройства на ПК110, ПК128; 

- выполнить покрытие территории причала на участках отсутствия;  

на Причале № 12, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. Береговая, 30: - выполнить ремонт железобетонного коллектора на ПК145; 

- привести отметку дна перед причалом к проектным значениям и предоставить  

подтверждающие документы в виде промеров глубин перед причалом на расстоянии 20  

перед кордоном; 

- выполнить антикоррозионную защиту шпунтовой стенки в зоне переменного  

уровня акватории; 

- выполнить ремонт в зоне коррозионных разрушений шпунтов на ПК107, ПК151,  

ПК155; 

- заварить стальные заплатки на участках отверстий в шпунтах, обеспечить  

герметичность по длине шпунтовой стенки; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на участках разрушения и отслоения  

защитного слоя бетона; - выполнить покрытие территории причала на участках отсутствия; 

на Причале № 13, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. Береговая, 30: 

- при производственной необходимости привести отметку дна перед причалом к  

проектным значениям и предоставить подтверждающие документы в виде промеров  

глубин перед причалом на расстоянии 20 перед кордоном; 

- выполнить ремонт деревянного ограждения фасада причальной эстакады,  

вывесить отбойные устройства на участках ПК16-28, ПК75-271; 

- выполнить ремонт деревянного настила в прикордонной части на ПК90-236; 

- при необходимости швартовки выполнить монтаж швартовного устройства на  

ПК1; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на участках разрушения и отслоения  

защитного слоя бетона на ПК9, ПК23-30; 

- выполнить ремонт железобетонных плит и двутавровых стоек лицевой стенки на  

участках разрушения и отслоения защитного слоя бетона на ПК0-48;  

на Причале № 28, расположенном по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шоссейная, 49 А: 

- выполнить ремонт шпунтовой стенки на ПК44-45 в местах отслоения защитного  

слоя бетона с оголением корродирующей арматуры; 

- выполнить антикоррозионное покрытие шпунтовой стенки на ПК0-8 в местах  

отслоения АКЗ; 

- выполнить ремонт шапочного бруса на ПК0-4, ПК8-10, ПК26-27, ПК27-35, ПК45- 

55,6 в местах отслоения защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры; 

- выполнить ремонт тумбовой ниши на ПК23-24 в местах отслоения защитного  

слоя бетона с оголением корродирующей арматуры; 

- выполнить устройство и планировку покрытия территории причала с  

организацией водоотвода; - установить защитные колпаки на водосборный бетонной лоток; 

- выполнить ремонт колесоотбойного бруса на ПК0-8 в местах отслоения  

защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры; 

- закрепить кордонный уголок на ПК0- 8; 

- вывесить отбойные устройства на ПК8-12. На ПК0-8 вывесить отбойные  

устройства в случае необходимости швартовки на данном участке; 

- поднять, либо вывесить дополнительные отбойные устройства выше  

существующих на ПК25-35; 

- доукомплектовать дополнительными покрышками отбойные устройства на ПК15,  

ПК20, ПК36, ПК42 в местах отсутствия; 

- при необходимости установить швартовные рымы на ПК46;  

на Причале № 29, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить ремонт участка разрушения бетона рымовой ниши с восстановлением  грунтонепроницаемости на ПК180-181. Выполнить засыпку участка просадки на ПК180- 181 площадью 0,25 м2 и глубиной до 300 мм;  

- заварить зазор и нештатное отверстие стенки на ПК194 и на ПК201;  

- выполнить ремонт шпунтовой стенки на ПК85-90, ПК126, ПК194 в местах  отслоения защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры;  

- выполнить усиление шпунтины на ПК196 в месте вертикального разрыва ребра.  Проварить вертикальный стык шпунтины;  

- удалить участки слоистой коррозии, выполнить антикоррозионное покрытие  шпунтовой стенки на ПК194-205,95;  

- выполнить ремонт шапочного бруса на в местах отслоения защитного слоя бетона  с оголением корродирующей арматуры;  

- выполнить ремонт тумбовой ниши на ПК38-42 в местах отслоения защитного  слоя бетона с оголением корродирующей арматуры;  

- восстановить кордонный козырек на ПК20-22, ПК42-47, ПК149-150;  

- восстановить покрытие территории в местах отсутствия и разрушения плит.  Переложить плиты на участке ПК19-22 в местах превышения вертикального смещения;  

- выполнить ремонт колесоотбойного бруса на ПК26-28, ПК42-47; 

- вывесить отбойные устройства на ПК19-20, ПК44-63, ПК153, ПК145-150.  Закрепить отбойную раму на ПК34-37;  

- поднять, либо вывесить дополнительные отбойные устройства выше  существующих на ПК25-30, ПК86-90, ПК170-174, ПК180-185, ПК190-195;  

- доукомплектовать дополнительными покрышками отбойные рамы на ПК0-13,  ПК34-38, ПК48-52, ПК162-168 в местах отсутствия;  

- заполнить полости швартовных устройств бетоном марки М300 на ПК202-204. 

Обязать акционерное общество "Ростовский порт" ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***> в течение 24 месяцев с момента вступления решения в законную силу  выполнить следующие ремонтные работы:  

на Причале № 6, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить ремонтно-восстановительные работы шпунтовой стенки на участке  ПК40-140 по специально разработанному проекту;  

на Причале № 7, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить усиление внутренних шпунтов шпунтовой стенки участка ПК30-100  на ПК31-32, ПК36-38, ПК39, ПК41, ПК44, ПК47-49, ПК50, ПК54, ПК55, ПК64, ПК65-68,  ПК70-72, ПК76, ПК82, ПК88, ПК98 по специально разработанному проекту на участках  сквозных коррозионных отверстий;  

на Причале № 8, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия по обеспечению  устойчивости шпунтовой стенки на ПК110-150 по специально разработанному проекту;  

на Причале № 9, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия по обеспечению  устойчивости шпунтовой стенки на ПK0-20, ПK140-150 по специально разработанному  проекту;  

на Причале № 10, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия по обеспечению  устойчивости шпунтовой стенки на ПК0-20, ПК115-150 по специально разработанному  проекту;  

на Причале № 12, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия по обеспечению  устойчивости шпунтовой стенки на ПК135-166 по специально разработанному проекту;  

на Причале № 13, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- выполнить реконструкцию эстакадной части причала на ПК48-271 по специально  разработанному проекту.  

В случае неисполнения решения в установленный срок взыскать с акционерного  общества "Ростовский порт" ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> в пользу ФГУП  "Росморпорт" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> неустойку в размере 10 000 рублей  за каждый день просрочки.  

Взыскать с акционерного общества "Ростовский порт" ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***> в пользу ФГУП "Росморпорт" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>  судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Пипник Т. Д.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 11.01.2022 7:33:08

Кому выдана Пипник Татьяна Дмитриевна