61/2024-35871(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-12360/2023

г. Ярославль

11 марта 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Регионального фонда содействия  капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,  ООО «УК МКД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца после вступления решения в законную силу  

устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту крыши  

многоквартирного дома, расположенного по адресу: в  

доме № 3 по ул. Озерная г. Переславль-Залесский, в том числе: 1) выполнить работы по замене покрытия кровли (215,0 м2), путем: - демонтажа кровли из рулонного материала -215 м2, - демонтажа стяжки - 10,75 м3, - демонтажа керамзита - 7,2 м3, - демонтажа утеплителя - 26,7 м3 - устройства примыкания к парапетам высотой до 600 мм - 57 п.м., - устройства примыкания к вент, шахтам до 600 мм с краевой рейкой - 17 п.м, 

- устройства утеплителя из менераловатных плит Rockwool Руф Баттс В Оптима  

120мм-26,7 м3; - устройства армирующей сетки -215 м2, 

- устройства цементно-песчаной стяжки до 50 мм -215м2,  - огрунтовки битумным праймером -215 м2,  

- устройства кровель плоских из направляемых материалов Икопал В, Икопал Н: в два  

слоя 215 м2; 

2) выполнить работы по ремонту парапетов, путем разборки кирпичных парапетов - 5.3  

м3, кладки парапетов из силикатного кирпича марки СОР-100/25 ГОСТ 379-95, морозоустойчивостью МРз-25-5,3 м3, 3) по завершении работ убрать и вывезти с территории объекта строительный мусор. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу Регионального фонда содействия капитальному ремонту  

многоквартирных домов Ярославской области судебную неустойку на случай неисполнения  

решения суда в размере: 3 000 руб. в день с тридцать второго календарного дня с даты  вступления в силу судебного акта по настоящему делу до даты фактического исполнения  гарантийных обязательств по договору № 10смр/2020 от 27 апреля 2020 года за каждый день  просрочки по день фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу Регионального фонда содействия капитальному ремонту  многоквартирных домов Ярославской области 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том  числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети  «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Л.А. Шадринова