АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248600, г. Калуга, ул. Ленина, д.90; тел.: (4842)505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

httр://kaluga.arbitr. ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело №А23-2841/2019

28 июня 2019 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена27 июня 2019 года

В полном объеме решение изготовлено 28 июня 2019 года

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Чехачевой И.В.,                при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), 629306 Автономный округ Ямало-Ненецкий, 

<

...> к обществу с ограниченной ответственностью «В-Макс Строй»,  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), 248001, 

<

...>,  о взыскании 1403703 руб. 27 коп., 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области к обществу с ограниченной ответственностью «В-Макс Строй» с исковым заявлением о взыскании штрафной санкции по договору на выполнение работ по капитальному ремонту от 09.01.2017 № КР-ЗиС-79706-17 в сумме 1403703 руб. 27 коп. 

На основании ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, суд  установил следующее.

По итогам открытого запроса предложений №1/0001/16/5.1/0079706/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/13.12.2016 на основании протокола подведения итогов запроса предложений от 23.12.2016 между ООО «Газпром добыча Ямбург» (заказчик) и ООО «В-МАКС СТРОЙ» (подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту от 09.01.2017 № КР-ЗиС-79706-17, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить за свой риск собственными (не менее 50% объемов работ) и привлеченными силами и средствами работы «Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений объектов добычи газа ЯНГКМ (УКПГ-1, ДКС-1 (I оч.), УППГ-8, УКПГ-3, ДКС-3 (I оч.), УКПГ-4, УППГ-4А, УКПГ-2В, ЛЭС) ООО «Газпром добыча Ямбург» согласно квартальному заданию (приложении №2), а заказчик - оплатить эти работы в предусмотренном договором порядке.

Стоимость работ по договору определена на основании протокола подведения итогов запроса предложений №1/0001/16/5.1/0079706/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/13.12.2016 от 23.12.2016 и составила 167 852 146 руб. 45 коп., в том числе НДС (п. 3.1. договора).

В соответствии с п. 6.2. договора ответчик принял на себя обязательство выполнить собственными силами и (или) привлеченными силами и средствами капитальный ремонт объектов в пределах стоимости работ по договору и сдать результат работ заказчику в сроки и на условиях, определенных договором, в состоянии, позволяющем немедленную эксплуатацию объектов.

В приложениях №1 к договору стороны согласовали график производства работ.

В соответствии с п. 15.1. договора подрядчик гарантировал выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиям договора.

При этом в п. 17.4. договора стороны предусмотрели ответственность подрядчика за нарушение согласованных сроков выполнения работ в виде неустойки в размере 0,03% от стоимости неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. 

В соответствии с графиком производства работ с учетом дополнительного соглашения  от 29.12.2018 №6), квартальным заданием  выполнению в 2018 году подлежали работы предусмотренные договором на общую сумму 39712489 руб. 09коп., без НДС.

Ссылаясь на то, что ответчиком  выполнены работы не в полном объеме, предусмотренные к выполнению в 2018 г.,  истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями, предварительно направив в адрес ответчика претензию, оставленную без ответа и удовлетворения. 

Суд, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующих обстоятельств. 

Исходя из условий договора, суд приходит к выводу, что между сторонами фактически сложились обязательства, вытекающие из договора подряда (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В связи с нарушением сроков выполнения работ в 2018 истец начислил неустойку в размере 1403703 руб. 27 коп. (т.  1, л.д. 11-12).  

Согласно положениям части 31 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, непредставление доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11, от 08.10.2013 №12857/12, определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2015 №305-ЭС14-8858).

С учетом изложенного, суд признает обоснованными требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 1403703 руб. 27 коп.

Ответчик в отзыве на исковое заявление факт нарушения обязательства по договору не отрицал, расчет неустойки не оспорил, заявил о снижении неустойки. 

В силу пункта 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

В соответствии с пунктом 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7) бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (пункт 74 постановления N 7).

Согласно пункту 75 постановления N 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3,4, статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при отсутствии доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, суд не усматривает оснований для снижения заявленной к взысканию неустойки.

Явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств из материалов дела не усматривается.

Ответчик, являясь коммерческой организацией, в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а, следовательно, должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых по договору обязательств. Договор заключен сторонами по обоюдному согласию, все условия, в том числе и в части размера ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, определялись добровольным волеизъявлением истца и ответчика, что соответствует  статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предусмотренный сторонами в п. 17.5. договора размер неустойки –     0,03% за каждый день просрочки – является адекватным и соизмеримым с нарушенным интересом заказчика по договору. Доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств ответчик суду не представил. Не представил ответчик и доказательств отсутствия его вины в просрочке исполнения вышеуказанного обязательства, в том числе доказательства принятия им в целях надлежащего исполнения обязательства всех мер и с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру этого обязательства и условиям оборота.

Размер неустойки в 0,03% за каждый день просрочки определен по свободному усмотрению сторон; не превышает обычно применяемую за нарушение обязательства ставку для расчета пени (0,1%), признаваемую судебной практикой, при отсутствии доказательств обратного, адекватной мерой ответственности за нарушение договорных обязательств (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.01.2014 N ВАС-250/14).

  На основании статей 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика, исходя из удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, ч. 1 ст. 150, 151, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «В-Макс Строй» г.Калуга в пользу общества  с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» г. Новый Уренгой неустойку в размере 1403703  рубля 27 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 27037 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья                                                                                    И.В. Чехачева