2010/2023-116013(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-8472/2023 

от 18 октября 2023 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

РЕШИЛ:

Исковые требования государственного казенного учреждения Архангельской  

области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" 

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления  

решения суда по делу № А05-8472/2023 в законную силу устранить следующие недостатки  

работ по государственному контракту от 25.05.2020 № 0124200000620001584: 

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>:  

- устранить недостаток в виде образования темных пятнен под плинтусами с  

последующим восстановлением плинтусов в квартире  № 2; 

- устранить дефекты линолеумного напольного покрытия в квартире  № 7;  - восстановить работу звонка входной двери в квартире  № 7;  

- выполнить работы по герметизации в местах примыкания оконного блока к  

стеновой панели в квартире  № 10; 

- выполнить работы по герметизации в местах примыкания оконного блока к  

стеновой панели в квартире  № 13; 

- устранить недостаток в виде образования трещины в отделочном слое стены  

санузла в квартире  № 13; 

- устранить недостаток в виде не открывающейся створки окна  

на проветривание в квартире  № 19; 

- устранить недостаток в виде промерзания угла в кухне в квартире  № 19;  

- выполнить работы по восстановлению внутренней отделки в местах протечек в  

помещениях квартир  № 25,26,52,53; 

- выполнить работы по восстановлению внутренней отделки в местах протечек в  

комнатах квартиры  № 40; 

- устранить дефекты в виде деформации линолеумного напольного  

покрытия в комнате квартиры  № 40; - выполнить работы по замене стеклопакета в кухне квартиры  № 40; - установить осветительный прибор в тамбуре квартиры  № 48; 

- выполнить в полном объеме работы по установке вентиляционного  

отверстия между ванной и туалетом в квартире  № 50; 

- выполнить работы по устранению недостатка в виде образования  

контруклонов по отливам окон на лестничных клетках; 

- выполнить работы по монтажу сушильного оборудования в соответствии  

с проектом; 

- устранить недостаток в виде образования подтопления грунтовыми водами  

в подвале дома под первым подъездом и в узле учета тепловой энергии;  

- выполнить работы по монтажу обогрева водосточной системы в  

соответствии с проектной документацией; 

- выполнить работы по монтажу пожарного гидранта в соответствии  

с проектной документацией; 

- выполнить в полном объеме работы по монтажу контура молниезащиты  

в соответствии с проектной документацией; 

2. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область,  

<

...> Октября, д. 8 В: - Коридор техподполья: 

- выполнить работы по покраске полов полиуретановой краской;  - зачеканить русты плит-перекрытия;  

- устранить недостаток в виде отсутствия утепления канализационной трубы ф50 мм  

над входной дверью 

- выполнить работы по окраске потолков водоэмульсионными красками;  - Водомерный узел и индивидуальный тепловой пункт:  

- установить манометр на подающем трубопроводе теплоузла; - установить манометр на обратном трубопроводе теплоузла; - выполнить работы по замене тепловычислителя; - выполнить работы по замене балансировочного клапана; - выполнить работы по замене датчиков температуры; - выполнить работы по замене дренажного насоса; 

- выполнить работы по покраске полов полиуретановой краской;  - зачеканить русты плит-перекрытия;  

- выполнить работы по окраске потолков водоэмульсионными красками;  

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя  

на утеплителе (под ванными комнатами и санузлами); 

- выполнить работы по подключению трансформатора 230В - 36 В;  

- привести в соответствие с проектом ввод к водомерному узлу; - привести в соответствие с проектом толщину утепления труб водомерного узла; - выполнить работы по замене счетчика; - выполнить работы по замене фильтра; - привести в соответствие с проектом шаровые краны; - привести в соответствие с проектом сечение и толщину ППР трубы; 

- привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в  

помещениях; 

Помещение сетей связи и комната уборочного инвентаря:  - выполнить работы по установке канализационного насоса;  

- выполнить работы по покраске полов полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; - выполнить работы по покраске потолков водоэмульсионными красками; 

- устранить недостаток в виде образования деформаций штукатурного  

защитного слоя стен; 

- привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в  

помещениях; 

- выполнить работы по подключению душевого поддона к системе  

канализации; 

- выполнить работы по установке сифона душевого поддона;  

- выполнить работы по подключению водонагревателя к системе  

электроснабжения; Подвальные помещения: 

- выполнить работы по отсыпке подвальных помещений в соответствии  

с проектной документацией; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя на  

утеплителе (под ванными комнатами и санузлами); 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя на  

утеплителе (под лестничными клетками); 

- организовать вывоз остатков неиспользованных строительных материалов в  

подвале с последующей утилизацией; 

- устранить недостаток в виде образовавшихся остатков не демонтированной  

деревянной опалубки; 

- устранить недостаток в виде образовавшихся остатков несрезанной арматуры с  

последующей покраской торцов арматуры; 

Входы в подвал:  

- выполнить работы по замене материалов и ограждений в соответствии с  

проектной документацией; 

- устранить дефекты брусчатки на входе в теплоузел в соответствии с  

проектной документацией; 

- устранить дефекты в виде деформации блоков входа в подвальные  

помещения; - устранить дефекты установки лестничного марша; Фасад: - выполнить работы по установке поливочных кранов; 

- выполнить работы по покраске в RAL8017 штукатурки цоколя;  - выполнить работы по монтажу отливов на армопоясе;  

- выполнить работы по окраске металлических уголков над окнами; 

- выполнить работы по восстановлению декоративной штукатурки фасада  

(шубы); - выполнить работы по покраске армопояса в соответствии с проектом; - выполнить работы по теплоизоляции вентиляционных шахт на крыше; 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя  

вентиляционных шахт на крыше; 

- выполнить работы по заделке пропусков между фундаментными блоками  

монолитными участками; 

- выполнить работы по замене вентиляционных решеток в соответствии с проектом;  - выполнить работы по восстановлению декоративной штукатурки помещения  

электрощитовой; - привести в соответствие с проектом крыльца; 

- устранить недостаток в части восстановления отмостки в соответствии  

с проектом; - Наружные сети канализации и водопровода: - привести в соответствие с проектом прокладку канализационной наружной сети; 

- привести в соответствие с проектом канализационные колодцы;  

- устранить недостаток в виде образования подтопления колодца сетей  

водоснабжения; - выполнить работы по монтажу крыш пожарных резервуаров; 

- выполнить работы по засыпке пожарных резервуаров в соответствии  

с проектом; Наружное электроснабжение: 

- выполнить работы по замене типа опор освещения в соответствии  

с проектом; 

- привести в соответствие с проектом светильники;  

- выполнить работы по заземлению опор; Сети связи: - выполнить работы по монтажу сетей связи; Места общего пользования: 

- выполнить работы по установке межтамбурных дверей;  - выполнить работы по восстановлению штукатурного слоя;  

- устранить недостаток в виде образования загрязнения на дверях  

с последующей покраской; 

- привести в соответствие с проектом стремянку выхода на чердак;  

- привести в соответствие с проектом защитную сетку на стремянке выхода на  

чердак; 

- выполнить работы по установке детских замков на окнах;  - Система электроснабжения:  

- выполнить работы по установке электроконвектора в электрощитовой;  - привести в соответствие с проектом распределительный щиток;  

- привести в соответствие с проектом щиток сетей связи;  - выполнить работы по затирке керамической плитки в электрощитовой;  

- выполнить работы по установке распределительных коробок на заземлении  

ванной; 

- привести в соответствие с проектом светильники подвала;  

- привести в соответствие с проектом прокладку проводов на вводе  

в электрощитовую; - привести в соответствие с проектом светильники на чердаке; 

- выполнить работы по установке молниезащиты на крыше;  - выполнить работы по настройке дизель-генераторной установки;  

- выполнить работы по установке заземления внутриквартирных  

распределительных щитков; - Квартиры: 

- выполнить работы по восстановлению внутренней отделки в квартирах в части  

восстановления обойного покрытия; 

- устранить недостаток в виде образования темных пятен в местах мостика холода  

по армопоясу; 

- устранить недостаток в виде образования темных пятен на обоях  

в квартирах; 

- выполнить работы по установке противопожарных извещателей;  

- выполнить работы по запениванию противопожарной пеной гильз прокладки  

коммуникаций; 

- выполнить работы по монтажу «сапожка» из плитки в санузлах;  - выполнить работы по поклейке обоев за радиаторами отопления;  

- привести в соответствие с проектом крепления труб водопровода;  - привести в соответствие с проектом крепления труб канализации;  - устранить дефекты линолеумного напольного покрытия в квартирах;  

- удалить транспортировочную пленку на окнах в квартирах; Система отопления: 

- привести в соответствие с проектом размер и сечение труб отопления;  - устранить причину неполного прогрева радиаторов системы отопления;  - привести в соответствие с проектом толщину утепления труб отопления;  

Кровля: - привести в соответствие с проектом ограждение кровли; - привести в соответствие с проектом снегозадержание кровли; 

- привести в соответствие с проектом прокладку труб канализации в  чердачном помещении;  

- привести в соответствие с проектом ходовые мостики чердачного  помещения;  

- устранить недостаток в части отсутствия пароизоляции; 

- устранить дефекты по монтажу насосов в комнате уборочного инвентаря;  3. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область,  

<

...> Октября, д. 9 В: - Коридор техподполья: - выполнить работы по покраске полов полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по окраске потолков водоэмульсионными красками;  - Водомерный узел и индивидуальный тепловой пункт:  

- выполнить работы по замене тепловычислителя; - выполнить работы по замене балансировочного клапана; - выполнить работы по замене датчиков температуры; - выполнить работы по замене дренажного насоса; - выполнить работы по покраске пола полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по окраске потолков водоэмульсионными красками;  - выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя  

на утеплителе (под ванными комнатами и санузлами); - привести в соответствие с проектом ввод к водомерному узлу; 

- привести в соответствие с проектом толщину утепления труб водомерного узла;  

- выполнить работы по замене счетчика; - выполнить работы по замене фильтра в соответствии с проектом; - привести в соответствие с проектом шаровые краны; - привести в соответствие с проектом сечение и толщину ППР трубы; - привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в помещениях; 

Помещение сетей связи и комната уборочного инвентаря:  - выполнить работы по установке канализационного насоса;  

- выполнить работы по покраске пола полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; - выполнить работы по покраске потолков водоэмульсионными красками; 

- устранить недостаток в виде образования деформаций штукатурного  

защитного слоя стен; 

- привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в  

помещениях; 

- выполнить работы по подключению душевого поддона к системе  

канализации; 

- выполнить работы по установке сифона душевого поддона;  

- выполнить работы по подключению водонагревателя к системе  

электроснабжения; Подвальные помещения: 

- выполнить работы по отсыпке подвальных помещений в соответствии  

с проектной документацией; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя на  

утеплителе (под ванными комнатами и санузлами); 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя на  

утеплителе (под лестничными клетками); 

- организовать вывоз остатков неиспользованных строительных материалов  

в подвале с последующей утилизацией; 

- устранить недостаток в виде образовавшихся остатков несрезанной арматуры  

с последующей покраской торцов арматуры; Входы в подвал: - привести в соответствие с проектом материалы и размеры ограждений; 

- устранить дефекты брусчатки на входе в теплоузел в соответствии с  

проектом; 

- устранить дефекты в виде деформации блоков входа в подвальные  

помещения; 

- устранить дефекты установки лестничного марша;  

Фасад: - выполнить работы по установке поливочных кранов; 

- выполнить работы по покраске в RAL8017 штукатурки цоколя;  - выполнить работы по монтажу отливов на армопоясе;  

- выполнить работы по окраске металлических уголков над окнами; 

- выполнить работы по восстановлению декоративной штукатурки фасада  

(шубы); - выполнить работы по покраске армопояса в соответствии с проектом; 

- выполнить работы по наружной теплоизоляции вентиляционных шахт на крыше;  

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя  

вентиляционных шахт на крыше; 

- выполнить работы по заделке пропусков между фундаментными блоками  

монолитными участками; 

- выполнить работы по замене вентиляционных решеток в соответствии с проектом;  - выполнить работы по восстановлению декоративной штукатурки помещения  

электрощитовой; - привести в соответствие с проектом крыльца; 

- устранить недостаток в части восстановления отмостки в соответствии  

с проектом; - Наружные сети канализации и водопровода: 

- привести в соответствие с проектом прокладку канализационной наружной сети;  - привести в соответствие с проектом канализационные колодцы;  

- устранить недостаток в виде образования подтопления колодца сетей  

водоснабжения; - выполнить работы по монтажу крыш пожарных резервуаров; 

- выполнить работы по засыпке пожарных резервуаров в соответствии  

с проектом; Наружное электроснабжение: 

- выполнить работы по замене типа опор освещения в соответствии  

с проектом; - привести в соответствие с проектом светильники; - выполнить работы по заземлению опор; Сети связи: - выполнить работы по монтажу сетей связи; Места общего пользования: - выполнить работы по установке межтамбурных дверей; 

- выполнить работы по восстановлению штукатурного слоя;  

- устранить недостаток в виде образования загрязнения на дверях  

с последующей покраской; 

- привести в соответствие с проектом стремянку выхода на чердак;  

- привести в соответствие с проектом защитную сетку на стремянке выхода на  

чердак; 

- выполнить работы по установке детских замков на окнах;  Система электроснабжения:  

- выполнить работы по установке электроконвектора в электрощитовой;  - привести в соответствие с проектом распределительный щиток;  

- привести в соответствие с проектом щиток сетей связи; 

- выполнить работы по затирке керамической плитки в электрощитовой;  

- выполнить работы по установке распределительных коробок на заземлении  

ванной; 

- привести в соответствие с проектом светильники подвала;  

- привести в соответствие с проектом прокладку проводов на вводе  

в электрощитовую; 

- привести в соответствие с проектом светильники на чердаке;  - выполнить работы по установке молниезащиты на крыше;  

- выполнить работы по настройке дизель-генераторной установки;  

- выполнить работы по установке заземления внутриквартирных  

распределительных щитков; - Квартиры: 

- выполнить работы по восстановлению внутренней отделки в квартирах в части  

восстановления обойного покрытия; 

- устранить недостаток в виде образования темных пятен в местах мостика холода  

по армопоясу; 

- устранить недостаток в виде образования темных пятен на обоях  

в квартирах; 

- выполнить работы по установке противопожарных извещателей;  

- выполнить работы по запениванию противопожарной пеной гильз прокладки  

коммуникаций; 

- устранить недостаток в части отсутствия «сапожка» из плитки в санузлах;  - выполнить работы по поклейке обоев за радиаторами отопления;  

- привести в соответствие с проектом крепления труб водопровода;  - привести в соответствие с проектом крепления труб канализации;  - устранить дефекты линолеумного напольного покрытия в квартирах;  

- удалить транспортировочную пленку на окнах в квартирах;  

Система отопления:  

- привести в соответствие с проектом размер и сечение труб отопления; 

- устранить причину неполного прогрева радиаторов системы отопления;  - привести в соответствие с проектом толщину утепления труб отопления;  

Кровля: - привести в соответствие с проектом ограждение кровли; - привести в соответствие с проектом снегозадержание кровли; 

- привести в соответствие с проектом прокладку труб канализации в  

чердачном помещении; 

- привести в соответствие с проектом ходовые мостики чердачного  

помещения; - устранить недостаток в части отсутствия пароизоляции; 

- устранить дефекты по монтажу насосов в комнате уборочного инвентаря;  

4. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область,  

<

...>: - Коридор техподполья: - выполнить работы по покраске полов полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по окраске потолков водоэмульсионными красками;  - Водомерный узел и индивидуальный тепловой пункт:  

- выполнить работы по замене тепловычислителя; - выполнить работы по замене балансировочного клапана; - выполнить работы по замене датчиков температуры; - выполнить работы по замене дренажного насоса; - выполнить работы по покраске пола полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по окраске потолков водоэмульсионными красками;  

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя  

на утеплителе (под ванными комнатами и санузлами); - привести в соответствие с проектом ввод к водомерному узлу; - привести в соответствие с проектом толщину утепления труб водомерного узла; 

- выполнить работы по замене счетчика в соответствии с проектом;  - выполнить работы по замене фильтра в соответствии с проектом;  - привести в соответствие с проектом шаровые краны;  

- привести в соответствие с проектом сечение и толщину ППР трубы; - привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в помещениях; 

Помещение сетей связи и комната уборочного инвентаря:  

- выполнить работы по установке канализационного насоса; - выполнить работы по покраске пола полиуретановой краской; - зачеканить русты плит-перекрытия; - выполнить работы по покраске потолков водоэмульсионными красками; 

- устранить недостаток в виде образования деформаций штукатурного  

защитного слоя стен; привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в помещениях; - выполнить работы по подключению душевого поддона к системе канализации; - выполнить работы по установке сифона душевого поддона; 

- выполнить работы по подключению водонагревателя к системе  

электроснабжения; Подвальные помещения: 

- выполнить работы по отсыпке подвальных помещений в соответствии  

с проектной документацией; - зачеканить русты плит-перекрытия; 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя на  

утеплителе (под ванными комнатами и санузлами); 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя на  

утеплителе (под лестничными клетками); 

- организовать вывоз остатков неиспользованных строительных материалов  

в подвале с последующей утилизацией; 

- устранить недостаток в виде образовавшихся остатков несрезанной арматуры  

с последующей покраской торцов арматуры; Входы в подвал: - привести в соответствие с проектом материалы и размеры ограждений; 

- устранить дефекты брусчатки на входе в теплоузел в соответствии с  

проектом; 

- устранить дефекты в виде деформации блоков входа в подвальные  

помещения; - устранить дефекты установки лестничного марша; Фасад: 

- выполнить работы по установке поливочных кранов;  - выполнить работы по покраске в RAL8017 штукатурки цоколя;  

- выполнить работы по монтажу отливов на армопоясе;  - выполнить работы по окраске металлических уголков над окнами;  

- выполнить работы по восстановлению декоративной штукатурки фасада  

(шубы); 

- выполнить работы по покраске армопояса в соответствии с проектом;  

- выполнить работы по наружной теплоизоляции вентиляционных шахт на  

крыше; 

- выполнить работы по восстановлению защитного штукатурного слоя  

вентиляционных шахт на крыше; 

- выполнить работы по заделке пропусков между фундаментными блоками  

монолитными участками; 

- выполнить работы по замене вентиляционных решеток в соответствии с проектом;  - выполнить работы по восстановлению декоративной штукатурки помещения  

электрощитовой; - привести в соответствие с проектом крыльца; 

- устранить недостаток в части восстановления отмостки в соответствии  

с проектом; 

- выполнить работы по установке отводы на водосточных трубах;  

- выполнить работы по установке водосточного желоба на фасаде у входа  

в здание в соответствии с проектом; - Наружные сети канализации и водопровода: 

- привести в соответствие с проектом прокладку канализационной внутренней сети;  - привести в соответствие с проектом канализационные колодцы;  

- выполнить работы по засыпке пожарных резервуаров в соответствии  

с проектом; Наружное электроснабжение: 

- выполнить работы по замене типа опор освещения в соответствии  

с проектом; - привести в соответствие с проектом светильники; - выполнить работы по заземлению опор; Сети связи: - выполнить работы по монтажу сетей связи; 

- привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в  

помещении; Места общего пользования: - выполнить работы по установке межтамбурных дверей; 

- устранить недостаток в виде образования загрязнения на дверях  

с последующей покраской; - привести в соответствие с проектом стремянку выхода на чердак; 

- привести в соответствие с проектом защитную сетку на стремянке выхода на  

чердак; - выполнить работы по установке детских замков на окнах; 

- организовать вывоз строительных материалов в местах общего пользования и  

на территории возле здания с последующей утилизацией; 

- устранить дефекты в виде образования провалов основания и деформации  

покрытия из брусчатки по периметру здания; 

- устранить дефекты в виде разрушения бетонного покрытия хозяйственной  

площадки; 

- устранить дефекты в виде провалов грунта в местах озеленения вокруг здания и на  

пожарных резервуарах; 

- выполнить работы по восстановлению покрытия дороги и поврежденного тротуара  

к прилегающей дворовой территории; 

- организовать вывоз остатков строительного мусора, в том числе арматуры на  

детской площадке; 

- устранить дефекты в части восстановления бортовых камней по периметру здания  

и на детской площадке; Система электроснабжения, наружного освещения: - привести в соответствие с проектом распределительный щиток; - привести в соответствие с проектом щиток сетей связи; 

- выполнить работы по установке распределительных коробок на заземлении  

ванной; 

- привести в соответствие с проектом светильники подвала;  - привести в соответствие с проектом светильники на чердаке;  

- выполнить работы по установке молниезащиты на крыше;  - выполнить работы по настройке дизель-генераторной установки;  

выполнить работы по установке заземления внутриквартирных  

распределительных щитков; 

- устранить дефекты в виде отклонения по вертикали опоры освещения;  - Квартиры:  

- выполнить работы по установке противопожарных извещателей;  

- выполнить работы по запениванию противопожарной пеной гильз прокладки  

коммуникаций; Система отопления: 

- привести в соответствие с проектом размер и сечение труб отопления;  - привести в соответствие с проектом толщину утепления труб отопления;  

Кровля, вводно-распределительное устройство: - привести в соответствие с проектом ограждение кровли; 

- привести в соответствие с проектом снегозадержание кровли;  

- привести в соответствие с проектом прокладку труб канализации  

в чердачном помещении; 

- устранить недостаток в части отсутствия пароизоляции;  

- привести в соответствие с проектом конструкцию кровли; 

привести в соответствие с проектом вентиляционную систему в  

помещении вводно-распределительного устройства; Благоустройство: 

- привести в соответствие с проектом толщину растительного слоя;  - привести в соответствие с проектом количество зеленых насаждений;  

- устранить дефекты в части восстановления бордюрного камня;  - устранить дефекты в части восстановления покрытия тротуаров из брусчатки;  

- устранить дефекты в части крена фундамента дизельной генераторной установки;  - привести в соответствие с проектом растительный слой на пожарных емкостях;  

- привести в соответствие с проектом покрытие детской площадки;  - организовать вывоз бетонного боя с территории;  

- привести в соответствие с проектом люки смотровых колодцев;  

- устранить дефекты в виде образования провалов бетонной площадки  

для сбора ТБО; 

- устранить дефекты в виде отклонения опоры освещения по вертикали.  

На случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ"  

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) решения суда по делу № А05-8472/2023 в части  

обязательства по устранению недостатков в выполненных работах взыскать с общества с  

ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

в пользу государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное  

управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

денежную сумму (судебную неустойку) в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день  

неисполнения судебного решения, начиная со следующего дня, которым заканчивается  

соответствующий срок исполнения решения суда по делу № А05-8472/2023, по дату  

фактического исполнения. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" 

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. 00 коп.  

государственной пошлины по иску. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  

Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

 Судья Н.В. Бутусова.