АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-29484/2018

12 мая 2020 г.

г. Челябинск

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Жернакова А.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Воронковой Е.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью  «ОЛПИКО», ОГРН 1117447009657, г. Челябинск, к обществу с ограниченной  ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН  1177456068899, г. Челябинск, о взыскании 209 306 руб. 40 коп.,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН  1177456068899, г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью  «ОЛПИКО», ОГРН 1117447009657, г. Челябинск, о взыскании 296 699 руб.,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с  ограниченной ответственностью «Мегастрой», ОГРН 1047424509660, г.  Челябинск, специализированной некоммерческой организации-фонда  «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах Челябинской области», ОГРН 1137400002585, г.  Челябинск.  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью  «ОЛПИКО» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО  ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ОЛПИКО» штраф за нарушение сроков выполнения работ  по договору субподряда № 09/01-1 от 01.09.2017 за период с 16.05.2018 по  20.08.2018 в размере 75 241 руб. 35 коп., а также судебные расходы по оплате  государственной пошлины по первоначальному иску в размере 2 583 руб. 22  коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью  «СТРОИТЕЛЬНО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОЛПИКО» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО  ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» задолженность за выполненные работы по договору  субподряда № 09/01-1 от 01.09.2017 в размере 270 189 руб., а также судебные  расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску в размере 8  135 руб. 75 коп., судебные расходы по оплате судебной экспертизы в размере 24  587 руб. 56 коп.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

В порядке абз. 2 ч. 5 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации произвести зачет удовлетворенной части  первоначального и встречного исков, в результате которого взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «ОЛПИКО» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»  итоговую задолженность за выполненные работы по договору субподряда №  09/01-1 от 01.09.2017 в размере 194 947 руб. 65 коп., а также судебные издержки  по делу в размере 30 140 руб. 09 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОЛПИКО» в  доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному  иску в размере 1 233 руб. 23 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО  ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» в доход федерального бюджета государственную  пошлину по встречному иску в размере 1 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства  в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья А.С. Жернаков