6/2023-202270(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-8157/2023

г. Астрахань

20 ноября 2023 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление № 5» удовлетворить.  

Внести в государственный контракт от 29.04.2022 № 03252000067220000250001  следующие изменения:  

Пункт 3 раздела 3 государственного контракта от 29.04.2022   № 03252000067220000250001 «Сроки и условия выполнения работ подрядчиком» изложить в  следующей редакции:  

 «3.1. Сроки выполнения работ: С даты заключения контракта до 25.12.2023». 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Судья А.Э. Измайлова  

20 ноября 2023 года