Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-569/2017

29 ноября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  29 ноября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "КОЛУМБУС ИНВЕСТ" (адрес:  Россия 199226, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Лесозаводская строительная компания" (адрес:  Россия 692042, г ЛЕСОЗАВОДСК, ПРИМОРСКИЙ край, ул СВЕРДЛОВА 29, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 1 167 909 руб. 44 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 11.05.2016

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 22.07.2017

установил:

ООО "КОЛУМБУС ИНВЕСТ" предъявил иск к ООО "Лесозаводская строительная компания" и после уточнения исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ просит взыскать 1 167 909 руб. 44 коп. неустойки за просрочку выполнения работ на основании договора № СП-555-1 от 09.02.2016. 

Ответчик иск отклонил.

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор № СП-555-1 от 09.02.2016, по условиям которого субподрядчик-ответчик принял на себя обязательства выполнить своими силами и средствами комплекс строительно-монтажных работ на территории строительной площадки НПС-2 Ванкорского месторождения, а подрядчик принять работы и оплатить в соответствии с условиями договора. 

Общая стоимость работ составляет 3 111 764 руб. 76 коп. 

Срок окончания работ – 31.05.2016.

В указанный срок ответчик работы не выполнил. 

В соответствии с п.14.1.1 договора в случае просрочки субподрядчиком исполнения своих обязательств по договору, субподрядчик обязуется уплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки. 

Из расчета на 09.09.2016 неустойка составляет 1 167 909 руб. 44 коп. 

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, проверены судом и не нашли своего подтверждения. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 24 679 руб. 00 коп. 

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лесозаводская строительная компания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КОЛУМБУС ИНВЕСТ" 1 167 909 руб. 44 коп. неустойки.

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лесозаводская строительная компания" в доход федерального бюджета 24 679 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.