Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«13» апреля 2021 года

Дело №А12-33626/2020

Резолютивная часть оглашена 08 апреля 2021 года

Полный текст изготовлен 13 апреля 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в  судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки по п. 12.2  муниципального контракта  № 1600 от 20.05.2020.

В судебном заседании участвовали представители:

от истца –  ФИО1, по доверенности №3426/03 от 27.10.2020,

от ответчика – извещены, не явились.

Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее  МУ «Комдорстрой», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Старт-А» (далее  ООО «Старт-А», ответчик) о взыскании штрафа за нарушение обязательства, предусмотренного п. 12.2 муниципального контракта №1600 от 20.05.2020 в размере 283 691 руб. 65 коп.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте заседания извещался надлежащим образов.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

МУ«Комдорстрой» ( Муниципальный заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Старт-А» ( Подрядчик) 20 мая 2020 года заключен муниципальный контракт № 1600 (далее - Контракт) на выполнение работ по ремонту тротуаров и устройству парковочных стоянок автомашин у стадиона «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда в 2020 году.

В соответствии с п. 4.1. Контракта Цена Контракта составляет 2 836 916  рублей 50 копеек. 

Согласно п. 6.1. Контракта сроки выполнения работ с момента заключения Контракта с 20 мая 2020 года, окончание работ: до 01 октября 2020 (включительно).

По состоянию на 13 октября 2020 года Подрядчиком не выполнены в полном объемеобязательства по Контракту, в связи с чем МУ «Комдорстрой» принято решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 18.4. Контракта, п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 723 ГК РФ). 

Контракт считается расторгнутым с 24 ноября 2020 года. 

В соответствии с пунктом 12.2. Контракта за каждый факт неисполнения илиненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заисключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается размере 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

Учитывая неисполнение муниципального контракта № 1600 от 20 мая2020 года в полном объеме ответчику начислен штраф в размере  283 691рубль 65 копеек. Доказательств исполнения контракта  суду не предоставлено.

В целях соблюдения досудебного порядка МУ «Комдорстрой» в адрес ООО «Старт-А» направлено требование № 3742/03 от 26 ноября 2020 года об уплате штрафа. Требование не исполнено. 

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 283 691,65 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 674 руб.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова