33/2020-132967(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-7015/2020

г. Ярославль

19 ноября 2020 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление регионального фонда  

содействия капитальному ремонту многоквартирных домов ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Артем" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об устранении недостатков, 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Артем" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу  в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки в выполненных работ по  договору подряда № 25/14-08 от 26.09.2014 на выполнение работ по капитальному  ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 

<

...>,  выполнить работы, а именно:  

1. Устройство дополнительных рядов сплошной обрешетки до ширины по  рабочему проекту ООО «Центр Строительного Аудита» в карнизных частях кровли, в  коньковой части и в местах расположения вентшахт.  

2. Переустройство примыканий кровельного покрытия к выступающим над  кровлей конструкциям, а также обделок стен слуховых окон и фартуков парапетов в  соответствии с разработанными узлами рабочего проекта ООО «Центр Строительного  Аудита» и положениями СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция  СНиП П-26-76», «Кровли. Руководство по проектированию, устройству» правилам  приемки и методам оценки качества»: постановка дополнительных фартуков  примыканий; обеспечение плотности соединений кровельных листов в примыканиях и  при соединении друг с другом путем устройства фальцевых соединений листов;  герметизация мест сопряжения листов обделок с вертикальными конструкциями стен,  парапетов, вентшахт; выполнение фартуков стен и парапетов в соответствии с  положениями рабочего проекта; восстановление герметизации мест прохода через  кровлю стояков канализации.  

3. Постановка дополнительных крепежных элементов кровельного покрытия к  обрешетке в соответствии с положениями рабочего проекта ООО «Центр  Строительного Аудита».  

4. Переустройство планок вдоль ендов и ребер кровли с обеспечением плотности  соединения листов вдоль ската путем устройства фальцевых соединений в  соответствии с положениями СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция  СНиП П-26-76» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

5. Переустройство обшивки вентилируемого конька с восстановлением вентзазора  в соответствии с разработанным рабочим проектом ООО «Центр Строительного  Аудита».  

6. Выполнение опорных конструкций (брусков) ограждения в соответствии с  рабочим проектом; изготовление и перемонтаж кровельного ограждения в  соответствии с рабочим проектом ООО «Центр Строительного Аудита» и ГОСТ 25772- 83.  

7. Выполнение опорных конструкций (брусков) в соответствии с рабочим  проектом ООО «Центр Строительного Аудита»; перемонтаж элементов кровельного  снегозадержания в соответствии с рабочим проектом с заменой поврежденных  элементов.  

8. Склеивание стыков полос пароизоляции между собой, а также заведение пленки  на вертикальные конструкции с образованием плотного стыка примыкания; перекладка  теплоизоляционных матов с разбежкой матов в соответствии с положениями СНиП  3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Инструкции по монтажу  пароизоляции ФИО2  

9. Выполнение переходных мостков через вентканалы по направлению  прохождения ходовых трапов.  

10.Установка фасонных частей в местах стыков чугунных и полимерных  трубопроводов (вместо липких лент); восстановление целостности трубопроводов;  выполнение теплоизоляции трубопроводов в пределах чердачного помещения;  демонтаж колпаков в надкровельных частях стояков; переустройство стояков в местах  их выхода через слуховые окна.  

11.Произвести ремонт аварийных стропил из бревен; выправление уровня  стропильных ног из досок и бревен; перемонтаж вновь устроенных стропильных ног в  соответствии с рабочим проектом с их изготовлением; восстановление плотности  стыков и сопряжений элементов стропильной системы; постановка дополнительных  опор для стропил в зоне слуховых окон; переустройство подкосов на врубках и  опорных стоек в соответствии с рабочим проектом; постановка дополнительных  стягивающих креплений в составных сечениях элементов; демонтаж излишних  отдельно стоящих элементов, не предусмотренных рабочим проектом.  

12. Произвести работы по восстановлению прямолинейности уклонов скатов  кровли путем изменения положения элементов стропильной системы в соответствии с  рабочим проектом с заменой кобылок с заниженным сечением; восстановление  плотности стыков и сопряжений элементов стропильной системы; демонтаж излишних  отдельно стоящих элементов, не предусмотренных рабочим проектом.  

13. Произвести монтаж отсутствующих лобовых досок. 14. Произвести ремонт поврежденных облицовок вентканалов. 

15. Произвести замену деревянных дверных блоков чердачного помещения на  сертифицированную в установленном порядке противопожарную продукцию.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Артем" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу регионального фонда содействия  

капитальному ремонту многоквартирных домов ярославской области (ИНН  7604194785, ОГРН 1107600001233) 6 000,00 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Лапочкина И.М. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 6:54:51

Кому выдана Лапочкина Ирина Мариковна