АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-937/2022

г.Чита

02 октября 2024 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Принять к рассмотрению уточненные исковые требования о взыскании  неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту  от 05.09.2019 № 68/2019 за период с 01.07.2020 по 09.06.2023 в сумме 9 612 433 руб.  13 коп.  

Исковые требования удовлетворить частично с учетом удовлетворенного  ходатайства ответчика о снижении размера подлежащей взысканию неустойки  в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Водпроектстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации Агинского  Бурятского округа Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  3 362 362 руб. 03 коп. неустойки (пени) за просрочку исполнения государственного  контракта от 05.09.2019 № 68/2019 на разработку проектно-сметной документации для  завершения строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры п.Агинское  (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными  сооружениями)» за период с 01.07.2020 по 09.06.2023.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Водпроектстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 24 857 руб.  государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья О.В. Герценштейн