АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 91444/23-3-719

г. Москва

14 июня 2023 г.

Резолютивная часть объявлена 26 мая 2023 г. Дата изготовления решения в полном объеме 14 июня 2023 г.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  с использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙ" (121601, РОССИЯ, Г.  МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК,  ФИЛЁВСКИЙ Б-Р, Д. 10, К. 3, ПОМЕЩ. 3/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 17.10.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 773001001) к обществу с ограниченной  ответственностью "СПЕЦАНТИКОР СТРОЙ" (396657, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,  РОССОШАНСКИЙ РАЙОН, РОССОШЬ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.02.2014, ИНН:  

<

***>, КПП: 362701001) о взыскании 14 165 384, 68 руб., неустойки в размере  728 256, 01 руб.  

При участии: От истца: ФИО2 дов. от 01.06.2022 г. диплом; От ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙ" обратилось в  Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью "СПЕЦАНТИКОР СТРОЙ" о взыскании неосновательного  обогащения в размере 14 165 384, 68 руб., процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 02.08.2022 г. по 05.04.2023 г. в размере 728 256, 01  руб. с последующим начислением процентов, начиная с 05.04.2023 г. по день  фактической оплаты.  

В предварительное судебное заседание не явился представитель ответчика. 

Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания,  направленное ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении по  юридическому адресу, вернулось в суд с отметкой почтового органа «Истек срок  хранения».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения  

юридически значимых сообщений (ст. 165.1), доставленных по адресу, указанному в  едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по  указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по  адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются  полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.  

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или  иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает  гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие  последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его  представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно  поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам,  зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) (в редакции Федерального закона от  27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления, о времени и месте  судебного заседания опубликована на сайте http://www.msk.arbitr.ru.  

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после  получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении  производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению  информации о движении дела с использованием любых источников такой информации  и любых средств связи.  

Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные  участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если  к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия  арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о  принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении  производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим  Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле,  информации о начавшемся судебном процессе.  

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных  последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела,  если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом  извещены о начавшемся процессе.  

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом  о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с  чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в  отсутствие представителя ответчика.  

Согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании  присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют  в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного  заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были  заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе  завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой  инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом  требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.  

Учитывая изложенное, принимая во внимание также необходимость экономии  процессуального времени, суд, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ, с учетом  позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в  п. 27 Постановления от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному  разбирательству», считает возможным завершить предварительное судебное заседание  и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой  инстанции.  

Представитель истца требования поддержал в полном объеме по заявленным  основаниям, представил оригинал искового заявления.  

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив  обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, суд пришел к  следующим выводам.  

Как установлено судом, между ООО "Генстрой", (Подрядчик) и ООО  "Спецантикор Строй" (Субподрядчик) был заключен Договор субподряда № СП-4 на  выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу: г. Москва,  СЗАО, Парк «Покровское-Стрешнево» от "11" февраля 2022 года (далее - "Договор").  

В рамках п. 1.1 Договора Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика  выполнять работы по комплексному благоустройству территории по адресу: г. Москва,  СЗАО, парк "Покровское-Стрешево" в объеме установленном в техническом задании  (приложение № 1 к Договору) (далее по тексту - "Работы), а Подрядчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его.  

Для обеспечения исполнения Договора Подрядчик осуществил зачисление  суммы аванса в пользу Ответчика в размере 15 360 000 рублей 00 копеек.  

Однако, ответчик выполнил работы частично на сумму в размере 1 194 615,32  рублей 32 копейки. ООО "Генстрой" приняло данный объем Работы, подписав с  Ответчиком акт по форме КС-2.  

После чего ООО "Спецантикор Строй" прекратило предпринимать какие-либо  действия по исполнению Договора.  

Согласно пункту 15.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по  01 октября 2022 года.  

После истечения срока Договора на стороне ответчика образовался  неотработанный аванс в размере 14 165 384,68 рубля 68 копеек.  

ООО "Генстрой" направил Ответчику претензию от 06.12.2022 № 317-ГС с  требованием возвратить сумму неотработанного аванса.  

Претензионные требования о возврате неосновательного обогащения  ответчиком не исполнены, что послужило истцу обратиться в суд с исковым  заявлением.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в силу  ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.  

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик), обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить ее.  

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами  или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 8 Информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51  «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием  

для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является  сдача результата работ заказчику.  

Согласно пункту 15.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по  01 октября 2022 года.  

В силу ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что  окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по  договору.  

В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными  правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение).  

В соответствии с п. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно  пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими  услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого  пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в  том месте, где оно происходило.  

С учетом указанных обстоятельств, договор прекратил свое действие после 01  октября 2022 года.  

При этом, со стороны ответчика не представлено доказательств исполнения  настоящего договора на заявленную истцом сумму.  

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются  полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными  законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд  устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования  или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие  значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются  письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле,  заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и  материалы.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным  судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что  содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.  

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии  оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных  обстоятельств.  

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает  свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и  достаточными.  

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК  РФ.  

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого  количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.  

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не  признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).  

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том  числе по не представлению отзыва на исковое заявление.  

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание тот факт, что доказательств  надлежащего исполнения ответчиком условий Договора в материалы дела не  представлено, при наличии оплаты истцом ответчику денежных средств и отсутствии  доказательств их возвращения истцу, в связи с тем, что договор прекратил свое  действие, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом исковые требования о  взыскании неосновательного обогащения в размере 14 165 384,68 руб., являются  правомерными и подлежат удовлетворению.  

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование  чужими денежными средствами за период с 02.08.2022 г. по 05.04.2023 г. в размере 728  256, 01 руб. с последующим начислением процентов, начиная с 05.04.2023 г. по день  фактической оплаты.  

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания  денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат  уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой  Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются,  если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

Как следует из п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О  ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции,  действовавшей до 1 августа 2016 года, размер процентов за пользование чужими  денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки исполнения денежного  обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно,  если иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в  соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица  или в месте нахождения кредитора - юридического лица опубликованными Банком  России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками  банковского процента по вкладам физических лиц. Если иной размер процентов не  установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими  денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31  июля 2016 года, определяется на основании ключевой ставки Банка России,  действовавшей в соответствующие периоды (пункт 1 статьи 395 ГК РФ в редакции  Федерального закона от 3 июля 2016 года N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть  первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные  акты Российской Федерации").  

Расчет суммы процентов проверен судом, признан неверным по следующим  основаниям.  

С учетом того, что договор прекратил действие с 01 октября 2022 года,  принимая во внимание, что истец до указанной даты не направлял уведомлений в адрес  ответчика о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, проценты за  пользование чужими денежными средствами подлежат начислению непосредственно с  даты прекращения действия настоящего договора.  

В силу ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день,  днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

В связи с изложенным, судом произведен расчет суммы процентов за период с  04.10.2022 г. по 05.04.2023 г. сумма которых составила 535 567,97 руб. с учетом даты  прекращения договора и нерабочих дней.  

Таким образом, поскольку доказательств оплаты суммы неосновательного  обогащения не представлено, проценты за пользование чужими денежными средствами  

за период с 04.10.2022 г. по 05.04.2023 г. в размере 535 567,97 руб. с последующим  начислением процентов по день фактической оплаты, также подлежат взысканию.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, расходы по оплате госпошлины в размере 96  207 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, пропорционально  удовлетворенным требованиям.  

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦАНТИКОР  СТРОЙ" (396657, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССОШАНСКИЙ РАЙОН,  РОССОШЬ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННАЯ 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.02.2014, ИНН: 

<

***>, КПП:  362701001) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГЕНСТРОЙ"  (121601, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, ФИЛЁВСКИЙ Б-Р, Д. 10, К. 3, ПОМЕЩ. 3/1, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.10.2017, ИНН: 

<

***>, КПП:  773001001) неосновательное обогащение в размере 14 165 384 (Четырнадцать  миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят четыре) руб. 68 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 05.04.2023  г. в размере 535 567 (Пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 97  коп. с последующим начислением процентов по день фактической оплаты, расходы по  оплате госпошлины в размере 96 207 (Девяносто шесть тысяч двести семь) руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в  полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А. А. Федоточкин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 8:54:00

Кому выдана Федоточкин Андрей Александрович