АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-9803/2018

город Саранск27 февраля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2019 года.

Решение в полном объеме изготовлено 27 февраля 2019 года.

Арбитражный суд  Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

акционерного общества "Валенс" 

к Администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

о взыскании 1899900 руб. задолженности, 47627 руб. 63 коп. неустойки, 4000 руб. штрафа, 189900 руб. за увеличение объема работ и понесенные почтовые и судебные расходы,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца – открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Куйбышевской железной дороги, общество с ограниченной ответственностью «Саранскгражданпроект», общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сити»,

при участии

от истца: ФИО2, ФИО3, представителей по доверенности от 01.10.2018,

от ответчика: ФИО4, представителя по доверенности №40 от 10.01.2017,

от третьих лиц: ФИО5, представителя ООО «Саранскгражданпроект» по доверенности от 13.02.2019, ФИО6, директора ООО «Проект-Сити», 

у с т а н о в и л:

акционерное общество "Валенс" (далее – АО "Валенс", подрядчик, истец) обратилось в суд с иском к Администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее – Администрация, заказчик, ответчик) о взыскании 946378 руб. задолженности по оплате за выполненные проектные работы по муниципальному контракту на разработку ПСД по объекту «Канализационный коллектор в г.Рузаевка» №0109300012618000001-0106397-03 от 19.02.2018, 78650 руб. 02 коп. неустойки за нарушение срока оплаты, 4000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, 189900 руб. за увеличение объема работ и понесенные дополнительные затраты, понесенные судебные и почтовые расходы (с учетом уточнения иска, заявленного истцом в порядке, предусмотренном статьями 49, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и принятого судом). 

Определением от 16.01.2019 суд, руководствуясь частью 1 статьи 51 АПК РФ, привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца - открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») в лице филиала Куйбышевской железной дороги, общество с ограниченной ответственностью «Саранскгражданпроект» (далее – ООО «Саранскгражданпроект») и общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сити» (далее – ООО «Проект-Сити», третьи лица).

Истец уточненные исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик, исковые требования в части взыскания 946378 руб. образовавшейся задолженности признает, в остальной части заявленных исковых требований просит отказать.

Привлеченные третьи лица (ООО «Саранскгражданпроект» и ООО «Проект-Сити») поддержали доводы истца. 

ОАО «РЖД», надлежащим образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, отзыв не представило (статья 156 АПК РФ).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 19.02.2018 между сторонами спора заключен муниципальный контракт №0109300012618000001-0106397-03, по условиям пункта 1.1 которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить разработку ПСД по объекту «Канализационный коллектор в г.Рузаевка» в объеме, согласно приложению №1 к контракту (техническое задание), а заказчик - принять (раздел 4 контракта) и оплатить результат работ в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) (пункт 2.5). 

Стоимость работ (пункт 2.1) установлена в сумме 1899900 руб., цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1, ч.1.1 статьи 95 Закона о контрактной системе (пункт 2.4), срок выполнения работ определен с даты подписания контракта в течение 45 календарных дней (пункт 3.1). 

В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 7.1). Пунктом 7.12 предусмотрена ответственность заказчика за каждый факт неисполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно). 

В Техническом задании заказчик, в перечне исходных данных, обязался предоставил подрядчику в том числе и акт выбора места укладки коллектора по станции Рузаевка (пункт 12), при этом подрядчик своими силами и в отведенный срок обязался согласовать проектные решения по пересечению ж/д путей с филиалом ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога, стоимость согласования с филиалом «РЖД» оплачивается заказчиком. После оплаты филиал «РЖД» выдает заказчику письменное согласование проекта с перечнем требований по организации строительно-монтажных работ (пункт 26).

Согласно Техническому заданию и исходным данным, предоставленным заказчиком подрядчику, пересечение полотна железной дороги было предусмотрено на 617 км. ПК 9+40 м, 2 км. ПК 1+70 м. Куйбышевской железной дороги. 

Как указал истец, в рамках исполнения условий, предусмотренных спорным контрактом, ООО «Саранскгражданпроект», с которыми у подрядчика сложились договорные отношения (договор №6/18-ПР на разработку проектной документации по объекту «Канализационный коллектор» в г.Рузаевка от 19.02.2018) фактически выполнило проектные работы согласно исходным данным, предоставленным заказчиком (617 км. ПК 9+40 м, 2 км. ПК 1+70 м.) и, дополнительно выполнило проектные работы на другом участке: 617 км. ПК 9+50 м, 2 км. ПК 0+77, ввиду того, что ОАО «РЖД» отказало в согласовании вышеуказанных ординат пересечения полотна железной дороги в связи с нахождением там отстойника для вагонов. Стоимость дополнительного объема выполненных ООО «Саранскгражданпроект» проектных работ в рамках спорного контракта составила 359702 руб. (смета на дополнительный объем проектных работ).

Стоимость согласования с ОАО «РЖД» проектного решения (документации) (пункт 26 технического задания к спорному контракту) составила 62878 руб. 73 коп., но в нарушение условий контракта заказчиком не произведена.

 Согласно пункту 4.8 контракта подрядчик передает заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки работ и по накладной комплект проектной документации в 4-ти экз. на бумажном носителе и в 1-х экз. на электронном носителе со сводной ведомостью потребных ресурсов и сводной ведомостью объемов работ в формате WORD. В пункте 4.9 контракта стороны предусмотрели, что заказчик в течение 10 рабочих дней принимает, проверяет и в случае мотивированного отказа составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, при этом приемка выполненных работ производится по акту сдачи-приемки, который подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 10 календарных дней (пункт 4.10). 

АО "Валенс" по накладной №35/18 от 26.05.2018 передало Администрации разработанную ПСД по объекту «Канализационный коллектор в г.Рузаевка».

Администрация, во исполнение условий контракта (пункт 4.11), заключила 14.08.2018 с ГАУ «Госэкспертиза Республики Мордовия» муниципальный контракт №442/18 на оказание услуги по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство спорного объекта. Учитывая, что авансовых платежей (пункт 6.3.4 контракта) от заказчика услуг в счет исполнения обязательств по названному контракту Администрацией произведено не было, исполнитель расторг данный контракт (соглашение от 01.11.2018).    

09.08.2018 истец направил в адрес Администрации для принятия и подписания акт сдачи – приемки работ от 08.08.2018 на сумму 1899900 руб. В  сопроводительном письме №252 от 08.08.2018 истец также указал на дополнительно проведенные проектные работы, вызванные непредвиденными затратами на корректировку проектных работ. 

12.10.2018 АО "Валенс" направило в адрес Администрации претензию с требованием об оплате выполненной по контракту работы и дополнительных объемов работ, а также неустойки. Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужила основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Администрацией произведена частичная оплата выполненных истцом работ на сумму 953522 руб. (платежное поручение №719467), что послужило истцу основанием для уточнения исковых требований.

Исследовав материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд находит иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению. 

Спорные правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о договоре подряда, а также Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ).

По муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их муниципальному заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы, оплатить их или обеспечить их оплату  (часть 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии со статьей 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В подтверждение факта выполнения спорных видов работ на сумму 1899900 руб. истцом в материалы дела представлен акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.08.2018, подписанный в одностороннем порядке, который был частично оплачен заказчиком на сумму 953522 руб. (платежное поручение №719467 от 27.12.2018).

Ответчиком, в свою очередь, в материалы дела представлена копия акта сдачи-приемки работ на сумму 1899900 руб., подписанная со стороны заказчика 27.12.2018. Ответчик в отзыве на заявленные требования и представитель в судебном заседании, факт выполнения подрядчиком ПСД по объекту «Канализационный коллектор в г.Рузаевка» не оспаривал, что послужило ответчику также основанием для направления проектной документации на проведение государственной экспертизы (муниципальный контракт №442/18 от 14.08.2018, впоследствии муниципальный контракт №929/18 от 29.12.2018).

В соответствии со статьями 702, 711, 758 ГК РФ, заказчик обязан оплатить принятые результаты работы. 

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Отсутствие таких возражений позволяет суду сделать вывод о том, что обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своих требований, считаются признанными ответчиком.

В качестве надлежащего доказательства сдачи заказчику выполненных работ, суд, в соответствии со статьями 753 ГК РФ, 68, 71, 75 АПК РФ при непредставлении ответчиком подлинника акта, подписанного со стороны заказчика 27.12.2018,  принимает акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.08.2018

Поскольку истец документально обосновал выполнение работ и наличие у ответчика задолженности на сумму 946378 руб., а ответчик доказательств оплаты не представил, заявленное требование истца, о взыскании с ответчика задолженности в размере 946378 руб. является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 766 ГК РФ во взаимосвязи с частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

 В соответствии с положениями подпункта б пункта 1 части 1статьи 95  Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом и при условии, что объем работ увеличивается по предложению заказчика, но не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на 10% цены контракта.

Данное условие также согласовано сторонами в рамках спорного контракта: цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1, ч. 1.1 статьи 95 Закона о контрактной системе (пункт 2.4).

Из материалов дела усматривается, что необходимость выполнения дополнительных объемов проектных работ на сумму 189990 руб. возникла вследствие некорректных исходных данных, предоставленных заказчиком, по указанию места пересечения полотна железной дороги, в частности, судом установлено, что согласно техническому заданию (приложение к муниципальному контракту), акту выбора места укладки коллектора по станции Рузаевка, предоставленных Администрацией, пересечение полотна железной дороги было предусмотрено - 617 км. ПК 9+40 м, 2 км. ПК 1+70 м. 

19.07.2018 между ОАО «РЖД» в лице Куйбышевской железной дороги и ООО «Проект-Сити» (исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг №2967121, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуг на согласование проектной документации по объекту «Канализационный коллектор в г.Рузаевка» в части пересечения железнодорожного полотна канализационным коллектором на станции Рузаевка, с указанием одного из содержания услуг – выбор места расположения новой или реконструируемой вне существующей защитной трубы (канала, тоннеля) инженерной коммуникации в полосе отвода железной дороги, в том числе её пересечения с железнодорожной линией (пункт 6 технического задания).

ООО «Саранскгражданпроект», с которыми у истца сложились договорные отношения, что следует из договора №6/18-ПР на разработку проектной документации по объекту «Канализационный коллектор» в г.Рузаевка от 19.02.2018, фактически выполнило проектные работы согласно исходных данных, предоставленных заказчиком (617 км. ПК 9+40 м, 2 км. ПК 1+70 м.) и, дополнительно выполнило проектные работы на участке: 617 км. ПК 9+50 м, 2 км. ПК 0+77, что являлось обязательным для исполнения подрядчиком обязательств по контракту по разработке ПСД, фактического использования проекта для прокладки канализационного коллектора.

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, предусмотренным статьей 71 АПК РФ, в том числе, договор возмездного оказания услуг №2967121 от 19.07.2018, письмо №103 от 01.06.2018 ООО «Проект-Сити» с просьбой ОАО «РЖД» откорректировать ординаты пересечения полотна железной дороги, договор №6/18-ПР от 19.02.2018, с приложением сметы на дополнительный объем проектных работ, принимая во внимание пояснения истца и привлеченных третьих лиц о необходимости выполнения дополнительного объема работ, суд приходит к выводу о том, что выполнение вышеуказанных работ направлено на достижение цели, предусмотренной контрактом, а именно на выполнение разработки ПСД по объекту «Канализационный коллектор в г.Рузаевка» в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СНиП, техническими требованиями и иными нормативными документами.

Аналогичный правовой подход изложен в пункте 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика 189900 руб. за увеличение объема работ, составляющих 10% цены контракта, подлежит удовлетворению.

Немотивированная ссылки ответчика на невозможность изменения цены контракта подлежат отклонению на основании вышеизложенного, а также с учетом того, что стоимость дополнительных объемов работ не выходит за пределы 10% от цены контракта. Доказательства обратного в материалы дела не представлены (статья 65 АПК РФ).

Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В пункте 1 статьи 330 ГК РФ указано, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 7.1 контракта).

В силу части 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 АПК РФ).

Поскольку факт нарушения ответчиком своей обязанности по своевременной оплате выполненных по контракту работ установлен, то исходя из названных правовых норм и условий контракта требование истца о возложении на ответчика ответственности за нарушение обязательства по своевременной оплате является обоснованным.

Истец начислил ответчику неустойку, рассчитанную по правилам статьи 395 ГК РФ, размер которой согласно представленному расчету составил 78650 руб. 02 коп., начисленной с суммы задолженности (1899900 руб.) за период с 26.06.2018 по 16.01.2019.

Суд, проверив расчет заявленной неустойки, установил его не верное исчисление, без учета установленных по делу обстоятельств и условий спорного контракта (акт сдачи-приемки выполненных работ от 08.08.2018, направлен ответчику 09.08.2018 для согласования, срок его рассмотрения (принятия/не принятия) заказчиком, согласно условиям контракта установлен 10-ти дневный (пункт 4.9) и 15-ти дневный срок (пункт 2.5) для его подписания), в связи с чем, суд принимает для расчета и начисления неустойки период с 08.09.2018 по 16.01.2019 с суммы задолженности (1899900х7,75/300х111; 946378х7,75/300х20), сумма неустойки составляет 59369 руб. 25 коп. В остальной части требования истца о взыскании с ответчика неустойки подлежат отклонению.

В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. 

Таких доказательств ответчиком не представлено (статьи 9, 65 АПК РФ).

Рассматривая требование о взыскании штрафа в размере 4000 руб., суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 7.12 контракта за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (1000 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно).

Как следует из заявленных исковых требований, в данном случае требование об уплате штрафа в сумме 4000 руб. предъявлено за предоставление ответчиком не соответствующих исходных данных фактическим в техническом задании на проектирование; не проведение государственной экспертизы выполненных подрядчиком работ; отсутствие оплаты на проведение государственной экспертизы выполненных подрядчиком работ и не подписание ответчиком в установленный условиями контракта (10 дней) срок акта приема-передачи выполненных работ либо направления в указанный срок замечаний по выполненным работам.

При рассмотрении данного требования суд пришел к выводу, что истцом немотивированно в расчет для начисления штрафа в сумме 2000 руб. (1000 руб.+1000 руб.) включены как самостоятельные нарушения, допущенные ответчиком - не проведение государственной экспертизы выполненных подрядчиком работ, отсутствие оплаты на проведение государственной экспертизы выполненных подрядчиком работ, с учетом условий контракта (пункт 4.7) данные нарушения являются производными и составляют 1000 руб., в остальной части (1000 руб.) требования подлежат отклонению.

С учетом изложенного выше, суд признает обоснованным и доказанным ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. С ответчика подлежат взысканию задолженность в сумме 946378 руб., дополнительные затраты в сумме 189900 руб., неустойка в сумме 59369 руб. 25 коп и 3000 руб. штраф. 

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании 1011  руб. 18 коп. почтовых расходов в связи с почтовой отправкой корреспонденции  в рамках рассматриваемого спора, в том числе, искового заявления, запросов и дополнительных документов. В доказательство оплаты почтовых расходов истцом представлены соответствующие квитанции на заявленную сумму.      

Учитывая изложенное, в  соответствии с положениями статьей 101, 110 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных истцом требований о взыскании судебных расходов, связанных с направлением почтовой корреспонденции, на сумму 1011 руб. 18 коп. 

Расходы по уплате истцом 33708 руб. государственной пошлины (платежное поручение №675 от 25.10.2018) в соответствии со статьей 110 (часть 1) АПК РФ распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований: на ответчика относятся 24770 руб., которые подлежат возмещению истцу, при этом государственная пошлина в размере 8519 руб. подлежит возвращению истцу из федерального бюджета, как излишне оплаченная (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации).  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с Администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Республика Мордовия г.Рузаевка, зарегистрирована в качестве юридического лица 27.01.2006) в пользу акционерного общества "Валенс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Санкт-Петербург, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.04.2008) задолженность в сумме 946378 рублей, неустойку в сумме 59369 рублей 25 копеек, штраф в сумме 3000 рублей, дополнительные затраты в сумме 189900 рублей, судебные расходы по оплате почтовых расходов в сумме 1011 рублей 18 копеек и государственной пошлины в размере 24770 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить акционерному обществу "Валенс" (ИНН 

<

***>, г.Санкт-Петербург) из федерального бюджета 8519 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №675 от 25.10.2018. Справку на возврат госпошлины выдать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

СудьяТ.Л. Никишина