АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А17-6147/2022

г. Иваново

07 августа 2024 года

Резолютивная часть решения принята 07 августа 2024 года.

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Ерохиной Я.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Муравьевой Я.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя ФИО1 

(ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об урегулировании разногласий по договорам технологического присоединения,

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Армада», 

при участии в судебном заседании:

представителей истца ФИО2  (доверенность от 04.05.2024), ФИО3 (доверенность от 11.02.2021),

представителей ответчика ФИО4 (доверенность от 18.10.2022), ФИО5 (доверенность от  28.05.2024),

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, Предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (далее – ответчик, Общество) об обязании выполнить в отношении энергопринимающих устройств, указанных в заявлениях № № 4159106, 4159216, 4159416, 4159451, 4159340 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирных домов по адресу 

<

...>, планируемых к строительству на пяти земельных участках с кадастровыми номерами 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также об обязании заключить договор (договоры) о технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающих устройств, указанных в заявлениях № № 4159106, 4159216, 4159416, 4159451, 4159340 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств многоквартирных домов по адресу 

<

...>, планируемых к строительству на пяти земельных участках с кадастровыми номерами 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447.

Определением суда от 29.08.2023 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание. Протокольным определением от 23.03.2023 дело в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ назначено к судебному разбирательству.

Определением от 16.11.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО Специализированный застройщик «Армада» (далее – третье лицо).

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования, окончательно сформулировав их в ходатайстве от 14.05.2024, просил урегулировать разногласия между истцом и ответчиком по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническим условиям в отношении каждого из пяти объектов на основании поданных 18.03.2022 заявок №№4159451, 4159416, 4159216, 4159340, 4159106, изложив условия договоров в редакции истца (редакция приведена истцом). В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ указанное уточнение исковых требований принято судом, рассмотрение дела продолжено исходя из уточненных требований. 

Ответчик в отзывах от 23.09.2022, 05.12.2022, 07.02.2023, 13.06.2023, 10.11.2023, 11.01.2024, 09.02.2024, 08.05.2024, 27.05.2024, объяснениях от 05.08.2024, возражениях от 07.08.2024 указал, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку закон не предусматривает необходимости осуществления технологического присоединения ранее подключенного объекта; истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку оферты договоров не направлялись истцом в адрес ответчика. Со стороны истца не представлялись документы о планируемом создании пяти энергопринимающих устройств, что является злоупотреблением правом. С заявками в отношении вновь сформированных земельных участков №37:24:030101:456 (зарегистрирован 19.05.2022), №37:24:030101:458 (зарегистрирован 20.05.2022), №37:24:030101:464 (зарегистрирован 23.05.2022), №37:24:030101:490 (зарегистрирован 01.11.2023), №37:24:030101:493 (зарегистрирован 22.03.2023), истец не обращался. В адрес сетевой компании направлялись заявки в отношении энергопринимающих устройств, расположенных на земельных участках №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447.

В ходе рассмотрения дела ответчик представил свою редакцию пяти договоров и технических условий (приложены к отзыву №9 от 27.05.2024).

Судебное разбирательство по делу неоднократно откладывалось. 

Протокольным определением от 05.08.2024 в судебном заседании объявлен перерыв до 07.08.2024. Указанное протокольное определение размещено на официальном сайте суда в сети Интернет. 

В продолженном после объявленного перерыва судебном заседании 07.08.2024 представители истца и ответчика поддержали, соответственно, требования и возражения по спору.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о дате и времени судебного заседания, явку представителя в судебное заседание 07.08.2024 не обеспечило, заявлений, ходатайств, отзыва не поступило.

Дело в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассмотрено в отсутствии третьего лица.  

Заслушав в ходе рассмотрения дела представителей сторон, ознакомившись с представленными в материалы дела документами, арбитражный суд установил следующее.

Общество является сетевой организацией.

Предприниматель согласно представленным в материалы дела выпискам из Единого государственного реестра недвижимости являлся собственником земельных участков с кадастровыми номерами №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447.  

18.03.2022 Предприниматель обратилась в Общество с пятью заявками на присоединение энергопринимающих устройств в отношении многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: 

<

...>, на земельных участках №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447; присоединяемая мощность 149 кВт, напряжение 0,4 кВ, 2 категория надежности. Заявкам Обществом присвоены номера 4159451, 4159416, 4159216, 4159340, 4159106.

В ответ на заявки Общество письмом от 20.04.2022 №ИвЭ/05-20/626 указало, что на земельном участке №37:24:030101:324 имеется ТП-122, находящаяся на балансе ФИО1 Земельный участки №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447 образованы путем деления участка №37:24:030101:324, из чего следует, что энергопринимающие устройства на земельных участках №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447 также имеют технологическое присоединение к электрическим сетям. Технологическое присоединение носит однократный характер. Заявителю предложено осуществить технологическое присоединение многоквартирных домов от ТП-122.

Полагая, что ответчик уклоняется от заключения договоров на технологическое присоединение, истец обратился за судебной защитой в Арбитражный суд Ивановской области с уточненным требованием об урегулировании разногласий по договорам технологического присоединения.

Оценив вышеизложенные обстоятельства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.

В силу положений пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

Согласно пунктам 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В пункте 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно пункту 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.); лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Согласно статьям 12, 421, 445 Гражданского кодекса РФ в отношении договора, подлежащего в соответствии с ГК РФ или иными законами обязательному заключению, права и интересы одного из контрагентов могут быть защищены посредством урегулирования разногласий по договору или понуждения к заключению договора в судебном порядке.

Согласно пунктам 1, 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта.

Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (пункт 1 статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Общество включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется регулирование и контроль, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» 27.06.2008 №236-э под регистрационным номером 52.1.258 (с изменениями от 10.12.2015 №1231/5).

Как следует из пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются общими положениями о договоре (главы 27 и 39 ГК РФ), а также специальными нормами, регулирующими правоотношения в сфере электроэнергетики, в том числе Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее - Правила №861, Правила технологического присоединения).

В соответствии с пунктом 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Договор технологического присоединения является обязательным (публичным) для ответчика, являющегося сетевой организацией.

Пунктом 4 Правил технологического присоединения предусмотрено, что любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

В пункте 7 Правил №861 установлена следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки на технологическое присоединение; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Пунктом 15 Правил технологического присоединения предусмотрено, что в адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).

Поступившие в адрес ответчика от Предпринимателя заявки полностью соответствуют Правилам №861, заявителем заполнены и указаны все необходимые технические данные.

При этом, сетевой организацией не осуществлены действия по направлению истцу проектов договоров в соответствие с Правилами №861 для подписания.

Разногласия сторон при заключении договоров о технологическом присоединении сводятся к вопросу о необходимости технологического присоединения в отношении каждого из земельных участков, выделенных из одного земельного участка 37:24:030101:324, в пределах которого расположена ТП-122, а также к размеру платы за технологическое присоединение (пункт 10 договоров).

При рассмотрении настоящих требований суд исходил из того, что согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П отмечается, что преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее.

В рамках дела № А17-6671/2022 Арбитражным судом Ивановской области рассмотрено дело, возбужденное по  заявлению публичного акционерного общества «Россети центр и Приволжье» филиал «Ивэнерго» к  Управлению  Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области о признании незаконным и отмене постановления Управления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 037/04/9.21-206/2022 от 06.07.2022, представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 06.07.2022, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет иска (потерпевшая) – индивидуальный предприниматель ФИО1. Решение от 29.11.2022 по делу №А17-6671/2022 вступило в законную силу.

Отдельные подлежащие доказыванию обстоятельства рассматриваемого спора установлены указанным решением, а именно установлено, что: 

- земельные участки 37:24:030101:443, 37:24:030101:447, 37:24:030101:446 образованы из земельного участка с кадастровым номером 37:24:030101:439 путем его раздела; земельные участки 37:24:030101:449, 37:24:030101:448 образованы из земельного участка 37:24:030101:444 путем его раздела.

- ТП-122 расположена на земельном участке с кадастровым номером 37:24:030101:450.

- В выписке из ЕГРН по земельному участку 37:24:030101:450 указано, что в пределах земельного участка расположен объект недвижимости 37:24:030101:104.

- Согласно кадастровому номеру (37:24:030101:104) под ним зарегистрировано нежилое здание - трансформаторная подстанция (ТП-122), расположенная по адресу: 

<

...>.

- ТП-122, имеющая технологическое присоединение, расположена на ином земельном участке, а не в пределах вновь образованных земельных участков, в отношении присоединения энергопринимающих устройств которых обратился Заявитель в Сетевую организацию.

- Сетевой организацией не представлено доказательств наличия энергопринимающих устройств, в отношении которых ранее осуществлено технологическое присоединение, расположенных в пределах земельных участков с кадастровыми номерами  37:24:030101:443, 37:24:030101:447, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:448.

Следовательно, обстоятельства, установленные по делу № А17-6671/2022, в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для настоящего спора и не требуют повторного исследования и доказывания, сложившейся спорной ситуации дана правовая оценка.

Таким образом, довод  Общества о наличии технологического присоединения у каждого из земельных участков, выделенных из одного земельного участка, в пределах которого имелись энергопринимающие устройства, технологически присоединенные к сетям сетевой организации, без относительно установления факта расположения таких ранее присоединенных энергопринимающих устройств в границах вновь образованных участков, является неверным и не соответствует положениям части  1 статьи  26 Закона № 35-ФЗ.

В данном случае, говорить о принципе однократности технологического присоединения возможно только в отношении земельного участка, на котором расположены ранее присоединенные энергопринимающие устройства.

  При разделе земельного участка  в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации на два и более земельных участков с присваиванием новых  кадастровых номеров и расположением энергопринимающего устройства  в границах одного земельного участка, владелец, земельного участка, образовавшегося  в результате межевания, не имеющего в своих границах подключенных к электрическим сетям энергопринимающих устройств, вправе обратиться с заявкой на осуществление технологического присоединения вновь присоединяемого энергопринимающего устройства в ближайшую сетевую организацию.

Следовательно, у ответчика отсутствовали основания для отказа Предпринимателю в заключение договоров технологического присоединения по причине однократности технологического присоединения.

  То обстоятельство, что некогда имелся единый земельный участок скадастровым номером 37:24:030101:324, в пределах которого расположена ТП-122,учитывая его снятие с кадастрового учета, а также выделение из него иных земельных участков, в том числе земельного участка 37:24:030101:450, на котором в настоящее время расположена ТП-122, то говорить о принципе однократности технологического присоединения возможно в отношении данного земельного участка. При этом данное обстоятельство не является подтверждением наличия состоявшегося технологического присоединения в пределах границ земельных участков с кадастровыми номерами №37:24:030101:456, №37:24:030101:458, №37:24:030101:464, №37:24:030101:490, №37:24:030101:493.

Истец предложил изложить пункт 10 договоров в следующей редакции:

Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22 рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителю

= 14 091,09 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб.

Ответчик размер платы за технологическое присоединение определил в размере 207668147,38 руб., 205166080,76 руб., 204986509,37 руб., 208072183,01 руб., 204941616,52 руб., полагая, что в стоимости мероприятий по технологическому присоединению должны быть учтены расходы на строительство кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией, строительство кабельной линии, прокладываемой путем горизонтального бурения, строительство кабельной линии в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией, строительство двухтрансформаторной подстанции.

В рассматриваемом случае по пункту 10 договоров суд соглашается с позицией истца в силу следующего.

Из пункта 1 статьи 422, пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что договор должен соответствовать императивным нормам, действующим в момент его заключения. В предусмотренных законом случаях исполнение договора оплачивается по тарифам, устанавливаемым уполномоченными на то государственными органами. 

В силу пункта 17 Правил № 861 размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Согласно ч. 2 ст. 23.2 Закона №35-Ф3 размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Правилами № 861 предусмотрено, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии). огласно подпункту «б» пункта 25 и подпункту «б» пункта 25.1 Правил № 861, сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей. 

Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С 1 июля 2022 года положения абзаца шестого настоящего пункта не применяются при определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт (с учетом мощности  ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций, а также в случае технологического присоединения генерирующих объектов    к    объектам    электросетевого    хозяйства    территориальных сетевых организаций.

Согласно части 2 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике (в редакциях, действовавших до 01.07.2022) с 01.10.2017 в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства, - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не учитываемые с 1 октября 2015 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии,

Из пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (в редакции, действовавшей до 01,07.2022), следует, что в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов эдектросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Учитывая данные требования законодательства, а также дату подачи заявок Предпринимателем на осуществление технологического присоединения (18.03.2022), при определении размера платы технологического присоединения включение расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, является необоснованным.

В соответствии с абзацем 12 ч. 2 ст. 23.2 Закона об электроэнергетике, состав расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Пунктом 28 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (действовавшим до 01.09.2022), предусмотрено, что для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки С2-С7 равны 0.

Таким образом, пункт 10 договоров подлежит принятию в редакции истца, по остальным пунктам договоров у сторон разногласий не имеется, следовательно, они также подлежат принятию в редакции истца.

Довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора отклоняется судом в силу следующего.

Действительно, в адрес сетевой организации Предпринимателем не направлялись оферты договоров, однако в силу положений Правил №861 именно на сетевую организацию, как на профессионального участника рынка электроэнергии, возложена обязанность направить для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору. Предприниматель же, не являясь профессиональным участником рынка электрической энергии, лишен возможности определять мероприятия по технологическому присоединению, а также сроки осуществления мероприятий и размер платы за технологическое присоединение, поскольку не обладает сведениями относительно того, какие действия должна совершить сетевая организация для осуществления процедуры технологического присоединения.

В данном случае предметом спора явился отказ Общества в принятии поданных истцом заявок и не направление в адрес Предпринимателя заполненных и подписанных Обществом проектов договоров в двух экземплярах с приложением технических условий.

Обращение истца в суд с настоящим иском при отсутствии у него возможности разработать и представить проекты договоров технологического присоединения фактически направлено на понуждение ответчика, неправомерно отклонившего заявки Предпринимателя, исполнить предусмотренную пунктом 15 Правил №861 обязанность по направлению заполненного и подписанного проекта договора.

Предприниматель обращалась в сетевую организацию с заявками в отношении энергопринимающих устройств, расположенных на земельных участках №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443 и 37:24:030101:447. 

В дальнейшем, как следует из материалов дела, в результате раздела земельного участка 37:24:030101:448 сформирован участок №37:24:030101:460, путем перераспределения которого образован земельный участок №37:24:030101:493. В результате перераспределения земельного участка 37:24:030101:446 сформирован участок №37:24:030101:464. В результате раздела земельного участка 37:24:030101:447 сформирован участок №37:24:030101:463, путем перераспределения которого образован земельный участок №37:24:030101:490. В результате перераспределения земельного участка 37:24:030101:449 сформирован участок №37:24:030101:458. В результате перераспределения земельного участка 37:24:030101:443 сформирован участок №37:24:030101:456.

С заявками в отношении вновь сформированных земельных участков №37:24:030101:456 (зарегистрирован 19.05.2022), №37:24:030101:458 (зарегистрирован 20.05.2022), №37:24:030101:464 (зарегистрирован 23.05.2022), №37:24:030101:490 (зарегистрирован 01.11.2023), №37:24:030101:493 (зарегистрирован 22.03.2023), истец к ответчику не обращался. 

Однако, поскольку в установленный Правилами №861 срок ответчик не направил истцу проекты договоров в отношении земельных участков №№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443, 37:24:030101:447, а земельные участки №№37:24:030101:456, 37:24:030101:458, 37:24:030101:464, 37:24:030101:490, 37:24:030101:493 сформированы из первоначальных земельных участков (№№ 37:24:030101:448, 37:24:030101:446, 37:24:030101:449, 37:24:030101:443, 37:24:030101:447) по истечении срока для направления таких договоров, суд не усматривает необходимости для обращения Предпринимателя к ответчику с новыми заявками, поскольку данная ситуация возникла по вине самого Общества, нарушившего обязанность по своевременному направлению истцу проектов договоров по заявкам №№ 4159106, 4159216, 4159416, 4159451, 4159340.    

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 11657/11, реализация права стороны, управомоченной требовать заключения договора в судебном порядке, не может зависеть от формы уклонения обязанной стороны от его заключения на предложенных условиях (отказ от подписания договора, подписание его в суде с протоколом разногласий, утрата протокола разногласий при пересылке, или подписание неуполномоченным лицом и т.п.). Поскольку заключение договора является обязательным, обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора.

Согласно статье 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по спору, возникшему при заключении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении к заключению договора указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор.

При очевидном наличии последовательной позиции ответчика в отказе заявителю от заключения публичного договора, как в досудебном порядке, так и в процессе рассмотрения настоящего дела, требование истца должно быть рассмотрено и разрешено судом по существу.

Следовательно, разрешение судом спора о понуждении к заключению договора и при уклонении от заключения договора, и при возникновении разногласий по конкретным его условиям сводится по существу к внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49, при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом, дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

Вопреки доводам ответчика, злоупотребления правом со стороны истца судом не установлено. 

В силу пунктов 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны  действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд не усматривает злоупотребления правами со стороны истца, наличия умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав; реализация лицом права на защиту своего нарушенного права способами, предусмотренными законом, не может рассматриваться как злоупотребление правом.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 30000 руб. за рассмотрение иска подлежат отнесению на ответчика.

Излишне оплаченная истцом государственная пошлина в сумме 30000 руб. подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Урегулировать разногласия, возникшие между публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Принять  договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в следующей редакции:

ДОГОВОР № 371024691

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Иваново                                                                         «        »      2024 г.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.           Сетевая   организация  Публичное   акционерное   общество   «Россети   Центр   и   Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;

категория надежности II (вторая);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).

2.           Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:456.

3.  Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4.  Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5.           Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.           Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации

7.  Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.  Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.           Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10.         Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22 рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителю

= 14 091,09 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб.

11.         Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям":

а)           15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения;

б)           30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в)           35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

г)           20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

12.         Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13.         Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14.         Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15.         Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.         Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.         Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20.         Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.                  Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

Филиал «Ивэнерго»

Адрес: 153000, РФ, 

<

...>.

Заявитель:

ИП ФИО1

ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>

ПОДПИСИ СТОРОН

Сетевая организация:                                     Заявитель:

директор филиала_________ФИО6                   ___________Г.В. ФИО1

 

Приложение 1к договору № 371024691 от ______ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго»)

№ 102-36/58/371024691                                                                      "      "                       20          г.

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго». 

Заявитель: ИП ФИО1.

1.           Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки.

2.      Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:456.

3.      Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 149 кВт.

3.1.  Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

3.2.  Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.

4.           Категория надежности II (вторая).

5.           Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г.

7.  Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по точкам присоединения:

7.1.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

7.2.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

8.  Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).

9.  Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).

10. Обязательства Сетевой организации:

10.1.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

-   прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1440 м.;

-   прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 2500 м.

10.2.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3370 м.;

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 7640 м.

10.3.  Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.

10.4.  В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.

10.5.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 170 м.

10.6.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 170 м.

10.7.  Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

10.8.  По техническим условиям выполнить проект.

10.9.  Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.

11. Обязательства Заявителя:

11.1.  Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой организацией до данного ВРУ-0,4.

11.2.  В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам и по точкам присоединения.

11.3.  Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в соответствии с ПУЭ и ППРФ №442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 для установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.

11.4.  Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.

11.5.  При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.

11.6.  Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.

11.7.  При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.8.  Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного напряжения выше допустимого.

11.9.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.10.    Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий,   исключающих   возможность   отклонения   нормируемых   показателей   качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.11.   После выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для проведения осмотра электроустановок Заявителя.

11.12.   Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном законодательством порядке.

12.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1.  Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

12.2.  На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

12.3.  После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.

12.4.  Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала.

13.         Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор филиала «Ивэнерго»                              ФИО6

 

 

 

ДОГОВОР № 371024689

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Иваново                                                                                           «        »  2024 г.

I.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.           Сетевая   организация  Публичное   акционерное   общество   «Россети   Центр   и   Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;

категория надежности II (вторая);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).

2.           Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:458.

3.  Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4.  Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5.           Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.           Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.           Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10.         Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22 рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителю

= 14 091,09 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб.

11.         Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям":

а)           15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения;

б)           30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в)           35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

г)           20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

12.         Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13.         Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14.         Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15.         Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.         Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.         Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20.         Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

Филиал «Ивэнерго»

Адрес: 153000, РФ, 

<

...>.

Заявитель:

ИП ФИО1

ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>

ПОДПИСИ СТОРОН

Сетевая организация:                                     Заявитель:

директор филиала_________ФИО6                   ___________Г.В. ФИО1

 

Приложение 1к договору № 371024689 от _______

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго »)

№ 102-36/58/371024689                                                                      "      "                       20          г.

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго». 

Заявитель: ИП ФИО1.

1.           Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки.

2.      Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:458.

3.      Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 149 кВт.

3.1.  Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

3.2.  Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.

4.           Категория надежности II (вторая).

5.           Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г.

7.  Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по точкам присоединения:

7.1.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

7.2.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ- 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

8.  Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).

9.  Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).

10. Обязательства Сетевой организации:

10.1.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

-   прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1290 м.;

-   прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 2500 м.

10.2.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3020 м.;

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 7640 м.

10.3.  Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.

10.4.  В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.

10.5.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 250 м.

10.6.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 250 м.

10.7.  Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

10.8.  По техническим условиям выполнить проект.

10.9.  Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.

11. Обязательства Заявителя:

11.1.  Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой организацией до данного ВРУ-0,4.

11.2.  В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам и по точкам присоединения.

11.3.  Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в соответствии с ПУЭ и ППРФ №442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 для установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.

11.4.  Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.

11.5.  При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.

11.6.  Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.

11.7.  При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.8.  Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного напряжения выше допустимого.

11.9.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.10.    Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий,   исключающих   возможность   отклонения   нормируемых   показателей   качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.11.   После выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для проведения осмотра электроустановок Заявителя.

11.12.   Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном законодательством порядке.

12.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1.  Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

12.2.  На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

12.3.  После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.

12.4.  Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала.

13.         Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор филиала «Ивэнерго»                              ФИО6

 

 

ДОГОВОР № 371024692

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Иваново                                                                                           «        »   2024 г.

I.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.           Сетевая   организация  Публичное   акционерное   общество   «Россети   Центр   и   Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;

категория надежности II (вторая);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).

2.           Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:464.

3.  Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4.  Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5.           Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.           Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.           Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10.         Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22 рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителю

= 14 091,09 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб.

11.         Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям":

а)           15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения;

б)           30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в)           35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

г)           20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

12.         Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13.         Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14.         Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15.         Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.         Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.         Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20.         Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

Филиал «Ивэнерго»

Адрес: 153000, РФ, 

<

...>.

Заявитель:

ИП ФИО1

ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>

ПОДПИСИ СТОРОН

Сетевая организация:                                     Заявитель:

директор филиала_________ФИО6                   ___________Г.В. ФИО1

 

Приложение 1к договору № 371024692 от ________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго »)

№ 102-36/58/371024692                                                                     "      "     ________ 20_____ г.

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго». 

Заявитель: ИП ФИО1.

1.           Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки.

2.      Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:464.

3.      Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 149 кВт.

3.1.  Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

3.2.  Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.

4.           Категория надежности II (вторая).

5.           Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г.

7.  Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по точкам присоединения:

7.1.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

7.2.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

8.  Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).

9.  Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).

10. Обязательства Сетевой организации:

10.1.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

-   прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1290 м.;

-   прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 2500 м.

10.2.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3020 м.;

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 7640 м.

10.3.  Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.

10.4.  В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.

10.5.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 210 м.

10.6.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 210 м.

10.7.  Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

10.8.  По техническим условиям выполнить проект.

10.9.  Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.

11. Обязательства Заявителя:

11.1.  Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой организацией до данного ВРУ-0,4.

11.2.  В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам и по точкам присоединения.

11.3.  Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в соответствии с ПУЭ и ППРФ №442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 для установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.

11.4.  Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.

11.5.  При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.

11.6.  Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.

11.7.  При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.8.  Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного напряжения выше допустимого.

11.9.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.10.    Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий,   исключающих   возможность   отклонения   нормируемых   показателей   качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.11.   После выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для проведения осмотра электроустановок Заявителя.

11.12.   Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном законодательством порядке.

12.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1.  Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

12.2.  На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

12.3.  После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.

12.4.  Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала.

13.         Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор филиала «Ивэнерго»                              ФИО6

 

 

ДОГОВОР № 371024687

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Иваново                                                                                           «        »                     2024 г.

I.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.           Сетевая  организация  Публичное   акционерное   общество   «Россети   Центр   и   Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО6, действующего на основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;

категория надежности II (вторая);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).

2.           Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:490.

3.  Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4.  Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5.           Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.           Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.           Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10.         Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22 рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителю

= 14 091,09 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб.

11.         Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям":

а)           15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения;

б)           30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в)           35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

г)           20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

12.         Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13.         Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14.         Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15.         Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.         Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.         Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20.         Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

Филиал «Ивэнерго»

Адрес: 153000, РФ, 

<

...>.

Заявитель:

ИП ФИО1

ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>

ПОДПИСИ СТОРОН

Сетевая организация:                                     Заявитель:

директор филиала_________ФИО6                   ___________Г.В. ФИО1

 

Приложение 1к договору № 371024687 от _________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго »)

№ 102-36/58/371024687                                                                      "      " __________ 20_____ г.

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго». 

Заявитель: ИП ФИО1.

1.           Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки.

2.      Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:490.

3.      Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 149 кВт.

3.1.  Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

3.2.  Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.

4.           Категория надежности II (вторая).

5.           Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г.

7.  Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по точкам присоединения:

7.1.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ - 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

7.2.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

8.  Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).

9.  Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).

10. Обязательства Сетевой организации:

10.1.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

-   прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1440 м.;

-   прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 2500 м.

10.2.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3370 м.;

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 7640 м.

10.3.  Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.

10.4.  В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.

10.5.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 260 м.

10.6.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 260 м.

10.7.  Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

10.8.  По техническим условиям выполнить проект.

10.9.  Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.

11. Обязательства Заявителя:

11.1.  Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой организацией до данного ВРУ-0,4.

11.2.  В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам и по точкам присоединения.

11.3.  Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в соответствии с ПУЭ и ППРФ №442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 для установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.

11.4.  Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.

11.5.  При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.

11.6.  Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.

11.7.  При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.8.  Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного напряжения выше допустимого.

11.9.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.10.    Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий,   исключающих   возможность   отклонения   нормируемых   показателей   качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.11.   После выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для проведения осмотра электроустановок Заявителя.

11.12.   Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном законодательством порядке.

12.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1.  Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

12.2.  На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

12.3.  После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.

12.4.  Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала.

13.         Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор филиала «Ивэнерго»                              ФИО6

 

 

ДОГОВОР № 371024684

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Иваново                                                                                           «        »                     2024 г.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.           Сетевая   организация  Публичное   акционерное   общество   «Россети   Центр   и   Приволжье» (сокращенное наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН 

<

***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Ивэнерго» ФИО6, действующего на основании доверенности, принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) многоэтажной жилой застройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;

категория надежности II (вторая);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель ИП ФИО1, ОГРНИП 

<

***>, именуемая в дальнейшем заявителем, обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).

2.           Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:493.

3.  Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4.  Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5.           Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.           Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее 120 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.           Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10.         Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 14 091,09 рублей (четырнадцать тысяч девяносто один рубль 09 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 2 818,22 рублей, всего 16 909,31 рублей (шестнадцать тысяч девятьсот девять рублей 31 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+ 3 256,84 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителю

= 14 091,09 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС - 16 909,31 руб.

11.         Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а такжеобъектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям":

а)           15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона «О государственном оборонном заказе», - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения;

б)           30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в)           35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

г)           20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

12.         Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13.         Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14.         Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15.         Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.         Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.         Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20.         Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» 

Юридический адрес: 603950, РФ, 

<

...>

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

Филиал «Ивэнерго»

Адрес: 153000, РФ, 

<

...>.

Заявитель:

ИП ФИО1

ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>

ПОДПИСИ СТОРОН

Сетевая организация:                                     Заявитель:

директор филиала_________ФИО6                   ___________Г.В. ФИО1

 

Приложение 1к договору № 371024684 от ___________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - « Ивэнерго »)

№ 102-36/58/371024684                                                                      "      "      ________ 20

Сетевая организация: филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго». 

Заявитель: ИП ФИО1.

1.           Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ 0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки.

2.      Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) по адресу: 

<

...>, кадастровый номер земельного участка 37:24:030101:493.

3.      Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 149 кВт.

3.1.  Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

3.2.  Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 149 кВт.

4.           Категория надежности II (вторая).

5.           Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024г.

7.  Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по точкам присоединения:

7.1.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.1) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

7.2.      точка присоединения - вновь проложенная филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» КЛ-0,4 кВ (фид.2) от вновь построенной ТП от вновь построенного участка КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» до ВРУ – 0,4 кВ многоквартирного жилого дома -149 кВт.

8.  Основной источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-15» (ячейка фид.631 или 634).

9.  Резервный источник питания: вновь проектируемая ТП от вновь проложенной КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Ивановская-14» (ячейка фид.620).

10. Обязательства Сетевой организации:

10.1.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-15» с III секции шин (ячейка фид.631 или 634) до I секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

-   прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 1290 м.;

-   прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 2500 м.

10.2.      Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Ивановская-14» со II секции шин (ячейка фид.620) до II секции шин планируемой к строительству ТП, в том числе:

- прокладку кабельной линии в траншее многожильной с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 3020 м.;

- прокладку кабельной линии путем горизонтального наклонного бурения многожильный с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 7640 м.

10.3.  Для электроснабжения объекта максимально приближенно к земельному участку заявителя построить двухтрансформаторную и более подстанцию (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. Электрическую схему ТП и комплектацию оборудования определить на стадии проектирования.

10.4.  В ТП выполнить монтаж и наладку оборудования 6 и 0,4 кВ, установить два силовых трансформатора необходимой мощности напряжением 6/0,4кВ и предусмотреть заземляющие ножи с блокировкой на всех присоединениях и сборных шинах 6 кВ.

10.5.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП с I секции шин до ВРУ-0,4 кВ, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 200 м.

10.6.  Прокладку кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП со II секции шин до ВРУ-0,4, в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 200 м.

10.7.  Место строительства ТП и трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

10.8.  По техническим условиям выполнить проект.

10.9.  Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства.

11. Обязательства Заявителя:

11.1.  Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить от вновь построенной ТП по кабелям необходимого сечения с использованием кабельных линий 0,4 кВ, проложенных сетевой организацией до данного ВРУ-0,4.

11.2.  В ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам и по точкам присоединения.

11.3.  Выполнить монтаж приборов учета на границе балансового разграничения в соответствии с ПУЭ и ППРФ №442 от 04.05.2012 года с применением электронных счетчиков класса точности не менее 0,5S. Трансформаторы тока пломбируемые, класс точности 0,5S. В соответствии с пунктом 136 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 для установки прибора учета необходимо обратиться к гарантирующему поставщику.

11.4.  Выполнить защиту цепей учета от несанкционированного доступа с возможностью их пломбирования. Провод (кабель) от точки присоединения, а также от измерительных трансформаторов до приборов учета не должен иметь ответвлений, соединений, повреждений изоляции и должен быть доступен для визуального контрольного осмотра по всей длине.

11.5.  При необходимости, освещение дворовой территории выполнить от МОП жилого дома. Предусмотреть автоматическое включение и отключение освещения.

11.6.  Учет электроэнергии квартир выполнить в соответствии с ПУЭ с применением электронных счетчиков класса точности 2,0 и выше.

11.7.  При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.8.  Для однофазных токоприемников предусмотреть защиту от повышения фазного напряжения выше допустимого.

11.9.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.10.    Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий,   исключающих   возможность   отклонения   нормируемых   показателей   качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.11.   После выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством и обеспечить доступ представителей филиала «Ивэнерго» для проведения осмотра электроустановок Заявителя.

11.12.   Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном законодательством порядке.

12.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1.  Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

12.2.  На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

12.3.  После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.

12.4.  Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала.

13.         Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Директор филиала «Ивэнерго»                              ФИО6

 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 30000 руб. судебных расходов.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) 30000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 19.08.2022 №23.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

 

Судья                                                                                         Ерохина Я.Л.