АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

19 марта 2025 года

Дело № А33-1959/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 19.03.2025.

В полном объёме решение изготовлено 19.03.2025.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Городова Алексея Павловича (ИНН 246300266405, ОГРН 319246800051726)

к обществу с ограниченной ответственностью "КомСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании денежных средств,

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 02.03.2022, представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена паспортом;

в отсутствии ответчика;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лалетиной А.О., 

установил:

индивидуальный предприниматель Городов Алексей Павлович (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с уточненным иском к обществу с ограниченной ответственностью "КомСтрой" (далее – ответчик) о взыскании 2 142 016 руб. 60 коп. долга по договору подряда от 16.07.2024, штрафа за нарушение ответчиком сроков окончания работ по договору в размере 10 067 руб. 50 коп., расходов на оплату государственной пошлины в размере 89 563 рубля. Определением от 29.01.2025 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ИП ФИО1 и ООО «Комстрой» 16.07.2024 заключен договор подряда, согласно которому ответчик принял на себя обязательства произвести работы по строительству и монтажу одноэтажного магазина, а истец обязался принять результат работ и оплатить обусловленную договором цену. Объект по адресу: 

<

...> «а», стр. 1.

Цена заключенного договора составила 2 691 476 рублей, в том числе НДС 20 %.

В соответствии с подп. 3.2 договора оплата по договору производится в следующем порядке:

- оплата авансового платежа в размере 35 % от цены договора, что составляет 942 016 рублей 60 коп., в том числе НДС 20 % - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания договора;

- оплата оставшейся части в размере 65 % от цены договора, что составляет 1 749 459 рублей 40 коп., в том числе НДС 20 % - ежемесячно, исходя из фактически-выполненных объемов работ за месяц (за каждый отчетный период с 1 по 30/31 число месяца), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком без замечаний акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 (за каждый месяц).

В соответствии с п. 3.3 договора обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме, произведя ответчику оплату на сумму 2 142 016, 60 руб. (платежные поручения № 2929 от 12.07.2024г., № 3585 от 22.08.2024г., № 4341 от 10.10.2024г.).

В соответствии с подп. 4.1.1, 4.1.4 договора подрядчик обязался выполнить все работы, предусмотренные договором (Приложениями к договору) надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные договором (его Приложениями), и сдать заказчику результаты работ в порядке и сроки, установленные договором (п. 5.1 договора).

Пункт 2.2 договора предусматривал следующие сроки выполнения работ:

- начало: дата подписания договора («16» июля 2024г.);

- окончание: 53 (Пятьдесят три) рабочих дня с даты начала работ.

Согласно подп. 4.1.15 договора подрядчик обязался оформить предусмотренную законодательством, а также условиями договора (приложений к нему) исполнительную документацию на выполненные работы в объеме, составе и количестве, определенном законодательством РФ, договором, заказчиком.

Ответчик должен был выполнить работы по договору до 26.09.2024 (последний день выполнения работ), а также предоставить заказчику документы, подтверждающие выполнение работ по договору (исполнительную документацию).

Истец указал, что работы по договору ответчиком истцу сданы так и не были, как и не была предоставлена необходимая документация.

Претензией от 12.11.2024 (направлена 13.11.2024) истец обратился к ответчиком с требованием о выполнении работ либо о возврате денежных средств. 

В соответствии с п. 7.4 договора в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения (начала и окончания) работ заказчик имеет право удержать с подрядчика штраф в размере 0,01 % от оплаченной стоимости по договору за каждый день просрочки за каждое из указанных нарушений.

Размер пени за нарушение ответчиком сроков окончания работ по договору по состоянию на 12.11. 2024г. составил 10 067 рублей 50 коп., без НДС.

Расчет на 12.11.2024г.: Нарушенный срок выполнения Работ по Договору - 47 дней (с 27.09.2024г. по 30.09.2024г. - 4 дня; с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.-31 день, 12.11.2024г. - 12 дней). с 27.09.2024 по 12.11.2024 2142016,6 x 0,01% x 47 = 10067,48 руб. 

В соответствии с п. 8.2 договора в случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Срок рассмотрения претензии — 7 рабочих дней с момента получения претензии контрагентом. Претензия оставлена без удовлетворения, в связи с чем, истец обратился в суд.  

Ответчик требования не оспорил. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В силу части 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

В части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. 

В указанный срок подрядчиком обязательство по возврату аванса не исполнено. Доказательств обратного не представлено. 

В соответствии с главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства из неосновательного обогащения возникают при обогащении одного лица за счет другого, и такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований. Обогащение признается неосновательным, если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошло при отсутствии к тому предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований. В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

В отсутствие доказательств выполнения работ, требование о взыскании долга обосновано.

Истец начислил 10 067,50 руб. неустойки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. На основании пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 7.4 договора в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения (начала и окончания) работ заказчик имеет право удержать с подрядчика штраф в размере 0,01 % от оплаченной стоимости по договору за каждый день просрочки за каждое из указанных нарушений.

Размер пени за нарушение ответчиком сроков окончания работ по договору по состоянию на 12.11. 2024г. составил 10 067 рублей 50 коп., без НДС.

Расчет на 12.11.2024г.: Нарушенный срок выполнения Работ по Договору - 47 дней (с 27.09.2024г. по 30.09.2024г. - 4 дня; с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.-31 день, 12.11.2024г. - 12 дней). с 27.09.2024 по 12.11.2024 2142016,6 x 0,01% x 47 = 10067,48 руб. 

Проверив расчет, суд нарушений не установил.

Ответчик требования не оспорил.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

С учетом представленных доказательств, иск подлежит удовлетворению, расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КомСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 142 016 руб. 60 коп. долга, 10 067 руб. 50 коп. неустойки, 89 563 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.Н. Мальцева