Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-6500/2020

город Петрозаводск

01 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  28 сентября 2020 года 

Полный текст решения изготовлен   01 октября 2020 года.

Судья Арбитражного суда Республики Карелия Буга Н.Г.,   

при ведении протокола судебного заседания с применением технических средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

к Акционерному обществу «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» 

об обязании выполнить работы по договорам аренды лесных участков от 19.12.2008 года № 57-з и № 58-з

при участии представителей:

истца, Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия – Подмятников Андрей Николаевич, юрисконсульт Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Сегежское центральное лесничество», доверенность № 149-д от 04.09.2020 года, личность установлена на основании предъявленного паспорта; 

ответчика, Акционерного общества «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» - ФИО3, представитель, доверенность № 77 А В 7452203 от 11.12.2018 года, личность установлена на основании предъявленного паспорта,  

установил:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия (ОГРН: 1071001000828, ИНН: 1001016090, адрес места регистрации: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 2/24) (далее – истец, министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к Акционерному обществу «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» (ОГРН: 1021000921314, ИНН: 1006004155, адрес места регистрации: 186420, Республика Карелия, город Сегежа, улица Заводская, дом 1) (далее – ответчик, общество) об обязании выполнить работы по договорам аренды лесных участков от 19.12.2008 года № 57-з и № 58-з.

Исковые требования обоснованы положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, условиями договоров аренды лесных участков № 57-з и № 58-з от 19.12.2008 года, приложениями № 6 к указанным договорам, подписанными сторонами на 2018 год.

Ответчик, Акционерное общество «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат», в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направил суду отзыв на исковое заявление, в котором требования не оспорил. Указал, что Общество не уклоняется от выполнения мероприятий, предусмотренных Проектом освоения лесов. Обществом заключены договоры подряда со сторонними организациями для выполнения лесохозяйственных и лесовосстановительных работ. 

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об отказе от заявленных требований в части обязания Акционерного общества «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» выполнить лесохозяйственные мероприятия - содействие естественному возобновлению леса на площади 16,8 га по договору аренды лесного участка № 58-з от 19.12.2008 года.

Представитель ответчика не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

Право истца на полный или частичный отказ от требований предусмотрено частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку частичный отказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, суд принимает его.

В связи с тем, что истец отказался от заявленных требований в части обязания Акционерного общества «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» выполнить лесохозяйственные мероприятия - содействие естественному возобновлению леса на площади 16,8 га по договору аренды лесного участка № 58-з от 19.12.2008 года и отказ принят судом, производство по делу в указанной части в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению. 

Таким образом, суд продолжает рассматривать дело по требованию об обязании Общества выполнить на переданных в аренду лесных участках работы по охране, защите, воспроизводству лесов, недовыполненные в 2018 году, в части рубок ухода в молодняках на площади 210,8 га, по договору аренды лесного участка № 57-з от 19.12.2008 года и рубок ухода в молодняках на площади 61,0 га, по договору аренды лесного участка № 58-з от 19.12.2008 года

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Просил суд обязать Общество выполнить все работы в течение шести месяцев с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признал в полном объеме, в соответствии с полномочиями предоставленными доверенностью № 77 А В 7452203 от 11.12.2018 года (страница 3 доверенности). Поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление.

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательств, суд находит установленными следующие обстоятельства.   

Как следует из материалов дела, между Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия (Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.09.2017 года № 326-П преобразовано в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия) и Акционерным обществом «Сегежский целлюлозно - бумажный комбинат» заключены договоры аренды участков лесного фонда № 57-з и № 58-з от 19.12.2008 года, сроком действия до 31 декабря 2053 года.

Договор аренды № 57-з от 19.12.2008 года лесного участка зарегистрирован в Едином государственном реестре (запись № 10-10-06/003/2009-099 от 11.04.2009 года). Договор аренды № 58-з от 19.12.2008 года лесного участка зарегистрирован в Едином государственном реестре (запись № 10-10-06/003/2009-098).

Пунктом 1.4 договоров аренды предусмотрено, что лесные участки передаются арендатору для использования в целях заготовки древесины.

Согласно пункту 4.4.15 договоров аренды арендатор обязан выполнять на переданном в аренду лесном участке работы по охране, защите и воспроизводству лесов в объемах и сроки, установленные Проектом освоения лесов и приложением № 6 к договору аренды. Приложение № 6 заключается сторонами ежегодно. 

Приложения № 6 к договорам аренды № 57-з и № 58-з на 2018 год, предусматривающие перечень мероприятий по охране, защите воспроизводству лесов, годовой объем и сроки их выполнения, подписаны со стороны арендатора без замечаний и возражений.

В 2018 году по договорам аренды № 57-з, № 58-з арендатор не в полном объеме выполнил обусловленные приложением № 6 и проектом освоения лесов объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов на арендованных лесных участках. Неисполненными остались следующие обязательства: рубка ухода в молодняках на площади 210,8 га, по договору аренды лесного участка № 57-з от 19.12.2008 года и рубка ухода в молодняках на площади 61,0 га, по договору аренды лесного участка № 58-з от 19.12.2008 года. 

Претензия, направленная в адрес Общества 24.09.2018 года, оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Суд находит исковые требования, подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов. На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия). Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов (часть 1 и 2 статьи 64 Лесного кодекса Российской Федерации).

Пунктами 5.4 проектов освоения лесов по договорам аренды установлены ежегодные мероприятия по уходу за лесом, не связанные с заготовкой древесины. Годичные объемы лесовосстановительных работ в зависимости от освоения площади расчетной лесосеки по видам рубок указываются в приложениях № 6 к договорам аренды.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что рубки ухода в молодняках по договорам аренды № 57-з и № 58-з в 2018 году выполнены не в полном объеме. 

В силу части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При таких обстоятельствах, исковые требования Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия подлежат удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина за рассмотрение дела подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 110, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 151, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Принять отказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия в части требований об обязании Акционерного общества «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» выполнить лесохозяйственные мероприятия - содействие естественному возобновлению леса на площади 16,8 га по договору аренды лесного участка № 58-з от 19.12.2008 года. Производство по делу в указанной части прекратить.  

2. Исковые требования Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) удовлетворить полностью. 

3. Обязать Акционерное общество «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение шести месяцев с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу выполнить на переданных в аренду лесных участках работы по охране, защите, воспроизводству лесов, недовыполненные в 2018 году, в части рубок ухода в молодняках на площади 210,8 га, по договору аренды лесного участка № 57-з от 19.12.2008 года и рубок ухода в молодняках на площади 61,0 га, по договору аренды лесного участка № 58-з от 19.12.2008 года.

4. Взыскать с Акционерного общества «Сегежский целлюлозно – бумажный комбинат» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в размере 6 000 руб. 00 коп.

5. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, город Санкт - Петербург, Суворовский проспект, дом 65, литер А);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо - Западного округа (190000, город Санкт - Петербург, улица Якубовича, дом 4) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

Судья

Буга Н.Г.