АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

18 октября 2023 года

 

Дело № А33-29790/2022

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17.10.2023.

В полном объёме решение изготовлено 18.10.2023.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "МАККОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности за выполненные строительные работы,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "МАККОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения и процентов на сумму долга,

при участии в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

- ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

- ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО2., представитель по доверенности от 20.04.2023, личность удостоверена паспортом,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 01.10.2021, личность удостоверена паспортом,

в отсутствие третьих лиц,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4, 

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МАККОЙ" (далее – ответчик) о взыскании задолженности за выполненные строительные работы в размере 13 607 660,15 рублей.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 16.11.2022 возбуждено производство по делу.

21.02.2023 от ответчика поступило встречное исковое заявление, согласно которому просит суд признать отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью взыскать с ответчика сумму неосновательно полученных денежных средств в размере 8 123 646 рублей 06 коп.; взыскать с ответчика проценты за пользование чужими средствами в размере 518 911 рублей 81 копейку за период с 18.05.2022 г. по 21.02.2023 г. (включительно) с последующим начислением процентов по день фактической уплаты.

Определением от 27.02.2023 принято к производству суда встречное исковое заявление для рассмотрения совместно с первоначальным иском.

Представитель истца заявил устное ходатайство о вызове свидетеля ФИО5 В судебном заседании заслушаны пояснения свидетеля.

В материалы дела от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать задолженность за выполненные строительные работы в размере 10 489 000,22 рублей. В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований принято судом.

Судом истребованы у ПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), расположенного по адресу: 665708, Иркутская обл., г. Братск, ж/р Центральный, пл-ка Промзона Браза, доказательства:  - сведения о выданных пропусках на строительной площадке в г. Шелехов за период  2020 -2021 г.г. на указанных сотрудников. В адрес суда поступил ответ об отсутствии сведений (срок хранения  истек).

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Истец указал, что между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (подрядчик) и ОООО «МАККОЙ» (заказчик) заключены договоры на выполнение подрядных работ:

1. Договор № 9110СМ1453 от 19 марта 2020 года на выполнение подрядных работ, по условиям которого подрядчик обязуется в соответствии с заданием Заказчика, утвержденной им Проектно-сметной документацией, выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «СГОУ 11» (на основании РД 445.9110Е676.011.011.1.6-КМ1.1, КМ1, АР, ТХ, ТХ ГФ1, НВК2; НТК) в рамках ИМ 203.70.19.001 «Строительство «сухих» ГОУ (серия 1)» филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, и сдать результаты работ в объеме и сроки, установленные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить их результат.

Состав, виды и объемы работ согласуются в локальных сметных расчетах, а также в рабочей документации. Документами, подтверждающими выполнение подрядчиком работ по договору являются акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2). Общая цена выполняемых подрядчиком по договору работ (максимальная, ориентировочная) составляет 4 500 000 руб. 00 коп.

Согласно п. 5.3.1 договора, оплата выполненных подрядчиком работ производится в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

Подрядчиком обязательства по договору выполнены в полном объеме. Согласно актам о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) за период с  26.04.2020   по   17.03.2021   подрядчиком   выполнено  работ  на  общую   сумму 2 503 635 руб. 69 коп.:

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.05.2020 на сумму 39 053,22 рублей, Акт по форме КС-2 № 1 от 29.05.2020 о приемке выполненных работ на сумму 39 053.22 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.06.2020 на сумму 310 851,14 рублей, Акт по форме КС-2 № 2 от 25.06.2020 о приемке выполненных работ на сумму 148 670 рублей, Акт по форме КС-2 № 3 от 25.06.2020 о приемке выполненных работ на сумму 124 387,78 рублей, Акт по форме КС-2 № 4 от 25.06.2020 о приемке выполненных работ на сумму 37 793,36 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 27.07.2020 на сумму 594 385,47 рублей, Акт по форме КС-2 № 5 от 27.07.2020 о приемке выполненных работ на сумму 430 733 рублей, Акт по форме КС-2 № 6 от 27.07.2020 о приемке выполненных работ на сумму 163 652,47 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.07.2020 на сумму 354 635,68 рублей,  Акт по форме. КС-2 № 7 от 09.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 56 105 рублей, Акт по форме КС-2 № 8 от 09.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 298 530,68 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от30.09.2020 на сумму 360 878,29 рублей,

- Акт по форме КС-2 № 10 от 30.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 344 447,42 рублей, Акт по форме КС-2 № 11 от 10.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 16 430,87 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.12.2020 на сумму 165 232,56 рублей,  Акт по форме КС-2 № 13 от 25.12.2020 о приемке выполненных работ на сумму 165 232,56 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 15.02.2021на сумму 458 308,23 рублей,  Акт по форме КС-2 № 14 от 15.02.2021 о приемке выполненных работ на сумму 433 857 рублей, Акт по форме КС-2 № 15 от 15.02.2021 о приемке выполненных работ на сумму 24 451,23 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 17.03.2021 на сумму 220 291,10 рублей, Акт по форме КС-2 № 16 от 17.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 197 902 рублей, Акт по форме КС-2 № 17 от 17.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 22 389,10 рублей.

В установленные договором сроки оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ произведена не была.

Размер задолженности по договору на выполнение подрядных работ № 9110СМ1453 от 19.03.2020 по состоянию на 30.08.2022 составляет 2 503 635 руб. 69 коп.

2. Договор № 9110СМ1479 от 01 октября 2020 года на выполнениеподрядных работ, по условиям которого подрядчик обязуется в соответствии с заданием заказчика, утвержденной им Проектно-сметной документацией, выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Устройство системы АПС (ОМЗ88.000) на электролизёрах С-8БМ в корпусах № 5 и № 6 (в количестве 88 шт.), ДЭП серии 3, в рамках ИМ 203.70.15.002 «Строительство «сухих» ГОУ» на филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, и сдать результаты работ в объеме и сроки, установленные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходим для выполнения работ условия, принять и оплатить их результат.

Состав, виды и объемы Работ согласуются в Локальных сметных расчетах, а  также-в рабочей документации. Документами, подтверждающими выполнение Подрядчиком Работ по Договору являются Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2). Общая цена выполняемых Подрядчиком по Договору Работ (максимальная, ориентировочная) составляет 8 000 000 руб. 00 коп.

Согласно п. 5.3.1 договора, оплата выполненных подрядчиком работ производится в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

Подрядчиком обязательства по договору выполнены в полном объеме.

Согласно Актам о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) за период с 01.10.2020 по 30.03.2021 Подрядчиком выполнено работ на общую сумму 5 423 428 руб. 17 коп.:

- Акт по форме КС-2 № 1 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 685 041,82 рублей, Акт по форме КС-2 № 2 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 241 609,77 рублей, Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.10.2020 на сумму 2 926 651,59 рублей;

- Акт по форме КС-2 № 3 от 30.11.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 152 923,39 рублей, Акт по форме КС-2 № 4 от 30.11.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 241 609,77 рублей, Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.11.2020 на сумму 2 394 533,16 рублей;

- Акт по форме КС-2 № 5 от 30.12.2020 о приемке выполненных работ на сумму 40 008,24 рублей, Акт по форме КС-2 № 6 от 30.12.2020 о приемке выполненных работ насумму 31 117,59 рублей; Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от  30.12.2020 на сумму 71 125.83 рублей;

- Акт по форме КС-2 № 7 от 30.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 31 117,59 рублей, Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.03.2021 на сумму 31 117,9 рублей.

В установленные договором сроки оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ произведена не была.

Таким образом, размер задолженности по договору на выполнение подрядных работ № 9110СМ1479 от 01.10.2020 по состоянию на 30.08.2022 составляет 5 423 428 руб. 17 коп.

3. Договор № 9110СМ1488 от 01 октября 2020 года на выполнениеподрядных работ, по условиям которого подрядчик обязуется в соответствии с заданием заказчика, утвержденной им Проектно-сметной документацией выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Устройство системы АПС (ОМЗ88.000) на электролизёрах С-8БМ в корпусах № 1 и № 2 (в количестве 88 шт.), ДЭП серии 1, в рамках ИМ 203.70.19.001 «Строительство «сухих» ГОУ» на филиале ПАО «РУСАЛ Братск» в г.   Шелехов,   и   сдать  результаты   Работ   в   объеме   и   сроки,   установленные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять и оплатить их результат.

Состав, виды и объемы работ согласуются в локальных сметных расчетах, а также в рабочей документации. Документами, подтверждающими выполнение подрядчиком работ по договору являются акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2). Общая цена выполняемых подрядчиком по договору работ (максимальная, ориентировочная) составляет 8 000 000 руб. 00 коп.

Согласно п. 5.3.1 договора, оплата выполненных подрядчиком работ производится в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ.

Подрядчиком обязательства по договору выполнены в полном объеме. Согласно актам о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) за период с 01.10.2020 по 31.05.2021 Подрядчиком выполнено работ на общую сумму 5 680 596 руб. 29 коп.:

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.10.2020на сумму 3 724 829,18 рублей, Акт по форме КС-2 № 1 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 862 414,59 рублей, Акт по форме КС-2 № 2 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от ^    30.10.2020 на сумму 1 418 982,54 рублей, Акт по форме КС-2 № 4 от 30.11.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1418 982,54 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.03.2021на сумму 1 418 982,54 рублей, Акт по форме КС-2 № 5 от 30.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 443 432,05 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.04.2021 на сумму 46 676,76 рублей, Акт по форме КС-2 № 6 от 30.04.2021 о приемке выполненных работ на    сумму 46 676,26 рублей.

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 31.05.2021 на сумму 46 676,26 рублей, Акт по форме КС-2 № 7 от 31.05.2021 о приемке выполненных работ на сумму 46 676,26 рублей.

В установленные договором сроки оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ произведена не была.

Таким образом, размер задолженности по договору на выполнение подрядных работ № 9110СМ1488 от 01.10.2020 по состоянию на 30.08.2022 составляет 5 680 596 руб. 29 коп.

Истец также указал, что между сторонами были заключены договоры подряда №№ 9110СМ1388 от 21.09.2019, № 9110СМ1449 от 12.03.2020, № 9110СМ0299 от 01.05.2020.

Всего по всем договорам истцом выполнено работ на сумму 40 014 600,22 руб. оплата составила 29 525 600 руб.

Всего долг с учетом оплат составил 10 489 000,22 руб.

Претензией от 30.08.2022 истец предложил ответчику оплатить выполнение подрядных работ, в размере 13 607 660 руб. 15 коп., в срок не позднее 10 (десяти)  календарных дней с даты ее получения. Указанная претензия направлена по юридическому адресу ответчика и получена им 07.09.2022 (почтовый идентификатор ФГУП «Почта России» № 66007575005177) и оставлена без исполнения, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик требования оспорил, указав:

- договоры подписаны не уполномоченным лицом – работником ФИО6, договоры не заключены.

От ответчика поступило встречное исковое заявление, согласно которому просит суд взыскать с ответчика сумму неосновательно полученных денежных средств в размере 8 123 646 рублей 06 коп.; взыскать с ответчика проценты за пользование чужими средствами в размере 518 911 рублей 81 копейку за период с 18.05.2022 г. по 21.02.2023 г. (включительно) с последующим начислением процентов по день фактической уплаты.

Ответчик указал, что работы выполнялись по устной договоренности.

Из встречного иска следует, что ИП ФИО1 направил документы на оплату на выполнение работ на сумму 21 401 953,94 руб. ООО «Маккой» оплачено 29 525 600 руб. Переплата составила 8 123 646,06 руб. 18.05.2022 в адрес ИП ФИО1 направлена претензия о возврате денежных средств.

Ответчик по встречному иску представил отзыв:

- договорные отношения подтверждены частичной оплатой;

- акты подписаны, долг составил 10 489 000,22 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заключенные между сторонами договоры являются договором строительного подряда, отношения по которому регулируются параграфами 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Суд критично относится к доводу ответчика по первоначальному иску о незаключенности договоров.

В материалы дела представлены договоры с проставлением печати общества ООО «Маккой». Доказательств выбытия печати из владения не представлено.

Суд учитывает, что истец представил в материалы дела акты по форме КС-2, КС-3, подписанные сторонами, которые содержат ссылку на спорные договоры. Документы подписаны без замечаний со стороны заказчика, проставлена печать общества.

Кроме того, в материалы дела представлены договоры подряда №№ 9110СМ1388 от 21.09.2019, № 9110СМ1449 от 12.03.2020. Договоры подписаны аналогично спорным.

Указанные договоры частично оплачены, то есть исполнены.

Стороны договора не вправе ссылаться на незаключенность договора, если спор возник после его фактического исполнения. Такие действия сторон могут быть оценены судом как злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Учитывая, что сторонами условия оспариваемого договора исполнялись на протяжении определенного периода времени, доводы о незаключенности договора подлежат отклонению, как необоснованные. Названные обстоятельства являются основанием для применения принципа эстоппель.

Если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора").

Расчет суммы долга на сумму 10 489 000,22 руб. обоснован.

Согласно п. 5.3.1 договора № 9110СМ1453 от 19 марта 2020 года, оплата выполненных подрядчиком работ производится в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ. Подрядчиком обязательства по договору выполнены в полном объеме. Согласно актам о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) за период с  26.04.2020   по   17.03.2021   подрядчиком   выполнено  работ  на  общую   сумму 2 503 635 руб. 69 коп.:

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.05.2020 на сумму 39 053,22 рублей, Акт по форме КС-2 № 1 от 29.05.2020 о приемке выполненных работ на сумму 39 053.22 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.06.2020 на сумму 310 851,14 рублей, Акт по форме КС-2 № 2 от 25.06.2020 о приемке выполненных работ на сумму 148 670 рублей, Акт по форме КС-2 № 3 от 25.06.2020 о приемке выполненных работ на сумму 124 387,78 рублей, Акт по форме КС-2 № 4 от 25.06.2020 о приемке выполненных работ на сумму 37 793,36 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 27.07.2020 на сумму 594 385,47 рублей, Акт по форме КС-2 № 5 от 27.07.2020 о приемке выполненных работ на сумму 430 733 рублей, Акт по форме КС-2 № 6 от 27.07.2020 о приемке выполненных работ на сумму 163 652,47 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 28.07.2020 на сумму 354 635,68 рублей,  Акт по форме. КС-2 № 7 от 09.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 56 105 рублей, Акт по форме КС-2 № 8 от 09.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 298 530,68 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от30.09.2020 на сумму 360 878,29 рублей,

- Акт по форме КС-2 № 10 от 30.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 344 447,42 рублей, Акт по форме КС-2 № 11 от 10.09.2020 о приемке выполненных работ на сумму 16 430,87 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 25.12.2020 на сумму 165 232,56 рублей,  Акт по форме КС-2 № 13 от 25.12.2020 о приемке выполненных работ на сумму 165 232,56 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 15.02.2021на сумму 458 308,23 рублей,  Акт по форме КС-2 № 14 от 15.02.2021 о приемке выполненных работ на сумму 433 857 рублей, Акт по форме КС-2 № 15 от 15.02.2021 о приемке выполненных работ на сумму 24 451,23 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 17.03.2021 на сумму 220 291,10 рублей, Акт по форме КС-2 № 16 от 17.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 197 902 рублей, Акт по форме КС-2 № 17 от 17.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 22 389,10 рублей.

В установленные договором сроки оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ произведена не была.

Размер задолженности по договору на выполнение подрядных работ № 9110СМ1453 от 19.03.2020 по состоянию на 30.08.2022 составляет 2 503 635 руб. 69 коп.

Согласно п. 5.3.1 договора № 9110СМ1479 от 01 октября 2020 года, оплата выполненных подрядчиком работ производится в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ. Подрядчиком обязательства по договору выполнены в полном объеме.

Согласно Актам о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) за период с 01.10.2020 по 30.03.2021 Подрядчиком выполнено работ на общую сумму 5 423 428 руб. 17 коп.:

- Акт по форме КС-2 № 1 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 685 041,82 рублей, Акт по форме КС-2 № 2 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 241 609,77 рублей, Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.10.2020 на сумму 2 926 651,59 рублей;

- Акт по форме КС-2 № 3 от 30.11.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 152 923,39 рублей, Акт по форме КС-2 № 4 от 30.11.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 241 609,77 рублей, Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.11.2020 на сумму 2 394 533,16 рублей;

- Акт по форме КС-2 № 5 от 30.12.2020 о приемке выполненных работ на сумму 40 008,24 рублей, Акт по форме КС-2 № 6 от 30.12.2020 о приемке выполненных работ насумму 31 117,59 рублей; Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от  30.12.2020 на сумму 71 125.83 рублей;

- Акт по форме КС-2 № 7 от 30.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 31 117,59 рублей, Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.03.2021 на сумму 31 117,9 рублей.

В установленные договором сроки оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ произведена не была.

Таким образом, размер задолженности по договору на выполнение подрядных работ № 9110СМ1479 от 01.10.2020 по состоянию на 30.08.2022 составляет 5 423 428 руб. 17 коп.

Согласно п. 5.3.1 договора договора № 9110СМ1488 от 01 октября 2020 года, оплата выполненных подрядчиком работ производится в течение 30 календарных дней после подписания актов о приемке выполненных работ. Подрядчиком обязательства по договору выполнены в полном объеме. Согласно актам о приемке выполненных работ (по форме КС - 2) за период с 01.10.2020 по 31.05.2021 Подрядчиком выполнено работ на общую сумму 5 680 596 руб. 29 коп.:

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.10.2020на сумму 3 724 829,18 рублей, Акт по форме КС-2 № 1 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1 862 414,59 рублей, Акт по форме КС-2 № 2 от 30.10.2020 о приемке выполненных работ,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от ^    30.10.2020 на сумму 1 418 982,54 рублей, Акт по форме КС-2 № 4 от 30.11.2020 о приемке выполненных работ на сумму 1418 982,54 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.03.2021на сумму 1 418 982,54 рублей, Акт по форме КС-2 № 5 от 30.03.2021 о приемке выполненных работ на сумму 443 432,05 рублей,

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.04.2021 на сумму 46 676,76 рублей, Акт по форме КС-2 № 6 от 30.04.2021 о приемке выполненных работ на    сумму 46 676,26 рублей.

- Справка по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 31.05.2021 на сумму 46 676,26 рублей, Акт по форме КС-2 № 7 от 31.05.2021 о приемке выполненных работ на сумму 46 676,26 рублей.

В установленные договором сроки оплата заказчиком выполненных подрядчиком работ произведена не была. Таким образом, размер задолженности по договору на выполнение подрядных работ № 9110СМ1488 от 01.10.2020 по состоянию на 30.08.2022 составляет 5 680 596 руб. 29 коп.

Истец также указал, что между сторонами были заключены договоры подряда №№ 9110СМ1388 от 21.09.2019, № 9110СМ1449 от 12.03.2020, № 9110СМ0299 от 01.05.2020.

Истцом выполнено работ на сумму 40 014 600,22 руб. оплата составила 29 525 600 руб.

Всего долг с учетом оплат составил 10 489 000,22 руб.

Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме не представлено.

Истец по первоначальному иску также представил акты освидетельствования скрытых работ, приказы о направлении работников в командировку.

В судебном заседании допрошен свидетель ФИО5, который подтвердил выполнение работ.

С учетом совокупности всех представленных доказательств (показаний свидетеля документов  т.п.) суд полагает требования истца по первоначальному иску обоснованными.

Ответчик не представил полный  пакет документов, свидетельствующий о том, что спорные работы были выполнены либо силами генподрядчика, либо иными привлеченными субподрядчиками.

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Заявляя требование о взыскании неосновательного обогащения, истец должен доказать как сам факт пользования ответчиком имуществом без установленных законом или иными правовыми актами или сделкой оснований так и то, что неосновательное получение (сбережение) ответчика имело место за счет истца. Также для взыскания суммы неосновательного обогащения истец должен представить доказательства, подтверждающие обоснованность размера неосновательного обогащения, указанного в исковом заявлении.

С учетом установленных судом обстоятельств, неосновательное обогащение на стороне истца по первоначальному иску отсутствует. Встречные требования удовлетворению не подлежат.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МАККОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 10 489 000 руб. 22 коп. долга, 75 445 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 15 593 руб. государственной пошлины уплаченной чек-ордером от 07.11.2022.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

А.Н. Мальцева